SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel:  	Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: 	Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: 	JUDr. Jiřím Vošvrdou, předsedou okresního soudu 
IČO: 	00024961
bank. spojení:  
číslo účtu:	 

dále jen  “objednatel”

Zhotovitel: Tomáš Vinšálek

se sídlem: Dubenec 42, 544 55 Dubenec
IČO: 66822581
DIČ :  
bank. spojení:  
číslo účtu :  

dále jen  “zhotovitel”

Předmětem tohoto dodatku je změna článku IV. – Lhůty plnění.

IV.
Lhůty plnění

1.	Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech:
1.1	Předání projektové dokumentace pro budoucí modernizaci plynové kotelny a úpravy otopné soustavy: nejpozději do 31. 7. 2025

 Důvodem posunutí termínu je úraz zhotovitele ze dne 1. 6. 2025 (dle lékařské zprávy).

V Jičíně  dne 28.6.2025					V Dubenci dne 30.6.2025

Za objednatele:						Za zhotovitele: