DODATEK č.1  
SMLOUVY O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
se sídlem: Holásecká 33, 620 00 Brno
zastoupené: ředitelkou Mgr. Miroslavou Mužíkovou, MBA
IČ:  75145189
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Mužíková , MBA - ředitelka  
- ve věcech technických:  xxxxxxxxxxx
		                              
(dále jen objednatel)

A

ZPT  Vigantice,  spol.  S.r.o.
se sídlem: Vigantice 266, 756 61
Zastoupená: jednatelem Rudolfem Stodůlkou
IČ: 48396044
DIČ: CZ 48396044
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:  Rudolf Stodůlka, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

I.	Předmět a důvod uzavření Dodatku č.1
1.	Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2025 Smlouvu o dílo. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zhotovení díla zhotovitelem dle zadání objednatele pod názvem  „Komunikační systém sestra – pacient“.

2.	Předmětem a důvodem uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo je změna dokončení realizace díla. Důvodem změny je prodlení objednatele v poskytnutí nezbytné součinnosti připravenosti objektu na vlastní realizaci díla s ohledem na provozní podmínky objednatele jako poskytovatele sociálních služeb.

3.	Smluvní strany mění původní ujednání smlouvy o dílo, článek 4. Sjednaná doba pro provedení díla, v bodě 4.1.2. který nově zní:
4.1.2.	 Zhotovitel dílo provede a předá zadavateli:
                     - vypracování projektové dokumentace pro instalaci signalizačního a komunikačního 
                        systému do 15.září 2025;
                     - vlastní realizace podle projektu vyhotoveného Zhotovitelem do 30.listopadu 2025.

II.	Ostatní ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

3.	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle podmínek zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv.

4.	Smluvní strany Dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 20. 10. 2025                          	       	                       Ve Viganticích dne 21. 10. 2025

Za objednatel:                                                                                    Za zhotovitele:                                                                       

………………………………………………………..                                           …………………… ……………………………….
Mgr. Miroslava Mužíková, MBA, ředitelka                                   Rudolf Stodůlka, jednatel