DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: KSN_25003
Číslo dodatku: 1		
Článek I. 
Smluvní strany
OBJEDNATEL:
Název:	Služby Města Veselí nad Moravou	
IČO:	46936777	
Sídlo:	Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou	
 Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Jana Ondrůšová, ředitelka
Tel.: xxxxxxxxx  
Email: info@sluzby-veseli.cz	
Zastoupený ve věcech technických: 	Michal Majtán, vedoucí úseku vodních prvků
Tel.: xxxxxxxxx	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

ZHOTOVITEL:
Jméno a příjmení: / Název:	Michal Voráč	
IČO:	09117954	
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Michal Voráč
Tel.: xxxxxxxxx
Email: mvcerpadla@seznam.cz 	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) 

Článek II. 
Základní ustanovení
1.	.Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.10.2025 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený Smlouvou o dílo č. KSN_25003 jejímž hlavním předmětem je realizace závlahy 
v areálu ZŠ Hutník (dále jen „dílo“).

2.	V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat z důvodu nepřesného umístění přípojky vody. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly v tomto dodatku na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo: vodoměrná sestava + montáž – viz cenová nabídka CN20250017. 

3.	V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl.II. odst. 1 tohoto dodatku vyvstala nutnost navýšit cenu díla o 22.000 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
        Smluvní strany sjednávají novou cenu za dílo v celkové výši: 126.049 Kč Kč bez DPH.
Článek III. 
Závěrečná ustanovení
1.	Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2.	Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží jedno  vyhotovení.
3.	Zhotovitel souhlasí, aby tato dodatek byl uveřejněn v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5.	Smluvní strany prohlašují, že ti tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy
6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – cenová nabídka 
Veselí nad Moravou 23.10.2025 
 zhotovitel:					          za objednatele:

				24.10.2025
       _______________________________                  _________________________________
                          Michal Voráč 			                             Ing. J. Ondrůšová
 	 majitel firmy			                                ředitelka SMV

za zřizovatele:
--------------------------------------------------------
							      Tomáš Nekarda
							        místostarosta