DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 02-0081-SUB03
Číslo dodatku: 1		
Článek I. 
Smluvní strany
Zhotovitel:
Název:	Služby Města Veselí nad Moravou	
IČO:	46936777	
Sídlo:	Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou	
 Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Jana Ondrůšová, ředitelka
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: info@sluzby-veseli.cz	
Zastoupený ve věcech technických: 	Michal Majtán, vedoucí úseku vodních prvků
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Objednatel:
Jméno a příjmení: / Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
IČO:	26285363	
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01  Hodonín	
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Monika Michálková	
Zastoupený ve věcech technických: 	David Olšák, DiS.	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) 

Článek II. 
Základní ustanovení
1.	Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.10.2025 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený Smlouvou o dílo č. 02-0081-SUB03 jejímž hlavním předmětem je realizace závlahy 
v areálu ZŠ Hutník (dále jen „dílo“).

2.	V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat z důvodu nevhodného umístění přípojky vody. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly v tomto dodatku na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo: vodoměrná sestava + montáž – viz cenová nabídka CN20251017. 

3.	V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl.II. odst. 1 tohoto dodatku vyvstala nutnost navýšit cenu díla o 25.300,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
        Smluvní strany sjednávají novou cenu za dílo v celkové výši: 144.949,00 Kč Kč bez DPH.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení
1.	Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.

2.	Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží jedno  vyhotovení.

3.	Objednatel souhlasí, aby tato dodatek byl uveřejněn v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá zhotovitel.

4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.	Smluvní strany prohlašují, že ti tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – cenová nabídka CN 20251017.
Veselí nad Moravou 24.10.2025 
za  objednatele:					          za zhotovitele:

       _______________________________                  _________________________________
                    Ing. Monika Michálková		                             Ing. J. Ondrůšová
 					                                ředitelka SMV