Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
_____________________________________

ze dne 19.6.2018 uzavřené mezi 

objednatelem

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
se sídlem Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec II

zastoupen Ing. Davidem Hemberou, ředitelem
IČO: 60816767

a

zhotovitelem

L.M.electric s.r.o.
se sídlem Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupeným jednatelem Martinem Linhartem
IČO: 05533821
DIČ: CZ 05533821

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 25349

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smluvních podmínek smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333: 

1.	Změna doby plnění. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno dne 17.9.2018.

2.	Změna rozsahu díla a ceny díla. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, tak že dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno ve změnovém listu – pokynu pro stavbu číslo 1, která včetně příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Popis změn je uveden ve příloze č. 3 změnového listu.
V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla, že tato bude činit 2.448.487,40 Kč bez DPH , DPH 514.182,35 Kč, celkem 2.962.669,75 Kč včetně DPH.

3.	Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 19.6.2018 se nemění. 

4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

5.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. 

V J. Hradci dne 12.9.2018				 J. Hradci dne  12.9.2018

za objednatele:					za zhotovitele:					

……………………………….			………………………………..