DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
Ing. Pavel Svarc, vedoucí provozně-technického oddělení
IČ: 00844896
CZ00844896
anonymizováno
anonymizováno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel11)
2.	Stavo - Čestav, s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
1Č:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
Jarošova 31, 736 01 Havířov - Šumbark
Jozefem Čečotkou, jednatelem
64085236
CZ64085236
anonymizováno
anonymizováno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8495 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radim Vodrážka, tel.: anonymizováno
(dále jen „zhotovitel11)
I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2018 Smlouvu o dílo č. HAV/SOD/180/18. Z důvodu realizace víceprací uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen SOD).
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce rozvodů medicinálního kyslíku“ - modernizaci stativů dětské JIP vč. dodávky originálních náhradních dílů, PBTK a potřebných revizí po zásahu, následujících koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů, vše v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických zařízení, v platném znění (dále jen „stavba11) v rozsahu dle:
• projektové dokumentace stavby zpracované společností MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 60703016^
•	předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo11),
1

III.
Doba a místo plnění
Na základě čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1, se smluvní strany dohodly, že z důvodu víceprací se doba plnění nemění.
IV.
Cena díla
V čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se stávající znění nahrazuje novým zněním následovně: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena za stavební a související práce dle SOD:	2 224 786,- Kč bez DPH
vícepráce:	63 620,- Kč bez DPH
Cena za stavební a související práce celkem:	2 288 406,- Kč bez DPH
Ostatní cenová ujednání uvedená v čl. V. Cena za dílo odst. 1 se nemění.
V.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení obsažená v SOD se nemění.
2.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4.	Přílohu tvoří položkový rozpočet víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
V Havířově dne

Ing. et. In;
/
objednatel
Jiří Matěj, MBAce
ředitel
Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
tel.: 596 431 1 11
258
za zhotovitele
Jozef Čečotka
jednatel
2

VERLAG
DASHÓFER	Krycí list rozpočtu	
Název stavby:		Nemocnice s poliklinikou, p.o.	Objednatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orga	IČ/DIČ:	00844896/	
Druh stavby:		Rekonstrukce rozvodů mediciálního kyslíku - vícepráce	Projektant:		IČ/DIČ:		
Lokalita:		Dělnická 1132/24; Havířov	Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov	IČ/DIČ:	64085236/CZ64085236	
Začátek výstavby:	27.11.2018	Konec
výstavby:	09.12.2018	Položek:	10	
JKSO:			Zpracoval:	Stachová Hana	Datum:	04.12.2018	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	0	Doplňkové náklady	0 Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 936,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	8 471,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	14 232,18	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	26 684,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	4 220,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	1 690,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	1 385,06					
ZRN celkem	63 620,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	63 620,00	
Základ 21%	63 620,00	DPH 21%	13 360,20	Celkem včetně DPH	76 980,00	
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:

VERLAG
DASHÓFER
Stavební rozpočet
Název stavby:
Druh stavby:
Lokalita:
JKSO:	Nemocnice s poliklinikou, p.o.
Rekonstrukce rozvodů mediciálního kyslíku - vícepráce
Dělnická 1132/24: Havířov	Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne:	13 dní
27.11.2018
09.12.2018
04.12.2018	Objednatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orga
Projektant:
Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov
Zpracoval:	Stachová Hana		
č ■'	Objekt	Kód	Zkrácený popis
Rozměi^_	M.j.	Množství	Jednot, cena (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová
soustava	
							Dodávka	Montáž I	Celkem	Jednot. | Celkem		
		61	Oprava povrchů vnitřní				2 282,69	5 158,27	7 440,96		0,64			
1		611401311RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2	kus	8,000	621,00	1 316,00	3 652,00	4 968,00	0,04	0,29	RTS	/ 2018	
2		611403399RT2 Hrubá výplň maltou ve stropech	m2	5,120	483,00	966,69	1 506,27	2 472,96	0,07	0,35	RTS	/ 2018	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				14 232,18	28 069,06	42 301,24		0,77			
3		767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	350,000	41,50	1 848,00	12 677,00	14 525,00	0,00	0,37	RTS	/ 2018	
4		767995104R00 Výroba kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	350,000	47,11	2 481,50	14 007,00	16 488,50	0,00	0,02	RTS	/ 2018	
5		13318045	Kovová nosná konstrukce, hutní materiál	t	0,385	25 721,25	9 902,68	0,00	9 902,68	1,00	0,39	RTS	/ 2018	
6		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	692,530	2,00	0,00	1 385,06	1 385,06	0,00	0,00	RTS	/ 2018	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní'			4 654,07	3 313,61	7 967,68		0,00			
7		953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	32,000	248,99	4 654,07	3 313,61	7 967,68	0,00	0,00	RTS	/ 2018	
		M21	Elektromontére				4 220,00	1 690,00	5 910,00		0,00			
8		21O810O46R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	60,000	40,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS 1/2018	
9		210120451R00	Jistič 10/1/C	kus	-1,000	250,00	-180,00	-70,00	-250,00	0,00	0,00	RTS	/ 2018	
10		210120452R00 Jistič 6/2/C	kus	8,000	470,00	3 200,00	560,00	3 760,00	0,00	0,00	RTS	/ 2018	
Celkem:	63 620,00
Poznámka: