DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO Č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ")
…………………………………………………………………………………………………...

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Domov pro seniory Horní Stropnice

se sídlem:		Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice
IČ:			00666254
zastoupený:		Evou Chaloupeckou, ředitelkou DpS
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:		

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:		Ateliér Hronek s. r. o.

s místem podnikání:	Otakarova 2696/20
České Budějovice 3, PSČ 370 01
IČ:			28093968
zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,   vložka 16914
zastoupený:		Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - Ing. Zdeněk Fischer
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu:		
(dále jen „zhotovitel")

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že není projednána změna územního plánu umožňující plánovanou přístavbu, je upravena doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Do této doby bude dokončen i vlastnický převod pozemků parc.č. 525 a 185 na Jihočeský kraj.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v ČL II. této smlouvy, následovně:

c) pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. c) a d) do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne: 17. 12. 2018	   V Českých Budějovicích dne: 17. 12. 2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:													 ……...........................................................		.......................................................					
Eva Chaloupecká, ředitelka DpS 			Ing. Stanislav Hronek, jednatel