Lukáš Kočí
Spáleniště 4
518 01 Dobruška
IČ: 01296639
DIČ: CZ9108163284

Dodatek č. 1 k objednávce č. 332

Datum: 20.12.2018                                           

Upozornění!
Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.
Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.
(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)  

Naší objednávkou č. 332 ze dne 02.11.2018 jsme (jakožto objednatel) u Vás (jakožto u zhotovitele) objednali zhotovení 2 sběrných míst tříděného odpadu - č. 11 a č. 13, 14 v rozsahu dle projektu „Sběrná místa tříděného odpadu“ zpracovaného Ing. arch. Tomášem Haromem a dle Vaší nabídky č. 52/2018 ze dne 24.10.2018 za celkovou cenu 349.201 Kč bez DPH, tj. 422.533,21 Kč vč. 21 % DPH. Tuto naši objednávku jste akceptoval dne 09.11.2018, čímž došlo k uzavření smlouvy o dílo. 

Termín pro provedení obou sběrných míst byl sjednán do 21.12.2018. 

Na základě námitek obyvatel bytového domu čp. 853 – 856 proti výstavbě sběrného místa č. 13, 14, které mělo být umístěno naproti tomuto domu, se město Dobruška rozhodlo toto sběrné místo nerealizovat. Místo toho město Dobruška zamýšlí realizovat sběrné místo vedle objektu Technických služeb města v Družstevní ulici v Dobrušce, pro jehož realizaci nyní zajišťuje potřebné podklady. 

S ohledem na shora uvedené navrhujeme změnit shora uvedenou objednávku č. 332 takto:  

1.	V původním sjednaném termínu, tj. do 21.12.2018, bude realizováno pouze sběrné místo č. 11. Sjednaná cena za realizaci tohoto sběrného místa ve výši 198.463 Kč vč. DPH bude zhotovitelem vyfakturována fakturou-daňovým dokladem po dokončení sběrného místa a jeho protokolárním předání objednateli, a to nejpozději do 21.12.2018. Splatnost faktury bude činit 21 dnů.

2.	Sběrné místo č. 13, 14 (u knihovny - naproti bytovému domu čp. 853 – 856) nebude vůbec realizováno a v objednávce sjednaná cena za realizaci tohoto místa, tj. 224.070,22 Kč vč. 21 % DPH tak nebude objednatelem zhotoviteli hrazena. 

3.	V případě, že po předložení zhotovitelem dle bodu 5. zpracovaného položkového rozpočtu objednateli dojde k dohodě objednatele a zhotovitele o ceně za jeho realizaci, bude realizováno nové sběrné místo vedle objektu Technických služeb města Dobruška v Družstevní ulici v Dobrušce (dále jen "stání u TS"), a to dle dokumentace (výkres, 2 pohledy, stanoviska správců sítí, obsahují-li podmínky vztahující se k výstavbě stání u TS), kterou zajistí město Dobruška. Stání u TS přitom bude v dokumentaci řešeno v obdobném provedení jako nerealizované sběrné místo č. 13, 14, bude však zohledňovat místní specifika umístění tohoto stání. Bez předchozí dohody o ceně za jeho realizaci stání u TS realizováno nebude. 

4.	Cena za realizaci stání u TS bude předem dohodnuta smluvními stranami. Tato cena bude zhotovitelem vyfakturována fakturou-daňovým dokladem se splatností 21 dnů po dokončení stání u TS a jeho protokolárním předání objednateli. 

5.	Termíny vztahující se k realizaci stání u TS 
 
-	předání dokumentace stání u TS (výkres, 2 pohledy, stanoviska správců sítí, obsahují-li  podmínky vztahující se k výstavbě stání u TS) zhotoviteli k ocenění -  do 28.02.2019;

-	předání položkového rozpočtu zhotovitele s celkovou navrhovanou cenou za provedení stání u TS objednateli -  do 1 měsíce od obdržení dokumentace stání u TS 

-	dokončení a předání stání u TS 		do 2 měsíců ode dne, kdy dojde k    
                                                                                   dohodě objednatele a zhotovitele o 							ceně za realizaci stání u TS.   		         						Pokud však k takové dohodě dojde před 
                                                                                   31.03.2019, je sjednaným termínem 							předání nejpozději 31.05.2019  

6.	Odstoupení od objednávky v části týkající se provedení stání u TS:

6.1. Objednatel (město Dobruška) může od této objednávky v její části týkající se realizace stání u TS odstoupit, vedle občanským zákoníkem stanovených důvodů, i v případě:
a)	prodlení zhotovitele s předložením položkového rozpočtu s celkovou cenou za realizaci stání u TS delší než 30 dnů;
b)	nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel na ceně za realizaci stání u TS ani do 2 měsíců od předložení položkového rozpočtu zhotovitele s navrhovanou cenou za realizaci stání u TS objednateli;  
c)    rozhodne-li se objednatel stání u TS nerealizovat.  
 
6.2.  Zhotovitel (Lukáš Kočí) může od této objednávky odstoupit v její části týkající se realizace stání u TS, vedle občanským zákoníkem stanovených důvodů, i v případě že:
a)	neobdrží od objednatele kompletní dokumentaci stání u TS ani do 30 dnů po sjednaném termínu,
b)	nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel na ceně za realizaci stání u TS ani do 2 měsíců od předložení položkového rozpočtu zhotovitele s navrhovanou cenou za realizaci stání u TS objednateli.  

Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

7.	V případě odstoupení objednatele dle bodu 6.1. písm. b) či c), stejně jako v případě odstoupení zhotovitele od smlouvy dle bodu 6.2., se objednatel zavazuje, nedojde-li následně k jiné dohodě, odkoupit od zhotovitele jinak Vámi nevyužitelný nový a nepoužitý materiál již pořízený ke zhotovení nerealizovaného sběrného místa č. 13, 14, tj. tahokov v množství 10 ks polí, hutní materiál v množství 500 kg, spojovací materiál v množství 1110 ks a chemické kotvy v množství 15 ks, a to za cenu ve výši 34.980 Kč + DPH v platné zákonné sazbě.   

8. V ostatním se objednávka nemění. 

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii a jeden výtisk tohoto dodatku nebo jeho kopii. Ve faktuře uveďte, že je fakturováno plnění dle objednávky č. 332 a jejího dodatku č. 1! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.  

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel i zhotovitel s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel. 

Tento dodatek byl schválen radou města Dobrušky dne 20.12.2018

Razítko a podpis odpovědného pracovníka objednatele:													____________________________
								         	Ing. Petr Lžíčař, starosta		

Podpis správce rozpočtu:					____________________________
								     Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ

Se změnou objednávky v rozsahu uvedeném v tomto dodatku souhlasím. 

datum:								____________________________
								         Lukáš Kočí, IČ: 01296639