DODATEK č.3 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je 
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby" . 

OBJEDNATEL: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

Památník národního písemnictví 
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany 
Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem 
00023311 
CZ00023311 

b) smluvních 
zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
	a) technických 	Milan Kerekanič, vedoucí OTS 
email: kerekanic@pamatnik-np.cz
 Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel 
a 

ZHOTOVlTEL: 
zastoupený: 
Bankovní spojení: 
IČO: 
DIČ: 

KONSIT a.s. 
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6 
Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva 
Česká spořitelna a.s., č.ú. 820762/0800 
18630197 
CZ18630197 

zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752 
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně 
Smlouvy:
1. Předmět díla dle článku II. Dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající: 
- v provedení SDK konstrukcí dle nové legislativy a nového požárního katalogu v objektu SO.O 17 
dle přílohy č.l tohoto dodatku - Změnového listu č, ZL 27. 
- v nahrazení části plastových parapetů dřevotřískovými s povrchovou úpravou lamino z důvodu 
výrobního omezení v objektu SO.017 dle přílohy č.2 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 30. 
- v doplnění čerpadla na topnou větev trr pro III. etapu, tedy objekt SO.Ol v místnosti KPS dle 
přílohy č.3 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 31. 
- v opravě plotové podezdívky, a to kompletní demontáží plechů, očištěním jednotlivých částí, 
zpětné montáži opravených prvků, sanaci betonových podezdívek dle přílohy č.4 tohoto dodatku - 
Změnového listu č. ZL 32. 

Stránka 1 z 2 

2. Článek IV. Místo a doba plnění, odst. 2 se nahrazuje tímto zněním: 

2. Dodavatel se zavazuje, že: 
a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště - 
4.7.2017, 

b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 
kalendářních dní dle dodatku Č. 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku Č. 2 + 37 kalendářních dní 
dle dodatku Č. 3 od předání staveniště dodavateli. 
c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla. 

Důvodem k posunu termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla je zejména splnění 
požadavků na provedení SDK konstrukcí dle nové legislativy a nového požárního katalogu. 
Dále pak zjištěný havarijní stav betonové podezdívky s nutností provedení sanace v celém 
rozsahu a značná degradace vlnitých plechů a části ocelových sloupů, které bude nutné 
demontovat a očistit v celém rozsahu oproti předpokladu PD. 

3.	Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o 2.781.796,97,-Kč bez DPH, tj. vzhledem k tomu se 
článek V. Cena díla, odst. 1. nahrazuje tímto textem: 

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu: 

Cena díla bez DPH 	106.416.719,59Kč 	
DPH 	22.347.511,llKč 	
Celková výše ceny včetně DPH 	128.764.230,71Kč 	

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- Příloha Č. 1 - Změnový list Č. ZL 27 
- Příloha č. 2 - Změnový list Č. ZL 30 
- Příloha Č. 3 - Změnový list Č. ZL 31 
- Příloha Č. 4 - Změnový list Č. ZL 32 
- Příloha Č. 5 - Rekapitulace ceny 
- Příloha Č. 6 - Časový harmonogram výstavby 

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

	

V Praze dne .f.~: .. t .. 2019 

~', - / 
	........... ·.ďV~ 	. 
z objednatele 

Stránka 2 z 2 

V Praze dne 11.1.2019 

za zhotovitele 

kkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkk

Ing. Jaromír Podborský 
člen představens 
KONSIT a.s. 

	
Příloha č. 5 - Rekapitulace ceny 
IIPNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby(( 
REKAPITULACE CENY 

Základní slouva o dílo 			94 218 934,21 Kč 	
Číslo ZL 	Vícepráce 	Méněpráce 	Celkem (bez DPH) 	
ZL 01 	165 418,58 Kč 		165 418,58 Kč 	
ZL 02 	2 588 515,34 Kč 		2588515,34 Kč 	
ZL 03 	51693,48 Kč 		51693,48 Kč 	
ZL 04 	229 145,50 Kč 		229 145,50 Kč 	
ZL 05 	29173,95 Kč 		29173,95 Kč 	
ZL 06 	353 197,49 Kč 		353 197,49 Kč 	
ZL 07 	34636,81 Kč 		34636,81 Kč 	
DODATEK Č.1 			3 451 781,15 Kč 	
ZL 08 	127029,50 Kč 		127 029,50 Kč 	
ZL 09 	585078,31 Kč 		585078,31 Kč 	
ZL 10 	202 127,18 Kč 	-7505,99 Kč 	194621,19 Kč 	
ZL 11 	440863,06 Kč 		440863,06 Kč 	
ZL 12 	784 338,05 Kč 	-12 313,80 Kč 	772 024,25 Kč 	
ZL 13 	139 633,98 Kč 		139 633,98 Kč 	
ZL 14 	666079,86 Kč 		666079,86 Kč 	
ZL 15 	227972,06 Kč 		227 972,06 Kč 	
ZL 16 	620233,76 Kč 		620233,76 Kč 	
ZL 18 	516294,61 Kč 	-415879,56 Kč 	100415,05 Kč 	
ZL 19 	2 130331,29 Kč 	-362 112,26 Kč 	1 768 219,03 Kč 	
ZL 20 	18713,10 Kč 		18713,10 Kč 	
ZL 21 	31801,68 Kč 		31801,68 Kč 	
ZL 22 	134 988,54 Kč 		134 988,54 Kč 	
ZL 23 	12908,79 Kč 		12908,79 Kč 	
ZL 24 	123 625,10 Kč 		123625,10 Kč 	
DODATEK Č.2 			5 964 207,26 Kč 	
ZL 27 	4804 760,19 Kč 	-2370774,92 Kč 	2433 985,27 Kč 	
ZL 30 	24821,95 Kč 	-8077,86 Kč 	16744,09 Kč 	
ZL 31 	72 953,87 Kč 		72 953,87 Kč 	
ZL 32 	258 113,75 Kč 		258113,75 Kč 	
DODATEK Č.3 			2 781 796,97 Kč 	

Celkem vč. dodatků 	106416719,59 Kč 	
DPH 	22347511,11 Kč 	
Celkem vč. DPH 	128 764 230,71 Kč 	

Ctvrt 2.2018 
Ctvrt.l.2019 
pr;rp - CentrálnTde-pozilářutcměřrce, II. etapa-výstavby 
p'red~'ňí""á"pré'Viei! staveniště 
záfiMerii'st~vebriiCii"práCi'~'p"f[pravné'préce' 
IX 
	
	VI 	
	6.3:""19 --- 	
	4.7.17 	
	8:8: 17 	
Ú:;:7.17 	fi1.17 	
2«8.171 	1.12.17 	
i9.·1"7"1 	5.12.17 	
	15.5.18 	
	9.5.18 	
	28.6.18 	
	::úf'i7 	
	2.9.18 	
	8.7.18 	
	12.8.18 	
	6.10.18 	
	26.10.18 	
	4.{19 	
	6.9.18 	
	27.8.18 	
	í:ÚčC18 	
	16.10.18 	
	16.10.18 	
	1'5:1"1":'18 	
	'2'1'.'1'2:18 	
3.5.18 
2.6.18 
. 16.·ÉCfs··· 

16.7.18 
·2:3"."i·18, 
21.7.18 
'29":9: 18 
13."i6:18 
12.11.18 
úi"."ff.·iá 
tvrt.3.2017 
VII. 	I 	VIII. 
4.7. 
ctvn. 4. 2017 
Ctvrt.1.2018 
IX. 	X 	Xl. 
XII. 
Ctvrt.3.2018 
ClVrt.4.2018 
Ctvrt. 2. 2019 
~1---r----lS;='='W'='="'="'=';'='='='='="1
III. 
VI. 	VII. 	I VIII 
IV. 	V. 
-::::::;:::::::::::::::::::::::::: 
X 	Xl. 
XII 
III 
:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
1--1 
IV 	V 
roO·'·"='=T':':':':':':':':':
r- 
4!'='=f='='l'='=l=':'='='='='='='=
··oO'='=I"=I=':F:o='='='='='=':'='=':'=:;:;:;:;:;:;:::,,=,=::,='; 
::;:::;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;-:-;-::::::::-:,--, 
: 4!','""""""""""""""""""""""""""", "~O "~O 1@ 
.~ 	. 
r:lli:;:=:;~::;~;~;~;~;~;:;~;:;~;:;~;:;::~;~:~;~;~;~;~:~;~;:;~(
o:::: ::;:::;:::;:::_::;_::;_::::;:;:::::::::;:;:;:;:::;::::::::-:::::::'::: 
.-_-_r:: __ :::::;;=:::=::::;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::=;:;=:=:=:::=;:::;:;:;:=::::::_-- 
-::-_:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
---_:::::::::;:::::::::::::::::::;:::::::;:::=::::: 
--:::::;::'::::::::: 
-;:;:::;:::;:;-;-::::;:;:::::;::-: 
_:::~::::!::::::':::::::::::::;:::::::::2"",	~ 
, ti=~ = :=~ =: =~:::::~ =~::;: =~:: :::::::: ~:;: ~:~:~:c-: 
Milník 
• 
Souhrnný 
:::;:::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::: 
·='='='='='='="'='='='='='='='='='='='='='='='='='='3':':':':':':':':':':':.-.-. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_::::::::::::::-:::::,:::: 
:::::::::::::;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:::;:;:;-:-:,-::::,:::::: 
::::;=;=;=;:;=;:;=;=:=::;:;=;=;::: 
-::::::::::::::_:_:~ - - 
='='=:"=:='=:='=1=:='='='='='='='='='='='='='='='='='='='="""""'="'."":"'.""""'"'' 

~=,=,=,=",=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,>:",=,=,=,=",=,=
•. 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,;::::::::
T 
L_II/'='='=' "."" 
~'=:::::::':'=:::!.
____ O_O. 
~,=""=";=;,;=J;l
L....jf':':':'" ,:,:,::" 
~:;:;:=:;:;:;:;:;:;:=:;ll
t 
+".3.: 
Stránka 1 
Souhrn projektu 
f 	IVnějš!milnlk 
• 
Konečný termín .z>. 
Vnějšlůkoly