DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SOALT/649/82/2014
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník"),
(dále jen „dodatek41)
Článek I
Smluvní strany
Česká republika -Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo:Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČO: 70979464
DIČ: - nejsme plátci
Zastoupený:Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - pobočka Ústí nad Labem,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Beránek
E-mail: beranek@soalitomerice.cz
Telefon: 477 755 984
(dále jen „objednatel")

Obchodní firma /název/jméno a příjmení

INTO-SERVIS spolsr.o.
Sídlo podnikání: Areál Chemopetrolu DS 18,436 70, Litvínov
IČO: 63149150
DIČ: CZ63149150
 Jejíž jménem jedná: Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB a.s. Chomutov
Kontaktní osoba: Pavel Gabko, technik výroby
E-mail: intoservis@intoservis.cz
Telefon: 476 162 540, 777 112 020, 773 933 040
Fax: 476 162 540
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9480
(dále jen „zhotovitel44)

Článek II
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu chybných podkladů k vytýčení kanalizační sítě a umístění kanalizační šachty ze strany SČVaK. Poblíž objektu není umístěna vhodná kanalizační šachta, napojení kanalizační přípojky musí být provedeno do nově vybudované kanalizační šachty a dále příri ým spojením s hlavním kanalizačním řádem. V důsledku těchto skutečností dojde ke zpoždění vlastních prací na provedení kanalizační přípojky.
Článek III odst. 4. se mění takto:
4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 29.10.2016.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběm i smluvními stranami.

V Litoměřicích, dne 30.9.2016	V Litvínově, dne 30.9.2016
n
Za objednatele:	Za zhotovitele
Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích
.	j,|V.

	-\	■'			
Daniel Opatrný