DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. SOALT/649/82/2014
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník44),
(dále jen „dodatek")
Článek I
Smluvní strany
Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu:	Krajská 48/1,412 01 Litoměřice 70979464
CZ70979464 – 
nejsme plátci
 Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem 
ČNB - pobočka Ústí nad Labem,	
Kontaktní osoba: E-mail:
Telefon:	Bc. Jan Beránek beranek@soalitomerice.cz 477 755 984	
(dále jen „objednatel") 
a
Obchodní firma /název/jméno a příjmení Sídlo/místo podnikání:	INTO-SERV1S spol. s r.o.
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
Jejímž jménem jedná: Bankovní spojení:
Číslo účtu:	Areál Chemopetrolu DS 18, 436 70, Litvínov
63149150
CZ63149150
Daniel Opatrný, jednatel společnosti KB a.s. Chomutov	
Kontaktní osoba: E-mail:
Telefon:	Pavel Gabko, technik výroby
intoservis@intoservis.cz
476 162 540, 777 112 020, 773 933 040	
Fax:	476 162 540
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 9480 „(dále jen „zhotovitel)“
                                                                                    Článek II
                                                                              Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu potřeby provedení změny trasy kanalizační přípojky. Vzhledem k chybným podkladům k vytýčeni kanalizační sítě a umístění kanalizační šachty ze strany SČVaK bude napojení kanalizační přípojky provedeno do nově vybudované kanalizační šachty a dále přímým spojením s hlavním kanalizačním řádem. V důsledku takto změněné trasy dojde k vícepracím i méněpracím na kanalizační i vodovodní přípojce specifikovaným v přílohách č. 3 a 4 dodatku.
                                                                             
D

Článek II odst. 2. se mění takto:
2. Stavba bude provedena ve smyslu vydaného územního rozhodnutí ze dne 10.11.2015 č. j. MmM/142133/2015/OSÚ/BM. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci uvedenou v Příloze ě. 1 - Projektová dokumentace, specifikaci v Příloze č. 2 — Stavební rozpočet (obsahující cenu a podrobný rozpis prací spojených s vyhotovením díla, datovaný a podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran), v Příloze č. 3 - Změna projektové dokumentace a v Příloze č. 4 - Stavební rozpočet (obsahující cenu a podrobný rozpis víccprací a méněprací spojených s vyhotovením díla, datovaný a podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran).
Článek VIII odst. 1 . se mění takto:
1. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 614 768,94 Kč bez DPH (slovy: šestsetčtmácttisícsedmsetšedesátosm korun českých a devadesátčtyři haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. 743870,42 Kč s DPH (slovy: sedmsetčtyřicettřitisícosmsetsedmdesát korun českých a čtyřicetdva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Litoměřicích, dne 16.11.2016

V Litvínově, dne

Za objednatele: Mgr. Vítězslav Lisec - ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Za zhotovitele: Daniel Opatrný - jednatel společnosti

l