shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21477,0);(0,0);(0,21495);(21477,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21493);(21495,21493)posrelh0posrelv0pib

Smlouva 0 dilo 
SMLOUV A 0 VYKONU CINNOSTi TECHNICKEHO DOZORU 
STAVEBNiKA A KOORDINATORA BOZP 
Smluvni strany 

Detske centrum Strancice, pffspevkova organizace 
(Objednatel) 
a 
Ing. Ales Rada 
(Zhotovitel) 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21477,0);(0,0);(0,21495);(21477,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21493);(21496,21493)posrelh0posrelv0pib

Smlouva 0 dilo 
Dnesniho dne uzavfely Smluvni strany: 

Objednatel: 

Detske centrum Strancice, pfispevkova organizace 

se sidlem: 
ICO: 
zastoupena: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu.: 

Hrdinu 175, 251 63 Strancice 
43750672 
MUDr. Pavel Biskup, feditel p.o. 

a 

(dale jen "Objednatel") 

Zhotovitel: 

Ing. Ales Rada 
se sidlem: 
ICO: 
DIC: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu: 

Rasosky 88,55221 
749341 63 
CZ7904083066 
Ceska Sporitelna a.s., 
- 

	zastoupena: 	Ing. Alesern Radou 
(dale jen "Zhotovitel") 
v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale tez "obeanskY 
zakonik ei o. z."), § 152 odst. 4 zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (dale tez 
StZ) a zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci 
v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb 
mimo pracovnepravni vztahy, ve znenl pozdejsich pfedpisu (dale jen "Zakon 0 BOZP"), tuto: 
Smlouvu 0 vykonu einnosti technickeho dozoru stavebnika a koordinatora BOZP 
(dale jen "Smlouva"). 
VZHLEDEM K TOMU, ZE 
	(A) 	Objednatel proved I dne 27. 4. 2017 zadavaci fizenf na verejnou zakazku s nazvem .Rekonstrukce 
Detskeho centra Chocerady - technicky dozor stavebnika ve. BOZP" (dale jen "Verejna 
zakazka"); 
	(B) 	Zhotovitel podal zavaznou nabidku na Verejnou zakazku a tato byla Objednatelem vybrana jako 
nejvhodnejsi; 
2 

· . 

(C) 	Zhotovitel je podnikatelem, ktery je schopen radne splnit predmet Verejne zakazky, k cemuz rna 
pfislusna opravneni, mimo jine je opravnen provadet vykon cinnosti koordinatora BOZP die Zakona 0 
BOZP a die provadecich pfedpisu k tomuto zakonu, zejmena die narizeni vlady c. 591/2006 Sb., 0 
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve zneni 
pozdejsich predpisu, a ze rna odbornou zpusobilost pro vykon stavebnich koordinatoru BOZP s 
osvedcenim platnym v Ceske republice; 
(D) 	Objednatel rna, s ohledem na vysledek zadavaciho Hzeni na Verejnou zakazku, v umyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci predmetu plneni Verejne zakazky; a 
(E) 	smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejmena doslo ze strany Zhotovitele 
k fadne realizaci predmetu plneni Verejne zakazky; 
se smluvni strany, vedomy si svych zavazku v teto Smlouve obsazenych a s umyslem by! touto Smlouvou 
vazany, dohodly na nasledujicim zneni Smlouvy: 
	1. 	UCEL A PREDMET SMLOUVY 
1.1 Ucelem teto Smlouvy je zajisteni radneho vykonu cinnosti technickeho dozoru stavebnika ve smyslu 
§ 152 odst. 4 zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve 
zneni pozdejsich predpisu (dale jen "vYkon cinnosti TDS") a zajistenl radneho vykonu cinnosti 
koordinatora BOZP na stavenisti, pfi pfiprave stavby a ve fazi jeji realizace dIe Zakona 0 BOZP (dale 
jen "vYkon cinnosti koordinatora BOZP") Zhotovitelem pro Objednatele v souvislosti s pfipravou a 
realizaci stavby .Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady - technicky dozor stavebnika ve. 
BOZP " (dale jen "Stavba"), a tim zajistenf radne pfipravy, prubehu a dokonceni Stavby, dodrzenl 
rozpoctovych nakladu Stavby a predpokladanych terminu jeji realizace, a dale zajisteni bezpecnosti a 
ochrany zdravi pfi praci pfi realizaci Stavby. 
1.2 Predmetern teto Smlouvy je uprava pray a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonern cinnosti 
TDS a vykonem cinnosti koordinatora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele. 
1.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svuj naklad a na sve nebezpeci, vlastnim jmenem za 
podminek teto Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu cinnosti TDS a vykonu 
cinnosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu cinnosti TDS, ktery je predmetem teto Smlouvy, je 
uveden v Pfiloze c. 1 teto Smlouvy. Rozsah vykonu cinnosti koordinatora BOZP, ktery je predmetem 
teto Smlouvy,je uveden v Prtloze C. 2 teto Smlouvy. Pokudje k radne realizaci vykonu cinnosti TDS 
nebo vykonu cinnosti koordinatora BOZP zapotrebi provedeni dalsich cinnosti ve Smlouve vyslovne 
neuvedenych, 0 jejichz potrebe vsak ZhotoviteI mel a mohl vedet na zaklade svych odbornych a 
technickych znalosti a zkusenosti, povazuji se tyto dodavky ci sluzby za sou cast predmetu Smlouvy. 
Zhotovitel v takovem pfipade nema narok na zmenu vyse odmeny, 
1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Zhotoviteli za poskytovani plneni dIe teto Smlouvy 
odmenu ve vysi a za podminek ujednanych v teto Smlouve a poskytnout Zhotoviteli za podminek 
teto Smlouvy nezbytnou soucinnost. 
	2. 	ZMOCNENi ZHOTOVITELE 
2.1 Zhotovitel je opravnen zastupovat Objednatele v technickych vecech tykajicich se Stavby ave vecech 
bezpeenosti a ochrany zdravi pfi praci vuci tfetim osobam, zejmena zhotoviteli Stavby a jeho 
poddodavatelum, projektantovi Stavby a prislusnym spravnim organum. Zhotovitel je zejmena 
3 

4 

opravnen zastupovat Objednatele pfi jakychkoliv kontrolach Stavby. 
2.2 Zhotovitel neni opravnen zastupovat Objednatele pri jednanich, v dusledku nichz by doslo k pouziti 
jinych rnaterialu nebo technickych postupu nez stanovenych v projektove dokumentaci Stavby nebo 
ktere by mely vliv na dispozicni reseni, kvalitu provedeni, vzhled interieru nebo exterieru, a dale pfi 
jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ci jejich jednotlivych soucasti, ledaze jej 
k uvedenyrn jednanim zmocni Objednatel v pisemne plne moei. 
2.3 Za ucelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udell Objednatel Zhotoviteli na jeho zadost pisemnou plnou 
moe. Objednatel je opravnen kdykoliv zmocneni Zhotovitele udelene v odst. 2.1 Smlouvy a plnou 
moe udelenou dIe tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemne, elektronicke ci ustni 
forme odvolat. 
	3. 	DOBA A MisTO PLNENi 
3.1 Zhotovitel je povinen zahajit vykon cinnosti TDS na zaklade pisemneho pokynu (vyzvy) Objednatele. 
Totez plati 0 zahajeni vykonu cinnosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen pokyn k 
zahajeni vykonu kterekoliv z cinnosti vydat. Neudeleni takoveho pokynu ze strany Objednatele ve 
lhute delsi nez dva (2) roky od uzavreni Smlouvy je duvodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud se neudeleni takoveho pokynu cyka pouze jedne casti plneni, tj. bud' vykonu 
cinnosti TDS, nebo vykonu cinnosti koordinatora BOZP, je Zhotovitel opravnen odstoupit od 
Smlouvy pouze v rozsahu cinnosti.jichz se neudeleni pokynu tyka, 
3.2 Udeli-Ii Objednatel Zhotoviteli pokyn k pferuseni vykonu einnosti TDS alnebo vykonu cinnosti 
koordinatora BOZP dIe odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon cinnosti TDS alnebo vykon cinnosti 
koordinatora BOZP Zhotovitelem pisemnym pokynem Objednatele v prubehu dvou (2) let od jejiho 
pferuseni opetovne obnoven, je Zhotovitel opravnen od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudeleni 
pokynu dIe pfedchozi vety tyka pouze jedne easti plneni, tj. bud' vykonu cinnosti TDS, nebo vykonu 
cinnosti koordinatora BOZP, je Zhotovitel opravnen odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu cinnosti, 
jichz se neudeleni pokynu tyka, 
3.3 Vykon einnosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich: 
	3.3.1 	pred zahajenim realizaee stavebnieh praci budou vykonavany cinnosti uvedene v clanku 
Pfilohy c. 1 Smlouvy; 
	3.3.2 	v prubehu realizaee stavebnieh praci na Stavbe az do radneho provedeni Stavby, 
kolaudacniho rfzeni a dokonceni souvisejicich cinnosti budou vykonavany cinnosti uvedene v 
clanku 2 Prflohy c. 1 Smlouvy; 
	3.3.3 	po predant a prevzeti Stavby budou vykonavany cinnosti uvedene v clanku 3 Prilohy c. 
Smlouvy. 
3.4 Vykon cinnosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. dokonceni 
a predani dila. 
3.5 Mistem plneni dIe teto Smlouvy je prostor staveniste Stavby a sidlo Zhotovitele, pfipadne jine misto, 
je-li to nezbytne pro radny vykon cinnosti TDS nebo einnosti koordinatora BOZP. Mistem pfedani 
jakychkoliv pisemnych vystupu dIe Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v 
konkretnim pripade sjednano jinak. 
3.6 Pfedpokladany harmonogram realizaee stavby je v Priloze c. 3 Smlouvy. 

5 

	4. 	CENA
4.1 Odmena za poskytovani sluzeb dIe teto Smlouvy byla sjednana v nasledujici strukture a vYsi: 
	4.1.1 	Celkova odmena za vykon cinnostt TDS uvedenych v clanku 1 Prilohy c. 1 Smlouvy cini 
14.695,- Kc bez DPH. 
	4.1.2 	Mesicni odmena za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 2 Pfilohy c. 1 Smlouvy cim 
37.800,- xe bez DPH. 
	4.1.3 	Odmena za jednu (1) hodinu vykonu cinnosti TDS uvedenych v clanku 3 Prilohy c. 1 
Smlouvy cint 650,- Kc bez DPH. Uctuje se skutecne straveny cas, nestanovi-li tato Smlouva 
jinak. Predpokladany pocet je 30 hodin. 
	4.1.4 	Mesicni odmena za vykon cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v Ptiloze c. 2 Smlouvy 
cini 7385,- xe bez DPH. 
	4.1.5 	Celkova odmena za vykon cirmosti TDS cint 525.595,- Kc bez DPH; celkova odmena za 
vykon cinnostl koordinatora BOZP cini 96.005,- Kc bez DPH. 
4.2 K odmene se pficte DPH ve vYsi stanovene na zaklade a v souladu s platnymi a ucinnymi pravnimi 
pfedpisy, 
4.3 Jednotlive soucasti odmeny jsou konecne a neprekrocitelne a zahrnuji veskere naklady nezbytne k 
radnemu, uplnemu a bezvadnemu poskytovani plneni, za nez je prlslusna sou cast odrneny sjednana 
(vcetne zejrnena materialovych, mzdovych a jinych nakladu, dopravne, cestovne apod.) a zisk 
Zhotovitele, jakoz i jakekoliv pfipadne dodatecne naklady Zhotovitele, 0 kterych Zhotovitel v dobe 
uzavreni Smlouvy mohl nebo mel vedet na zaklade svych odbomych a technickych znalosti a 
zkusenosti, 
4.4 Zvyseni cen v prfslusnem oboru, materialovych, mzdovych nebo jinych nakladu, jakoz i pfipadna 
zmena cel, dovoznich pfirazek nebo zmena kurzu ceske meny k zahranicnim menam, popfipade jine 
vlivy, nemaji dopad na vYsi odmeny. 
4.5 Narok na odrnenu die teto Smlouvy vznika Zhotoviteli provedenim cinnostl, za jejichz provedeni je 
odmena placena. Za provedenou se povazuje pouze cinnost, ktera byla radne dokoncena a tam, kde 
tato Smlouva (ci jeji prfloha) predpoklada predani hmotne zachyceneho vysledku dane einnosti Ci 
akceptaci dane cinnosti, tak tez radnym predanirn vysledku dane cinnosti za podminek teto Smlouvy, 
respektive akceptaci dane cinnosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovijinak. 
	5. 	PLATEBNi POnMINKY 
5.1 Celkova odmena za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 1 Pfilohy c. 1 die odst. 4.1.1 Smlouvy 
bude Zhotovitelem vyuctovana nejdfive po radnem provedeni vsech cinnosti uvedenych v clanku 1 
Pfilohy c. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy. 
5.2 Mesicnt odmena za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 2 Pfilohy c. 1 die odst. 4.1.2 Smlouvy 
bude Zhotovitelem uctovana mesicne pozadu po skonceni kalendamfho mesice, za nejz je faktura 
vystavovana. V pfipade, ze Zhotovitel ukonci vykon einnosti TDS uvedenych v clanku 2 Prilohy c. 1 
v prubehu kalendafnfho mesice, rna narok pouze na pomernou cast mesicni odmeny dIe odst. 4.1.2 
Smlouvy. Pokud v prubehu vykonu einnosti TDS uvedenych v clanku 2 Pnlohy c. 1 dojde 
k preruseni praci dIe odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odmenu. 
5.3 Odrnena za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 3 Pfilohy c. 1 die odst. 4.1.3 bude Zhotovitelem 
uctovana mesicne pozadu na zaklade skutecne straveneho casu vykonem uvedenych cinnosti. 

6 

Vykazany cas je Zhotovitel opravnen zaokrouhlit na cele ctvrthodiny smerem nahoru. Maximalni a 
neprekrocitelna cena za dane sluzby v jednom kalendafnim mesici Cini 19.500,- Kc bez DPH. 
5.4 Mesicni odmena za vykon cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v Pfiloze c. 2 dIe odst. 4.1.4 
Smlouvy bude Zhotovitelem uctovana mesicne pozadu po skonceni kalendarniho mesice, za nejz je 
faktura vystavovana. V pffpade, ze Zhotovitel ukonci vykon cinnostl koordinatora BOZP uvedenych 
v Pfiloze c. 2 v prubehu kalendafniho mesice, rna narok pouze na pomernou cast mesicni odmeny dIe 
odst. 4.1.4 Smlouvy. Pokud v prubehu vykonu cinnostl koordinatora BOZP uvedenych v Priloze c. 2 
dojde k preruseni praci dIe odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odmenu, 
5.5 Datem uskutecneni zdanitelneho plneni je: v pflpade odmeny dIe odst. 4.1.1 Smlouvy den provedeni 
vsech cinnosti uvedenych v clanku 1 Prilohy c. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a v pfipade 
odmeny za cinnosti dIe odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst. 4.1.4 vzdy posledni den kalendafniho mesice, 
za ktery je pfislusna cast odmeny (Ictovana. 
5.6 Odmena bude ubrazena na zaklade faktur, resp. daiiovych dokladu (dale jen "faktura") vystavenych 
Zhotovitelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnu od jejiho vystaveni, pficemz musi byt Objednateli 
dorucena alespoii 25 dnu pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskere nalezitosti 
stanovene pravnimi predpisy, pficemz v kazde fakture bude dale uvedena identifikace Smlouvy (cislo 
smlouvy, smluvni strany, datum uzavfeni a strucny nazev akce) a prehledne vyznacena Zhotovitelem 
fakturovana castka, odpovidajici Smlouve, 
5.7 Pfilohou faktury na zaplaceni mesicni odmeny za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 2 Pfilohy c. 
1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovnez pisemna zprava 0 einnosti Zhotovitele dIe c1. 2 Pfilohy c. 1 
Smlouvy za kalendami mesic, za nejf je odmena uctovana, Zhotovitel je povinen tuto zpravu pfilozit 
k faktufe,jinakje Objednatel opravnen odmitnout proplaceni. 
5.8 Prflohou faktury na zaplaceni odmeny za vykon cinnosti TDS uvedenych v clanku 3 Pfilohy c. 1 dIe 
odst. 4.1.3 bude rovnez Objednatelem schvaleny podrobny rozpis provedenych cinnosti dIe c1. 3 
Pfilohy c. 1 Smlouvy za kalendafni mesic, za nejz je odmena uctovana. Zhotovitel je povinen tento 
rozpis a doklad 0 jeho schvaleni pfilozit k fakture, jinak je Objednatel opravnen odmitnout 
proplaceni. 
5.9 Pfilohou faktury na zaplaceni mesicni odmeny za vykon cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v 
Priloze c. 2 dIe odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovnez pisemna zprava 0 cinnosti Zhotovitele dIe Pfilohy c. 
2 Smlouvy za kalendarni mesic, za nejz je odmena uctovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu 
pfilozit k faktufe, jinakje Objednatel opravnen odmitnout proplaceni. 
5.10 V prfpade, ze faktura nebude obsahovat nekterou z predepsanych nalezitosti nebo pokud bude faktura 
obsahovat nespravne udaje nebo pokud nebudou zprava dIe odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis 
dIe odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skutecnosti, je Objednatel opravnen takovou fakturu ve lhute jeji 
splatnosti vratit Zhotoviteli k oprave ci doplneni. Lhuta splatnosti v takovemto pfipade pocina bezet 
znovu az od doruceni bezvadne faktury. 
5.1] Veskere platby Objednatele dIe Smlouvy budou probihat rylucne bezhotovostnim prevodem v ceske 
mene, a to na ucet Zhotovitele, uvedeny v zahlavi teto Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou 
okamzikem, kdy byla odpovidajici castka odepsana z bankovniho uctu Objednatele. 
5.12 Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany, Smluvni strany vyslovne vylucuji pouziti ustanoveni § 
26] 1 obcanskeho zakoniku, 
5.13 Objednatel ubradi fakturu Zhotovitele pouze na zverejnene bankovni ucty, V prlpade, ze Zhotovitel 
nebude mit dany ucet zverejneny, zaplati Objednatel pouze zaklad dane a rysi DPH uhradi az po 

.' , 

7 

zvefejneni prislusneho uetu v registru platcu a identifikovanych osob. 
5.14 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smysiu zakona 0 dani z pridane hodnoty, zaplati 
Objednatel pouze zaklad dane. Pfislusna vYse DPH bude uhrazena az po pisernnem dolozeni 
Zhotovitele 0 jeji uhrade pfislusnemu spravci dane. 
	6. 	pRA V A A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
6.1 Zhotovitel je povinen provadet vykon cinnosti TDS a vykon cinnosti koordinatora BOZP s veskerou 
odbomou pecf, radne, v pozadovane kvalite a yeas, v souladu s obecne zavaznymi predpisy a 
relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k predmetu plneni teto Smlouvy. 
6.2 Zhotovitel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnene zajmy, Zhotovitel je 
povinen bez zbytecneho odkladu upozomit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, pfipadne 
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zadavacimi podminkami Verejne 
zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovida za pfipadnou skodu zpusobenou jeho 
dodrzenim. V pfipade, ze Objednatel na plneni nevhodnych pokynu trva, Zhotovitel bude postupovat 
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Trvani Objednatele na 
nevhodnych pokynech neni duvodem pro odstoupeni od SmIouvy ze strany Zhotovitele. 
6.3 Zhotovitel je povinen bez zbytecneho odkiadu oznamit Objednateli vsechny okolnosti, ktere zjistil pfi 
poskytovani sluzeb dIe teto Smlouvy ei jinak v souvislosti s touto Smlouvou a ktere mohou mit vliv 
na zmenu pokynu nebo zajmu Objednatele ei na plneni teto SmIouvy. 
6.4 Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelu opravnene se 
podilejlcich na plneni teto SmIouvy majici pfislusnou odbomou zpusobilost. Doklady 0 odborne 
zpusobilosti pracovniku je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit, Pracovnici 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelu podilejicich se na plneni teto SmIouvy musi zajistit vzajemnou 
zastupiteinost pfi nepfitomnosti pracovnika odpovedneho za sluzby dIe teto SmIouvy. 
6.5 Zhotovitel je opravnen k vymene osob uvedenych v pfedchozim odstavci pouze s pisemnym 
souhIasem Objednatele. Zhotovitel pred touto vymenou Objednateli dolozi, ze novy pracovnik rna 
minimalne stejne zkusenosti a odbomost jako vymeiiovany pracovnik a spliiuje pozadavky na 
odbomost stanovene touto SmIouvou a obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy. 
	6.6 	Zhotovitel se zavazuje: 
		6.6.1 	seznamit sve zamestnance, poddodavatele a dalsi osoby vstupujici na staveniste sjeho 
svolenim s bezpecnostnimi pravidly na stavenisti Stavby a pfipadne dalsich pracovistich 
Objednatele, 
	6.6.2 	dodrzovat je a 
	6.6.3 	zajistitjejich dodrzovani. 
6.7 Bude-li Zhotovitel pfi plneni teto Smlouvy predavat Objednateli jakekoliv dokumenty vypracovane 
tretfmi subjekty vcetne organu verejne spravy, musi by! 0 jejich predani pofizen pisemny protokol, 
ktery bude podepsan obema smluvnimi stranami, s vyjimkou komentafu a pripomlnek k navrhum 
dokumentu vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vYjimkou bezne 
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takove dokumenty postacuje zaslat objednateli ve forme 
prosteho e-mailu. Az podpisem pisemneho protokolu obema smluvnirni stranami se dokument 
povazuje za radne predany. 
6.8 Zhotovitel je povinen pouzit vsechny materialy, ktere obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnenim 
teto Smlouvy, vyhradne k plneni teto Smlouvy. Pfijeti materialu ze strany Objednatele Zhotovitel 

8 

' .. 
pisemne ci e-mailem die volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Zhotovitel predane 
materialy, podklady a jine predane veci Objednateli vrati alnebo je a vsechny jejich kopie znici, 
6.9 Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost 0 vsech udajich, ktere jsou obsazeny v projektovych, 
technickych a realizacnich podkladech, nebo 0 jinych skutecnostech, se kteryrni pfisel pfi plneni teto 
Smlouvy do styku a udajich tvoricich obchodni tajemstvi Objednatele ve smysiu obcanskeho 
zakoniku, ledaze je povinen takovou informaci poskytnout dIe zavazneho pravniho pfedpisu ci 
vykonatelneho soudniho ci spravniho rozhodnuti. 
6.10 Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani v ustni, pisemne ci e-mailove forme die volby Objednatele 
informovat Objednatele 0 prubehu plneni teto Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim plnenim a 
otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby. 
	7. 	pRA VA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 
7.1 Objednatel se zavazuje vytvorit radne podminky pro plneni teto SmIouvy Zhotovitelem a poskytovat 
Zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro fadne plneni teto SmIouvy. Objednatel je dale povinen zavazat 
zhotovitele Stavby k soucinnosti s Zhotovitelem pfi plneni teto Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfimefene Ihute pfed pfedpokladanym terminem 
potreby soucinnosti. 
7.2 Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli veskere podklady nezbytne pro realizaci pfedmetu plneni die 
teto SmIouvy tak, aby se Zhotovitel mohl s uvedenymi podklady vcas seznamit pfed tim, nez bude 
zahajen vykon cinnosti TDS, resp. vykon cinnosti koordinatora BOZP, pokud z teto SmIouvy ci 
jejich povahy nevyplyva, ze je rna zajistit Zhotovitel v ramci plneni Smlouvy. Dalsi relevantni 
podklady, ktere Objednatel ziska v prubehu plneni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Zhotoviteli 
bez zbytecneho odkladu. Pfedani podkladu je Zhotovitel povinen potvrdit pisemnou formou ci 
formou e-rnailu die volby Objednatele. 
7.3 Objednatel se zavazuje umoznit Zhotoviteli a jeho pfipadnym poddodavatelum, opravnene se 
podilejicim na plneni predmetu Smlouvy, vstup do prostoru staveniste Stavby. 
7.4 Objednatel je opravnen kontrolovat plneni zavazku vyplyvajicich z teto Smlouvy Zhotovitelem. Zjisti- 
Ii Objednatel, ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, muze pozadovat, aby Zhotovitel proved I 
napravu, Jestlize tak Zhotovitel neucini v Objednatelem stanovene dodatecne pfimerene Ihute, jedna 
se 0 podstatne poruseni Smlouvy ve smyslu § 2002 obcanskeho zakoniku. 
7.5 Objednatel je opravnen z dulezitych duvodu (zejmena v pfipade, ze dojde na Stavbe k preruseni praci) 
pisemnym pokynem ulozit Zhotoviteli povinnost pferusit vykon cinnosti TDS alnebo vykon cinnosti 
koordinatora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele dIe teto Smlouvy. V takovem prfpade Zhotovitel 
pferusi plneni pfedmetu Smlouvy ve vztahu k prfslusne cinnosti neprodlene pote, co jej k tomu 
Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Zhotovitel je vsak povinen bezodkladne 
informovat Objednatele 0 jakekoliv skode hrozici Objednateli v dusledku pferuseni plneni dIe teto 
SmIouvy. Znovuobnoveni plneni die teto SmIouvy ve vztahu k prerusene cinnosti je Objednatel 
opravnen ulozit Zhotoviteli pisemnyrn pokynem. V takove prfpade obnovi Zhotovitel prace 
nejpozdeji tfi (3) pracovni dny po doruceni vYzvy k opetovnemu zahajeni praci. 
7.6 Objednatel rna pravo die vlastniho uvazeni pfi neplneni povinnosti pracovniku Zhotovitele, v pripade 
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu cinnosti TDS nebo vykonu einnosti koordinatora 
BOZP nebo v pfipade porusovani povinnosti ze strany Zhotovitele pozadovat vymenu konkretni 
osoby poskytujici plneni na ucet Zhotovitele. Vymenu je Zhotovitel povinen provest na sve naklady 
nejpozdeji do 14 dnu od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vymenu 

.' . 

9 

pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nove navrzeneho pracovnika Zhotovitelem. 
Soucasne s touto vyrnenou Zhotovitel Objednateli dolozi, ze novy pracovnik rna minimalne stejne 
zkusenosti a odbornost jako vyrneriovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovene 
touto Smlouvou a obecne zavaznymi pravnimi predpisy. 
7.7 Objednatel je opravnen jednostrannym oznamenim dorucenym Zhotoviteli snizit rozsah predrnetu 
plneni teto Smlouvy, a to pfi respektovani zakona c. 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek 
(dale jen .Zakon 0 ZVZ"). Odmena bude v takovem pripade pomerne snizena. 
	8. 	ODPOvEDNOST ZA SKODU 
8.1 Zhotovitel odpovida zajakoukoliv skodu vzniklou v dusledku poruseni svych povinnosti vyplyvajicich 
ze Smlouvy nebo v dusledku poruseni pravnich predpisu. Skoda se nahrazuje v penezich, ledaze 
Objednatel ci poskozeny pozaduje nahradu skody uvedenim v pfedesly stay za predpokladu, je-li to 
objektivne mozne. Zhotovitel zejmena odpovida za: 
	8.1.1 	zniceni, ztratu, poskozeni ci snfzeni hodnoty majetku Objednatele, verejneho majetku ci 
majetku tretich osob; 
	8.1.2 	skodu vzniklou Objednateli Ci tretim osobam v dusledku poruseni jeho povinnosti vcetne 
skody vznikle tfetim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-Ii nebo 
spoluodpovida-li za ne Zhotovitel; 
	8.1.3 	jakekoliv vicenaklady, ktere bude Objednatel v dusledku poruseni Smlouvy a pravnich 
povinnosti Zhotovitelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za pfedpokladu, ze by je 
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-Ii by Zhotovitel v souladu se svymi srnluvnimi a 
zakonnymi povinnostmi; 
	8.1.4 	pripadne sankce ci korekce, ktere budou Objednateli jako zadavateli Verejne zakazky (ci jine 
verejne podpory) ulozeny ze strany organu statni spravy, a to jak formou povinnosti odvodu 
do statniho rozpoctu, ulozeni pokuty nebo financni sankce ci jineho zpusobu ulozeni financni 
ujmy, bude-li sankce ulozena z duvodu poruseni smluvnich ci zakonnych povinnosti 
Zhotovitel; a 
8.2 Smluvni strany se odchylne od ustanoveni § 2589 o. z. dohodly, ze Zhotovitel vzdy odpovida za sve 
poddodavatele tak, jako by zavazek z teto Smlouvy plnil sam. 
	9. 	ODPOvEDNOST ZA VADY A zARUKA 
9.1 V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pismo c) o. Z. odpovida Zhotovitel za vady Stavby spolecne a 
nerozdilne se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpusobilo selhani jeho dozoru. 
9.2 Zhotovitel odpovida, ze bude vykon cinnosti TDS a vykon cinnosti koordinatora BOZP provadet 
v souladu s touto Smlouvou, obecne zavaznyrni pfedpisy, stavovskymi pfedpisy, vztahuji-li se na 
cinnost Zhotovitel, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, ktera v ramci vykonu cinnosti TDS nebo 
vykonu cirmosti koordinatora BOZP dIe teto Smlouvy vytvofi, budou v souladu s touto SmIouvou, 
obecne zavaznyrni predpisy, stavovskymi predpisy, vztahuji-Ii se na cinnost ZhotoviteIe, a pokyny 
Objednatele. 
9.3 Na odpovednost za vady dIe odst. 9.2 SmIouvy se obdobne apIikuje pravni uprava odpovednosti za 
vady a odpovednost za zaruku obsazena v pravni uprave smlouvy 0 dilo v obcanskem zakoniku, 
ledaze tato Smiouva stanovi jinak, nebo to vylueuje povaha daneho ustanoveni. 
9.4 Zarucni lhuta pocina bezet dnem, kdy je konkretni sluzba v ramci vykonu cinnosti TDS nebo vykonu 

· " 
cinnosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonci: 
	9.4.1 	ohledne cinnostt uvedenych vel. 1 Pfilohy e. 1 teto Smlouvy uplynutim peti (5) let od 
okamziku akceptace ukonceni uvedene faze vykonu cinnosti TDS; 
	9.4.2 	ohledne einnosti uvedenych vel. 2 Prilohy e. 1 teto Smlouvy uplynutim peti (5) let od 
okamziku kolaudace Stavby; 
	9.4.3 	ohledne cinnosti uvedenych vel. 3 Pfilohy e. 1 teto Smlouvy uplynutim peti (5) let od 
okamziku provedeni dane cinnosti; a 
	9.4.4 	ohledne cinnosti uvedenych v Ptiloze e. 3 teto Smlouvy uplynutim peti (5) let od okamziku 
radneho pfedani a prevzeti Stavby. 
9.5 Konec zarucni lhuty die odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plneni Zhotovitele, za ktere odpovida 
Objednateli die § 2630 odst. 1 pismo c) O. Z. Zarucni lhuta ve vztahu k temto vadam uplyne soucasne 
se zarucni lhutou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby. 
9.6 Smluvni strany se dohodly odchylne od ustanoveni § 2112 odst. 1 O. Z. (aplikuje se die § 2615 odst. 2 
O. z.) tak, ze zjevne i skryte vady je Objednatel opravnen oznamit Zhotoviteli do tficeti (30) dnu ode 
dne, kdy danou vadu zjistil. 
9.7 Zhotovitel je povinen v pfirnerene lhute stanovene Objednatelem, maxi maine vsak ve lhute (60) dnu 
od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatneny Objednatelem, a to i v pfipade, ze jej 
neuznava. Naklady na odstraneni vady nese Zhotovitel i ve spornych prfpadech az do rozhodnuti 
sporu. 
9.8 Neodstrani-li Zhotovitel vadu die odst. 9.6 Smlouvy, je Objednatel opravnen vadu odstranit na naklady 
Zhotovitele sam, prlpadne ji na naklady Zhotovitele nechat odstranit osobou majici k dane cinnosti 
podnikatelske opravneni, 
10. POJISTENi
10.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozdeji pfi podpisu teto Smlouvy mit sjednano pojisteni sve odpovednosti za 
skodu zpusobenou Objednateli ei tfeti osobe pfi vykonu podnikatelske cinnosti zahmujici tez 
odpovednost za skodu zpusobenou porusenim teto Smlouvy v plnem rozsahu a odpovednost za vady 
die § 2630 odst. 1. pismo c) O. Z. s minimalni rysi pojistneho plneni 250.000,- Kc, Toto pojisteni je 
Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze Smlouvy. Pro ucely tohoto 
ustanoveni doba trvani zavazku z teto smlouvy konci uplynutim peti (5) let ode dne provedeni 
Stavby. 
10.2 Pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnez zahmovat i 
pojisteni vsech poddodavatelu Zhotovitele, prlpadne je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobne 
pojisteni v pfimerenem rozsahu sjednali i vsichni jeho poddodavatele, a to na celou dobu jejich ucasti 
pfi plneni predmetu teto Smlouvy. 
10.3 Doklad potvrzujici existenci pojisteni die predchozich odstavcu je Zhotovitel povinen predlozit pred 
podpisem teto Smlouvy a dale vzdy do peti (5) dnu od obdrzeni zadosti Objednatele 0 prokazani 
pojistenf. 
11. PODDODAVATELE
11.1 Vyjma castf predrnetu plneni prfpadne uvedenych v zadavacich podminkach Verejne zakazky je 
10 

" . 

Zhotovitel opravnen plnit predmet Smlouvy prostfednictvim poddodavatelu. Zhotovitel je pri plneni 
teto Smlouvy opravnen vyuzit pouze ty poddodavatele, ktere uvedl ve sve nabidce na Verejnou 
zakazku. V pfipade poskytovani pfedmetu plneni prostrednictvim poddodavatelu Zhotovitel 
odpovida Objednateli za einnosti provadene poddodavateli, jako by je provadel sam. 
11.2 Vyuziti poddodavatele neuvedeneho v nabidce Zhotovitele na Verejnou zakazku ci zrnena 
poddodavatele je mozna pouze s pfedchozlm pisemnym souhlasem Objednatele za predpokladu, ze 
novy poddodavatel bude disponovat vsemi opravnenimi potrebnymi k plneni te casti plneni dle teto 
SmIouvy, kterou rna pro Zhotovitele realizovat. Zmena poddodavatele, kterym Zhotovitel v 
zadavacim fizeni na Verejnou zakazku prokazoval splneni casti kvalifikacnich predpokladu je navic 
mozna pouze, pokud Zhotovitel pfedlozi Objednateli za noveho poddodavatele doklady, z nichz bude 
bez pochybnosti vyplyvat, ze novy poddodavatel spliiuje kvalifikacni pfedpoklady alespoii ve 
stejnem rozsahu jako puvodni poddodavatel. 
	12. 	LICENCE
12.1 Pokud jsou s jakyrnkoli plnenim dIe teto Smlouvy spojena autorska prava, poskytuje Zhotovitel 
Objednateli opravneni k vykonu takoveho prava (Iicenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl. 
obcanskeho zakoniku a zakona c. 12112000 Sb., 0 pravu autorskem, 0 pravech souvisejicich s pravem 
autorskym a 0 zmene nekterych zakonu (autorsky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, a to bez 
omezeni rozsahu uziti, ke vsem zpusobum uziti uvedenym v § 12 autorskeho zakona, vcetne uziti 
dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych pray autorskych. Objednatel je opravnen 
licenci postoupit a poskytnout podlicenci tfetim osobam, ObjednateIje opravnen autorska dila men it. 
12.2 Smluvni strany si ujednaly, ze uzernni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude 
opravnen k uziti s uzemnim rozsahem pro celou Ceskou republiku. 
12.3 Odmena za Iicencije zahmuta v odrnene za plneni die teto Smlouvy. 
12.4 Objednatel neni povinen Iicenci vyuzit. 
	13. 	SANKCE
13.1 Porusi-Ii Zhotovitel svou povinnost: 
	13.1.1 	die odst. 6.6.1 SmIouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za 
kazdy jednotlivy pfipad poruseni teto povinnosti; 
	13.1.2 	die odst. 6.6.2 nebo 6.6.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve rysi 0,5 % z ceny 
sluzby za kazdy jednotlivy pfipad poruseni teto povinnosti; 
	13.1.3 	dIe odst. 6.9 SmIouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve rysi 0,5 % z ceny sluzby za 
kazdy jednotlivy pfipad poruseni teto povinnosti; 
	13.1.4 	prerusit prace ve stanovene lhute, informovat 0 hrozici skode ci znovuobnovit prace dIe odst. 
7.5 SmIouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy 
zapocaty den prodleni se splnenim kazde z uvedenych povinnosti; 
	13.1.5 	dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisteni dle odst. 10J Smlouvy, zaplati 
Objednateli smIuvni pokutu ve rysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty den prodleni se 
splnenim uvedene povinnosti; 
	13.1.6 	vyuzit pf plneni SmIouvy pouze ty poddodavateIe, ktere uvedl ve sve nabidce, nebo 
poddodavateIe, kteryrni byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dIe odst. 11.1 ci odst. 11.2 
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve rysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy 
11 

pripad poruseni teto povinnosti a smIuvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy 
zapocaty den udrzovani zavadneho stavu. 
	13.1.7 	poskytnout Objednateli Iicenci dIe c1. 12 SmIouvy, zaplati Objednateli smIuvni pokutu ve 
rysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy pripad poruseni teto povinnosti za kazdy den 
prodleni az do okamziku, nez Objednatel ziska licenci v rozsahu stanovenem touto SmIouvou. 
13.2 V pfipade, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na castku ve rysi smluvni 
pokuty fakturu spliiujici nalezitosti daiioveho dokladu podle platnych pravnich predpisn Zhotoviteli. 
SmIuvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnu ode dne doruceni faktury Zhotoviteli. Zaplacenim 
smIuvni pokuty se rozumi pfipsani ji odpovidajici castky na bankovni ucet Objednatele. 
13.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k nahrade skody, na jeji vysi, na naroky z 
odpovednosti za vady ani na trvani zajist'ovane povinnosti. 
13.4 V pfipade prodleni Objednatele s uhradou faktury je Zhotovitel opravnen pozadovat urok z prodleni ve 
vysi stanovene pravnimi predpisy. 
	14. 	TRV ANi A ZANIK zA V AZKU ZE SMLOUVY 
14.1 Tato Smiouva je uzavrena na dobu urcitou. Zavazek z ni zanika splnenim posledni povinnosti vznikle 
v souladu s ni Ci najejim zaklade dotcenou smluvni stranou. 
14.2 Objednatel je opravnen tuto Smiouvu kdykoliv pisemne ukoncit. Ukonceni je ueinne jeho dorucenim 
Zhotoviteli. Ukoncenim zanika i ta cast zavazku z teto SmIouvy, kterou lze pravne kvalifikovat jako 
jiny smluvni typ, nez je smlouva 0 dilo cijako smlouvu nepojmenovanou. 
14.3 Objednatelje opravnen od Smlouvy odstoupit v zakonnych pfipadech a dale: 
	14.3.1 	pozbude-li Zhotovitel opravneni vyzadovaneho platnyrni pravnimi predpisy k cinnostem, k 
jejichz provadeni je Zhotovitel povinen dIe teto SmIouvy; 
14.3.2 prohlasi-Ii Zhotovitel, ze predmet SmIouvy nespIni; 
	14.3.3 	pokud vyjde najevo, ze Zhotovitel ve sve nabidce na Verejnou zakazku uvedl informace nebo 
predlozil doklady, ktere neodpovidaji skutecnosti nebo nejsou pfesne a mely nebo mohly mit 
vliv na vysledek vyberoveho fizeni na Verejnou zakazku; 
	14.3.4 	v pfipade upadku ZhotoviteIe, hroziciho upadku Zhotovitele, rozhodnuti 0 upadku 
Zhotovitele nebo zamitnuti insolvencniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele. 
14.3.5 nebude-li mit Zhotovitel uzavrenou pojistnou smiouvu dIe odst. 10.1 Smlouvy 
14.4 Zhotovitel je opravnen od Smlouvy odstoupit v zakonnych pffpadech a dale v pripade, ze Objednatel 
bude v prodleni se splnenim jakehokoliv peneziteho dIuhu po dobu delsi nez 30 dnu a dany dIuh 
nespini ani v dodatecne Ihute v delce 30 dnu, kterou mu Zhotovitel pisemne poskytne po uplynuti 
doby dIe prve casti tohoto ustanoveni. 
14.5 Odstoupeni od Smlouvy musi opravnena smluvni strana spolu s duvodem odstoupeni pisemne oznamit 
povinne smluvni strane bez zbytecneho odkiadu pote, co se 0 duvodu dozvedela. V pfipade 
Objednatele cim tato lhuta mini maine jeden (1) mesic. 
14.6 Smiouva se rusi dorucenim pisemneho oznameni 0 odstoupeni druhe smIuvni strane. 
14.7 SmIuvni strany jsou opravneny od teto smIouvy odstoupit pouze ve vztahu k plneni, ktere rna by! 
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnene casti plneni. To neplati, nemaji-li dilci 
jiz poskytnuta plneni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatne vady. Toto plati i ve vztahu 
12 

" . 

k plneni, ktere nelze vratit, jakym jsou konzultace, (least najednanich atd. 
14.8 Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obcanskeho zakoniku a stanovi, ze 
poskytnou-li si navzajem dodatecnou lhutu k plneni, ve ktere prohlasi, ze ji jiz neprodlouzi, tak jeji 
marne uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pf poskytnuti dodatecne lhuty 
vyslovne stanovily, ze marne uplynuti lhuty takovy nasledek mit rna. 
14.9 Bude-Ii zavazek z teto Smlouvy zrusen jinak, nez jejim splnenim, vypofadaji se smluvni strany 
nasledovne: 
14,9.1 doslo-li k zaniku zavazku z duvodu na strane ZhotoviteIe: 
(a) Objednatel je opravnen rozhodnout, zda si ponecha plneni, ktere mu bylo odevzdano a 
ohledne ktereho zavazek ze Smlouvy zanikl; 
(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plneni, ktere obdrzel za plneni, ohledne ktereho 
zavazek Zhotovitele zanikI; 
(c) Objednatel je povinen zaplatit prokazane naklady Zhotovitele na poskytnuti plneni, 
ohledne ktereho jeho zavazek zanikI a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalne 
vsak do vyse odrneny za dane plneni die teto Smlouvy; 
(d) Objednateli nalez! licence v rozsahu die teto Srnlouvy k projevum dusevniho vlastnictvi 
obsazenym v pfedmetu plneni, ktere si Objednatel ponechal za podminek teto Srnlouvy; 
(e) Zhotovitel odpovlda za vady a za zaruky za plneni, ktere se Objednatel rozhodl si 
ponechat. Zarucni doba zacne bezet, pokud jiz bezet nezacala, okamzikem zaniku 
zavazku ze Smlouvy. 
	14.9.2 	doslo-li k zaniku zavazku z duvodu na strane Objednatele (za ty se povazuje i vyssi moe, 
vyjma duvodu spocivajicich ve financni situaci Zhotovitele, za kterou odpovida on): 
(a) Zhotovitel je opravnen pozadovat vraceni plneni (je-li to mozne), ktere Objednateli 
poskytl a ohledne ktereho zavazek ze Smlouvy zanikl; 
(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plneni, ktere obdrzel za plneni, ohledne ktereho 
zavazek Zhotovitele zanikI a ktere Zhotovitel Objednateli neposkytl; 
(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dIe teto Smlouvy za plneni, ohledne ktereho jeho 
zavazek zanikl, avsak Zhotovitel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej v souladu s jeho 
pozadavkem vratil; 
(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle teto Smlouvy k projevum dusevniho vlastnictvi 
obsazenym v predmetu plneni, ktere Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit; 
(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plneni, ktere Objednatel obdrzel a neni 
povinenjej vratit. Zarucni doba zacne bezet, pokud jiz bezet nezacala, okamzikern zaniku 
zavazku ze SmIouvy. 
14.10 V pripade zaniku zavazku z teto Smlouvy jinak nez splnenim je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda, 
14.11 Zruseni zavazku z teto Smlouvy jinak nez splnenim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty a 
nahrady skody a v jeho dusledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z teto Srnlouvy, z 
jejichz obsahu ei povahy plyne, ze rnaji zavazovat smluvni strany i po zruseni teto Smlouvy, a ta 
prava a povinnosti, 0 nichz to stanovi tato Srnlouva. 
14.12 Dojde-Ii k zaniku zavazku z teto Smlouvy (jedno z jakeho duvodu), pfeda Zhotovitel Objednateli 
13 

veskere materialy, podklady a veci, ktere od Objednatele v souvislosti s plnenim Smlouvy prevzal. 0 
tom strany sepisl protokol. 
	15. 	FINANCOV ANi 
15.1 Plneni teto Smlouvy je financovano v ramci projektu s nazvem .Rekonstrukee Detskeho centra 
Chocerady" . 
15.2 Smluvni strany berou na vedomi, ze jakekoli, byt' jen castecne, neplneni povinnosti vyplyvajicfch z 
teto Smlouvy muze ovlivnit cerpani prostredku poskytnutych na plneni Smlouvy a realizaci Stavby a 
muze vest k sankcim, korekcim vydaju ci odvodum ze strany opravnenych kontrolnich organa. 
Skoda, ktera muze Objednateli neplnenim povinnosti vyplyvajicich z teto Smlouvy vzniknout, muze i 
z tohoto duvodu presahnout sjednanou odmenu. 
15.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci predmetu Smlouvy v souladu se vsemi pfislusnymi 
predpisy a podminkami, zejmena: 
	15.3.1 	archivovat nejmene do konce roku 2028 veskere doklady souvisejici s plnenim Smlouvy a 
umoznit Objednateli pflstup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni predpis u 
nektereho dokumentu delsi dobu archivace, je Zhotovitel povinen fidit se takovym pravnim 
predpisem; 
	15.3.2 	jako osoba povinna podle § 2 pismo e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole, v platnern 
zneni, spolupusobit pfi vykonu financni kontroly; a 
	15.3.3 	zajistit, aby jeho poddodavatele jako osoby povinne podle § 2 pismo e) zakona c. 320/2001 
Sb., 0 financni kontrole, v platnem zneni, spolupusobili pfi vykonu financni kontroly. 
	15.3.4 	poskytovatel je povinen minimalne do konce roku 2028 poskytovat pozadovane informace a 
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu a dila zamestnancum nebo zmocnencum 
poverenych organa (eRR, MMR CR, MF CR, Evropske komise, Evropskeho ucetnfho dvora, 
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusneho organu financni spravy a dalsich opravnenych 
organa statni spravy) a je povinen vytvorit vYse uvedenym osobam podminky k provedeni 
kontroly vztahujici se k realizaci projektu dila a poskytnout jim pfi provadeni kontroly 
soucinnost. 
	16. 	KONT AKTNi OSOBY 

	-_" 	_-_ "-==--.,;:.. .. z. 
16.1 V zalezitostech tykajicich se teto Smlouvy jsou opravneni jednat za Objednatele: 
	16.1.1 ve 	vecech 	technickych 	lng. 	Adolf Beranek, 	tel. 

e-mail: 

16.1.2 ve vecech smluvnich MVDr. Pavel Biskup, feditel p.o., tel. ~.!iI!!!!I., e-mail: 
16.2 V zalezitostech tykajicich se teto Smlouvy jsou opravneni jednat za Zhotovitele: 
16.2.1 ve vecech smluvnich: Ing. Ales Rada, tel.l4S!IIiiljp(;.;" e-mail: s! 0 3 iiiz 
16.2.2 ve vecech technickych: Ing. Ales Rada, tel. .1!1~~.t6,. e-mail: r.ai5I1ii.JJ.iiiiii.z osoba 
14 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,14290);(9384,14290);(9384,21489);(21496,21489)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(7482,0);(0,0);(0,21448);(21496,21448);(21496,1636);(7482,1636)posrelh0posrelv0pib
." . 

poskytujici sluzby v oboru: 
• hlavni stavebni dozor: Ing. Ales Rada, tel. .,. •• a, e-mail: ••• II.iiI~ 

• staly stavebni dozor: Ing. Ales Rada, tel. __ , e-mail: •••••• 

•	koordinatora BOZP a Pf): Ing. Ales Rada, tel. ••• lI!t e-mail:.!.c.".8j;·iII.~ 
•	tvorby a kontroly rozpoctu: Ing. Ales Rada, tel. .ii1 •• ~., e-mail: . ..,I;ZI_. 

• zodpovedneho technika v oboru technika prostredi staveb: Ing. Zdenek Poskocil, tel. 
e-mail.j ••• 

	17. 	SALVATORNIKLAUZULE

17.1 Pokud by se kterekoliv ustanoveni teto Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se 
jim stalo po uzavreni teto Smlouvy, pak tato skutecnost nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatnich ustanoveni teto Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicfch ustanoveni pravnich predpisu jinak. 
Smluvni strany se zavazuji bez zbytecneho odkladu po ryzve kterekoliv strany takove neplatne ci 
nevynutitelne ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, ktere je svym obsahem 
nejblizsi ucelu neplatneho Ci nevynutitelneho ustanoveni. 

	18. 	ZAvERECNA USTANOVENI 

18.1 Tato Smlouva obsahuje uplne ujednani 0 predmetu Smlouvy a vsech nalezitostech, ktere strany mely a 
chtely ve Smlouve ujednat, a ktere povazuji za dulezite pro jeji zavaznost, Zadny projev stran 
ucineny pfi jednani 0 teto Smlouve ani projev uCineny po uzavfeni teto Smlouvy nesmi byt vykladan 
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi teto Smlouvy a nezaklada zadny zavazek ze stran, ledaze tato 
Smlouva stanovi jinak. Soucasti teto Smlouvy je zadavaci dokumentace verejne zakazky, na jejimz 
zaklade byla tato Smlouva uzavrena, V pfipade rozporu mezi pravy a povinnostmi dIe teto Smlouvy a 
Zadavaci dokumentace rna pfednost ustanoveni teto Smlouvy. 

18.2 V pfipadech touto Smlouvou vyslovne neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi 
platnymi pravnimi predpisy Ceske republiky, zejmena obcanskym zakonikern. 

18.3 Ukaze-li se nektere z ustanoveni teto Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv teto vady na 
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobne podle § 576 obcanskeho zakoniku. 

18.4 Smluvni strany jsou povinny vyrozumet druhou smluvni stranu bez zbytecneho odkladu 
o skutecnostech, ktere by mohly mit vliv na obsah zavazkoveho vztahu zalozeneho Smlouvou. 

18.5 Jakakoliv ustni ujednani pfi plneni Smlouvy, ktera nejsou pisemne potvrzena opravnenymi zastupci 
vsech Smluvnich stran, jsou pravne neucinna, Vzajemna komunikace mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem neni navrhem ani akceptaci nove smlouvy, pokud neni podepsana statutarnimi zastupci 
smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovijinak. 

18.6 Tato Smlouva mtize byt menena nebo doplnovana pouze formou pisemnych vzestupne cislovanych 
dodatku podepsanych vsemi smluvnimi stranami. Ke zmenam ci doplneni neprovedenym pisemnou 
formou se nepfihlizi. 

18.7 Smluvni strany souhlasi s uverejnenlm teto Smlouvy vcetne jejich pfipadnych zmen a dodatku a ryse 
skutecne uhrazene ceny die teto Smlouvy na profilu Objednatele dIe § 219 zakona 0 ZVZ. 

18.8 Zhotovitel na sebe pfebira nebezpeci zrneny okolnosti v souvislosti sjeho pravy a povinnostmi 
vzniklymi na zaklade teto Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatneni § 1765 odst. 1 a § 1766 

15 

obcanskeho zakoniku na svuj smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou. 
18.9 Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti svym dnem podpisu smluvnimi stranami. 
18.10 Tato smlouva je vyhotovena v peti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi tfi 
(3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
18.11 N edilnou soucasti teto smlouvy j sou nasleduj ici pfilohy: 

:priloha c. 1 

Rozsah vykonu cirmosti TDS 
Rozsah vykonu cinnosti koordinatora BOZP 
Pfedpokladany harmonogram realizace stavby 

NA DDKAZ TOHO, ze smluvni strany s obsahem teto Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se kjejimu 
plneni, pfipojuji sve podpisy a prohlasuji, ze tato Smlouva byla uzavrena pod Ie jejich svobodne a vazne vule. 

16 

Objednatel 
Ve Strancicich, dne [BUDE DOPLNENO] 
[BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Zhotovitel 
V Rasoskach, dne 
Ing. Ales Rada 

.' . 

Pfiloha c. 1 - Rozsah yfkonu cinnosti TDS 
CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STA VEBNicH PRAci 
1. Pred zahajenim realizace stavebnich praci budou provadeny nasledujici cinnosti: 
1.1 kontrola uplnosti, vecne spravnosti, souladu se smlouvou 0 zhotoveni projektove dokumentace Stavby, 
pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pfedpisy, zejmena s vyhlaskou 499/2006 Sb., 0 
dokumentaci staveb, ve zneni pozdejsich ptedpisu, a relevantnimi verejnopravnimi akty, veskere 
projektove dokumentace Stavby (tj. zejmena projektove dokumentace pro vydani stavebniho 
povoleni a dokumentace pro provadeni stavby) a vsech dalsich podkladu pro realizaci Stavby 
vypracovanych pted zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedene kontroly budou 
pisemne pfipominky, ktere je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimerene lhiite od poskytnuti 
kontrolovaneho dokumentu, stanovene Objednatelem; 
1.2 komplexni podpora Objednatele pf administraci zadavaciho Hzeni na verejnou zakazku na vyber 
zhotovitele Stavby spocivajici zejmena v nasledujicich cinnostech: 
	1.2.1 	osobni konzultace dIe pozadavku Objednatele v prubehu pfipravy zadavacich podminek 
Verejne zakazky alespoii v rozsahu tfi (3) ctythodinovych konzultaci; 
	1.2.2 	kontrola uplnosti a vecne spravnosti zadavacich podminek Verejne zakazky pred vyhlasenirn 
Verejne zakazky; vysledkem provedene kontroly budou pfipominky v pisemne ei e-mailove 
forme, ktere je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimerene Ihiite od poskytnuti 
zadavacich podminek, stanovene Objednatelem; 
	1.2.3 	konzultace pfi poskytovani dodatecnych informaci k zadavacim podminkam; a 
	1.2.4 	dle pozadavku Objednatele ucast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici 
komise pfi vyhodnocovani nabidek; 
1.3 kontrola uplnosti a vecne spravnosti veskerych podkladu predanych Objednatelem nebo jim poverenou 
osobou zhotoviteli Stavby; vysledkem provedene kontroly budou pripominky v pisemne ei e-mailove 
forme, ktere je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimerene Ihiite od poskytnuti 
kontrolovaneho dokumentu, stanovene Objednatelem; 
1.4 seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotcenych organu statni spravy a 
s majetkopravnimi smlouvami vcetne splneni jejich podminek (nahlaseni zahajeni praci atd.); 
1.5 predbezne projednani zajisteni odberu potrebnych energii a medii pro Stavbu a zajisteni 
odkanalizovani stavenistniho zaffzeni se spravci siti; zhotoviteli Stavby bude vysledek predbezneho 
projednani sdelen pfi pfedani a pfevzeti staveniste; 
1.6 zastupovani Objednatele pfi predani a prevzeti staveniste zhotovitelem Stavby; 0 pfedani a prevzeti 
staveniste bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma nalezitosti uvedenych ve smlouve 0 zhotoveni 
Stavby a nalezitosti, ktere jsou dIe odbornych a technickych znalosti a zkusenosti Zhotovitele, 
vhodne, obsahovat alespoii: 
	1.6.1 	stanoveni zpusobu oploceni ci ohrazeni, pripadne jine ochrany bezpecnosti osob pohybujiclch 
se v sousedstvi staveniste; 
	1.6.2 	potvrzeni 0 prevzeti vytycovaciho protokolu zhotovitelem Stavby; 
	1.6.3 	stanoveni odpovedneho pracovnika zhotovitele Stavby, ktery pred zahajenim zemnich praci 
ovefi na stavenisti inzenyrske site, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron skodlivych 
17 

latek a stanovi opatrenl k zaj isteni bezpecnosti prace; 
	1.6.4 	upozorneni na objekty, ktere je nutne ochranit pred stavenistnim provozem a zpusob jejich 
ochrany; a 
	1 .6.5 	stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a stroju a urceni zpusobu 
napojeni staveniste na verejnou komunikaci; 
	1.6.6 	zajisteni uplnosti a vecne spravnosti protokolu 0 predani a pfevzeti staveniste. 
o dokonceni poskytovani cinnosti TDS Zhotovitelem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb die tohoto 
clanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptacni protokol. 
V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonceni teto faze poskytovani sluzeb a Zhotovitel pfeda Objednateli 
dokumentaci, kterou rna Zhotovitel dIe tohoto clanku vlastnfrn jmenem ci v zastoupeni Objednatele obstarat, 
zejmena rozhodnuti verejne spravy tykajici se Stavby, protokol 0 predani staveniste, dokumentaci 0 vytyceni 
staveniste. Pfedavanou dokumentaci preda Zhotovitel Objednateli ve forme a poctu vyhotoveni (max. 5), ktere 
sdeli Objednatel Zhotoviteli v primefene Ihute prede dnem predani. Pfedani zhotovenych ci obstaranych 
dokumentu je Objednatel opravnen pozadovat, jakmile dojde kjejich vyhotoveni. V takovem pifpade se 
v protokolu uvede udaj, ze byly predany a datum pfedani, 
Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis predavane dokumentace, (ii) soupis chybejici dokumentace, 
(ii) soupis vad a zpusobu jejich odstraneni, Odmitne-li Objednatel dokonceni faze vykonu cinnosti TDS die 
tohoto clanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstraneni nedostatku v cinnosti TDS ci 
jej Ich vysledcich. 
2.	CINNOSTI V PRIJBEHU REALIZACE STAVEBNicH PRAci NA STA VBE AZ DO 
IliDNEHO PREDANi A PREVZETi STA VBY A KOLAUDACNIHO RiZENi 
V prubehu realizace stavebnich praci na Stavbe az do fadneho predani a pfevzeti Stavby a 
kolaudacniho fizeni budou provadeny nasledujici cinnosti: 
2.1 prubezna kontrola a overovani 
	2.1.1 	technickych postupu provadeni stavebnich praci; 
	2.1.2 	kvality provadenych stavebnich praci; 
	2.1.3 	souladu provadenych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby; 
	2.1.4 	souladu provadenych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejmena 
stavebnim povolenim Stavby; 
	2.1.5 	souladu provadenych stavebnich praci se smlouvou 0 zhotoveni Stavby; 
	2.1.6 	souladu provadenych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi predpisy a technickymi 
a kvalitativnimi normami; 
	2.1.7 	dodrzovani kontrolniho a zkusebniho planu zhotovitele Stavby popr. planu kontrolnich 
prohlidek; 
	2.1.8 	kvality a mnozstvi zabudovanych materialu a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi 
normami a dokumenty; 
	2.1.9 	dodrzovani dohodnuteho casoveho planu (harmonogramu) provadeni stavebnich praci; 
	2.1.10 	vedeni stavebniho a montaznlho deniku; Zhotovitel bude zaroveii potvrzovat spravnost zapisu 
a vyjadtovat se v nem k dIe jeho odbornych a technickych znalosti a zkusenosti vyznamnym 
skutecnostem; 
18 

.' 

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli zhotovitele Stavby; 
2.1.12 radneho uskladneni materialu, vyrobku, stroju a konstrukci; a 
	2.1.13 	fadneho nakladani s materialem odstranenyrn ze Stavby, ktery nadale zustava v majetku 
Objednatele; 
2.2 Za ucelem vykonu cinnosti dIe odst. 2.1. teto prilohy zajisti Zhotovitel odpovedneho pracovnika 
alespoii kazdy pracovni den Stavby minimalne po dobu 8 hodin, z cehoz bude na stavenisti pfitomen 
nejmene 5 hodin (doba pfitomnosti pracovnika na stavenisti bude rozvrzena v navaznosti na 
probihajici prace v prubehu kazdeho dne) a dale vzdy, jestlize je pfttomnost odpovedneho pracovnika 
nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbe. V urgentnich pfipadech je Objednatel 
opravnen pozadovat ucast odpovedneho pracovnika na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V pripade 
kratkodobeho preruseni Stavby (napf. z duvodu technologicke pauzy apod. neni nutna jeho 
pfitomnost na miste Stavby, ale muze vykonavat dalsl cinnosti spojene s vykonem TDS v sidle 
Zhotovitele nebo Objednatele, pfipadne v jinych mistech, je-li to nezbytne pro radny vykon TDS. 
Provedene kontroly budou pravidelne zapisovany do stavebniho deniku a doplneny fotodokumentaci; 
pracovnik dale vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a einnostl, ktere byly dany den 
provedeny, a tento vykaz preda na konci pffslusneho kalendafniho mesice Objednateli. Odpovedny 
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostrednictvlm telefonniho spojeni kazdy den; 
2.3 zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu cinnosti TDS jakekoliv nedostatky, je povinen bezodkladne plsemne 
upozomit zhotovitele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatreni; v pfipade ohrozeni zdravi 
nebo majetku je Zhotovitel opravnen naridit zhotoviteli Stavby zastaveni praci; 
2.4 prubezna evidence pripadnych nedostatku Stavby a dohlizeni na jejich prubezne odstrariovani a jeho 
soulad s Objednatelovyrni pokyny; 
2.5 koordinace procesu vedoucich k naprave pripadnych nedostatku v procesu realizace Stavby; 
2.6 provedeni kontroly vytyceni stavby zhotovitelem a vyznaceni technicke infrastruktury na stavenisti 
jejimi spravci v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejmena zakonem e. 200/1994 Sb., 0 
zememefictvi a 0 zmene a doplneni nekterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenlm, ve znenf 
pozdejsich predpisu; 
2.7 zajisteni oznameni pod Ie § 22 odst. 2 zakona e. 2011987 Sb., 0 statni pamatkove peer, ve zneru 
pozdejsich predpisu, Archeologickemu ustavu A V CR Praha minimalne tfi tydny pred zahajenim 
vykopovych ci jinych stavebnich praci tento zamer; 
2.8 kontrola uplnosti, vecne spravnosti a souladu se smlouvou 0 zhotoveni Stavby, ve zneni prlpadnych 
dodatku, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnlmi predpisy, zejmena s vyhlaskou 499/2006 Sb., 0 
dokumentaci staveb, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a relevantnimi verejnopravnimi akty, 
dokumentace skutecneho provadeni Stavby, vcetne vsech jejich zrnen; vysledkem provedene 
kontroly budou pfipominky v pisemne ei ernailove forme, ktere je Zhotovitel povinen Objednateli 
dorucit v pfimefene lhUte od poskytnuti kontrolovaneho dokumentu, resp. od provedeni jakekoliv 
zmeny kontrolovaneho dokumentu, stanovene Objednatelem; 
2.9 spoluprace se zhotovitelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadeni Stavby pfi provadeni 
nebo navrhovani opatreni na odstraneni pfipadnych zavad teto dokumentace; 
2.10 ucast pfi projednavani a overeni spravnosti vsech dokladu a zrnen projektove dokumentace Stavby; 
2.11 kontrola procesu systematickeho doplnovani dokumentace pro Objednatele a zhotovitele Stavby, podle 
ktere se Stavba realizuje; 
19 

2.12 svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnu jednou za 7 dni za ucasti zhotovitele Stavby; 
vyhotovovani a rozesilani zapisu z kontrolnich dnu Stavby zucastnenym stranam dIe pokynu 
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku; 
2.13 kontrola spravnosti a uplnosti zhotovitelem Stavby provedeneho soupisu zmen, dopliiku nebo rozsfteni 
Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadeni Stavby, z odbornych znalosti zhotovitele Stavby 
nebo z vad projektove dokumentace a kontrola jejich oceneni; zajisten! vcasneho pfedlozeni tohoto 
soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti a uplnosti 
Zmenovych listu pro zpracovani nasledneho dodatku ke Smlouve, spolu s pfipomlnkami Zhotovitele 
v pisemne ci emailove forme; zmeny mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlaseni; 
2.14 financni kontrola spocivaj ici v: 
	2.14.1 	kontrole vecne a cenove spravnosti oceiiovacich podkladu a faktur, jimiz jsou uctovany 
stavebni prace na Stavbe; vysledkem provedene kontroly budou pfipominky v pisemne ci e- 
mailove forme, ktere je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimetene lhute od 
poskytnuti ocefiovacich podkladu a faktury, stanovene Objednatelem; 
	2.14.2 	kontrola navrzenych cen za dodatecne prace realizovane zhotovitelem nad ramec smIouvy 0 
zhotoveni Stavby; 
2.15 spoluprace s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpisu; 
2.16 spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby; 
2.17 spoluprace s odpovednymi geodety (dIe vyhlasky c. 20011994 Sb., 0 zememeficstvi, ve zneni 
pozdejsich predpisu); 
2.18 hlaseni archeologickych nalezu v souladu s relevantnimi pfedpisy; 
2.19 spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pfi provadeni opatreni na odvraceni nebo na omezeni skod 
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi; 
2.20 kontrola a overovani uplnosti a vecne spravnosti mesicniho soupisu mnozstvi provedenych praci 
a dodavek, je-li jej zhotovitel Stavby povinen predkladat; 
2.21 kontrola souladu postupu zhotovitele dila; 
2.22 kontrola a overovani dokoncenych praci, zejmena: 
	2.22.1 	kontrola a overovani kvality dokoncenych stavebnich praci Stavby a overovani shody 
s ustanovenimi projektove dokumentace, smlouvy 0 zhotoveni Stavby a dalsich zavaznych 
dokumentu pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi pfedpisy, relevantnimi 
verejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami; 
	2.22.2 	kontrola provadeni zkousek na Stavbe, doh led nad dodrzovanim predepsanych postupu, 
platnych pravnich predpisu, kontrola provadeni technickych zkousek provadenych 
opravnenymi subjekty a kontrola vysledku zkousek; 
2.22.3 kontrola prubehu zkousek technologickych zarizeni provadenych zhotovitelem Stavby; 
2.22.4 ucast pfi provadeni mereni (hluk, osvetleni, apod.); 
	2.22.5 	sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkousek materialu, konstrukci a praci, 
kontrola jejich vysledku a dokladu, ktere prokazuji kvalitu provadenych praci a dodavek 
(certifikaty, atesty, protokoly apod.); 
2.22.6 kontrola tech casti konstrukci, dodavek a montazi materialu, vyrobku a technologickych 
20 

postupu, ktere budou pfi dalsim postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou 
nepristupnym, vcetne zajisteni fotodokumentace i; 
2.22.7 zaverecne kontroly dokoncene Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodelku, vcetne stanoveni 
terminu a zpusobu jejich odstraiiovani; 
2.22.8 kontrola odstraiiovani vad a nedodelku do pfedani a pfevzeti Stavby; 
Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou 0 dilo. Zhotovitel je povinen zajistit osobni 
ucast odpovedneho pracovnika pfi provadeni kontroly; zaznarn 0 provedeni kontroly a 0 jejim 
vysledku kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolu - formulani urcenych pro 
stavbu, vcetne zpracovani fotograficke ci video dokumentace. 
2.23 vedeni podrobne dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalne po dobu 10 let a prubezne pfedavani 
kopii ci originalu dokumentace Objednateli dIe jeho voIby; 
2.24 cinnosti souvisejici s pfedanim a prevzetim Stavby: 
	2.24.1 	priprava veskerych podkladu nezbytnych pro pfedani a prevzeti Stavby nebo jejich casti ve 
spolupraci se zhotovitelem Stavby a overeni jejich uplnosti a vecne spravnosti; 
2.24.2 ucast pfi pfedani a pfevzeti Stavby nebo jeji casti; 
2.24.3 priprava predavacfho protokolu Stavby ve spolupraci se zhotovitelem Stavby; 
2.25 kontrola zamereni skutecneho provedeni Stavby; 
2.26 predani veskerych podkladu pro zaverecne vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlene po 
jejim ukonceni, jedna se zejmena 0: 
2.26.1 popis prubehu akce ajeji vyhodnoceni; 
2.26.2 kopie vsech proplacenych faktur; 
2.26.3 original kolaudacniho souhlasu v pnpade, ze byl vydan; 
2.26.4 original zapisu z pfevzeti praci, dodavek nebo sluzeb; 
2.26.5 fotodokumentace z prubehu cele stavby; 
2.26.6 kopie veskerych zapisu z pravidelnych kontrolnich dnu; a 
2.26.7 pnpadne dalsi pfilohy vcetne jejich seznamu 
2.27 vypracovani zadosti 0 uzfvanf Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napr. pro kolaudaci stavby) ajeji 
podani na pfislusny stavebni urad v zastoupeni Objednatele. 
2.28 kontrola uplnosti a vecne spravnosti dokladu obdrzenych od zhotovitele Stavby v souvislosti 
s dokoncenim Stavby, vcetne zajisten] jejich pflpadne opravy ci doplneni a odevzdani Objednateli v 
kompletnim stavu; 
2.29 kontrola uplnosti a vecne spravnosti a overenf dokladu pro konecne vyuctovani stavebnich praci, ktere 
dolozi zhotovitel Stavby k pfedani a pfevzeti dokoncene Stavby; 
2.30 kontrola uplnosti a vecne spravnosti veskerych dokladu, ktere dolozi zhotovitel Stavby pro jednani 0 
uzivan! stavby ve smyslu stavebniho zakona smerem k prlslusnemu uradu; 
2.31 prfprava podkladu pro hodnoceni Stavby a cerpani financntch prostredku; 
2.32 ucast na rfzent 0 uzfvani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu; 
2.33 kontrola vyklizeni staveniste zhotovitelem Stavby. 
21 

o vykonu a vysledcich cinnosti TDS die cl. 2 Prilohy c. 1 Smlouvy bude Zhotovitel mesicne podavat 
Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendafni 
mesic musi by! Objednateli dorucena do pateho (5) dne nasledujiciho kalendafniho mesice. A dale 
prubeznou tydenni zpravu, strucne postihujici zejmena zasadni skutecnosti 0 prubehu vystavby a 
dodrzovani harmonogramu praci zhotovitele stavby. Tato must by! Objednateli dorucena do 
poslednfho pracovniho dne tydne, 
	3. 	CINNOSTI PO PREDANi A PREVZETi STA VBY 
Po predani a prevzeti Stavby budou Zhotovitelem provadeny nasledujici cinnosti: 
3.1 kontrola odstraiiovani vad a nedodelku zjistenych pfi pfedani a pfevzeti Stavby a pfi fizeni 0 uzivani 
Stavby ve smyslu stavebniho zakona; 
3.2 kontrola Stavby za ucelem odhaleni pfipadnych skrytych vad, pfiprava pokladu pro jejich reklamaci a 
kontrolajejich odstraiiovani; 
3.3 Tyto cinnosti bude Zhotovitel provadet vYlucne na zaklade pozadavku Objednatele a v dohodnutem 
rozsahu. 
3.4 Budou-li v kalendafnim mesici cinnosti die tohoto cl. 3 Pfilohy c. 1 Smlouvy provadeny, pfeda 
Zhotovitel Objednateli nejpozdeji do peti (5) dnu po uplynuti tohoto kalendarnfho mesice k 
odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych cinnosti za uplynuly kalendarni mesic, ktery bude 
obsahovat minimalne: pfehled ukonu, ktere Zhotovitel v ramci provadeni uvedenych cinnostl za 
uplynuly kalendafni mesic provedl, spolu s uvedenim datace jednotlivych ukonu, casove narocnosti 
jednotlivych ukonu a jmen konkretnich osob, ktere jednotlive ukony provedly. Objednatel je povinen 
se k predlozenemu rozpisu provedenych cinnosti vyjadrit do peti (5) dnu od jeho doruceni 
s uvedenim, zda jej schvaluje ci nikoliv, a v prlpade jeho neschvaleni s uvedenim oduvodneni. Po 
schvaleni rozpisu Ize fakturovat. 
22 

.' 

Priloha c. 2 - Rozsah rtkonu cinnosti koordimitora BOZP 
Zhotovitel jakozto koordinator BOZP bude provadet nasleduj ici cinnosti: 
CINNOST ZHOTOVITELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP 
1.	Pfevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan 
BOZP"), zejmena zabezpeceni, aby Plan BOZp· obsahoval podrobnosti 0 mistnich a provoznich 
podminkach, udaje a informace a postupy, ktere se mohou na Stavbe vyskytnout. 
2.	Vypracovani nebo aktualizace prehledu pravnich ptedpisu ke Stavbe a informace 0 rizieich, ktere se 
mohou na Stavbe vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli; 
3.	Revize projektove dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby z pohledu 
zajisteni plneni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci zhotovitelem, 
Objednatelem a dalsimi osobami, projednani potreby pfipadnych uprav s Objednatelem, Zhotovitelem 
a Projektantem; 
4.	Poskytovani konzultaei a doporuceni projektantovi Stavby ohledne pozadavku na zajistem bezpecnosti 
prace, specificka opatreni, technologicke postupy s navrhy na zajistenf BOZP; 
5.	Vypracovani a zaslani Oznameni 0 zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP). 
6.	Zabezpeceni seznameni dodavatelu Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky a 
opatrenlmi kjejich eliminaci. 
7.	Zpracovani, pfedani, uprava a aktualizace Planu BOZP a pusobeni najeho dodrzovani. 
8.	Prubema a pravidelna kontrola, zda Objednatel, zda zhotovitele Stavby a projektanti Stavby 
v souvislosti se Stavbou zajist'uji plneni svych povinnosti plynouei z pravni upravy bezpecnosti a 
ochrany zdravi pri praci na stavenisti, navrzeni zpusobu odstraneni zjistenych nedostatku, a kontrola 
jejich odstraneni. 
9.	Kontrola informovanosti u vsech dotcenych zhotovitelu Stavby 0 bezpecnostnich a zdravotnich 
rizieich, ktera vznikla na stavenisti behem postupu praei, a 0 pfislusnych opatrenlch k minimalizaci 
rizik. 
10.	Upozoriiovani zhotovitele Stavby prokazatelnyrn zpusobem na nedostatky v uplatiiovani pozadavku na 
bezpecnost a ochranu zdravt pfi praci zjistene na Stavbe, vyzadovani zjednani napravy a k tomu 
navrhovani pfimetenych technickych a organizacnich opatfeni. 
l L'Oznamovani nedostatku v uplatriovani pozadavku na zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi 
Objednateli, nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodlene prijata pfimerena opatteni ke zjednani napravy. 
12.	Sledovani realizace napravnych opatreni a v pfipade neplneni prokazatelnym zpusobem vyzadovani 
jejich plneni na zhotoviteli Stavby. V pfipade opakovani stejnych nedostatku navrhovani uplatneni 
sankcnich opatfeni. 
13.	Ucast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani terminu kontrolnich dnu k problematice 
BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti zhotovitelu stavebnich praei z hlediska bezpecnosti 
a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbe a dosazenych vysledku, 
14.	Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpecnosti a ochrany 
23 

zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajist'ovanych zhotoviteli Stavby a vedeni prislusnych zaznamu, 
15.	Kontrola dokumentace systemu managementu BOZP souvisejici se stavebni cinnosti a postupem praci 
pod Ie realizacni dokumentace. 
16.	Provadeni dalsi cinnosti, ktere jsou Zhotoviteli jakozto koordinatorovi BOZP ulozeny obecne 
zavaznymi pfedpisy v souvislosti s vykonern jeho cinnosti koordinatora BOZP. 
o vykonu a vysledcich cinnosti koordinatora BOZP die Prflohy c. 2 Smlouvy bude Zhotovitel mesicne 
podavat Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Zhotovitel zaznamena za kazdy tyden 
cinnosti, ktere v miste plneni probihaly ve vykazu cinnosti, ktery bude pfilohou pisemne zpravy; pisemna 
zprava za uplynuly kalendami mesic musi by! Objednateli dorucena do pateho (5.) dne nasledujiciho 
kalendamfho mesice. 
24