FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. děkan

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
SMLUVNÍ STRANY KUPUJÍCÍ:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sídlo (příp. doručovací adresa):	Nám. Sítná 3105, Kladno, PSČ 271 01 IČ:	68407700
DIČ:	CZ68407700
zastoupené:	prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

PRODÁVAJÍCÍ:
IN SPACE s.r.o.
Sídlo:	Letňanská 68/11,Praha 9 - Prosek, 190 00
IČ:	05529581
DIČ:	CZ05529581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského  soudu v  Praze v  oddílu C, vložce
265200.
Zastoupená:	Ing. Barbora Cekotová, jednatelka IN SPACE s.r.o.
bankovní spojení:	xxx

1.	V návaznosti na provedené zadávací řízení veřejné zakázky Mobiliář pro FBMI - Výzva 44 pro OP VVV ", části 4.4.2., část 2: laboratorní nábytek provedl prodávající ověření připravenosti prostor určených pro dodávku nábytku podle této smlouvy. Při této příležitosti zjistil, že v místnosti určené pro dodání nábytku do laboratoře byly při provádění stavebních prací provedeny rozvody sítí, přičemž dle původní specifikace měly tyto rozvody být součástí nábytku. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
a.	Prodávající jako součást laboratorního nábytku nedodá modul pro rozvod sítí
v ceně 6000,- Kč bez DPH;
b.	Prodávající dodá místo původně specifikované pracovní desky PF postforming pracovní desku z vysokotlakého chemicky odolného laminátu, která je kvalitnější a vhodnější pro laboratorní zařízení, s cenovým navýšením 6000,- Kč bez DPH oproti původní specifikaci;
c.	Dále se mění článek 5, odst. 5.2. s tím, že se mění termín instalace a to na 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2.	Uvedená záměna nemá vliv na celkovou výši kupní ceny. S ohledem na výši změny ve finančním vyjádření jde o nevýznamnou změnu závazku ze smlouvy.
3.	V ostatním se kupní smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.

1

4.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede kupující. Pro účely zveřejnění prodávající prohlašuje, že před uzavřením smlouvy označil kupujícímu části smlouvy, které nemohou být uveřejněny, jinak bere na vědomí, že bude uveřejněna celá smlouva s přílohami s výjimkou osobních údajů.
5.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Kladně dne 22.2.2019	V Praze dne 6.2.2019

…………………………………………..	…………………………………
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.	Ing. Barbora Cekotová děkan FBMI	jednatelka IN SPACE s.r.o.