DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO Č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Domov pro seniory Horní Stropnice
se sídlem:		Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice
IČ:			00666254
zastoupený:		Evou Chaloupeckou, ředitelkou DpS
bankovní spojení:	
číslo účtu:		
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:		Ateliér Hronek s.r.o.
s místem podnikání:	Otakarova 2696/20
České Budějovice 3, PSČ 370 01
IČ:			28093968
zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16914
zastoupený:		Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:		
(dále jen „zhotovitel")

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že změna územního plánu umožňující plánovanou přístavbu bude veřejně projednána dne 17.4.2019 a následné vydání Opatření veřejné povahy je plánováno do konce měsíce května 2019, je upravena doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v Čl. II.. této smlouvy,  následovně:

c) pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. c) a d) do 30.6.2019

V Českých Budějovicích dne: 22. 3. 2019      Českých Budějovicích dne: 22. 3. 2019

Za objednatele:				       Za zhotovitele:

Eva Chaloupecká, ředitelka DPS			Ing. Stanislav Hronek, jednatel