Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi smluvními stranami
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
se sídlem: Thákurova 7, Praha 6		
IČ:	68407700			
DIČ:	CZ 68407700		
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
zastoupené:	Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemníkem
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „Objednatel“

a 

Karlova Firma, s.r.o
se sídlem: Palác Lucerna, Vodičkova 704/36, Praha 1, 110 00 						
IČ: 24248011				
DIČ:	CZ24248011			
zapsán v OR: C 196196 vedená u Městského soudu v Praze		
zastoupené: Karlem Mašínem, jednatelem		
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX	
dále jen „Zhotovitel“

S ohledem na to, že 
A)	smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem FSv – Inovovaná laboratorní a zkušební infrastruktura pro doktorský studijní program Pozemní stavby - Interiérové stavební úpravy mikrobiologické a chemické laboratoře K124  smlouvu o dílo č. 1119000090 (dále též „smlouva“); 
B)	V průběhu realizace díla byly zjištěny závažné nedostatky ve stávajících elektrických rozvodech a vyvstala potřeba provést dodatečné stavební práce (vícepráce) uvedené v příloze tohoto dodatku, a to v celkové výši 32 175,00  Kč bez DPH, tj. 38 931,75 Kč včetně DPH. 
C)	Samotné vícepráce tvoří 9,81% z celkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu podle smlouvy. 
D)	Objednatel má zájem na dokončení díla v termínu a s vícepracemi nezbytnými pro dokončení díla souhlasí;
se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy.

1)	Článek III odst. 1) Smlouvy se mění takto: 
Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 360 241,00 Kč bez DPH. Tato cena je konečnou cenou po započtení víceprací uvedených v příloze Dodatku č. 1 smlouvy.
2)	 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3)	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4)	Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha číslo 1.: změnový list 

V Praze dne .........................	V Praze dne dne .........................
Objednatel	Zhotovitel
ČVUT v Praze, Fakulta stavební 	                          Karlova Firma, s.r.o

                  
.........................................................                  	.........................................................
Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemník                        Karel Mašín, jednatel