Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:  1119000001
Číslo smlouvy zhotovitele: 201/038040

Označení smluvních stran
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 
se sídlem 	Thákurova 7, 166 36 Praha 6, Česká republika
IČ: 	68407700
DIČ: 	CZ 68407700
Zastoupena: 	Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemníkem 
dále jen „FSv“
na straně jedné jako objednatel

a	

INSTALACE Praha, spol. s r.o.
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1	
bank. spojení: KB, a.s. čú.: 16008111/0100	
IČ: 45804371
DIČ: CZ45804371
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Štočkem
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 11753 

dále jen „projektant“
na straně druhé jako zhotovitel
společně dále jen „strany“
s ohledem na to, že 
a)	zjišťování stávajícího stavu energetické sítě v objektech FSv bylo časově náročnější než byl původní předpoklad;
b)	pro zachování kvality provádění díla je nezbytné prodloužit termín dokončení díla; 

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.1.2019 (dále jen „Smlouva“)
1. Článek 8, odst. 8.1 Smlouvy se mění a nahrazuje takto: „Projektant je povinen dílo dle této smlouvy předat FSv do 15. 4. 2019“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne                                                          V Praze dne  	

__________________________			____________________________
čvut	v Praze, Fakulta stavební			   INSTALACE Praha, spol. s r.o.
     Ing. Miroslavem Vlasákem                                      Ing. Jaroslav Štoček