Dodatek č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce územních studií,
uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Smlouva)
Cl. 1 Smluvní strany
Objednatel:	Město Humpolec
Adresa:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený:	Jiřím Kučerou - starostou města
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266
(dále jen „objednatel")
a
Zhotovitel	City Upgrade s.r.o.
Adresa	Školská 12, 110 00 Praha 1
Zastoupený	Ivo Pavlík
IČ	02756021
DIČ	CZ02756021
(dále jen "zhotovitel")
Cl. 2 Předmět dodatku smlouvy
Předmětem dodatku ke smlouvě je změna smlouvy v článku:
ČI. 4 Čas plnění
Podpis smlouvy o dílo	do 30. 6. 2016
Zahájení plnění na základě pokynu zadavatele	1. 12. 2016
Zpracování konceptu územních studií	22.3 2017
Odevzdání díla	31.5 2017
A dále se týká změna i článku:
ČI. 6 Zaplacení ceny
Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur:
1.	dílčí faktura vystavená k 22.3. 2017 ve výši 50% celkové částky bez DPH
2.	dílčí a současně konečná faktura ve výši zbývajících 50% z celkové nabídkové ceny bez DPH do deseti dnů po ukončení a předání předmětu plnění objednateli
Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 smlouvy.
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Str. 1/2

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
Splatnost faktur činí 30 dní od data doručení. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.	*

                     Ivo Pavlík, jednatel

                    V Humpolci 28.11.2016
                     Jiří Kučera,starosta
                     Květoslav Namyslo, místostarosta