Dodatek č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce územních studií,
uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Smlouva)
Cl. 1 Smluvní strany
Objednatel:	Město Humpolec
Adresa:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený:	Jiřím Kučerou - starostou města
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266
(dále jen „objednatel")
a

Jiří Poláček 
Průhonice 
Jiřím Poláčkem

68588763 CZ7111050166

Zhotovitel 
Adresa 
Zastoupený 
IČ DIČ
(dále jen "zhotovitel")
Cl. 2 Předmět dodatku smlouvy
Předmětem dodatku ke smlouvě je změna smlouvy v článku:
ČI. 4 Čas plnění

Podpis smlouvy o dílo
Zahájení plnění na základě pokynu zadavatele Zpracování konceptu územních studii Odevzdání díla

do 30. 6. 2016
1. 12. 2016 22.3 2017 31.5 2017
A dále se týká změna i článku:
ČI. 6 Zaplacení ceny
Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur:
1.	dílčí faktura vystavená k 22.3. 2017 ve výši 50% celkové částky bez DPH
2.	dílčí a současně konečná faktura ve výši zbývajících 50% z celkové nabídkové ceny bez DPH do deseti dnů po ukončení a předání předmětu plnění objednateli
Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 smlouvy.
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel
Str. 1/2

oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
Splatnost faktur činí 30 dní od data doručení. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Humpolci 28.11.2016
Jiří Kučera,starosta                                                                                 Jiří Poláček,jednatel
 
Květoslav Namyslo,místostarosta