OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 001	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Investor:	SPŠ Stavební Valašské Meziříčí	Datum: 20.12.2018	
Název akce: „Stavební úpravy SPŠ Stavební – zateplení správní budovy Vrbenská“	
Způsob odeslání / předání
datum: 20.12.2018	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:	T03/A Výpis výplní otvorů	
	V29/B pohled S	
	Položkový rozpočet	
	Dod. č.1 SOD	

Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                                     
Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo zhotovitelem předloženo provozně vhodnější technické řešení nových výplní dveřních otvorů vedoucích do prostorů dílen odborného výcviku, a to z důvodu nově plánované obměny strojového vybavení dílen. V PD navržené 2 kusy plastových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (pozice PS 2), byly nahrazeny jedním kusem sekčních vrat s přerušeným tepelným mostem s nadsvětlíkem (PS2b) Druhé dvoukřídlé dveře pouze upraveny v členění (PS2a). Dodrženy byly všechny tepelně technické parametry, a toto kvalitativně vhodnější řešení bylo bez dopadu na cenu díla: Dle požadavků PD měly být dodány otevíravé dvoukřídlé dveře s Ud ≤ 1,100 W/(m2K), sekční vrata mají hodnotu Ud ≤ 0,880 W/(m2K), tedy lepší, než bylo požadováno v PD i v EP, cena za dodání kvalitativně lepšího výrobku zůstává stejná.

Počet připojených listů specifikací:                                         	6	
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: Ing. Karel Trlica TDI (TDS)
                
                                                                                                               ………..………………………….………………
                                                                                                                     Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nesnižuje standard díla dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
TDS doporučuje tento ZL č. 1 odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
                                                                                                         Razítko a podpis TD

Stanovisko projektanta stavby: 
Novým výrobkem sekčních vrat je splněna podmínka technických a stavebně fyzikálních parametrů uvedených v PD.
  AD doporučuje změnu odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
Razítko a podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:           
Původní návrh dle EP č. 24-17/127 ze dne 8.9.2017 počítal s výměnou stávajících dveří za nové s hodnotou Ud ≤ 1,200 W/(m2K). Změna řeší výměnu původně navržených dvoukřídlých otevíravých dveří do dílen odborného výcviku za sekční vrata. Nová výplň dveřního otvoru bude mít hodnotu Ud = 0,880 W/(m2K). Změnou bude dosaženo lepší hodnoty součinitele prostupu tepla, než bylo původně plánováno. Tato změna je na straně bezpečnosti výpočtu a nebude mít vliv na roční úsporu energie na vytápění a emise CO2. S navrhovanou změnou souhlasím.

                                                                                                                 ……………………………………………
Razítko a podpis ES
	
Příloha: rozpočet VCP a MNP, specifikace, pohledy	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 001	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Datum: 	20.12.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
  
Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                             
 Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo zhotovitelem předloženo provozně vhodnější technické řešení nových výplní dveřních otvorů vedoucích do prostorů dílen odborného výcviku, a to z důvodu nově plánované obměny strojového vybavení dílen. V PD navržené 2 kusy plastových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (pozice PS 2), byly nahrazeny jedním kusem sekčních vrat s přerušeným tepelným mostem s nadsvětlíkem (PS2b). Druhé dvoukřídlé dveře pouze upraveny v členění (PS2a). Dodrženy byly všechny tepelně technické parametry, a toto kvalitativně vhodnější řešení bylo bez dopadu na cenu díla: dle požadavků PD měly být dodány otevíravé dvoukřídlé dveře s Ud ≤ 1,100 W/(m2K), sekční vrata mají hodnotu Ud ≤ 0,880 W/(m2K), tedy lepší, než bylo požadováno v PD i v EP, cena za dodání kvalitativně lepšího výrobku zůstává stejná.
	
Počet připojených listů specifikací: 4  	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:

- 85 909,01 Kč	Cena víceprací bez DPH:

+ 85 909,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

0,- Kč	Beze změny                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 20.12.2018	

Datum: 20.12.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):