OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 002	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Investor:	SPŠ Stavební Valašské Meziříčí	Datum: 5.3.2019	
Název akce: „Stavební úpravy SPŠ Stavební – zateplení správní budovy Vrbenská“	
Způsob odeslání / předání
datum: 5.3.2019	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Položkový rozpočet	
	Dod. č.2 SOD	

Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                                     
Na základě dodatečného požadavku objednatele nebude prováděno logo školy na fasádě.
Tato změna přináší pouze méněpráce.	
Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: Ing. Karel Trlica TDI (TDS)

                
                                                                                                               ………..………………………….………………
                                                                                                                     Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nesnižuje standard díla dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
TDS doporučuje tento ZL č. 2 odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
                                                                                                         Razítko a podpis TD

Stanovisko projektanta stavby: 
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
AD doporučuje změnu odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
Razítko a podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:           

Irelevantní	
Příloha: rozpočet MNP	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 002	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Datum: 	5.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
  
Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                             
Na základě dodatečného požadavku objednatele nebude prováděno logo školy na fasádě. Tato změna přináší pouze méněpráce.

   - 10 743,80 Kč bez DPH
	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

- 10 743,80 Kč	Cena víceprací bez DPH:

+ 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

- 10 743,80 Kč	Beze změny                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum:  5.3.2019	

Datum: 5.3.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):