OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ:  1	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o.	
Investor:	AOPK ČR Praha 	Datum: 7.5.2019	
Název akce: „PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR“ – oddělení SCHKO 
                      Železné hory, Nasavrky“	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	ZL č. 1	
	Příloha SOD č. 3 – oceněné soupisy prací (rozpočty)	

Předmět změny:  
Odpočet neprovedených prací – zateplení špalet, bednění podlahové konstrukce, publicita
Přípočet – oprava palubek vikýřových oken a navýšení výměry fasády 

Popis a zdůvodnění změny:                                     
Zateplení vnějšího ostění špalet – z důvodu posunutí nově montovaných oken do líce fasády nebylo nutné přiteplovat špalety. 
Při demontáži bednění podlahy byla šetrně demontována podlahová prkna, která se po zateplení podlahy vrátila zpět; proto nebyl záklop proveden z OSB desek. 
Povinnou publicitu si zajistil investor.
Palubky vikýřových oken – při demontáži oken vikýřů bylo nutné zdemontovat palubkové ostění oken a při montáži nových oken bylo nutné toto ostění doplnit novými palubkami.
Fasáda – při realizaci bylo zjištěno, že plocha fasády je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr.                            
	
Počet připojených listů specifikací:                                         	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 	
Oznámení vydává:               
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko energetického specialisty:           

	
Příloha:   Soupis prací	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum: 	7.5.2019	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  
Odpočet neprovedených prací – zateplení špalet, bednění podlahové konstrukce, publicita
Přípočet – oprava palubek vikýřových oken a navýšení výměry fasády 

Popis a zdůvodnění změny:                                     
Zateplení vnějšího ostění špalet – z důvodu posunutí nově montovaných oken do líce fasády nebylo nutné přiteplovat špalety. 
Při demontáži bednění podlahy byla šetrně demontována podlahová prkna, která se po zateplení podlahy vrátila zpět; proto nebyl záklop proveden z OSB desek. 
Povinnou publicitu si zajistil investor.
Palubky vikýřových oken – při demontáži oken vikýřů bylo nutné zdemontovat palubkové ostění oken a při montáži nových oken bylo nutné toto ostění doplnit novými palubkami.
Fasáda – při realizaci bylo zjištěno, že plocha fasády je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr.                            
	
Počet připojených listů specifikací:  1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

-	38.134,- Kč	Cena víceprací bez DPH:

37 530,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

-	604,- Kč	
Zůstává bez změny                                        	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum:  7.5.2019	

Datum:  7.5.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):