SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

číslo smlouvy objednatele: Z-2200-303-2015 - 02
                                  číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
Zastoupená: | PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
Se sídlem: | Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1
IČ: | 000 64 416
DIČ: | CZ000 64 416
Bank. spojení: | xxxxxxxxxxxxx
Č.ú.: | xxxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako „objednatel“
a 
zhotovitel: 

Brandl s.r.o.
Jednatelka:  RNDr. Milena Nečásková ak. mal.
Se sídlem: | Praha 10, Azalková 25, PSČ: 102 00
IČ: | 41188292
DIČ: | CZ 41188292
Je plátcem 15 % DPH
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 
tento:

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 8. 2015

Předmětem smlouvy jsou doplňující průzkumné práce, a konzervační a restaurátorské práce: „Restaurování jižního prospektu – tzv. Divadla v areálu Trojského zámku v Praze 7“.

Dodatek č. 2 se uzavírá v rozsahu změn, na kterých se obě smluvní strany dohodly (ostatní ujednání zůstávají v platnosti):
Vzhledem ke vzniklým vícepracím požadovaným zástupci MHMP OPP a NPÚ 
na základě výsledků postupu rekonstrukčních restaurátorských prací na plastických sochařských prvcích prospektu a zápisu z průběžného kontrolního dne z 2. etapy prací, ze dne 21. 7. 2016, se práce druhé etapy r. 2016 rozšířily o rekonstrukci modelace těchto prvků, a to na základě dodatečně dohledané fotografické dokumentace prospektu, z přelomu 19. /20. stol. a proto se část prací etapy č. 2 r. 2016 přesouvá do r. 2017 s termínem ukončení 30. 6. 2017. 
Cena 1. části 2. etapy r. 2016 včetně DPH: 398.228,58,- CZK. 
Fakturace 1. části 2. etapy r. 2016 proběhne do konce r. 2016.

Cena převedených prací 2. části 2. etapy r. 2017 včetně DPH: 66.371,428,- CZK
Fakturace 2. části 2. etapy r. 2017 proběhne následně po závěrečném kontrolním dnu

V Praze dne

Objednatel:

................................................
PhDr. Magdalena Juříková
ředitelka, Galerie hlavního města Prahy

V Praze dne 

Zhotovitel:

................................................
 RNDr. Milena Nečásková ak. mal.
jednatelka, Brandl s.r.o.