OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Investor:	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště	Datum: 29.5.2019	
Název akce:   Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Příloha č.2	
		
Předmět změny:  Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP
Popis a zdůvodnění změny:                                     
      Jedná se o výmalby celých stěn po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu stěn je nutná, včetně drobných zednických vysprávek stěn (otvory po skobách a hřebíčkách po obrazech a garnyžích). Navýšení m2 SDK z důvodu snížení trasy VZT –v průběhu stavebních prací zhotovitel v součinnosti se zadavatelem dospěl k zjištění, že původně navržená trasa VZT koliduje s elektrorozvody oproti projektu, aby byla trasa VZT proveditelná došlo k jejímu odskočení a tím k navýšení m2 SDK. Nová svítidla v suterénu – stávající světla, která byla demontována z důvodu kolize se sádrokartonem zakrývajícím VZT, byla na konci své životnosti (drolící se starý plast, zteřelé gumové těsnění, pokřivené kryty) a zpětná montáž již není možná. Vyzdívka nové HUP pro plyn - stávající HUP musela být z důvodu výkopových prací kolem objektu demontována a její zpětná montáž vzhledem k špatnému technickému stavu jednotlivých prefa dílců není možná.
	
Počet připojených listů specifikací:                                         	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 

              	

Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: nerelevantní          

	
Příloha: změnový rozpočet	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum: 	29.5.2019	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
Předmět změny:  Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP
Popis a zdůvodnění změny:                             
  Jedná se o výmalby celých stěn po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu stěn je nutná, včetně drobných zednických vysprávek stěn (otvory po skobách a hřebíčkách po obrazech a garnyžích). Navýšení m2 SDK z důvodu snížení trasy VZT –v průběhu stavebních prací zhotovitel v součinnosti se zadavatelem dospěl k zjištění, že původně navržená trasa VZT koliduje s elektrorozvody oproti projektu, aby byla trasa VZT proveditelná došlo k jejímu odskočení a tím k navýšení m2 SDK. Nová svítidla v suterénu – stávající světla, která byla demontována z důvodu kolize se sádrokartonem zakrývajícím VZT, byla na konci své životnosti (drolící se starý plast, zteřelé gumové těsnění, pokřivené kryty) a zpětná montáž již není možná. Vyzdívka nové HUP pro plyn - stávající HUP musela být z důvodu výkopových prací kolem objektu demontována a její zpětná montáž vzhledem k špatnému technickému stavu jednotlivých prefa dílců není možná.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:

100 161,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

100 161,- Kč	Nemění se                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):