OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Investor:	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště	Datum: 17.7.2019	
Název akce:   5. 1 a Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Příloha č.2	
		
Předmět změny:  doplnění keramických obkladů na WC, zatření spodní strany atiky, 
Popis a zdůvodnění změny:                                     
      Jedná se o doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu obkladů je nutná (popraskané, nebo zcela chybějící obklady). V části atiky, kde došlo k uvolnění a odstranění římsy (římsa byla v havarijním stavu a po odsouhlasení TDI i projektanta došlo k jejímu odstranění), s kterou projekt nepočítal je potřeba zednicky zapravit pohledovou stranu v délce cca 9,5m a ve výšce cca 9m (práce z plošiny). Odbourání betonu před vstupem na dvůr a sjednocení s novým okapovým chodníkem kolem budovy, s tímto detailem u vstupu projekt neuvažoval, ale vzhledem k celému novému vyspádování a sjednocení dvora je zapotřebí tuto úpravu provést.
	
Počet připojených listů specifikací:                                         	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 

              	

Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:  souhlasím          

	
Příloha: změnový rozpočet	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum: 	29.5.2019	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
Předmět změny:  Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP
Popis a zdůvodnění změny:                             
  Jedná se o doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu obkladů je nutná (popraskané, nebo zcela chybějící obklady). V části atiky, kde došlo k uvolnění a odstranění římsy (římsa byla v havarijním stavu a po odsouhlasení TDI i projektanta došlo k jejímu odstranění), s kterou projekt nepočítal je potřeba zednicky zapravit pohledovou stranu v délce cca 9,5m a ve výšce cca 9m (práce z plošiny). Odbourání betonu před vstupem na dvůr a sjednocení s novým okapovým chodníkem kolem budovy, s tímto detailem u vstupu projekt neuvažoval, ale vzhledem k celému novému vyspádování a sjednocení dvora je zapotřebí tuto úpravu provést.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:

24 750,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

24 750,- Kč	Nemění se                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):