OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Investor:	VOŠ a SPŠ Jičín	Datum: 17. 6. 2019	
Název akce:   Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín
	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Příloha č.1	

Předmět změny:  
1)	Odvětrání tělocvičny

Popis a zdůvodnění změny: 
1)	Stávající ventilace je v havarijním stavu, proto na žádost objednatele ve spolupráci s projektantem navrženo nové odpovídající odvětrání tělocvičny
	
Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 

	

Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:  nerelevantní         

	
Příloha: změnový rozpočet	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 10	
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Datum: 	17. 6. 2019	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
1)	Odvětrání tělocvičny

Popis a zdůvodnění změny: 
1)	Stávající ventilace je v havarijním stavu, proto na žádost objednatele ve spolupráci s projektantem navrženo nové odpovídající odvětrání tělocvičny 
	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:

72.302,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

72.302,60 Kč	Nemění se                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):