Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j. SŠ 2/2019 SA 17
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
 Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:  	Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:		Brandlova 32, 695 01 Hodonín
zastoupený: 	PaedDr. Ivo Kurz, ředitelem
Technický dozor stavebníka:	…………………………..
Koordinátor BOZP	…………………………..
bankovní spojení:   												…………………………..
číslo účtu:															………………………….
IČ: 00559539   
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	Quantris spol. s r.o.
Sídlo: 		Růžičkova 2060/4 , 690 02 Břeclav
zastoupený:       …………………………. na základě plné moci z 20. 5. 2019, která je Přílohou č. 3
oprávněn jednat ve věcech technických …………………………………………………………………, mail: …………………………………..
bankovní spojení: …………………………………..
IČ: 01836480  DIČ: CZ01836480
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spis.zn. C79522 vedená u KS Brno      
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Změny smlouvy
Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 4 smlouvy o dílo č. j. SŠ 2/2019 SA 17, kterou uzavřely dne 27. 6. 2019 následovně:

Za ČL. II Předmět smlouvy odst. 3 se vkládá odst. 4 Předmět plnění – méněpráce a - vícepráce, a to s následujícím textem:

	„4. 	Předmět plnění smlouvy se snižuje o práce a dodávky a zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1“

V důsledku změn v Předmětu smlouvy se v čl. V Cena díla ruší ustanovení odst. 1 a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

1.	Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
Původní cena bez DPH:						2 973 343,38 Kč
Méněpráce bez DPH:							  117 753,29Kč
Vícepráce bez DPH:							  570 888,58Kč 
Nová cena bez DPH:							3 426 478,67 Kč
DPH (21%) :							  			   719 560,52Kč
Nová cena včetně DPH :						4 146 039,19 Kč
(slovy: čtyřimilionyjednostočtyřicetšesttisíctřicetdevětkorun, devatenáct haléřů včetně DPH ).

2.	Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), dále také na  základě prací a dodávek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 dodatku č. 1 (oceněný soubor víceprací a méněprací – položkový rozpočet). 

Článek III.

1.	Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. SŠ 2/2019 SA 17 zůstávají v platnosti beze změny.
2.	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a dobrovolně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
4.	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.
5.	Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany a 3 přílohy.

Přílohy:

č. 1 –Změnové listy - rekapitulace 
č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací) 
č. 3 – Plná moc -  …………………………..

 V Hodoníně dne 28. 8. 2019 						V Hodoníně 28. 8. 2019

….…….....……………………………								…….....……………………………
PaedDr. Ivo Kurz, ředitel      								…………………………….
za objednatele												za zhotovitele