Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 6150/31/2019
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
Český hydrometeorologický ústav,
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany
IČ: 00020699   
DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař.  
                                            č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák. 
                                            235/2004 Sb.)         
Statutární orgán: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :xxx
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx

(dále jen objednatel)

a

2.Zhotovitel: 
Ing. Jiří Pluháček
Hrázka 24
708 00 Ostrava - Pustkovec
IČ: 15494845
DIČ:CZ501118278
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
„Regulace vytápění objektu ČHMÚ, pob. Ostrava“ – VZ N006/19/V 00014774

1.	Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/31/2019 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4. 7. 2019:

Článek 5., odst. 5.1.:
      Celková cena bude na základě stanoviska stavebního dozoru  navýšena o cenu víceprací.

Vzájemně dohodnutá cena za dílo činí celkem:

                                      Cena bez DPH                   DPH (21%)             Cena vč.DPH

Původní cena               490 000,- Kč                   102 900,- Kč            592 900,- Kč

Vícepráce                       36 943,- Kč                       7 758,- Kč              44 701,- Kč

Nová cena díla             526 943,- Kč                   110 658,- Kč             637 601,- Kč	

Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí dodatku č.1.

2.    Zdůvodnění změny ceny díla:

Vícepráce: 
•	Během montáže a zprovoznění termostatických hlavic bylo zjištěno, že u některých ventilů ústředního vytápění nelze dosáhnout plné regulační funkce, a to z důvodu nestandardního zdvihu (zřejmě opotřebením během provozu). Musela být navržena výměna regulačních kuželek za nové s odpovídajícím zdvihem. Jedná se celkem o 44 ks ventilů.  	

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

•	Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
•	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
•	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne:						        V Ostravě dne:

.................................................			......................................................	
             za objednatele					za zhotovitele
xxxx								             xxx