OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Investor:	VOŠ a SPŠ Jičín	Datum: 09.08. 2019	
Název akce:   Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín
	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Příloha č.1	

Předmět změny:  
1)	Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy

Popis a zdůvodnění změny: 
1)	Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámcích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámky jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů. 
	
Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 

	

Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:  souhlasím         

	
Příloha: změnový rozpočet	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Datum: 	09. 08. 2019	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  
2)	Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy

Popis a zdůvodnění změny: 
2)	Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámcích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámky jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů. 
	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:

311 571,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

311 571,48 Kč	Dokončení opláštění a vnitřků tělocvičny + okapový chodník – 22. 09. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):