Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5119000077 ze dne 17. 6. 2019  

smluvní strany
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

ELIZZA s.r.o.
se sídlem na adrese: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
IČ: 00334561	DIČ: CZ00334561
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 	ing. Róbert Ďurčík, jednatel společnosti
(„zhotovitel“)
na straně druhé
Preambule
V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. V průběhu provádění prací tak byly stranami projednány změnové listy č. ZL1-ZL7, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, takže tato ustanovení nadále zní takto:
1.1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit pro objednatele provedení stavebních prací na akci: ČVUT Fakulta dopravní – Byty v budově FD – změna užívání pro potřeby školy (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen v projektové dokumentaci zpracované v 01/208 xxxxxxxx. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL7.
1.2.	Dílo bude provedeno v rozsahu dle oceněného výkazu výměr/položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle schválených změnových listů č. ZL1-ZL7.

2.	S ohledem na úpravy rozsahu díla změnovými listy ZL1-ZL7 se strany dohodly na úpravu termínu uvedenou v bodě 2.2 tak, že datum 30.9.2019 se nahrazuje datem 31.10.2019.
3.	Ustanovení odst. 3.1 nadále zní:
Cena za dílo včetně změn dle změnových listů č. ZL1-ZL7 je sjednána ve výši 1 734 480,13 Kč (slovy jeden milion sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát  korun českých a třináct haléřů). K ceně bude připočteno DPH ve výši 21 % 364 240,83 Kč (slovy tři sta šedesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých a osmdesát tři haléřů), takže cena za dílo včetně DPH je ve výši 2 098 720,96 Kč (dva miliony devadesát osm tisíc sedm set dvacet korun českých a devadesát šest haléřů). 
4.	Dále se do ust. 11.6 doplňuje nový bod e) tohoto znění:
b) Příloha č. 2 – Změnové listy ZL1-ZL7
5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze dne __________				V Praze dne ___________

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________		___________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.		Ing. Róbert Ďurčík
prorektorka pro výstavbu				jednatel společnosti