Spisový znak:            56.2
Skartační znak/lhůta:  V/5

DODATEK Č. D č. 4 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele: 	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub	
A Název akce: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská	Org: 5845	

		uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.	
       Smluvní strany

  1. Objednatel:	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 00299308	DIČ:  CZ00299308	
	Zástupci objednatele	
	- ve věcech smluvních:	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl	
	tel.:                                                        e- mail: 	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:	
		
	tel.                                                          e-mail: 	
		
	tel.: 		e- mail: 	
		
	tel:                                                         e-mail:  	
		
	Bankovní spojení: 	
	číslo výdajového účtu: 	

2. Zhotovitel:	Ing. Petr Doležel	
 též „mandatář“  	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc	
IČ: 45186677	DIČ:		
ŽL vydaný: 	
Č.j.:                                            event. Č.:                   	
Zástupci 		
- ve věcech smluvních:	
Ing. Petr Doležel	
tel.: 		e-mail: 	
- ve věcech technických:	
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace…………..)	
Ing. Petr Doležel	
tel.: 		 e-mail: 	
Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace…………..)	
Ing. Petr Doležel	
tel.: 		 e-mail: 	
	
Bankovní spojení: 	
č. účtu: 

     II. 
                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku  č. 4 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.  4 je dodatečně vydané kladné stanovisko SŽDC ke zpracované DUR. Tím  je možno pokračovat v přípravě akce. Je však  nutná aktualizace cca 25 stanovisek správců sítí  a je také nutno zaktualizovat a  znovu vytisknout celou DUR.

Tímto dodatkem č. 4 se mění tyto články smlouvy :

            V. 
Termín plnění

Mění se:
a)  Aktualizovaná dokladová část a podání žádosti o ÚR                                      do 31.3.2020
b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části a podání žádosti
     o stavební povolení                                                                                           do 30 dní od vydání ÚR
c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                                         do 30 dní od vydání SP

                                                                                        VI.
Cena  a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky takto: 

a)	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 
	Původní SOD	Dodatek č. 4	Nová cena	
Cena za DUR bez DPH	202 700	8 000	210 700	
DPH za DUR	42 567	1 680	44 247	
Cena za DUR s DPH	245 267	9 680	254 947	

b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	Původní SOD	Dodatek č. 4	Nová cena	
Cena za DUR bez DPH	21 000	20 625	41 628	
DPH za DUR	4 410	4 331	8 742	
Cena za DUR s DPH	25 410	24 956	             50 370	

Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 4	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	825 700	28 625	854 325	
DPH:	173 397	6 011	179 408	
Cena celkem s DPH:	999 097			34 636	1 033 733	

        Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č D č. 4 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento 
        dodatek č. D č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

V Olomouci dne:  	V  Olomouci dne: 	

 Objednatel	Zhotovitel	

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl	
Doležel Petr, Ing.