0.6 a~J 4-y/??/cI' ;Y~- 
::2c?4',R,2a4"<f 
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen "občanský zákoník") 
mezi smluvními stranami 
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti 
obec: 370 01 České Budějovice 
sídlo: Zátkovo nábřeží 4 
rčo 00070327 
DIČ:CZ00070327 (nejsme plátci daně) 
číslo účtu: 10633231 Komerční banka, a.s., České Budějovice 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jana Tichou, ředitelkou 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jakub Šimánek, zaměstnanec HaP 
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen "objednatel") 
a 

společnost: 
sídlo: 
rčo 
DIČ: 

STAKOZ CZ s.r.o. 
Vyšný 100, 381 01 Český Krumlov 
28107055 
CZ28107055 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17553 
	číslo účtu: 	230357566 

bankovní spojení: 
jednající prostřednictvím: 

0300 ČSOB Český Krumlov 
David Kozojed, jednatel 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen "zhotovitel") 
DODATEK Č. 1 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující úpravě odst. 1 položky 3) bodu VI. 
Doba provádění díla 
3) úpravy ve vstupní hale budou hotovy nejpozději do 31. ledna 2019 a úpravy části schodiště 
z haly na podestu budou hotovy nejpozději do 30. dubna 2019, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
SMLOUVA O DÍLO 
Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. 

V Českých Budějovicích, dne 27. prosince 2018 
Objednatel: 

V Českých Budějovicích, dne 27. prosince 2018 
Zhotovitel: 
...
	..	...
	....	...	....
.
...........
	..	..
.........................	...		..	..
..

Stránka 2 z 2