Galerie hlavního města Prahy
110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13
__________________________________________________________________________

Dodatek č. Z – 3100 - 543 – 2019 – 01                                               

ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,        mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy
		zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou
		ředitelkou galerie
		Staroměstské náměstí 605/ 13
		110 01 Praha 1
		IČO 064416
		DIČ 006-00064416
		číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxx
		bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:    Remy design s.r.o.
                       zastoupený panem Františkem Polesným
                       Truhlářská 316, Rychnov u Jablonce nad Nisou                                                                         IČO 27263045
DIČ CZ27263045
                        číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxx

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou:

      Malířské, sádrokartonářské a řemeslné práce pro výstavu
„Devětsil“ v Domě u Kamenného Zvonu

                                                   Termín výstavy: 10. 12. 2019 – 29. 3. 2020

2. Předmět dodatku:

Na základě dodatečných požadavků architekta výstavy odsouhlasil objednatel změny v rozsahu prací, upřesnění prací a materiálů a to:
-	stavba vitríny dle přiloženého výkresu, d. 2039,5 cm (dno, záda, boky + sklo + konzole + dodání a montáž v místě)
-	zkrácení již postaveného DTD panelu a jeho úprava ve 2. p.
-	další požadavky na malbu a přípravy pod malbu, cca 333 m2 (navýšení malby po opravách vstupu pro klimatizaci a vymalování celých stěn po demontáži panelů z předchozí výstavy – původně byly objednané jen opravy otvorů)
-	dodatečná demontáž a likvidace SDK panelu v první místnosti ve 2. p. 
-	sádrování otvorů s dvířky (po úpravách klimatizačních jednotek)
-	doplnění 40 cm SDK v první místnosti v 1. p.
-	dodání barvy RAL 9010 na „vlnovky“ 
-	odstranění plotrových nápisů ve vstupní hale
-	zaklopení vitrín a montáž kapa destiček na lustr

III. Cena: 

Cena se navýšila o 102.150,- Kč bez DPH, tj. 123.601,- Kč vč. DPH.
Celková cena zakázky vč. dopravy je tedy 399.000,- Kč bez DPH, tj. 482.790,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění

Termín dokončení prací byl prodloužen do 21. 11. 2019. Zaklopení vitrín a montáž kapa destiček na lustr 9. 12. 2019.

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

……………………………………..			……………………………………
          objednatel						zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy			Remy design s.r.o.
PhDr. Magdaléna Juříková				František Polesný
ředitelka						

V Praze dne:……………………….			V Praze dne: ……………………..