ZMĚNOVÝ LIST 	číslo ZL: 1	
Číslo smlouvy:	34-2019-11142	
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích	
Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství	
Zhotovitel:	SALVETE spol. s r.o.	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
Aktualizace výkazu výměr a změna celkové ceny díla v důsledku nových objektivně nepředvídatelných okolností, jež byly zjištěny při realizaci díla.
Popis a zdůvodnění změny:        
Během realizace díla byla zjištěna potřeba níže uvedených změn resp. víceprací a méněprací u části díla střecha a stěny.
Specifikace rozsahu změn – Stěny:
Revizí výkazu výměr zakázky: „Projektová dokumentace na zateplení budovy Ministerstva zemědělství na adrese Palackého nám. 1090, Strakonice“ ze dne: 06/2017 byla zjištěna početní chyba ve výpočtech. Chyba spočívá ve výměře výplní otvorů. Výkazem výměr byla napočtena dvojnásobná výměra okenních výplní otvorů, což se zásadně projevilo v ploše kontaktního zateplovacího systému (výměra chybějící plochy 333,07 m2) a v likvidaci odpadů a demontáži výplní otvorů. Změnovým listem je výkaz výměr upraven a doplněn o chybějící výměru včetně systémových prvků KZS a úpravu objemů demontáží s likvidací výplní otvorů.
Odvětrávací mřížky mezistřešního prostoru ve fasádě jsou pro skladbu jednoplášťové střešní konstrukce bezpředmětné a jsou změnovým listem odečteny.
Změnovým listem je odečtena z rozpočtu k SoD položka na prohlídku trhlin ve fasádě včetně vypracování posudku. Vizuální posouzení provedl TDI s realizační firmou. Trhliny nejsou tak zásadního statického charakteru, jak se předpokládalo, a nebyla nutná účast specialisty.
Změnovým listem je odečtena z rozpočtu k SoD položka na opětovnou montáž ocelových mříží ze dvora na okenních výplních provozovny Money Bank. Ze strany provozovatele nebyl vznesen požadavek na nutnost opětovného osazení mříží na tyto výplně otvorů, proto jejich opětovné osazení bylo bezpředmětné. 
Změnovým listen je upraven počet osazovaných požárních dveřních výplní otvorů do prostoru WC na jednotlivých podlažích. Počet osazovaných výplní otvorů by upraven dle definice počtu výplní v PBŘ.
Změnovým listem je upraven počet ocelových žebříků v úrovni střešních rovin. Přístup na střešní rovinu 3.NP je zajištěn okenními výplněmi ve 4.NP. Přístup na střešní rovinu nad 4.NP byl zajištěn ocelovými žebříky z obou střeních rovin nad 3.NP. Dva přístupy ocelovými žebříky na střešní rovinu nad 4.NP je bezpředmětný, proto byl jeden ocelový žebřík odečten.
Vzhledem ke zjištění skutečnosti nadměrné nerovnosti vnitřního ostění výplní otvorů byla jeho úprava provedena instalací izolantu z polystyrenu tl. 30 mm s odečtením úpravy hrany ostění rohovou lištou.
V průběhu výměny okenních výplní otvorů v prostoru provozovny Money Bank bylo zjištěno ukotvení profilů SDK kazetového podhledu do rámů okenních výplní. Bylo tedy nutné část tohoto podhledu v šířce cca 1000 mm demontovat a upravit tak, aby nadále nezasahoval do konstrukce okenních rámů. Tyto úpravy jsou definovány změnovým listem.
Při opravě ocelové schodišťové konstrukce bylo zjištěno značné poškození výplní schodišťových stupňů a podesty z pororoštů v takovém rozsahu, že by pouhá oprava nátěrem nebyla možná garantovat jako dostačující. Z tohoto důvodu byla provedena výměna těchto výplní za nové. Tyto úpravy jsou definovány změnovým listem.
V rámci úpravy osvětlení ve fasádě po dokončení KZS bylo zjištěno značné poškození stávajících svítidel, kde není možné zaručit jejich bezpečný provoz ve venkovních prostorách. Uvedená svítidla v počtu 7 kusů jsou nahrazena novými. Tyto úpravy jsou definovány změnovým listem.
Specifikace rozsahu změn – Střecha:
Po provedení demontáže střešní krytiny stávající střešní konstrukce byla zjištěna jiná skladba stávající střešní konstrukce oproti uvedené skladbě v projektové dokumentaci: „Projektová dokumentace na zateplení budovy Ministerstva zemědělství na adrese Palackého nám. 1090, Strakonice“ ze dne: 06/2017. Při zpracování projektové dokumentace bylo vycházeno ze skladeb uvedených v průvodní projektové dokumentaci objektu z roku 06/1971. Z důvodu zachování celistvosti a funkčnosti střešního pláště nebyly prováděny sondy do střešního pláště, aby nedošlo k jeho poškození. S ohledem na degradovaný povrch střešního pláště hrozilo riziko nespojení vrstev v případě opravy. Původní skladba střešní konstrukce, která byla tvořena porobetonovými deskami na vyrovnávacích pískovoškvárových podsypech, s povlakovou krytinou z bitumenových pásů ve dvou vrstvách, byla v průběhu let doplněna o dřevěný podkladový rošt s vloženou minerální tepelnou izolací tl. 50 mm na parotěsné fólii a prkenným záklopem z bitumenových pásů ve dvou vrstvách. Tyto bourací práce jsou změnovým listem řešeny jako vícepráce včetně odvozu a likvidací odpadů.
V souvislosti se zjištěním jiné skladby stávající střešní konstrukce nebylo možné využít pro oplechování vnější atikové hrany střešní roviny doplnění navrhovaných kotevních konzol, které jsou z rozpočtu k SoD změnovým listem odečteny. Konzole jsou změnovým listem nahrazeny výdřenou a záklopem z OSB desek.
Navrhované klasické odvětrávací hlavice pro odvětrání kanalizace nad střešní rovinou jsou nevyhovující, vzhledem ke zjištěné skutečnosti po demontáži stávající střešní krytiny, kde tyto hlavice pod střešní rovinou sdružují 2 – 3 kanalizační stoupačky. Navrhované klasické hlavice jsou změnovým listem odečteny a přípočtem navrženy odvětrávací hlavice Lomanco BIB 8, včetně propojovacího potrubí KG pod střešní rovinou.
Odvětrávací hlavice mezistřešního prostoru jsou pro skladbu jednoplášťové střešní konstrukce bezpředmětné a jsou změnovým listem odečteny.
Úprava odvětrávacího kanalizačního potrubí pozice č. Y nebude prováděno. Je řešeno v rámci ventilačních hlavic Lomanco BIB 8.
	
Počet připojených listů specifikací: 6

	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:

215.399,61,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 749.566,12,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

534.166,51,- Kč
	-                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 
	
Podpis Technického dozoru investora:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum:	Datum: