SMLOUVA O DÍLO č. 105/15 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 
jen "OZ") 
Dodatek Č. 2 
I. 
Smluvní strany 
1) Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Kontaktní osoby: 
(dále jen "objednatel//) 
2) Zhotovitel 
Název: 

P ALA TA - Domov pro zrakově postižené 
Na Hřebenkách 737/5,15000 Praha 5 
70872783 
CZ70872783 
Ing. Jiří Procházka, ředitel 
Ve věcech smluvních: Ing Jiří Procházka, ředitel 
Ve věcech technických: Ivan Slepička, investiční 
technik 
INTAR a .s. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
25594443 
CZ25594443 
Ing. František Houdek, prokurista a ředitel společnosti 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2024668389/0800 
CZ88 0800 0000 0020 2466 8389 
Sídlo: 
IČ: 
OIČ: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, tel. č.: 604742342, e-mail: mskoloudesintar.cz 
ve věcech technických: Jaroslav Kupr, tel. č.: 602 140 615, e-mail: jkupr@intar.cz 
(dále jen "zhotovitel//; zhotovitel společně s objednatelem také jen "smluvní strany") 
1 

doplnění čI. II. a III. 
Účel a předmět smlouvy - dodatku č.2 
Na základě specifických požadavků na umístění koncových prvků domovních technologií, 
orientačních a bezpečnostních prvků, informačního systému a provozních vazeb připravované 
stavby pro klienty trpící demencí a alzheimerovou chorobou, se smluvní strany domluvily na 
rozšíření předmětu plnění o vypracování "Studie interiérů". 
Studie interiérů vytvoří jednoznačný podklad pro realizaci stavby - barevné řešení, použité 
materiály, umístění koncových prvků a rozmístění bezpečnostních, ochranných a informačních 
prvků. 
doplnění čl. V. 
Čas provedení díla 
Studie interiéru bude předána do 15.3.2017 
doplnění a. VI. 
Cena díla 
Cena Studie interiéru je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 
300.000,- (slovy: třistatisíc) Kč bez DPH. 
Zhotovitel je oprávněn k ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
"ZD PH "), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen "DUZP"). 
doplnění čl, VII. 
Platební podmínky 
Cena díla bude objednatelem uhrazena po řádném předání a převzetí. 
doplnění čl. XIV. 
Závěrečná ujednání 
1)	Ujednání smlouvy neměněná tímto 2. dodatkem zústávají v platnosti beze změn. 
2)	Tento 2. dodatek smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

V Praze dne 5.1.2017 
Ing. Jiří Procházka, ředitel 
Za Objednatele 

Ing. František Houdek, B okurista 
Za Zhotovitele 
,