!Nositel

lnsastav s.r.o.	HMG - Úprava zahrady átria Vršovický zámeček Moskevská 120/21, 101 00 Praha 10 - Vršovice	30.1.2020
IO	/Název úkolu	I Doba trvání·1 Zahájeni I Dokončeni Převzetí staveniště		O dny 09.03. 20
Zahájeni praci	1den	10.03. 20
Pfiprava zalizenl staveniště	7dny	11.03. 20
Demontážní práce a bouráni otvorupro dveře	10dny      16.03. 20
Odstraněni zeleně, plesun, nakládáni a odvoz	20dny	24.03. 20
Odstraněni zeminy, plesun, nakládáni a odvoz	32dny	01.04. 20	02.05, 20
Zednické a sanačnl práce	25dny	19.04. 20	13.05. 20
Opravy izolaci strech	17dny	03.05. 20	19.05. 20
Komunikace - chodníky	24dny	17.05. 20	09.06. 20
Práce ZTI, úprava závlahového systému	12dny	03.06.  20 	14.06.  20
Elektroinstalace	8 dny	10.06. 20	17.06. 20
Úprava a modelacezahradní zeminy	12dny	08.06 20	19.06. 20
Montáž krytého sezení	12dny	10.06. 20	21.06. 20
Výsadba záhOnů. trávníků aslromů	12dny	17.06. 20	28.06. 20
Montáž mobiliáfe, vodního prvku	10dny	29.06. 20	08.07, 20
Osazeni dvefi do parku	3dny	09 07. 20	11.07. 20
Dokončovací práce, úklid	7dny	09 07. 20	15 07. 20
Uvedeni do provozu	5dny	15.07. 20	19.07	20
Předáni dokončeného díla	O dny   20.07. 20	20.07. 201	� 20.07.