shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21444);(21494,21444)posrelh0posrelv0pib
SMLOUVA 0 OiLO 
cfslo objednatele: 9/43750672/2020 
ctslo dodavatele: Z186 
"Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady- 
Technlckohospodafsky objekt" 
Smluvni strany 
Detske centrum Strancice, p. o. 
se sfdlem: Hrdinu 175,251 63 Strancice 
zastoupeny: MUOr. Pavlem Biskupem, i'editelem prlspevkove organizace 
ico: 437 50 672 
Ole: CZ43750672 
Bankovnf spojenf: Kornercnl banka, a.s. clslo lICtU: ••••• t 
dale jen "objednatel" 
a 
WANDEL CZECH s.r.o. 
Sfdlo: Havllckova 408, 584 01 Ledec nad Sazavou 
zapsany v obchodnfm rejsti'fku vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove v odd fie C, 
vlozka 13813 
Jednajfcf: Martin Vavficka. jednatel 
leo: 289 77 955 
Ole: CZ28977955 
Bankovnf spojenf: Komercnl banka, a.s., cislo uctu: 
dale jen .dodavater' 
uzaviraji podle pi'islusnych ustanovenf obcanskeho zakoniku 
tuto smlouvu 0 dflo: 
Clanek I. 
Predmet smlouvy 
1.1. Oodavatel se zavazuje k provedeni dfla - stavby .Rekonstrukce Oetskeho centra 
Chocerady - Technickohospodafsky objekt" pod Ie provadecl projektove dokumentace vc. 
vykazu vymer, kterou vypracoval TRANSPARENT studio s.r.o., se sidlem Pplk. Sochora 
34, 170 00 Praha 7, Ie: 243 06 649, v rozsahu specifikovanern v ocenenern vYkazu vymer 
(polozkovern rozpoctu), kterY tvoff pfflohu teto smlouvy a byl soucastl nabidky dodavatele 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21494);(21276,21494)posrelh0posrelv0pib
podane v ramci zadavaclho i'izeni na vyber dodavatele predmetu dila. Soucasti 
provedeni dila je i vypracovanl nezbytne vyrobni a dllenske dokumentace. 
Mfstem plnenl predrnetu plnenl dna je Chocerady cp, 124, PSG: 257 24 v rozsahu 
projektove dokumentace a podle uvedeneho vykazu vymer 
a pozadovaneho soupisu pracl. 
1.2. Oodavatel se zavazuje, ze provede dllo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podmfnek 
dohodnutych v teto srnlouve, svym jrnenern a na vlastnf odpovednost, v souladu 
s pravniml pi'edpisy a technlckymi normami GR a podmfnkami vyrobcu rnaterialu 
a dodanych zai'fzenf (viz clanek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
1.3. Objednatel se zavazuje za provedenf dila uvedeneho v clanku I. smlouvy zaplatit 
dodavateli cenu za dilo uvedenou v clanku III. smlouvy, a to za podmfnek uvedenych 
v teto smlouve. 
1.4. Pfedmetern dna jsou rovnez vsechny dale uvedene cinnosti: 
prubezna aktualizace harmonogramu provadenl pracl (v dusledku zrnen neprodlene, 
v ost. pi'fpadech kazde 3 meslce): 
vypracovanl kontrolne zkusebnlho planu stavby, kterY bude predan investorovi 
k odsouhlasenf do 7 kalendarnfch dnu od predant staveniste: 
naklady na pflpadnou likvidaci havarie: 
zpracovanl planu BOZP na stavenistl vcetne opatrenl pro jeho zajistenf; 
naklady na protipozarnl ochranu; 
pi'fprava staveniste vcetne pflstupu na stavenlste: 
dodanl rnaterialu a dilcu v pozadovane kvalite, vcetne jejich certifikatu a atestu: 
zhotovenf prace pod Ie technoloqtckeho predplsu: 
veskere nutne prosti'edky ochrany prace: 
zabezpecenl pruchodu pro pesf po celou dobu vystavby; 
letni opati'eni; 
zimni opati'eni; 
zhotovenf potrebnych provizornfch prechodu ci pi'ejezdu k objekturn, vcetne 
pflpadneho nutneho osvetlenl; 
zajisteni pracovlste proti vsern vlivurn znemoznujlcfrn nebo znesnadriujicim praci 
(cerpanl vody, zajisteni svahu, pi'isti'esky, zazlmovanl stavby, apod.); 
soustavne vytyeovani zfetelneho oznacenl obvodu staveniste: 
odvoz a poplatek za ulozenl vybouranych hmot a nevhodnych zemin; 
dodrzovanl bezpecnosti a hygieny na pracovisti; 
zajisteni vydani potrebnych rozhodnuti ohledne stanoveni pro prechodne upravy 
provozu na pozemnfch komunikacich die zpracovane PO a die vyjadi'eni dotcenych 
organu; 
zajistenf vydanl rozhodnuti 0 povoleni uzavirek, a to i castecnych (zajisteni objizdnych 
tras predpoklada rovnez soustavnou peei dodavatele 0 i'adne a kvalitni znacenl 
objlzdnych tras); 
naklady na obilzdne trasy a dopravnf znacenl: 
zajistenf geodeta a geologa stavby, vcetne zajistenf poti'ebnych rozboru v akreditovane 
laboratoi'i; 
Stranka 2 z 24 

zpracovanl havarijnfho planu, ktery stanovf zpusob ochrany dfla behem stavby, veetne 
zajistenf odsouhlasenf pi'fslusnymi organy, zajistenf odsouhlasenf je nutne pi'ed 
zahajenlm stavebnfch pracf; 
naklady na obnovenf geodetickych bodu; 
zabezpecenl pflpadneho nahradnlho zasobovanl okolnfch nemovitostf, veetne odvozu 
dornaclho odpadu, zabezpecenl pi'fstupu zachrannym slozkam organizaci CR; 
zajlsten! a urnoznenl pi'fstupu pracovnlkurn organizace provadejlc! archeoloqleky 
pruzkurn: 
zkousky a merent, revize zai'fzeni; 
zajisteni ostrahy stavby v prubehu realizace, 
zajistenf vytapeneho a osvetleneho prostoru ve. rnoznosti pi'ipojeni elektrospotrebicu 
pro staly stavebni dozor objednatele a konanl kontrolnich dnu. 
predlozenl technoloqickych postupu k provadenyrn pracem, a to alespori 8 dnf pi'ed 
zahajenim praci 
dolozenl technlckych listu k pouzitym rnaterlalurn 
vyzvanl zastupce Objednatele (technickeho dozoru stavebnika) ke kontrole 
jednotliyYch technoloqlckych kroku, zakryvanych vrstev a konstrukcf, a to alespon 4 
dny pi'ed jejich zakrytfm 
statlcka posouzeni 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpeclt provadenl dfla tak, aby pfi realizaci dfla nedoslo 
k omezeni soucasneho provozu sousednich objektU nad rarnec provadenych pracl. Musf 
bYt zachovana prujezdnost stavsjlclch komunikaci nebo jinak zajistena pi'istupnost vsech 
objektu, zejrnena pro inteqrovany zachranny system a zajisteni dopravni obsluznosti 
vsech yYstavbou dotcenych obcl. Dodavatel je povinen odstranit na vlastnf naklady 
zneeisteni komunikacf zpusobene provadenou stavbou, ktere by mohlo bYt zpusobile 
vytvoi'it zavadu ve sjfzdnosti komunikace, jeste pi'ed vznikem teto zavady. Dodavatel 
prohlasule, ze si je vedom teto odpovednosn, 
1.6. Dodavatel bere na vedomf, ze realizace dfla je flnancovana ze strany objednatele 
prosti'ednictvim vei'ejnych prostredku, kteryml jsou financnl prosti'edky rozpoctu 
Stfedoeeskeho kraje. 
1.7. Dodavatel je povinen poi'izovat fotodokumentaci pi'ed zapocetlm dfla, v jeho prubehu a po 
dokoncenl dfla v potrebnern rozsahu die pfedrnetu dfla, pod Ie pozadavku objednatele, 
s digitalnfm vyznaeenim data poffzenl. Tato fotodokumentace bude soucastl predrnefu 
dna a jeho ceny (viz elanek I. odst. 1.4. smlouvy). Pri vyuetovani kazde casti ceny dna 
dodavatel pi'ilozi k prislusne fakture jen pi'imereny pocet fotografii postihujicfch prubeh 
zhotovenf dane castl dila. V pffpade dllclch faktur tedy bude pfilozena dodavatelem jen 
fotodokumentace, ktera postihuje fakturovane polozky, V pfipade tech casti a dodavek 
dna, ktere budou v dalslm postupu zakryte, nebo se stanou neprlstupnymi. je dodavatel 
povinen vest podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) 
postihujicf detailne vsechny tyto castl, Fotodokumentaci je povinen dodavatel poffdit 
rovnez pri pflpadnern odstranenl vad a nedodelku dfla. V pffpade, ze dodavatel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatecne podrobnosti, budou strany 
v pfipade sporu 0 kvalitu dna nebo jeho konkretnl castl vycMzet z dokumentace, kterou si 
pofidf objednatel a jeji obsah bude pro takovy pi'ipad stranami povazovan za nesporny. 
Stranka 3 z 24 

1.8. Poflzenou fotodokumentaci je dodavatel povinen: 
predat objednateli v jednom vytistenem vyhotovenf a jednou v digitalnf podobe pri 
ptedanl dlla a pri pflpadnern odstranenl vad a nedodelku dlla, 
archivovat v jednom vytistenem vyhotovenf a v digitalnf podobs po dobu zaruky 
za jakost dna pro prfpad kontroly a resenl pflpadnych rozporu nebo reklamacf. 
1.9. Zavaznost dokumentace: 
V prfpade eventualnlho rozporu v platnosti smluvnfch dokurnentu, jsou dokumenty platne 
v tomto potadl: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova cast, 3) 
projektova dokumentace vykresova cast, 4) nabfdka dodavatele na verejnou zakazku 
5 nazvem .Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady - Technlckohospodafsky objekt" 
(dale jen "Verejna zakazka") - vykaz vymer, 5) nabfdka dodavatele ostatnf, 6) zadavacl 
dokumentace Verejne zakazky, 
1.10. Dodavatel prchlasuje, ze vypracoval nabfdku na dllo uplne a beze zbytku. Jeho 
nabfdka obsahuje vsechny materlaly, prace a postupy a technologie, ktere jsou potrebne 
k dohotovenf dna. Vznikne-li v prubehu provadent dlla poti'eba doplnit smlouvu 0 dilo 
o dalsf matenaly, prace postupy a technologie nese toto navYsenf dodavatel. Pouze 
v prlpade, ze jejich poti'eba vznikla v dusledku okolnostf, ktere objednatel jednajicf 
5 nalezitou pecf nemohl predvldat, a tyto dodatecne stavebn f prace jsou nezbytne pro 
provedenf puvodnlch stavebnfch pracl, muze objednatel postupem podle zakona 
c. 134/2016 Sb., 0 zadavanl verejnych zakazek, v platnem znenl, (dale jen "ZZVZU) 
uzavnt smlouvu na tyto vlceprace. Existenci techto okolnostf prokazuje dodavatel. 
1.11. Soucastl dlla jsou i prace v teto smlouve vyslovne nespecifikovane, ktere vsak jsou 
k i'adnemu provedenf dua nezbytne a 0 kterych dodavatel vzhledem ke sve kvalifikaci a 
zkusenostern mel, nebo mohl vedet. Provedenf tecnto pracl vsak v zadnem pflpade 
nezvysu]e touto smlouvou sjednanou cenu dlla, 
Clanek II. 
Doba zhotoveni dila 
2.1. Dodavatel provede (tj. dokoncl a pfeda) dflo specifikovane v climku I. odst. 1.1. a 1.4. 
smlouvy v termfnu do 10 mesfcu ode dne protokolarnlho ptedan! staveniste 
a v souladu 5 Pfilohou C. 1 - Harmonogram plnenl, 
2.2. K zapocetl plnen! predmetu dna bude dodavatel objednatelem vyzvan vzdy plsemne, 
e-mailem nebo faxem, a to nejmene 7 kalendarntcn dnu pi'ed pozadovanym zapocetlrn 
pracl, pi'icemz dodavatel je povinen potvrdit pi'evzetf teto vYzvy, plsemne, e-mailem nebo 
faxem, 5 uvedenfm presneho data zapocetl predmetu plnenl die clanku I. teto smlouvy. 
Dodavatel je povinen zahajit provadenl dila v termfnu die zaslane vyzvy. V prlpade, ze 
vyzva neobsahuje pi'esny termfn zahaienl provadenl dna, je dodavatel povinen zahajt 
provadenl dlla do 7 dnu ode dne obdrzenl vYzvy die tohoto odstavce. Tato lhuta neplatf, 
pokud objednatel nedodrZf podmfnky vazfcf se k zahajenf stavby die teto smlouvy. 
V pi'fpade, ze dodavatel nezahajl prace v termfnu stanovene die tohoto odstavce, je 
objednatel opravnen od tete smlouvy odstoupit. 
Stranka 4 z 24 

2.3. V pi'ipade, ze dodavatel zacne provadet dflo bez ptsemne vyzvy popsane v clanku II. odst 
2. 2. smlouvy, nese naklady na orace a dodavky takto provedene sam a objednatel neni 
povinen jejich cenu ani naklady takto vynalozene hradit. 
2.4. Dodavatel muze provest dilo pi'ed sjednanou dobou. 
2.5. Objednatel pfipoustl moznostl dohody 0 pflrnerenem prodlouzenl doby plnenl, zejmena 
v techto pi'ipadech: 
	- 	dojde-li behem vystavby ke zrnene rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto 
budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pi'ed jejich provedenim odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 
nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakehokoliv duvodu na strane 
objednatele; za okolnosti na strane objednatele se povazult i pi'ipadna opatfeni, 
stanoviska ci rozhodnuti organu statnl spravy nebo spravcu siti, v dusledku kterych se 
navysi objem praci a dodavek oproti pi'edpokladu stanovenemu v projektove 
dokumentaci a vykazu vymer (viz elanek I. odst. 1.1. smlouvy), to vse za pi'edpokladu, 
ze takova rozhodnuti, opatfeni ci stanoviska nebudou vyvolana cinnostl ci necinnostl 
dodavatele; 
zasah takzvane vyssi moci. 
2.6. Zrnena termlnu plnen! je mozna pouze v pfipade, ze takova zrnena nerna charakter 
podstatne zmeny zavazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda 0 vyse uvedenych zmenach 
musi bYt vzdy provedena plsemne formou dodatku ke smlouve, a to na zaklade obsahu 
formula fe, kterY je oznacen jako priloha c. 2 a tvofi nedilnou soucast teto smlouvy 0 dilo. 
Oznamenl o nutnosti prodlouzenl terminu dokoncenl dila musi bYt provedeno neprodlene, 
do ti'i pracovnich dnu od okamziku rozhodneho pro potfebu prodlouzenl terminu, a to 
plsernne nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost plsernneho oznarnenl die 
pi'edchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera cini castku 
5 % z celkove ceny dila. 
Clanek III. 
eena za dilo 
3.1. Cena za dllo die clanku I. smlouvy je sjednana dohodou na zaklade nabldkove ceny 
dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonern c. 526/1990 Sb., 0 cenach, 
ve znenl pozdejslch ptedplsu, v celkove vysi 9212963,81 Kc bez DPH, a to jako cena 
nejvyse pflpustna, 
K teto cene za dilo bude dodavatelem uctovana v souladu se zakonern c. 235/2004 Sb., 
o dani z pfidane hodnoty, v platnern znenl, DPH ve vysi 1 034722,40 Kc. 
Celkova cena za dllo vcetne DPH cini 11 147686,21Kc. 
Nedilnou soucastl smlouvy je oceneny vykaz vymer uvedeny v pffloze c. 3. Celkove ceny 
polozek (a jejich kalkulaci s ocenenym mnozstvlrn ci rozsahem dane polozky stanovene 
jednotkove ceny danych polozek) uvedene v ocenenern vykazu vymer jsou pevne a 
Stranka 5 z 24 

platne po celou dobu realizace dlla. Jednotlive polozky oceneneho vykazu vymer v sobe 
zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovne nepoirnenovane, jejichz provedeni ci dodanl je 
pro fadnou realizaci a dokoncenl dane polozky ocensneho vykazu vymer pfi odborne peci 
dodavatele nutno pi'edvidat a v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji soucast, 
3.2. Dodavatel je opravnen zmenlt uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem c. 235/2004 
Sb., 0 dani z pfidane hodnoty, jesthze po uzavfeni teto smlouvy 0 dllo nabude (lcinnosti 
zakon, kteryrn bude vYse DPH v uvedenem zakone zmenena. 
3.3. Cena za dllo je konecna, ani jedna strana neni opravnena pozadovat zmenu ceny dlla 
proto, ze si dllo vyzadalo jine usill nebo jine naklady, nez bylo predpokladano. Dodavatel 
je povinen poskytnout slevu z ceny dlla na neprovedene prace, Dodatecne stavebni prace 
mohou by! zadany pouze postupem v souladu se zakonern c. 134/2016 Sb. 
3.4. Cena dila bude snizena 0 prace, ktere oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany 
(rnene-prace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto srneru vyhrazuje pravo 
omezit rozsah provadeneho dlla die vlastni uvahy. 0 takovem omezeni musi by! 
dodavatel pi'edem (tj. pi'ed provedenim a dokoncenlrn dane casti dlla) plsernne 
informovan. 
3.5. Dllo Ize provest odlisne oproti provadecl projektove dokumentaci pouze s pi'edchozim 
plsemnym souhlasem objednatele. Pi'ed provedenim zrneny dlla oproti provadecl 
projektove dokumentaci musi by! 0 rozsahu tete zmeny (vecnern i financnlm) plsemne 
intormovan zastupce objednatele ve vecech smluvnich. K tete informaci bude pi'ilozeno 
stanovisko TDS a zastupce objednatele ve vecech technickych. Zmena dlla oproti 
provadecl projektove dokumentaci i v pi'ipade, ze nebude zvysovat cenu dna, musi by! 
schvalena rovnez poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 
3.6. Smluvni strany se dohodly, ze pi'i urcenl zmeny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 
vychazet z ceny stanovene ve vykazu vymer, jsou-li dana cinnost, prace ci material ve 
vykazu vymer zahrnuty. Nejsou-Ii ve vykazu vymer zahrnuty, bude se vychazet z cenove 
soustavy URS. Nelze-li zmenu ceny urcit ani timto zpusobem, zmenl se cena dlla 0 
castku odpovidajici cene praci a rnaterialu v mlste a case obvykle. 
Clanek IV. 
Platebni podminky 
4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli dfla zalohy. 
4.2. Realizovane prace a dodavky budou dodavatelem uetovany objednateli na zaklade 
skutecne i'adne provedenych pracl a dodavek plsemne odsouhlasenych technickym 
dozorem stavby, a to fakturami, ktere budou splnovat nalezltostl danoveho dokladu die 
platnych obecne zavaznych pravnlch pfedpisu, tj. die zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani 
z pfidane hodnoty, v platnern znenl a bude v nich uveden nazev "Rekonstrukce 
Detskeho centra Chocerady - Technickohospodarsky objekt", clslo stavby, clslo 
smlouvy objednatele, clslo projektu. Nedllnou soucastl kazde faktury musi by! soupis 
provedenych praci a dodavek za kalendafnl mesic, a fotodokumentace die ustanoveni 
Stranka 6 z 24 

elanku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 
4.3. Dodavatel je opravnen vystavit fakturu 1 x mesiene za kalendafnl mesic po uplynuti 
tohoto kalendatnlho meslce, pricemz datem zdanltelneho plnen! je posledni den tohoto 
kalendatnlho meslce: nedilnou soucastl faktury musi bYt soupis provedenych praci 
a dodavek v tomto kalendafnl meslcl, plsemne odsouhlaseny technickyrn dozorem 
stavby. Takto je dodavatel opravnen vyuctovat cenu dna az do vyse 90 % celkove ceny 
dna die teto smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkove ceny dna je dodavatel opravnen 
vyuetovat objednateli po radnem a uplnern dokoncenl dila bez vad a nedodelku a jeho 
prevzetl objednatelem, a to na zaklade vzajemne plsemne odsouhlaseneho pfedavactho 
protokolu, pflpadne doplneneho 0 vzaiemne odsouhlaseny protokol a pfedanl 
odstranenych vad a nedodelku, V prlpade, ze k prislusne fakture neni prilozena 
odpovidajici fotodokumentace (pflpadne z takove dokumentace provedeni uetovanych 
praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel rna pochybnosti 0 kvalite ei rozsahu takto 
uetovanych praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, 
nez se strany dohodnou na tom, zda a v [akern rozsahu a kvalite byly takto sporne prace 
nebo dodavky provedeny. 
	4.4. 	Zadrzne, dohodnute pod Ie podminek predesleho bodu smlouvy, muze bYt po vzajernne 
doh ode smluvnich stran nahrazeno bankovni zarukou ve steine yYsi. Dodavatel 
v terminu pred provedenim uhrady 90 % celkove ceny dna poskytne objednateli original 
zarucnl listiny ve vysi zadrzneho, platne do terminu predanl a prevzetl dna, prodlouzene 
do terminu odstranenl vad a nedodelku z protokolu 0 predanr a pi'evzeti dna. Financnl 
ustav v zarucn! listine potvrdi, ze uhradi objednateli eastku az do vyse zadrzneho 
dohodnuteho ve srnlouve, [estllze dodavatel nesplni sve zavazky spoiene s dokoncenlrn 
dila a odstranenirn vad a nedodelku z protokolu 0 pfedanl a prevzetl dna. Objednatel 
pozbYva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu 0 odstranenl posledni vady 
nebo nedodelku, 
	4.5. 	Faktura je splatna ve IhUte 30 kalendafnlch dnu od jejiho vystaveni (v prtpade, ze v 
prubehu plnenl dna to nebude vzhledem k financovanl z prostredku EU dohodnuto u 
jednotliyYch faktur jinak), prieemz musi bYt Objednateli dorucena alespon 25 dnu pred 
datem splatnosti. Faktura je splatna za pi'edpokladu, ze bude vystavena v souladu s 
platebnimi podminkami a bude splnovat vsechny uvedene nalezitosti, tykajici se 
vystavene faktury. Odchylne od pi'edchozi vety smluvni strany sjednaly, ze faktura na 
zaplaceni zbylych 10 % celkove ceny dna die clanku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatna do 
15 kalendatnlch dnu. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi 
podminkami nebo nebude splriovat pozadovane nalezitostl, je objednatel opravnen 
fakturu dodavateli dna vratit: vracenlm pozbyva faktura splatnosti. 
	4.6. 	Pro ucel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospech uctu dodavatele. 
V prfpade, ze by se ucet oznaceny v zahlavt smlouvy ukazal v prubehu realizace dila 
jako nereqlstrovany (ve smyslu zakona 0 dani z pfidane hodnoty), bude dodavatel do 10 
dnu povinen oznacit jiny reqistrovany ucet, na ktera bude objednatel uetovanou cenu 
dila povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, kterY neni 
reqistrovany ve smyslu vyse popsanem. 
Stranka 7 z 24 

	4.7. 	Objednatel je opravnen pozastavit uhradu kterekoliv platby v prubehu zhotovovanl dlla, 
jestlize je dodavatel v prodleni s dokoncenlm dlla nebo jeho castl oproti termlnurn, 
uvedenyrn v clanku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnenl tvorlclrnu PrUohu c. 1 
teto smlouvy, poprlpade pokud je dodavatel v prodleni 5 odstranenlm zjistenych vad 
a nedodelku dna nebo jestlize je dodavatel v prodleni 5 plnenlrn peneziteho zavazku 
vuci nekterernu z objednatelu pod Ie tete smlouvy 
4.8. Veskere platby budou provadeny v ceskych korunach. 
4.9. Dodavatel souhlasi die ust. § 2 pismo e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financnt kontrole, 
s vYkonem kontroly na predrnet zakazky. Dodavatel souhlasi se vstupem kontrolnich 
organu strukturalnlch fondu Evropske unie do svych objektu, ve kterych se pfedrnet 
smlouvy realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke kontrole kontrolnim organum veskerou 
provozni a ucetnl evidenci, ktera se tYka pfedrnetu smlouvy. Tato evidence musi bYt 
archlvovana v souladu 5 pozadavky zakona 0 ucetnictvl a zakona 0 danich z prijmu. 
Dodavatel se zavazuje poskytovat prislusnym organum ve stanovenych terminech uplne, 
pravdive informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, 
predrnetem smlouvy), dokladovat svoji cinnost a urnoznlt vstup kontrolou poverenyrn 
osobam - zamestnancurn objednavatele, Ministerstva financi CR, Evropske komise, 
Evropskeho ucetnlho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, flnancnlho uradu, a dalslch 
opravnenych organu statni spravy do svych objektu a na pozemky k overovanl plnenl 
podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakazky, ptedmetu smlouvy) 
za ucelern kontroly plnenf smlouvy a tuto kontrolu, die pozadavku poverenych osob v jimi 
pozadovanem rozsahu, neprodlene umoznit. V pflpade, ze cast dna bude dodavatel plnit 
prostfednictvim jinych subjektu je povinen zajistit, aby tyto subjekty podtehali 
povinnostem uvedenyrn v tomto bode smlouvy. Tuto povinnost rna dodavatel i v pflpade 
dodavatelskych sublektu. Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci 
souvisejici se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pfedan! a pfevzeti 
dlla. Dodavatel je povinen srnluvne zajistit, aby soueinnost pfi plnenl jeho zavazku die 
tohoto bodu smlouvy v plnem rozsahu poskytli i jeho poddodavatete. Pokud tak neuelnl, 
bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam. 
4.10. Smluvni strany se dale dohodly, ze v prfpade, ze se dodavatel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zakona 0 dani z prldane hodnoty nespolehlivym platcern dane a po dobu, kdy za 
nej ve smyslu uvedeneho zakonneho ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy 
bude rozhodnuto, ze neni nespolehllvyrn platcem dane), bude objednatel opravnen 
hradit uctovane casti ceny dna co do castky, odpovidajici dani z pfidane hodnoty, pnmo 
na ucet spravce dane. Poukazanlm prislusne castky na ucet spravce dane se v dane 
casti bude povazovat uctovana castka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 
nespolehlivost Objednatele upozornit po pravnl moci rozhodnuti. Nesplnenl teto 
povinnosti je hrubyrn porusenlm povinnosti dodavatele. 
4.11. Dodavatel predlozl objednateli planovany ftnancnl a casovy harmonogram stavby 
(HMG), kterY urcl objem cerpanl financnlch prostredku na jednotlive meslce, rozlozeny 
po meslclch. Tento financnl a casovy harmonogram tvofi nedllnou soucast smlouvy 0 
dllo jako PrUoha c. 1 teto smlouvy. Objem financnlch prostredku ve HMG neptekrocl 
celkovou smluvnf cenu dfla. 
Stranka 8 z 24 

Pokud by prekrocenl provedenych casti dila a souvisejieiho objemu rocnlho cerpanl 
financnlch prostredku znamenalo di'ivejsi termin ukoncenl realizaee dila, mohou se 
smluvni strany plsemne dohodnout na odpovidajiei zmene HMG. 
4.12. Stfedocesky kraj je registrovanym platcern dane z pridane hodnoty, avsak na pfijata 
plneni vyplYvajiei z teto smlouvy 0 dilo nernuze uplatnit rezim prenesene dariove 
povinnosti die § 92e zakona c. 235/2004 Sb. ve znenl pozdejsieh predpisu, nebof tate 
plnenl nejsou vyuzlvana pro ekonomiekou cinnost Stfedoceskeho kraje, resp. nejsou 
vyuzlvana pro uskuteenenl zdanitelnych plnenl, Z tohoto vyplyva, ze z predmetnych 
plneni bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., ze Stfedoceskemu kraji budou 
predrnetna plnenl fakturovana vcetne DPH. 
Clanek V. 
Vlastnicke pravo k dilu 
5.1. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od poeatku jejiho zhotovovanl s tim, ze 
dodavatel je vlastnikem veei, ktere si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy 
se zpracovanlm stanou soucastl vlastni stavby. 
5.2. Dodavatel neni bez pfedchoziho plsernneho souhlasu objednatele opravnen postoupit 
prava a povinnosti z teto smlouvy na tfeti osobu. 
ClanekVI. 
Staveniste 
6.1. Prostor staveniste je vymezen zadanlrn stavby. Pokud bude dodavatel poti'ebovat pro 
realizaci dlla prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady. 
6.2. Objednatel pteda dodavateli staveniste do 3 dnu po odeslanl vyzvy die clanku II. odst. 
2.2.smlouvy, a to na zaklade zevrubne prohlidky prostoru staveniste a oboustranne 
podepsaneho plsernneho protokolu opravnenymi zastupci obou smluvnieh stran, 
6.3. Nejpozdeji pi'i pi'edani stavenlste budou objednatelem predana dodavateli pravornocna 
rozhodnuti organu statnl spravy. Bez vyse uvedenych dokladu neni dodavatel povinen 
staveniste pfevzit. Nejpozde]i pf predan! staveniste preda objednatel dodavateli tez 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. V prlpade, ze objednatel 
nesplni povinnost die tohoto odstavee, IhUta pro zahajeni provadenl dila nezacne bezet. 
Dodavatel je pak povinen zahalit provadenl dila do 7 dni ode dne, kdy mu objednatel 
pi'eda pravornocna rozhodnuti vefejne spravy, 
6.4. Dodavatel zabezpeel na vlastni naklad stavenlste a zajisti vjezd na staveniste, jeho 
provoz, udrzbu, pojadek a cistotu po eelou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. c. 
268/2009 Sb., 0 obecnych technlckych pozadavclch na vystavbu, ve znenl pozdejslch 
predpisu, Zdroje energii pro realizaei dna si projedna sarnostatne s jejieh spravcl, 
pfipadne s organy statnl spravy. Totez ucini i v pi'ipade skladek materialu, povoleni 
vybudovanl objektu ZS apod. 
6.5. Dodavatel je odpovedny za vsechny skody zpusobene na stavenlsf do doby predanl 
Stranka 9 z 24 

a pfevzeti dfla a vyklizenf stavenlste, a to podle obecnych ustanovenf 0 nahrade skody. 
6.6. Dodavatel je povinen pi'ed zapocetlm v9kopovych pracf zabezpeclt na svuj naklad 
vytycenf vsech stavailclch sltl a zarlzenl a splnit veskere podmfnky stanovene ve 
vyjadi'enf jednotlivych spravcu tech to zai'fzenf. Za veskere dodavatelem zpusobene 
skody na stavailclm potrubf, vedenf a kabelech nese v9hradne a v pin em rozsahu 
odpovednost dodavatel. Dodavatel je pred zahajenlrn provadenl dfla rovnez povinen 
ohledat s odbornou peel odpovfdajfcf jeho predmetu podnlkanl a zavazkom die tete 
smlouvy mfsto provaden! dfla z hlediska zjistenf moznych pfekazek v naslednem 
provadenl dfla, neuvedenych v projektove dokumentaci ci dalslch podkladech pro 
realizaci dfla. 
6.7. Dodavatel v pine mfi'e zodpovlda za bezpecnost a ochranu zdravf vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpecl jejich vybavenf ochrannymi pracovnfmi pomuckami, 
Dale se zavazuje dodrZovat hygienicke predplsy a podmfnky zlvotnlho prosti'edf. 
Dodavatel je dale povinen dodrzovat veskere platne technlcke a pravnt pi'edpisy, tYkajfcf 
se zajistenf bezpecnosf a ochrany zdravf pri praci a bezpecnostl technlckych zai'fzenf, 
pozarn! ochrany apod. 
6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenlste do 14 kalendafntch dnu od 
protokolarnlho predanl a prevzetl dlla, prlpadne jednotlive casti staveniste. Pri 
nedodrienf tohoto termfnu je povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu, viz clanek XIII. 
odst. 13.2. teto smlouvy a dale je povinen uhradit objednateli veskere naklady a skody, 
ktere mu tim vznikly. 
6.9. Dodavateli je povinen zajistit v ramci zaffzenf staveniste podmlnky pro v9kon funkce 
autorskeho dozoru projektanta a technlckeho dozoru stavebnfka, prfpadne cinnost 
koordinatora bezpecnosf a ochrany zdravl pf praci na stavenisti, a to v pfimerenem 
rozsahu. 
Clanek VII. 
Opravneni zastupci smluvnich stran 
, 
7.1. Opravnenymi zastupci objednatele pri provadenl a prevzetl dila a ve veceoh technickych 
(dale jen .opravnenr zastupci objednatele") jsou: 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21479,0);(0,0);(0,21276);(21479,21276)posrelh0posrelv0pib
	- - 			- - 
		- 	._ 
. - 
Krajsky urad Sti'edoceskeho 
	Bc. Petr Kucera, ii': 	[gi: 
kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 
	Ing. Adolf Beranek, ii': 	[gi: 
Straneice, p.o. 

- - .:.--- - _- 
I;_ __ ''':__- __ ~:. 	_ 	- __ - 	_ 

Detska centrum 

Opravnen! zastupci objednatele jsou opravneni jed nat za objednatele ve vecech 
technickych a ve vecech, ktere tato smlouva vyslovne stanovf. Nenl-li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou opravnen! zastupci objednatele opravnenl clnlt [rnenem zadneho 
z oblednatelu pravnl ukony. 
Stranka 10 z 24 

Opravnenyrn zastupcern objednatele ve vecech smluvnich (dale jen .opravnent zastupci 
objednatele") je: 

MUDr. Pavel Biskup, V: 

.~ - - ':-- 
	- - 	--~::: 

121: 

	- 		- 
:.. 	.;- 	~;- _:..=_ 	.. ~~ 	- - =--- 	-; 

	7.2. 	Opravnenyrni zastupci dodavatele jsou: 
Hlavni stavbyvedouci: Ing. Jifi Machac, e-mail: 

Zastupce stavbyvedouciho: Ing. Ondfej Prasek, 

tel.:_ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21488,0);(0,0);(0,21473);(21488,21473)posrelh0posrelv0pib
	_ - - 	-:. - . -_ 	- -t: 
-- - 
Odborne zpusobila osoba v prevenci rizik BOZP a po: Jan Adrian, e-mail: 
	Ve 	vecech 	smluvnich 	zastupuje 	dodavatele: 	Martin 	Vavlicka, 	e-mail: 
tel.: _ 
Clanek VIII. 
Realizace dlla, nebezpeci skody na dUe, 
prava a povinnosti smluvnich stran 
8.1. Dodavatel je povinen provest dllo na svuj naklad a na sve nebezpecl, 
	8.2. 	Pfi provadenl dlla postupuje dodavatel sarnostatne a dllo provadl v souladu projektovou 
dokumentacf a dalslml podklady, uvedenyml v clanku I., obecne zavaznyrnl pravnlmi 
pfedpisy a ceskyrni technickymi normami. V pfipade, ze vyrobce (nebo dovozce) uziteho 
materialu nebo zaffzenf stanovf postup pro rnontaz, instalaci ci aplikaci takoveho 
rnaterialu ci zaffzeni, je dodavatel, nedohodnou - Ii se strany jinak, povinen provest 
rnontaz, instalaci ci aplikaci takoveho materialu ci zaffzenf v souladu s takovymi pokyny 
vyrobce (nebo dovozce), V pffpade, ze dodavatel dllo provadl v rozporu s pfedchozimi 
vetami, rna se za to, ze dflo obsahuje vady a nedostatky. 
8.3. Dodavatel prohlasule, ze rna k dispozici jedno vyhotovenf projektove dokumentace pro 
provaden i stavby vc. vykazu vymer od objednatele uvedene v clanku I. odst. 1 .1. 
smlouvy. 
8.4. Pri provadenl dlla prostfednictvrm zamestnancu dodavatele nebo pri provadenl casti dfla 
jinou osobou rna dodavatel odpovednost, jako by dllo provadel sam. 
8.S.Pri zhotovovanl vlastni stavby je dodavatel povinen vest stavebnf denfk v souladu 
se zakonern c. 183/2006 Sb., 0 uzernnlm planovant a stavebnfm radu (stavebnf zakon), 
ve znenl pozdejslch ptedpisu (dale jen .stavebnl zakon"). 
8.6. Zadny zapis ve stavebnfm denfku nenf zpusobily zvysit cenu za dllo uvedenou v clanku 
III. odst. 3.1. teto smlouvy. 
8.7. Opravneny zastupce objednatele a TDS je opravnen kontrolovat provadenl dila a rna 
Stranka 11 z 24 

pflstup na staveniste kdykoli v prubehu provadenl dila. Dodavatel je povinen objednateli 
die jeho pozadavku tuto kontrolu v plnern rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto 
ucelem potrebnou soueinnost. 0 vysledku kontroly bude sepsan protokol, v nernz budou 
uvedeny zjistene nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranenl. Tento odstavec 
platl obdobne i ve vztahu k osobe vykonavajlcl funkci autorskeho dozoru projektanta a 
k osobe vykonavajlcl koordmatora BOZP. ldentlfikaenl udaje osob vykonavajicl funkci 
autorskeho dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdeli objednatel dodavateli bez 
zbytecneho odkladu po jejfm urcenl, 
8.8.V souladu se stavebnfm zakonem bude objednatel provadet pf zhotovovanl vlastnf stavby 
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvlm osoby (dale jen .osoba 
vykonavaifcl technlcky dozer"), jejiz jrneno a prijmenf bude objednatelem sdeleno pri 
pfedanl staveniste a bude uvedeno v plsernnern protokolu 0 pfedanl staveniste 
a soucasne zapsano ve stavebnim denfku. 
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobe vykonavajici technicky dozor pi'fstup ke 
stavebnfmu denfku v prubehu zhotovovanl vlastni stavby. Na pozadanl je dodavatel 
povinen pfedlozlt objednateli a osobe vykonavaitc! technicky dozor veskere plsemne 
doklady 0 provadenl dila. Tento odstavec platl obdobne i ve vztahu k osobe vykonavajici 
funkci autorskeho dozoru projektanta a k osobe vykonavajici koordinatora BOZP. 
8.10. Dodavatel je povinen pf provadenl vlastni stavby organizovat na stavenlstl nejrnene 1 x 
tydne (jinak vzdy die poti'eby) kontrolni dny prubehu zhotovovanl vlastni stavby za ucastl 
opravneneho zastupce objednatele a osoby vykonavailcl technicky dozor objednatele. 
Z kontrolniho dne bude poftzen plsemny zaznarn, podepsany z(leastnenymi zastupci 
smluvnich stran. Zjistene nedostatky a vady pi'i provadenl vlastni stavby je dodavatel 
povinen odstranit v terminu uvedenem v plsemnem zaznamu z kontrolnfho dne. Datum 
konanl prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pf pfedanl stavenlste a uvedeno 
v pfedavaclm protokolu 0 predant stavenists a soucasne bude zaznarnenano ve 
stavebnim deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno 
v plsemnem zapise z probehnuvslho kontrolniho dne. 
B.t t.Jesnlze maji bYt nektere easti dila zakryty nebo maji bYt provedeny zkousky nekterych 
cast! dila podle obecne zavaznych pravnlch predpisu nebo podle ceskych technlckych 
norem, je povinen dodavatel nejmene 5 pracovnich dnu pi'ed jejich uskutecnenlrn 
oznarnit plsemne tuto skutecnost opravnenernu zastupci objednatele a soucasne ucinlt 
o teto skutecnosti plsernne zaznarn ve stavebnim deniku. 
Nesplni-Ii dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na zaklade plsemne zadosti 
objednatele na naklady dodavatele zakryte casti dila za (lcasti opravneneho zastupce 
objednatele odkrYt a na zaklade plsemne zadostl objednatele na naklady dodavatele 
provest znovu za ucastl opravneneho zastupce objednatele zkousky pi'islusnych casU 
dila podle obecne zavaznych pravnlch pfedpisu nebo pod Ie ceskych technickych norem. 
Nedostavi-li se opravneny zastuoce objednatele k zakryti casU dlla nebo k provedeni 
zkousek nekterych casU dila podle obecne zavaznych pravnlch pi'edpisu nebo podle 
eeskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutecnenl plsemne oznarneno 
dodavatelem neimene 5 pracovnich dnu pi'ed jejich uskutecnenlrn a dodavatel soucasne 
ucinil 0 teto skutecnosti plsernne zaznarn ve stavebnim deniku, nerna objednatel pravo 
se dozadovat toho, aby byly na naklady dodavatele zakryte easti dila odkryty a na 
Stranka 12 z 24 

naklady dodavatele znovu provedeny zkousky pi'fslusnych cast! dlla podle obecne 
platnych pravnlch pi'edpisu nebo podle ceskych technickych norem. 
8.12.Zjistf-li objednatel nebo osoba vykonavailcl technlcky dozor, ze dodavatel provadl dflo 
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho, aby 
dodavatel odstranil vady vznikle vadnyrn provadenlm a dllo provadel i'adnym zpusobem, 
Jestlize dodavatel dlla tak neuelnl ani v pi'imei'ene Ihute k tomu poskytnute, je objednatel 
opravnen odstoupit od smlouvy. 
8.13.Za spravnost a uplnost predane dokumentace odpovlda objednatel. Dodavatel je povinen 
ptsernne upozornit objednatele bez zbytecneho odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neuplnost a chyby projektove dokumentace vc. vYkazu vymer uvedenych 
v clanku I. odst. 1.1. smlouvy a dalslch plsernnych podkladu a pokynu, ktere dal 
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby 
zjistit pi'i vynalozenl odborne pece. 
Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedene dokumentace pro zadanl 
stavby vc. vYkazu vymer a dalslch plsemnych podkladu pfedanych objednatelem 
a pokynu objednatele pi'ekazejf v i'adnem provadenl dfla, je dodavatel povinen provadent 
dfla v nezbytnern rozsahu okarnzite pferusit, 0 teto skutecnosti je povinen ihned 
plsemne ve Ihute 3 pracovnfch dnu informovat jak IDS, tak osobu objednatele 
odpovednou ve vecech technickych die clanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formutafi) 
budou podrobne popsany problemy, branlcl v pokraeovanl pracl, Do doby plsernneho 
pokynu, jak bude pokracovano v odstranenl nevhodnosti, nedostatku, neuplnosti a chyb 
v uvedene zadavacl dokumentaci a v dalslch plsemnych podkladech predanych 
objednatelem nebo do doby zrneny pokynu objednatele nebo plsernneho sdelenl 
objednatele, ze objednatel trva na provadenl dfla podle uvedene zadavacl dokumentace, 
v pracfch pokracovat nebude. 0 dobu, po kterou bylo nutno provadenl dlla pferusit, se 
prodluzuie IhOty stanovena pro jeho dokoncenl. Dodavatel rna rovnez narok na uhradu 
nakladu spojenych s prerusenlm provadenl dfla. 
8.14.Jestlize dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v clanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 
nerna narok uhradu nakladu spojenych s prerusenlrn dfla. 
8.15. Zjistf-Ii dodavatel pi'i provaden! dfla skryte pi'ekazky, tykajfcf se mista, kde rna bYt dllo 
provedeno, a tyto pi'ekazky znemoznuli provedeni dfla dohodnutym zpusobem, je 
dodavatel povinen provadenl dna v nezbytnern rozsahu okarnzlte pferusit, 0 teto 
skutecnosti je povinen ihned plsernne ve Ihute 3 pracovnfch dnu informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovednou ve vecech technlckych die clanku VII. smlouvy. V tomto 
zapisu (torrnulari) budou podrobne popsany problemy branfcl v pokracovanl pracl. Do 
doby plsemneho pokynu, jak bude pokracovano v pracfch, budou tyto zastaveny. 
Oznarnenl 0 zastaveni praci musi bYt provedeno plsemne na formulafl, a to za 
podmfnek uvedenych v clanku II. odst. 2.5. teto smlouvy. Nesplnenl teto povinnosti rna 
za nasledek povinnost uhradit smluvnf pokutu die clanku II. odst. 2.6. smlouvy. 
8.16 .. Jestlize dodavatel neporusil svou povinnost die clanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pted 
zapocetlrn provadenl dlla pi'ekazky uvedene v clanku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nerna 
zadna ze stran narok na nahradu skody; dodavatel rna narok na cenu za cast dna, jez 
bylo provedeno do doby, nez pi'ekazky mohl odhalit pri vynalozent odborne pece. V 
Stranka 13 z 24 

opacnern pFipade odpovlda dodavatel objednateli za skodu, ktera mu v dusledku 
nemoznosti dokoncenl dila vznikne. 
8.17. Dodavatel nese nebezpecl skody na zhotovovanern dile. Nebezpecl skody na dlle 
prechazl na objednatele okamzlkern predan! dila dodavatelem objednateli a jeho 
pFevzeti objednatelem na zaklade plsernneho pfedavaclho protokolu. Jestlize vsak tento 
plsemny pfedavacl protokol obsahuje vady a nedodelky dlla, ktere je povinen odstranit 
dodavatel, pfechaz! nebezpeel na dile na objednatele az okamzlkem odstranenl techto 
vad a nedodelku dodavatelem. 
8.18. Dodavatel prohlasu]e, ze poddodavatel, jehoz prostFednictvfm prokazoval splnenl 
kvalifikacnfch pfedpokladu, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnenl v rozsahu, kterY je 
uveden v nabidce dodavatele, podane v ramci zadavaclho i'izeni na vyber dodavatele 
dlla die teto smlouvy. Dodavatel zajisti, ze poddodavatel, jehoz prostFednictvim 
prokazoval splnenl kvalifikacnfch preopoktad«, bude pi'i plnenl teto smlouvy poskytovat 
plnenl v rozsahu die pFedchozf vety. 
8.19. Zmena poddodavatelu oproti obsahu nabidky podane dodavatelem v zadavaclm Fizeni 
na dodavatele tohoto dila je mozna pouze na zaklade plsemneho souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpfrat v pflpade, ze novy 
poddodavatel bude splriovat veskere kvalifikacni pozadavky, ktere splrioval puvodnl 
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dane situaci disponovat, nebude 
vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provest jemu svei'enou cast dila vadne 
nebo jinym zpusobern naruslt realizaci dlla die teto smlouvy. 
8.20. Dodavatel se dale zavazuje, ze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl 
dostat svym povinnostem die § 219 ZZVZ. 
8.21. Dodavatel nesmf u dila provadet cinnost technickeho dozoru a tuto cinnost nesmi 
provadet ani osoba s dodavatelem propojena. 
8.22. Objednatel je opravnen kdykoliv behern provadenl dfla pferusit jeho provadenl nebo 
jeho provadenl ukoncit, V pFipade, ze k prerusenl provadenl dfla nedojde z duvodu na 
strane dodavatele, prodlouz] se 0 dobu pferusenl provadenl dlla a dalslch 7 dni termfn 
dokoncenl dlla, Pokud bude prerusenl provadenl dlla trvat dele nez 2 meslce, je 
dodavatel opravnen od tete smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnez opravnen kdykoliv 
snizit rozsah provadeneho dila 0 konkretnl polozky a casti, 
8.23. Dodavatel zajisti, ze osoby uvedene dodavatelem v seznamu vedoucich zamestnancu 
dodavatele nebo osob v obdobnern postaveni, jez budou odpovidat za realizaci 
pi'islusnych stavebnich pracl, predlozenem v nabfdce dodavatele na Vei'ejnou zakazku 
die zadavacl dokumentace Vefejne zakazky, se budou podilet na realizaci dfla, a to ve 
funkcfch, v jakych byly v seznamu uvedeny. Vymena takove osoby je mozna pouze 
s plsemnyrn souhlasem objednatele. 
8.24 Pi'i provadenl dila bude vzdy v do be od 8:00 do 16:00 pi'itomen zastupce 
stavbyvedoucfho v mfste stavby. 
Stranka 14 z 24 

Clanek IX. 
Pojisteni dodavatele 
	9.1. 	Dodavatel prohlasuje, ze ke dni uzavrenl tete Smlouvy ma uzavi'enou pojistnou smlouvu, 
jejimz predrnetem je pojisteni odpovednostl za skody zpusobene dodavatelem 
tretim osobam v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, vcetne rnoznych skod 
zpusobenych pracovniky dodavatele, minimalne ve vysi celkove ceny dila bez DPH 
uvedene v clanku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluucasti nejvyse 5 0/0, a jejiz prosta 
kopie nebo prosta kopie pojistneho certifikatu je pi'ilohou e. 4 teto Smlouvy. Dodavatel 
se zavazuje, ze po celou dobu trvanl teto Smlouvy a v primerenem rozsahu i po dobu 
zarucnl doby bude pojisten ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snlzenl 
poiistneho plnenl pod castku uvedenou v pfedchozl vete. 
	9.2. 	Oredne overene kopie pojistne smlouvy (pojistnych smluv) dodavatele, resp. 
akceptovane navrhy na uzavrenl pojlstne smlouvy ze strany pojisfovny die tohoto elanku 
rnusl bYt doruceny objednateli nejpozde]i pri prevzetl staveniste, pokud je jiz objednatel 
neobdrZel od dodavatele v rarnci zadavaclho i'izenL Na zadost objednatele je dodavatel 
povinen kdykoliv pozde]i predlozit uspokojive doklady 0 tom, ze pollstna smlouva 
(pojistne smlouvy) uzavrene dodavatelem jsou a zustavait v platnosti. 
	9.3. 	Dodavatel je povinen mit uzavreno platne stavebne montazni pojisteni pok..yvajici 
plnou hodnotu dlta se spoluucasti nejvyse 5 %, a to do predan! a prevzett 
dokonceneho dila. Presta kopie nebo prosta kopie poilstneho certiflkatu je 
pfllohou e. 4 teto Smlouvy (spolu s prostou kopil nebo prostou kopii pojistneho certflkatu 
pojisteni odpovednosti za skody die cl. 9.1.). 
	9.4. 	Dodavatel je povinen radne platit pojlstne tak, aby pojistna smlouva ei smlouvy sjednane 
die teto smlouvy ei v souvislosti s ni byly platne po celou dobu orovadent dila a v 
primerenem rozsahu i po dobu zaruky, V pripade, ze dojde k zaniku pojisten], je 
dodavatel povinen 0 teto skutecnosf neprodlene informovat objednatele a ve Ihute 3 
pracovnich dnu uzavflt pojistnou smlouvu ve vyse uvedenem rozsahu. Porusenl tete 
povinnosti ze strany dodavatele povazu]! strany teto smlouvy za podstatne porusenl 
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit. 
ClanekX. 
Splneni a predani dlla 
10.1. Dodavatel splni svou povinnost dokonelt duo tak, ze radne a uplne zhotovi dllo pod Ie 
elanku I. smlouvy a v souladu s elankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodelku, NedUnou soucastl radneho splnent dila je predant vsech plsemnych dokladu 
potrebnych k uzivani a provozovanl dlla, ktere se vztahuji k tern eastern dila, ktere 
zhotovoval nebo dodaval dodavatel ve smyslu teto smlouvy (a to i prosttednictvlrn svych 
poddodavatelu), a to jejich originalu. 
10.2. Objednatel je povinen radne a uplne dokoncene dflo bez vad a nedodelku prevzlt. 
Stranka 15 z 24 

10.3. Dokoncene dflo die clanku I. smlouvy bude predano objednateli na zaklade ptsemneho 
protokolu 0 predanl a pfevzeti dna podepsaneho opravnenymi zastupcl smluvnich stran 
ve vecech smiuvnlch.tdale jen .protokol"), V pfipade, ze se objednatel rozhodne dilo 
pfevzit s vadami a nedodelky nebranlcimi i'adnemu uzlvanl dna, budou v protokolu 0 
pfedanl dna uvedeny i takto zjistene vady a nedodelky nebranlcl radnemu uzivani dna a 
Ihuty pro jejich odstraneni, Objednatel je opravnen odmitnout pfevzetl dlla v pflpade, ze 
ma vady nebo nedodelky, Vadou se pritom rozumi odchylka v kvalite a parametrech dila 
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecne zavaznymi predpisy ci 
pokyny vyrobcu ci dovozcu materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v clanku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovnez pripadne odmitnuti pfevzetl dna bude zaznamenano 
v protokolu. 
10.4. Objednatel neni povinen dllo na zaklade protokolu pfevzit, jestlize dllo neni radne a 
uplne dokonceno, rna vady nebo nedodelky nebo spolu s dflern nejsou predany vsechny 
plsemne doklady popsane v clanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestllze se objednatel 
rozhodne dllo i presto pfevzlt, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvest tuto 
skuteenost a uvest v nem soupis vad a nedodelku se zavaznvm terminem jejich 
odstranenl dodavatelem, pripadne soupis chybejlclch plsemnych dokladu s terminem 
jejich dodanl dodavatelem objednateli. 
10.5. Pokud dodavatel neodstrani zavady nebo nedodelky na dlle v terminu uvedenem 
v predavaclm protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vYsi Kc 
1 000,- za kazdou vadu a kazdy den prodlenl. 
10.6. K predanl dna na zaklade protokolu vyzve dodavatel objednatele plsemne nejpozde] 5 
pracovnich dnu pfede dnem, kdy bude dllo pfipraveno k predant, tj. bude dokonceno, 
Objednatel zahajl pfevzetl dna do 5 pracovnich dnu od terminu navrzeneho 
dodavatelem. Objednatel rna vsak pravo odmitnout zahajenl pfejlrnaclho i'izeni, je-li 
termin navrzeny dodavatelem 0 vice nez 30 dnu drive, nez sjednany termin predanl dila. 
	10.7. 	K ptedanl dna pflzve objednatel osoby vykonavajici funkci rDS, pflpadne take 
autorskeho dozoru projektanta. 
ClanekXI. 
Zaruka za jakost dila a odpovednost za vady dila 
11.1. Delka zarucnl doby za jakost dna je sjednana na dobu 60 mesicu. Zarucn! doba poclna 
bezet dnem protokolarnlho pfedanl a pfevzetl dila. Pokud bylo dllo pi'evzato s vadami a 
nedodelky, pocina zarucnl doba bezet, az ode dne jejich uplneho odstranenl, Zarucn! 
Ihuta pro dodavky stroiu a zai'lzeni, na nez vyrobce tech to zai'izeni vystavuje 
sarnostatny zarucnl Ilst, se siednava v deice Ihuty poskytnute vYrobcem, neimene vsak 
v deice 24 meslcu, 
11.2. V prubehu zaruky za jakost dna bude mit dno vlastnosti vyplYvajici z teto smlouvy, tj. 
vyplyvajici z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dale bude mit obvykle vlastnosti 
pro vyuziti dna ke stanovenernu ucelu. 
11.3. Pokud se v prubehu zarucnl Ihuty vyskytly na dne vady, rna, objednatel pravo na jejich 
Stranka 16 z 24 

bezplatne cdstranenl, Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlene plsernne 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranenl beznych vad a nedodelku dila 
do 2 kalendatnlch dnu od dorucenl plsernne reklamace objednatele dodavateli a 
odstranit je nejpozdeii do 5 dnu ode dne dorucenl plsemne reklamace objednatele 
dodavateli, nebude-Ii mezi smluvnimi stranami dohodnuta delsi doba. V pi'ipade, ze se 
jedna 0 vadu, ktera brant uzivani dila (havarie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejimu 
odstranenl nejpozdeji do 12 hodin ode dne jejiho ohlasenl, do 24 hodin provest alespon 
takova opati'eni, aby dllo bylo mozne, byf s docasnyrn pi'imei'enym omezenim, opetovns 
uzlvat a vadu se zavazuje odstranit neipozde] do 20 dnu ode dne dorucenl plsemne 
reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytecneho odkladu, 
nejpozde]i vsak v terminech vyse popsanych, reklamovane vady odstranit, i kdyz 
neuznava, ze za vady odpovlda; ve spornych pi'ipadech nese naklady az do 
pravomocneho rozhodnuti 0 reklamaci dodavatel. Zaroven je dodavatel neipozde] do 10 
kalendatnlch dnu po obdrZeni plsemne reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci 
uznava, jakou lhutu k odstranenl vad navrhuje nebo z [akych duvodu odmlta reklamaci 
uznat. 
11.4. Jestlize v pripade reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranenl 
reklarnovanych vad a nedodelku ve Ihute stanovene v clanku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popripade je neodstrani v tam popsane IhUte nebo v tam popsane Ihute neprovede 
opati'eni potrebna k tomu, aby mohlo by! dilo dale uzlvano (v pi'ipade havarie branlcl 
uzivani dila), je objednatel opravnen nechat odstranit reklarnovane vady a nedodelky 
dna na naklady dodavatele jinou osobou. 
11.5. Naroky z odpovednosti ze zaruky za jakost dlla se nedotykajl naroku na nahradu skody 
nebo na smluvni pokutu. 
Clanek XII. 
Vypoved', Odstoupeni od smlouvy 
12.1. Objednatel rnuze odstoupit od teto smlouvy v pflpade, ze dodavatel porus! nekterou 
svou smluvni povinnost die tete smlouvy pi'esto, ze na moznost odstoupeni pro 
porusovanl povinnosti die tete smlouvy bude objednatelem pi'edem plsemne upozornen, 
popflpade pokud bude dodavatel v upadku ci jeho majetek bude postizen exekuci ci 
vykonem rozhodnuti. To neplati v pflpade clanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze 
pi'edem plsemne upozornit. Dodavateli budou v takovern pi'ipade uhrazeny (Jcelne 
vynalozsne naklady prokazatelns spojene 5 dosud provedenymi pracemi mimo nakladu 
spojenych s odstoupenim od smlouvy. soucasne objednateli vznika narok na uhradu 
vlcenakladu vynalozenych na dokoncenl dila uvedeneho v cl. II. tete smlouvy a na 
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenlm terminu jejiho dokoncenl ve stejnern rozsahu. 
Objednatel muze odstoupit od teto smlouvy i v pflpade, ze k porusenl smluvnich 
povinnosti dodavatele jeste nedoslo, ovsem z cinnosti dodavatele je zjevne, ze 
k takovemu porusenl dojde. 
12.2. Podstatnym porusenlrn teto smlouvy ze strany dodavatele se rozurnl zejrnena nesplnenl 
smluvnich terrnlnu podle teto smlouvy, nebo provadenl dila v rozporu s clankern VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a clankem IV. odst. 4.10. smlouvy. 
Stranka 17 z 24 

12.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnena oznaml strane povlnne plsemne. Ocinky 
odstoupeni nastanou dorucenlm die clanku 15.3 takoveho oznamenl na adresu povinne 
strane uvedenou v zahlavl tete smlouvy. 
12.4. Objednatel je dale opravnen od teto Smlouvy odstoupit, pokud vuci majetku dodavatele 
probiM lnsolvenenl i'izeni. 
12.5. Stanovi-Ii opravnena strana pro dodatecne plnenl IhUtu, vzrnka ji pravo odstoupit od 
smlouvy po marnem uplynuti teto Ihuty. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, plsemne 
prohlasl, ze svuj zavazek nesplni, muze opravnena strana odstoupit od smlouvy pi'ed 
uplynutim IhUty dodatecneho plneni, kterou stanovila, tzn. ihned pote, co prohlasenl 
povinne strany obdrZi. 
12.6. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vsechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu skody vznikle porusenlm 
smlouvy, i'esenf sporu mezi smluvnfmi stranami, naroku na smluvnf pokuty a jinych 
naroku, ktere podle teto smlouvy nebo vzhledem ke sve povaze maji trvat i po ukoncenl 
smlouvy. 
12.7. Objednatel je dale opravnen odstoupit od smlouvy v pi'ipade, kdy neni schopen uhradit 
sjednanou cenu dfla z duvodu nepi'idelenf financnlch prostredku nebo zmeny skladby 
rozpoctu a 5 tim souvisejici nemoznosti flnancovanl realizace dila. V takovem pi'ipade se 
strany dohodly, ze objednateli ve splnenl povinnosti ze smlouvy docasne nebo trvale 
zabranila mlmoradna nepi'edvfdatelna a neprekonatelna pfekazka vznlkla nezavisle na 
jeho vulL Dodavatel rna pak pouze narok na uhradu ceny do te doby dokoncenych castf 
dfla a dale na nahradu nakladu ucelne do te doby vynalozenych na poi'izenf 
rozpracovanych casU dfla. 
12.8. Objednatel je dale opravnen odstoupit od teto smlouvy, jestlize zjistf, ze dodavatel: 
a)	nabizel, daval, pi'ijimal nebo zprosti'edkovaval ureite hodnoty 5 cilem ovlivnit chovanl 
nebo jednan! kohokoliv, af jiz uredni osoby nebo kohokoliv jineho, pflmo nebo nepi'imo, 
v zadavaclm i'fzenf nebo pi'i provadenl tete smlouvy; nebo 
b)	zkresloval jakekoliv skutecnosf za ucelem ovlivnenf zadavaclho i'fzenf nebo provaden! 
teto smlouvy ke skode objednatele, vcetne uziti podvodnych praktik k potlacenl 
a snlzenl vyhod volne a otevi'ene souteze, 
12.9. Odstoupeni (zanik pray a povinnostf) nastane az splnenlm povinnostf vyplyvajfcfch 
z vyrovnanl smluvnfch stran. 
12.10. Smlouvu Ize dale ukoneit dohodou smluvnfch stran nebo pfsemnou vypovedi ze strany 
objednatele, a to i bez uvedenf duvodu, Vypovednf Ihuta einf v takovem pi'fpade 15 dnu ode 
dne dorucent vypovedi smluvnf strane. 
Stranka 18 z 24 

Clanek XIII. 
Smluvni pokuty a urok z prodleni 
13.1. V pripade, ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a predanlm dfla nebo jeho 
easti oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude urcena jako 
nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH, oznacene 
v elanku III. odst. 3.1. smlouvy. V pflpade, ze dodavatel prokaze. ze prodleni vzniklo z viny na 
strane objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatriovat, Dodavatel neni 
v prodleni, pokud nemohl plnit v dusledku vyssi moci. 
13.2. Smluvni pokuta za vcasne nevyklizeni staveniste je 0,05 % z ceny dna bez DPH za 
kazdy i zapocaty den prodleni dodavatele, nejvyse vsak 50 000,- Ke za den. 
13.3. Smluvni pokuta za nedodrZeni stanovene Ihuty pro odstranenl reklamovanych vad 
v obdobi zarucnl Ihuty, ktere brant radnemu uzivani dna nebo hrozi nebezpecl skody velkeho 
rozsahu, ve vysi 10.000,- Ke za kazdou vadu a kazdy den prodleni. 
13.4. Smluvni pokuty die teto smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jake vysi 
vznikne objednateli skoda, kterou je opravnen objednatel vyrnahat sarnostatne a bez ohledu 
na jeji vysi. 
13.5. Smluvni strany se dohodly, ze v pripade prodleni objednatele s uhradou ceny dna nebo 
jejl casti je objednatel povinen uhradit dodavateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy den prod len I, 
13.6. Je-ll uhrada faktury objednatelem vazana na obdrZeni flnanenlch prostfedku z dotace 
udelene z rozpoctu stredoceskeno kraje, statnlho rozpoctu Ceske republiky, neni objednatel 
povinen hradit orok z prodleni za nejvyse 180 dnu prodleni, pokud prokaze, ze tyto financnl 
prostredky nerna k dispozici. Objednatel je vsak povinen nejpozdeji do 10 pracovnich dnu od 
obdrZeni techto prostredku poukazat dluznou castku na bankovni ucet dodavatele. Neueini-li 
tak, podleha povinnosti zaplatit urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne castky za kazdy 
zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni Ihuty po obdrZeni flnancnlch prostredku od 
poskytovatele dotace. 
13.7. Urok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi 
platbu dodavateli pod Ie bodu elanku IV., bodu 4.7. tete Smlouvy. 
13.8. Objednatel neni povinen hradit urok z prodleni v pripade, ze cena za dilo, ci jeji cast, 
neni uhrazena ve Ihute splatnosti z duvodu zadrZeni platby pro ueely zajisteni pray 
Objednatele plynoucich z teto Smlouvy. 
ClanekXIV. 
Bankovni zaruka 
14.1. Dodavatel poskytne pri podpisu protokolu 0 predan! a prevzetl dila objednateli 
bankovni zaruku ve vysi 5 % z celkove ceny dila bez DPH die clanku III. odst. 3.1 Smlouvy za 
Stranka 19 z 24 

radne odstranenl vad uplatnenych objednatelem vuci dodavateli z titulu odpovednosti za vady 
dna v zarucnr dobe, 8ankovni zaruka musl by! platna mlnimalne po celou dobu zarucnl doby. 
14.2. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnen uplatnit v prfpadech, ze dodavatel 
nebude plnit sve povinnosti vyplyvajici ze zaruky za dflo, ke kteryrn je ze smlouvy povinen. 
14.3. Pred uplatnenlrn plnen! z bankovni zaruky oznarnl objednatel plsernne dodavateli vysi 
pozadovaneho plnenl ze strany banky. Dodavatel je povinen dorucit objednateli novou zaruenl 
listinu ve znenl shodnern 5 ptedchozl zarucnl listinou, v puvodnl vysi neipozde] do 7 
kalendafnlch dnu od jejiho uplneho vycerpanl. 8ankovni zaruka bude uvolnena objednatelem 
do 10 dnu po uplynuti zarucnl doby a vyporadanl vseoh zavazku mezi dodavatelem a 
objednatelem. 
14.4. 8ankovni zaruka zajisfuje i'adne odstranenl vad uplatnenych objednatelem vuci 
dodavateli z titulu odpovednosti za vady dlla v zarucnl dobe, pricemz platl, ze: 
a) v prlpade jakekoll zmeny zarucnl Ihuty je dodavatel povinen platnost bankovni zaruky 
prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zarucn] Ihuty; 
b) pravo ze zaruky je objednatel opravnen uplatnit v prlpadech. ze dodavatel neodstranil 
vadu dlla zpusobern a v dobe, k nimz je podle pi'islusnych ustanoveni smlouvy 0 dflo k 
odstranovanl vad v zarucnl Ihute povinen; 
	c) nepfedlozenl 	bankovni 	zaruky 	v 	pozadovanern 	terminu 	je 	duvodem 
k neprevzetl dokonceneho dfla a uplatnenl sankci pro nedodrZeni terminu dokoncenl 
a pfedanl dlla. 
14.5. Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskere dals! vydaje vznikle v souvislosti 
5 plnenlrn povinnostl die tohoto clanku nese Dodavatel. 
ClanekXV. 
Zaverecna ustanoveni 
15.1. V pi'ipade zrneny udaju uvedenych v zahlavl smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je 
povinna ta smluvni strana, u ktere zmena nastala, informovat 0 ni druhou smluvni 
stranu, a to prukaznym zpusobern a bez zbyteeneho odkladu. V prlpade, ze z duvodu 
nedodrZeni nebo porusenl teto povinnosti dojde ke skode, je strana, ktera skodu 
zpusobila, tuto v plnern rozsahu nahradit. 
15.2. Veskera textova dokumentace, kterou pri plneni smlouvy predava ci predklada dodavatel 
objednateli, musi by! predana ci predlozena v ceskem jazyce. 
15.3. Pisemnosti mezi stranami teto smlouvy, 5 jejichz obsahem je spojen vznik, zrnena nebo 
zanik pray a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejmena odstoupeni od smlouvy ci 
vypoved') se dorucuil do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruclt pisemnost do 
vlastnich rukou druhe smluvni strane je splnena pf dorucovanl postou, jakmile posta 
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorucl, Ucinky dorucenl nastanou i tehdy, 
jestlize posta pisemnost smluvni strane vratl jako nedorucitelnou a adresat svym 
jednantrn dorucenl zmai'iI nebo pi'ijeti pisemnosti odmltl. 
Stranka 20 z 24 

15.4. Jakakoliv ustnl ujednanl pi'i provadent dlla, ktera nejsou plsemne potvrzena 
opravnenyrnl zastupci obou smluvnfch stran, jsou pravne neucinna. 
15.5. Smlouvu 0 dllo Ize rnenlt pouze plsemnymi dodatky uzavrenyml v souladu se zakonem 
a postupem popsanym v cl. III odst. 3.3. a podepsanymi statutarnlmi zastupci obou 
smluvnfch stran. To se tyka veskerych dodatecnych stavebnfch pracl, menepracl a 
zrneny dlla vcetne pflpadnych zmen stavby oproti projektove dokumentaci. Tyto musl 
by! soucasne pi'edem odsouhlaseny technlckyrn zastupcern objednatele. 
15.6. Ostatnf vztahy smluvnfch stran v teto Smlouve vyslovne neupravene se i'fdf zakonern 
c. 89/2012 Sb, obcansky zakonlk. 
15.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oberna smluvnfmi stranami a uclnnosti 
dnem jejfho uvei'ejnenf v registru smluv (die zakona c. 340/2015 Sb. 0 registru smluv), 
ktere provede objednatel. 
15.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickem oriqinalu, kterY obdrZf kazda ze smluvnfch 
stran. 
15.9. Smluvnf strany prohlasuil, ze si Smlouvu pi'ecetly, s obsahem souhlasl a na dukaz jejich 
svobodne, prave a vazne vule pi'ipojujf sve podpisy. Uzavi'enf teto Smlouvy bylo 
schvaleno usnesenfm Rady Sti'edoceskeho kraje ze dne 16. 3. 2020, c. usnesenf 020- 
11/2020/RK 
15.10. Veskera uiednanl, technicke podmfnky a jina ustanovenf uvedena v nabfdce 
dodavatele, podane v rarnci zadavaclho i'fzenf na vyber dodavatele dlla die teto 
smlouvy, jsou nedflnou soucastl teto smlouvy, pokud tato smlouva nestanovf jinak (viz 
cl. I smlouvy). 
15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zakonern c.106/1999 Sb., 0 
svobodnem pi'fstupu k informacfm, v platnem znenl, souhlasl, aby vei'ejny zadavatel 
(objednatel) uvei'ejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavi'enou na vei'ejnou zakazku 
vcetne vsech jejfch zrnen, dodatku a pflloh. Dale Dodavatel souhlasf se zvefejnenlm 
teto Smlouvy Objednatelem v registru smluv pod Ie zakona c. 340/2015 Sb. 
15.12. Nedflnou soucast teto smlouvy tvorf nasleduiicl prflohy: 
Pi'IIoha c. 1: Harmonogram plnenl 
Prfloha c. 2: Formulaf pro ohlasent zmen stavby 
Pi'Uoha c. 3: Oceneny vykaz vymer 
PrUoha c. 4: Pojistna srnlouva/pojistny certinkat - pojistenf odpovednosti za skodu a 0 
stavebnfm a montaznlrn pojistenl 
Prfloha c. 5: Seznam poddodavatelu 
Stranka 21 z 24 

V Ledci nad Sazavou 

Dodavatel 

WANDEL CZECH s.r.o. 

Martin Vavi'icka, jednatel 

Ve Stranclclch 

Objednatel 

Detske centrum stranetee, p.o. 

Mart i n Digitalne podepsal 
Martin Vavflcka 

Vavf CV ka Datum: 2020.03.31 
11 :24:51 +02'00' 
/ 

MUDr. Pavel Biskup, i'editel PO 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(1013,0);(1013,20847);(0,20847);(0,21473);(21489,21473)posrelh0posrelv0pib

Stranka 22 z 24 

MUDr. 
Pavel 
Biskup 

Digitalne 
podepsal MUDr. 
Pavel Biskup 
Datum: 
2020.04.06 
12:47:45 +02'00' 

Priloha c. 2 
FORMULAR PRO OHLASENi ZMEN STAVBY 
"Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady - 
Technickohospodarsky objekt" 
Urceno: 
(v kopii vecne prislusny odbor) 
Cislo 500: 
Termin plneni: 
Celkova cena dila: 
Dodavatel: 
ICO: 
Opravnena osoba: 
Telefonni spojeni: 
Popis predmetu informace: 
Popis problemu: 
Ceho se dodavatel domaha: 
Nejzazsi termin pro uzavfenl dohody 0 zmene v realizaci dila: 
Datum, pod pis opravnene osoby 
Datum, potvrzeni pfevzetl podatelny objednatele: 
Stranka 23 z 24 

Stranka 24 z 24 

10 mesfcu 			CENTRUM CHOCERADY I STAVEBNf UPRAVY OBJEKTU SO.02 I TECHNICKO - HOSPODARSKY BLOK 			
HSV - Prace a dodavky HSV 												
1 . Zemni prace 												
2 - Zakladani 												
3 - Svisl. a kampl.tn; kanstrukce 												
4 • vodorovee konstrukce 												
5 • Komunikace pozemni 												
6 - Upravy povrchu, podlahy a os.zav~ni vVplnl 												
9 - Ostatni konstrukce a prace, bour~ni 												
997 - Pre.un .ute 												
998 - Presu n hmot 											I 	
PSV - Pr~ce a dod~vky PSV 												
711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 												
712 - Povlakove krytlny 											I 	
											I 	
713 - Izolace tepelne 												
721 - Zdravotechnika 											, 	
731 - Ustrednl vyt~penl 												
741 - Elektroinstalace - silnoproud 												
742 - Elektroinstalace - slaboproud 											, 	
751- Vzduchotechnika 											: 	
761 - VVplne otvoru 												
762 - Konstrukce tesarske 												
763 - Konstrukce suche vystavby 												
764 - Konstrukce klempilske 											, 	
765 - Krytina skladana 												
766 - Konstrukce truhlarske 												
767 - Kanstrukce zameenicke 												
771- Padlahy z dlaidle 												
772 - Podlahy z kamene 												
777 - Podlahy lite 											, 	
781 - Dokoncovaci prace - obklady 												
782 - Dokoncovaci prate - obklady z kamene 												
783 - Dokoncovaci prace - natery 											, 	
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 											I 	
VRN - VedleJ~i rozpoftove naklady 											! 	
										----- 	I 	
VRN1- Pruzkumne, geodeticke a projektove prace 								•• , •• '" •. :::;t &.roO 			
								;iickova-~IJ~ 	~ 	I 	
VRN3 - Zanzen; staveni~te 								_5;i41111..d~~ , 	,,,1<\77955 		
								J!::,2!1'J, N' 	~~ 		
								Tel. 			

REKAPITULACE STAVBY 

K6d: 
Stavba: 

Chocerady 
Centrum Chocerady stavebni upravy objektu SO 02 - Technicko hospodilisky blok - zmena 

Zpracovatel: 
Hana Pejsova 
Zadavatel: 
D~tske centrum Strantice,Hrdimi 175,25163Stran~ice 
ucnazee: 
Vypln udaj 
Projektant: 
TRANSPARENT studio s.r.o., Pplk.Sochora 34,Praha 7 
KSO: 
Misto: 
Poznamka: 
Cena bez DPH 
DPH zakladnl 
snlzena 

st.pozemek ~.175 a pozemky p.~.244/1 0, 11,12,13 
Sazba dane 
21,00% 
15,00% 

Zaklad dan~ 
9212963,81 
0,00 

CC-CZ: 		
Datum: 	3.12.2018 	
Ie: 	43750672 	
ole: 		
Ie: 	Vyph'\ udaj 	
ole: 	Vyph'\ udaj 	
Ie: 	24306649 	
ole: 	CZ24306649 	
Ie: 		
ole: 		
9212963,81 
VySe dan~ 
1934722,40 
0,00 

	I Cena s DPH 	v 	CZK 	------11147·6-86,21-1 
Strana 1 z 2 

REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRAci 

K6d: 
5tavba: 

Chocerady 
Centrum Chocerady stavebni upravy objektu SO 02 • Technicko hospodarsky blok • zmena 

Mfsto: 
Zadavatel: 
uchazee; 
K6d 

sLpozemek c.175 a pozemky p.c.244/10,11,12,13 
Detske centrum Strancice.Hrdinu 175,25163Stran(:ice 
Popis 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

3.12.2018 
TRANSPARENT studio s.r.o., 
Pplk.Sochora 34,Praha 7 
Hana Pej~ova 
Cena bez DPH [CZKj 	Cena s DPH [CZKj 

Naklady z rozpoctu 

9212963,81 

11 147686,21 

Chocerad 
y 

Centrum Chocerady stavebni upravy objektu 
SO 02 • Technicko hospodarsky blok • zmena 

Strana 2 z 2 

9212963,81 

11 147686,21 

KRyci LIST SOUPISU PRAci 
Stavba: 
Centrum Chocerady stavebni upravy objektu SO 02 - Technicko hospodarsk9 blok - zmena 

Zadavatel: 
Oetske centrum Straneice.Hrdinu 175,25163Stran~ice 
Projektant: 
TRANSPARENT studio s.r.o., Pplk.Sochora 34,Praha 7 
KSO: 
Misto: 
Uchazee: 
Vyplfl udaj 
Zpracovatel: 
Hana Pej!\ova 
Poznarnka: 
Cena bez DPH 

st.pozemek ~.175 a pozemky p.~.244/10, 11,12,13 

CC-CZ: 		
Datum: 	3.12.2018 	
Ie: 	43750672 	
ole: 		
Ie: 	Vyph'l ude] 	
ole: 	Vyplfl udaj 	
Ie: 	24306649 	
ole: 	CZ24306649 	
Ie: 		
ole: 		
9212963,81 

OPH zakladn! 
sni~ena 
[Cenas DPH 

Strana 1 z 25 

	Zaklad dane 	Sazba dane 
	9212963,81 	21,00% 
	0,00 	15,00% 
v CZK 

Vy!\edane 
1934722,40 
0,00 
11147686,21 

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRAci 

Stavba: 
Misto: 

Centrum Chocerady stavebni upravy objektu SO 02 - Technicko hospodarsky blok - zmena 
st.pozemek 1:.175 a pozemky p.I:.244/1 0,11,12,13 

Datum: 
} 

3.12.2018 
TRANSPARENT studio 

Zadavatel: 
ucnazec: 
K6d dilu - Popis 

D~tske centrum Strancice.Hrdinu 175,25163Stranl:ice 
Vyph'l uda] 

Projektant: 	s.r.o., Pplk.Sochora 
34,Praha 7 
Zpracovatel: 	Hana Pejiiova 
Cena celkem [CZK] 

NlIklady ze soupisu praci 
HSV - Prace a dodavky HSV 
1 - Zemni prace 
2 - Zakladan! 
3 - Svisle a kompletni konstrukce 
4 - Vodorovne konstrukce 
5 - Komunikace pozemni 
6 - Opravy povrchu, podlahy a osazovanl vyplni 
9 - Ostatni konstrukce a prace, bouranl 
997 - Pi'esun sute 
998 - Pi'esun hmot 
PSV - Prace a dodavky PSV 
711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 
712 - Povlakove krytiny 
713 - Izolace tepelne 
721 - Zdravotechnika 
731 - Osti'edni vytapeni 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 
742 - Elektroinstalace - slaboproud 
751 - Vzduchotechnika 
761 - Vyplne otvoru 
762 - Konstrukce tesatske 
763 - Konstrukce suche vystavby 
Strana 2 z 25 

9212963,81 
3 147357,09 
86143,62 
575874,51 
705296,94 
328673,77 
170332,51 
422364,96 
295919,61 
385840,12 
176911,05 
5756439,89 
152878,05 
73454,16 
325303,13 
968678,46 
69840,00 
649142,41 
406762,00 
541607,00 
405000,00 
433572,00 
281213,65 

764 - Konstrukce klemplrske 
765 - Krytina skladana 
766 - Konstrukce truhlarske 
767 - Konstrukce zamecnicke 
771 - Podlahy z dlazdlc 
772 - Podlahy z kamene 
777 - Podlahy lite 
781 - Dokoncovacl prace - obklady 
782 - Dokoncovacl prace - obklady z kamene 
783 - Dokoncovacl prace - natery 
784 - Dokoncovacl prace - malby a tapety 
VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady 
VRN1 - Pruzkurnne, geodeticke a projektove prace 
VRN3 - Zai'izeni staveniste 
VRN4 - Inzenyrska cmnost 
VRN5 - Financnl naklaoy 
VRN6 - Uzemni vi ivy 

Strana 3 z 25 

269183,11 
10840,60 
299875,14 
391 300,00 
145222,90 
68025,22 
62896,34 
75605,92 
3476,25 
49441,85 
73121,70 
309 166,83 
65000,00 
93910,32 
37564,13 
46955,16 
65737,22 

SOUPIS PRAci 
Stavba: 
Misto: 
Centrum Chocerady stavebni upravy objektu SO 02 • Technicko hospodarsky blok • zmena 
st.pozemek c.175 a pozemky p.c.244/10, 11, 12,13 
Datum: 
Zadavatel: 
Detske centrum Strancice,Hrdinu 175,25163Strancice 
3.12.2018 
TRANSPARENT studio 
Projektant: 	s.r.o., Pplk.Sochora 
34,Praha 7 
Zpracovatel: 	Hana Pej~ova 
Uchazec: 
Vyph''1 uda] 
PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [ClK] Cena celkem [ClK] 
Naklady soupisu celkem 

9212963,81 
3147357,09 
86143,62 

D 	HSV 
1 
Prace a dodavky HSV 
11310733R 	IOdstraneni podkladu z asfalbetonu tl150 mm strojne pi do 50 m2 	1 m2 	25,2001 	262,001 	6602,40 

	W 	14,000*1,8 	25,200 
1 2 1 K 1122201101 	IOdkopavky pod nadbetonovavkou 	1 m3 	26,4801 	144,001 	--3813,12] 
	W 	16*(1,1+0,8)*0,5*0,7 		10,640 
	W 	16*1,1*1,8*0,5 		15,840 
	W 	soucet 		26,480 
131 K 1122201102 	IOdkopavky nezapatenevhominetr.30bjemdo1000m3 	1 m3 1 	1 08,360 [---94.50[ 	10240,021 
	W 	6*2,1*8,6 		108,360 
141 K 1131201102 	IHloubenljamnezapa1enychvhominetr.30bjemudo1000m3 	1 m3 1 	220,2241 	--174,001 	38318,981 
	W 	(2,8+1,8)*0,5*1,6*17 		62,560 
	W 	0,8*0,83*0,5*17 		5,644 
	W 	(2,7+1,3)*0,5*0,9*(17-7) 		18,000 
	W 	(2+1,1)*0,5*2,9*7 		31,465 
	W 	(4+1,8)*0,5*0,9*14 		36,540 
	W 	(2,7+1,3)*0,5*0,9*5,5*2 		19,800 
	W 	1,2*0,9*(5,5*2+8,5) 		21,060 
	W 	13*2,15*0,9 		25,155 
	W 	soucet 		220,224 
1 5 1 K 1162201102 	Ivodorovne pfemisteni do 50 m vykopkulsypaniny z hominy tf. 1 a14 - na pozemku 	1 m3 	86,2481 	39,101 	3 372,301 
	W 	86,248 		86,248 
1 6 1 K 1174101101 	Izasyp jam kolem objektu sypaninou se zhutnenim 	1 m3 1 	242-;3-361 	95,001 	23021,921 
	W 	220,224 		220,224 
	W 	108,36 		108,360 
	W 	Mezisoucet 		328,584 
	W 	-(7,336+28,985+7,803+5,343+30,525*0,46) 		-63,509 
	W 	-1,53*1,28*1,5 		-2,938 
	W 	-1,8*1,3*2,2 		-5,148 
	W 	-9,845 		-9,845 
	W 	-32,05*0,3*0,5 		-4,808 
	W 	Mezisoucet 		-86,248 
	W 	soucet 		242,336 
1 7 1 K 1181951102 	1 Uprava plane v homine tf. 1 aZ4 se zhutnenim 	1 m2 1 	67,9721 	11,401 	-774,881 
	W 	VP04 
Strana 4 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZKj 	
	48,030 			
	19,942 			
	67,972 			
			575874,51 	
		183,001 	4575,00 	
w 
w 
w 
1,5*(4+28,02) 
1,3*(15,34) 
soucet 
2 
Zakladanl 

1390,00 
3639,02 

21275521R 
Trativody z drenaznrch trubek plastovych f1exibilnrch 0 100 mm vC:: loze a obalenr geotextnrr 
271532212 
Podsyp pod zakladove konstrukce se zhutnentm z hrubeho kameniva frakce 16 az 32 mm 
sch2 
w 	1,49*(0,5+2,15+0,5'2)'0,2 
w 	sch3 
w 	1,5'(1,1+3+0,5'2)'0,2 	1,530 
w 	soucet 	2,618 
1,088 
[ 101 K 1273322511 	Izakladove desky ze ZB se zvy~enymi naroky na prostredr tr. C 25/30-XC2,XA1 	1 m3 1 	35,3251 	2920,001 	103149,001 
	w 	objekt podlaha 
	w 	16,09*3,6*0,18 
	w 	0,55*0,1*16,09 
	w 	(6,42*13,36-0,6*0,6+1,1*1,1)'0,18 
	W 	0,25*0,12*(1,1 +0,6)*2 
	W 	MezisouC::et 
	W 	05-2 
	W 	(6,915*1 +6,915*1,5)*0,3 
	W 	05-3 
	W 	(1,5*0,8+2,5*1)*0,3 
	W 	0,64*1*0,4 
	W 	2,05*1,3*0,4+2,05*0,3*0,3 
	W 	Mezisouc::et 
	W 	kanalVZT 
	W 	1,28*2,02*0,2 		0,517 
	W 	soueet 		35,325 
10,426 
0,885 
15,592 
0,102 
27,005 
5,186 
1,110 
0,256 
1,251 
7,803 
1 11[K[273351121 	Izrrzenr bednenr zakladovych desek 	1 m2 1 	31,4411 	3s~ooT 	11350,201 
	W 	objekt 
	W 	0,18*(3,6*2+16,09+6,42*2+13,36*2) 
	W 	0,3*0,6*4+0,3*1,1*4 
	W 	05-2 
	W 	0,3*2*(6,915+6,915+1,5) 
	W 	05-3 
	W 	0,3'2'(1,5+2,5+0,8+0,5+1'0,5) 
	W 	0,4'2'(1,3+2,69) 
	W 	0,3'2*(2,05+0,3) 
	W 	kanalVZT 
	W 	0,2*2,02'2 
	W 	soucet 
11,313 
2,040 
9,198 
3,480 
3,192 
1,410 
0,808 
31.441 
12 	K 	273351122 	Odstranenr bednenr zakladovych desek 	m2 	31,441 	103,00 	3238,42 	
13 	K 	273361821 	Vyztuz zakladovych desek a stropu betonarskou oceli 10 505 (R) 	t 	4,549 	40600,00 	184 689,40 	
14 	K 	27431381R 	Zakladove pasy z betonu tr. C 25/30-XC2,XA1 	m3 	54,261 	2960,00 	160612,56 	
W 
W 
W 
0,8*0,9*(2,9*2+16,49+0,8) 
0,8*0,9*(0,43+13,56'2+5,02*2) 
0,6*0,3*17,97 
16,625 
27,065 
3,235 
	W 	u rampy 
	W 	0,7*0,8*13,1 	7,336 
	W 	soucet 	54,261 
1151 K 1274351121 	Izrrzenr bednenr zakladovych pasu rovneho 	1 m2 1 	142,0861 	--m.oor 	40778,681 
Strana 5 z 25 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(10726,0);(0,0);(0,21486);(10726,21486);(10726,18126);(21482,18126);(21482,0);(20362,0);(20362,4024);(10726,4024)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;20;(17817,0);(7751,0);(7751,6069);(2229,6069);(2229,11650);(0,11650);(0,21327);(1031,21327);(1031,16574);(2229,16574);(2229,21498);(3065,21498);(3065,19198);(14778,19198);(14778,21498);(17120,21498);(17120,16574);(21499,16574);(21499,12471);(17817,12471)posrelh0posrelv0pib
PC Typ 	Ked 	
w		
w 		
w 		
w 		
w 		
w 		
	274351122 	
	27531381R 	
w 		
W 		
Popis 
MJ 
Mnozstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
u rampy 
0,8*13,1*2+0,7*0,8*2 
zeloet pasy 
0,9*2*(2,9*2+16,49+0,8+0,43+13,56*2+5,02*2) 
0,3*2*17,97 
soueet 
22,080 
Odstranenl bednenl zaklad0vYch pasu rovneho 
58,10 
8255,20 
2890,00 
15441,27 
275351122 
62,60 
1 597,36 
279361821 
vyztuz zakladovych zdl nosnych betonarskou ocell1 0 505 - ztracene bednenl 
39200,00 
31046,40 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21470);(10441,21470);(10441,20545);(21487,20545)posrelh0posrelv0pib
3 
Svisle a komoletnl konstrukce 

705296,94 
311113142 	I Nosna zed tl do 200 mm z hladkych tvarnic ztraceneho bedneni vcetne vYplne z betonu If. 20/25 	I m2 I 	22,9131 	882,001 	20209,27 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(21236,12765);(21236,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	W 	OS-3 
	W 	6,69*0,75 	5,018 
	W 	3,8*(0,8*2+2,05)-0,55*1,35 	13,128 
	W 	kanalVZT 
	W 	1,18*2,02*2 	4,767 
	W 	soucet 	22,913 
1221 K 1311113144 	INoSn~t1d030o-mruhladkYChtvarnicztracen~hOb-ednen'vcetnevYPlnezbetOnutu::20/25 	I m2-r 	97,9221 	1 m.OOr 	- 124360-:941 
	W 	OS-2 
	W 	6,915*(1+1,85)*0,5+(1,85+2,6)*0,5*6,115+2,6*0,8 		25,540 
	W 	OS-3 
	W 	1,5*0,95+2,5*1,7+2,69*2,6 		12,669 
	W 	-(0,6*0,9+0,26*2,02) 		-1,065 
	W 	obvodove 
	W 	1*17,97+2,68*1,55 		22,124 
	W 	obvodova 
	W 	2,61*(6,52+8,29) 		38,654 
	W 	soueet 		97,922 
[23ft< P'12351-45 	IZdivojednovrstv~icihel brou~enych pfesPWdOP15 natenkO;;-rstvou maltutl2SOmm··· 	---- ur m2 I 9(),4541 	930,001 	84122,221 
	W 	2,68*(4,8-1,55+4,8+15,59) 	63,355 
	W 	-1,1*2,3*7 	-17,710 
	W 	2,61*(4,9+6,37+12,81) 	62,849 
	W 	-(5,1*2,3+1,8*0,7*3+1,1*2,3) 	-18,040 
	W 	soucet 	90,454 
I 241 K 1317121101 	I Montaz prefabrikovanych prekladu delky do 1500 mm 	I kus I 	6,0001 	160,001 	960,001 
	W 	PR03 
6 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21493);(10441,21493);(10441,20871);(21487,20871)posrelh0posrelv0pib
593210R1 	pfeklad ZB vel100x190x1000 mm 	480,00 	2880,00 	
317121102 	Montaz prefabrikovanych prekladu delky do 2200 mm 	200,00 	400,00 	
W 	PR04 			
	2 			
593210R2 	pfeklad ZB vel100x190x1750 mm 	920,00 	1840,00 	
317168012 	Pfeklad keramicky plochy ~ 115 mm dl1250 mm 	281,00 	2248,00 	
	Strana 6 z 25 		

PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZK) 	Cena celkem [CZK) 
	w 	~m 	~~ 
	W 	8 
1 291 K 1317168015 	- IPrekladkera~i~l<iPiO~115~m dl2000 mm 	1 kus 1 	1,0001 	397,001 	moDI 
	W 	PR02 
	W 	1 		1,000 
1 3() I i(-j32732412R 	10peme zdi ze 28 odolneho proti agresivnfmu prostredf tr. C 25/30-XC2,XA1 	I m3 I 	9,8451 	2950,001 	29042,751 
	W 	OS-1 
	W 	12,92*0,84*0,30 		3,256 
	W 	(1,85+1,15)*0,5*12,92*0,34 		6,589 
	W 	soucet 		9,845 
I 31 I K 1327351211 	18ednenf opernych zdf svislych i sklonenyeh zrfzenf 	I m2 I 	48,0361 	626,001 	30070,541 
	W 	0S-1 
	W 	19,38*2 
	W 	0,34*(1,85+1,15) 
0,30*2*(0,84+12,92) 
soueet 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21475);(10726,21475);(10726,21002);(21482,21002)posrelh0posrelv0pib
327351221 	18ednenf opernych zdf svislych i sklonenych odstranem 

303,00 
14554,91 
W 	OS-01 at 03 
W 	4,609 	4,609 
327361016 	IVyztut opernych zdf nad 12 mm z betonarske oeeli 10505 
38800,00 
178829,20 
1341 K 1342244211 	Iprfckazcihelbrou~enychnatenkovrstvoumaltutlou~fky115mm 	I m2 I 	91,4191 	·571,001 	52200,251 
	W 	2,68*(3,35*4+2,05+1,15+1,25) 		47,838 
	W 	-(1,38+1,58*3) 		-6,120 
	W 	1,1*1,45*5 		7,975 
	W 	2,81*(2,93*3+2,83+6,6) 		51,198 
	W 	-(1,38+1,58*2+1,78+1,6*1,97) 		-9,472 
	W 	soucet 		91,419 
I 351 K 1345321515 	lifdky ~tikov~ ~~iBtr~C-25/3O::XC-1- ---- ------------ 	I m3 I 	12,6551 	3 320~6!}[----- - 42 014~661 
	W 	0,65*2*(16,09+4,68+6,72)*0,2 		7,147 
	W 	0,55*2*(6,42+13,22)*0,2 		4,321 
	W 	0,65*(1,515+0,565+3,165+6,165)*0,16 		1,187 
	W 	soucet 		12,655 
[361 K 1345351005 	Izrfzenf bednenf plnostennych zfdek atikovych 	m2 I 	129,5161 	404,001 	52324,461 
	W 	2*(7,417+57,341) 		129,516 

345361821 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(0,0);(0,21462);(237,21462);(237,11459);(21494,11459)posrelh0posrelv0pib
Vyztut zfdek atikovych betonarskou oeeU 10505 

100,00 
12951,60 
K 1345351006 
49200,00 
55891,20 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21470);(11016,21470);(11016,20545);(21487,20545)posrelh0posrelv0pib
4 
Vodorovne konstrukce 

328673.77 
	W 	5,43*16,25*0,18 
	W 	6,53*13,62*0,2 
	W 	soueet 	33,671 
411321414 	IStropy deskove ze 2B tr. C 25/30-XC1 	1 m3 1 	33,6711 	3100,001 	104380,10 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,16713);(20729,16713);(20729,21483);(21489,21483)posrelh0posrelv0pib
I 40 I K 141132141R 	IStropy deskove ze 2B tr. C 25/30-XC2XA1 	m3 I 	0,3881 	34ci6,00r 	1 319,201 
	W 	kanalVZT 
	W 	1,28*2,02*0,15 		0,388 
	W 	soucet 		0,388 
1411 K 1411351011 	Izrfzenfbednenfstropu deskovychtldo25 em bezpodpeme kee 	1 m2 1 	179,7631 	344,001 	61838,471 
	W 	kanalVZT 
	W 	1,28*2,02 		2,586 
	W 	objekt 
Strana 7 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
MnozsM J.cena [CZK) 	Cena celkem [CZK) 
kanalVZT 
1,28*2,02 
soueet 

103,00 
18515,59 
88,238+88,939 
soucet 
w 

411351012 
Odstraneni bednenl stropu deskovYeh tl do 25 em bez podperne kee 
411354311 
Zrlzenl podperne konstrukce stropu vY~ky do 4 m tI do 15 em 
135,00 
349,11 
411354312 
Odstranenl podperne konstrukee stropu vY~ky do 4 m II do 15 em 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,20545);(20979,20545);(20979,21495);(21491,21495)posrelh0posrelv0pib
39,60 
102,41 
w 

Zrlzenl podperne konstrukee stropu vY~ky do 4 m tI do 25 em 
155,00 
27462,44 
411354313 
objekl 
	W 	88,238+88,939 	177,177 
i4sTi<1417321414 	IZlu;tujlel vence a prekladu ze ZB tr. C 20f25-XC1 	---- n 	---- - - 	1 m3 1 	4,5411 	3040,001 	13804,641 
	W 	0,3*0,16*16,09 				0,772 
	W 	0,25*0,16*16,09 				0,644 
	W 	0,25*0,2*4,8*2 				0,480 
	W 	0,25*0,2*4,9 				0,245 
	W 	0,4*0,2*(7,9+6,52) 				1,154 
	W 	0,25*0,26*(6,37+12,8) 				1,246 
	W 	soueet 				4,541 
[471 K 1417351115 	IZrlzenlbednenlztu;tUjlelehVeneuaprekladu 	I m2 I 	34,3591 	304,001 	10445,141 
	W 	2*0,16*(16,09+16,09) 		10,298 
	W 	2*0,2*(4,8*2+4,9+7,9+6,52) 		11,568 
	W 	2*0,2*(6,37+12,8) 		7,668 
	W 	0,25*(1,1*7+1,8*3+1,1+5,1) 		4,825 
		Soucet 		34,359 

417351116 
Odstranenl bednenl ztu;tujleleh veneu a prekladu 	I m2 I 	34,359 

71,50 
2456,67 
4351239R1 	iAtyp schodistove prefa rameno seh2,kompl prov - O+M+kotvenl,vYztu:t 
27000,00 
27000,00 
W 	1 	1,000 
150 I K 14351239R2 	-r.6.iypsehodi~foveprefaramenoseh3,komplprov-O+M+kotvenl,vYztu;t 	-jkus-nl --1,0001 	29000,OOr- 	29000,001 
	W 	1 	1,000 
1 51 I K 14351239R3 	IAtyp sehodi~fove prefarallleno se stupni 1x17S:S;a]0 mn{,kompl pro~-D+M+k~tv-enf.~ztu:t---- 	- ------ I kus 1--1-,OOor==Y-OOO~or=- 	32000:001 
	W 	1 	1,000 

5 
Komunikace oozernnl 

170332.51 
564851111 
Podklad ze ~terkodrte SO tI 150 mm 
112,00 
16808,18 
VP 01 
W 	1,5*(11,55+4,55) 
W 	VP02 
W 	1,61*11+1,3*16,07 
W 	VP03 
W 	1,5*12,9 
W 	VP04 
W 	1,5*(4+28,02) 	48,030 
W 	1,3*(15,34) 	19,942 
W 	soucet 	150,073 
24,150 
38,601 
19,350 
1 531 K IS7321110R 	IpOStrik spojovacf modifikovany 	I m2 I 	67,972r-----19;ooc------ 	1291-,47] 
	W 	VP04 
	W 	1,5*(4+28,02) 
	W 	1,3*(15,34) 
	W 	soucet 
48,030 
19,942 
67,972 
Strana 8 z 25 

PC Typ 
MJ 
Cena celkem [CZK] 
K6d 
Popis 
MnozsM J.cena [CZK] 
67,9721 	483,001 
54IK [57814311R 	ILitYasfalttl80mm
1 m2 1 
W 	VP04 
W 	1,5*(4+28,02) 	48,030 
w 	1,3*(15,34) 	19,942 
w 	soueet 	67,972 
32830,48 
I 551 K 1581124112 	!Krytz b;'orn;ko;;,-~ikace tl. 120 mm 	1 m2 1 	67,9721 	382,001 	25965,301 
	w 	VP04 
	W 	1,5*(4+28,02) 		48,030 
	W 	1,3*(15,34) 		19,942 
	w 	soucet 		67,972 
1 561 K 1596211110--- 1 Kladenl zamkove dlazby komunikacl pro pMI tl 60 mm vt loze tl 30 mm 	1 m2 1 	24,1501 	313,001 	7 558,951 
	w 	VP01 
1,5*(11,55+4,55 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;32;(1032,0);(0,0);(0,6155);(836,6155);(836,11090);(0,11090);(0,21497);(1032,21497);(1032,15056);(2623,15056);(2623,17253);(3069,17253);(3069,17110);(3238,17110);(3238,15605);(14769,15605);(14769,17253);(17115,17253);(17115,15056);(21498,15056);(21498,11090);(16332,11090);(16332,6297);(17115,6297);(17115,0);(4690,0);(4690,955);(3069,955);(3069,542);(2623,542);(2623,11632);(1032,11632)posrelh0posrelv0pib
59245018.BET 
59681122R 
w 
w 
w 
w 
38,601 
19,350 
59681122R1 
Kladenl betonove dlazby komunikacl pro pe~1 do loze z kameniva t115-75 mm 
ST02 
61,4-1,3*8.83+0.48*7.24 

5924749R 
dlatdice teraeova tryskana impregnovana plOtiskluzna 60x60x4 em 
w 
53,396*1,1 'Pfepottene koeficientem rnnozstvl 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21493);(10726,21493);(10726,20871);(21482,20871)posrelh0posrelv0pib
6 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(0,0);(0,21482);(207,21482);(207,15264);(21494,15264)posrelh0posrelv0pib

612131121 
612321141 	[Vapenocementova omltka stukova dvouvrstva vnitfnlch sten nanasena rucne 
w 	2*91,419 
w 	22,124+38,654 
w 	90,454 
w 	1,*15,02 
w 	-2,1*(1,35+1,01*2) 
W 	-0,85*(2,225+0,6*2) 
W 	-2,1*(1,62*2+2,93) 
W 	0,25*(2,3*2+1,1 )*8 
W 	0,25*(0,7*2+1,8)*3 
W 	soucet 	339,945 
231,00 
6136,52 
292,00 
16921,69 
281,00 
15004,28 
495,00 
29074,32 
422364,96 
53,00 
18017,09 
246,00 
83626,47 
1641 K 1622142001 	IPotazenl vnej~lch sten sklovlaknitYm pletivem vtlacenym do tenkovrstve hmoty 	1 m2 1 	38,1451 	197,001 	- -7514,571 
	W 	FS 11 
	W 	(2,11 +1 +1,2)*1,45 
	W 	0,44*2,11 
	W 	12,9*(1,2+0,5)*0,5 
	W 	FS12 
	W 	1*6,915+(1 +2.6)*0,5*6,115+2,6*0,8 
	W 	Soucet 
6,250 
0,928 
10,965 
20,002 
38,145 
Strana 9 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [ClK] 
Cena celkem [ClK] 
65 1 K 1622211011 	j Monl~t konlaklnlho zaleplenl vnej~lch sten z polystyrenovych desek II do 80 mm v~ sysl prvku a 1i~1 
1m2 1
82,5721 	529,001 
43680,59 
W 	FS04 
W 	(0,81+0,25)*(6,73+9,03) 
W 	FS 10 
W 	0,55*31,9 
W 	FS02 
W 	0,81*(16,7+5,83+5,83) 	22,972 
W 	0,75*(6,75*2+13,84) 	20,505 
W 	0,35*13,84 	4,844 
W 	soucet 	82,572 
16,706 
17,545 
1661 M 12837593R 	jd~~k~ EPS-75~dni A=O,036 tl80mm 	I m2 I 	44,3471 	108,00 I 	4789.481 
	W 	0,81*(16,7+5,83+5,83) 		22,972 
	W 	0,75*(6,75*2+13,84) 		20,505 
		soueet 		43,477 
		43,477*1,02 'Pfepoclene koeficienlem mnozstvl 		44,347 

5900266005403 I desky XPS- 50mm, AD = 0,036 (W'm-1'K-1), 1250 x 600 x 50 mm, rozmer vCetne polodra2ky 1265 x 615 mm 	I m2 	I 	34,936 
34,251*1,02 'Prepoetene koeficienlem mnozstvl 	34,936 

257,00 
8978.55 
5900266005427 IdeskaXPS tl80mm, AD = 0,036 (W·m-1·K-1).1250x 600 x 80 mm, rozmervCetne polodratky 1265 x 615 mm 
412,00 
2035.69 
0,35*13,84 
4,844*1,02 'Pfepoctene koeficientem rnnozstvl 
62221103R 	IMonl~z kontaktnlho zateplenl vnej~lch sten z polystyrenovych desek tI do 160 mm vc syst prvku a Ii~t 	I m2 	100,7861 	635,001 	63999,11 

FS 01 
	W 	2,5*16,47-0,9*2,2*6 	29,295 
	W 	2,56*6,78-5,1*2,3 	5,627 
	W 	1,62*2,7+(1,62+0,31)*0,5*4,05 	8,282 
	W 	2,5*4+1,1*1,6-0,9*2,2 	9,780 
	W 	2,56*11,44+(2,56+0,87)*0,5*2,4 	33,402 
	W 	3*4,8*0,5*2 	14,400 
	W 	soucet 	100,786 
I 70 1 M 12837595R 	IdeSk~EPS~dni A=O,036 tl160mm 	I m2 	102,8021 	216,00 I 	22205.231 
	W 	100,786*1,02 'Prepoctene koeficientem rnnozstvl 		102,802 

	K 162221206R 	IMont~t kontaktnlho zateplenl vnej~lho osten I hI. ~palety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm vc syst prvku a Ii~t 	I 	m 	I 	16,5001 	238,001 	3927,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(20982,12765);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
		5,1+2,3*2 	9,700 
	W 	(1,35+0,55)*2 	3,800 
	W 	(0,6+0,9)*2 	3,000 
	W 	Soucet 	16,500 
liiiM-j2837593R 	IdeskaEps75fasadniA=O,036tl80mm 	I m2 	5,6601 	108,001 	611,281 
	W 	(5,1+2,3*2)*0,25 		2,425 
	W 	(1,35+0,55)*2*0,4 		1,520 
	W 	(0,6+0,9)*2*0,4 		1,200 
	W 	soueet 		5,145 
		5,145*1,1 'Prepoctene koeficientem rnnozstvt 		5,660 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(746,0);(0,0);(0,21276);(21492,21276);(21492,8510);(746,8510)posrelh0posrelv0pib

FS 10 
	W 	0,31*31,9 	9,889 
622521021 	ITenkovrstv~ silik~tov~ zrnit~ omltka tI. 2,0 mm vcetne penetrace vnej~lch sten 	I m2 I 	9,8891 	290,001 	2867,81 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,12765);(21235,12765);(21235,21276);(21491,21276)posrelh0posrelv0pib
I 741 K 162252102R 	ITenkovrstv~ silik~tova zrnit~ omltka 11.2,0 mm vcetnll penetrace v~llj!Hch stlln - imita~e beton~ ---------- --T ;;iT- -205,686] 	327,001 	67259,321 
	W 	FS 12 
	W 	1 *6,915+(1 +2,6)*0,5*6,115+2,6*0,8 	20,002 
	W 	FS04 
	W 	0,63*(6,73+9,03) 	9,929 
	W 	0,4*2,1*4 	3,360 
Strana 10 z 25 

PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj 
w 	FS 11 
W 	1,45*(2,11+1+1,2) 
W 	0,44*2,11 +12,9*(1,2+0,5)*0,5 
W 	FSOl 
W 	2,5*16,47-0,9*2,2*6 
W 	2,56*6,78-5,1*2,3 
W 	1,62*2,7+(1,62+0,31)*0,5*4,05 
W 	2,5*4+1,1*1,6-0,9*2,2 
W 	2,56*11,44+(2,56+0,87)*0,5*2,4 
W 	3*4,8*0,5*2 
W 	FS02 
W 	0,81*(16,7+5,83+5,83) 
W 	0,75*(6,75*2+13,84) 
W 	0,35*13,84 
W 	ostent 
W 	(5,1+2,3*2)*0,25 	2,425 
W 	(1,35+0,55)*2*0,4 	1,520 
W 	(0,6+0,9)*2*0,4 	1,200 
W 	soucet 	205,686 
6,250 
11,893 
29,295 
5,627 
8,282 
9,780 

33,402 
14,400 
22,972 
20,505 
4,844 
I 751 K 1631311115 	I Mazanina II do 80 mm z betonu prosteho bez zvy~enych naroku na prostredl tr. C 20/25 	I m3 	I 	9,8821 	3 670,00 I 	-----s626S:94] 
	W 	(51,64+25,52+77,44)*0,06 			9,276 
	W 	8,66*0,07 			0,606 
	W 	soucet 			9,882 
I 761 K 1631311123 	IPodkladnl beton II do 120 mm z betonu prosteho bez zvy~enych naroku na prostredl tr. C 12115 	I m3 	I 	1,3091 	3180,001 	4162;62] 
	W 	sch2 
	W 	1,49*(0,5+2,15+0,5*2)*0,1 
	W 	sch3 
	W 	1,5*(1,1+3+0,5*2)*0,1 			0,765 
	W 	soucet 			1,309 
0,544 
I 771 K 1631311135 	I Mazanina tl do 240 mm z betonu prosteho bez zvy~enych naroku na prostredl n. C 20/25 	I m3 	I 	9,4281 	3360,001 	n 31-678,081 
	W 	62.85*0,15 			9,428 
W 	62,85*1,3*0,00444 	0,363 
631362021 	IVyztuz mazanin svarovanymi sltemi Kari 	1 	t 	0,363 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(17396,0);(17396,575);(0,575);(0,21487);(21489,21487)posrelh0posrelv0pib

K 1631319175 	IPriplatek k mazanine tl do 240 mm za strZenl povrchu spodnl vrstvy pred vlozenlm vyztuze 	1 m3 	9,428 
67,40 
635,45 
32200,00 
11688,60 
1801 K 1632451024 	IvyrovnavaclPotertldo50mmzMC15provedenyvpaSu-PS07 	I m2 	I 	21,77'9ru 	260,001 	5662,541 
	W 	PS07 
1,45*(2,53+3,33+4,98+1,13+1.35+1 
632481213 
Separacnl vrstva z PE f61ie 

12,20 
2758,54 

W 
W 
51,64+8,66+25,52+77,44 
41,86+8,31+12,68 
soucet 
	~ 	- 	-_ .. _ ...... ,_ .. _ ... _ .... _- - •.... _-- ___ ,_ ... 				- - - - . 	
82 	K 	900R(}1 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 01 	kus 	6,000 	970,00 	5820,00 	
83 	K 	900R02 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 02 	kus 	1,000 	830,00 	830,00 	
84 	K 	900R03 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 03 	kus 	1,000 	2100,00 	2100,00 	
85 	K 	900R04 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 04 	kus 	1,000 	5200,00 	5200,00 	
86 	K 	900R05 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 05 	kus 	1,000 	1620,00 	1620,00 	
87 	K 	900R06 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 06 	kus 	1,000 	7400,00 	7400,00 	
Strana 11 z 25 

PC Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZKj 	
88 	K 	900R07 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 07 	kus 	1,000 	78,00 	78,00 	
89 	K 	900R08 	Ostatnt konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 08 	kus 	1,000 	980,00 	980,00 	
90 	K 	900R09 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 09 	m 	27,500 	1 160,00 	31900,00 	
91 	K 	900Rl0 	ostatnt konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 11 a 	m 	50,270 	197,00 	9903,19 	
92 	K 	900Rll 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 11 b 	m 	29,530 	392,00 	11 575,76 	
93 	K 	900R12 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - B 11 c 	m 	4,640 	246,00 	1141,44 	
94 	K 	900R13 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane.kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 11 d 	m 	2,190 	820,00 	1795,80 	
95 	K 	900R14 	Ostatnl konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - B 12 	m 	14,500 	293,00 	4248,50 	
96 	K 	916331112 	Osazenl zahradnlho obrubnlku betonoveho do loze z betonu s bo~nf operou 	m 	29,500 	146,00 	4307,00 	
w 
B 10 
29,5 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,20307);(20979,20307);(20979,21487);(21491,21487)posrelh0posrelv0pib

59217010 
obrubnlk betonovy zahradnl pf/rodnl seda SOx5x15 em 
919735123 
Rezanl stavajlclho asfaltobetonoveho krytu hi do 150 mm 
	pro VP 01 	14,000 
W 	14 
61,70 
1820,15 
242,00 
3388,00 
[99T!]941111132 	I Monta! le~enl radoveho trubkoveho lehkeho s podlahami zatfzenl do 200 kg/m2 ~ do 1,5 m v do 25 m 	T32=r=-307, 1361 ----67,20 I 	20 639,541 
	W 	16,84*4,15 	69,886 
	W 	11,34*4,15 	47,061 
	W 	9,5*3,4*0,5 	16,150 
	W 	9,75*4,15+9,75*2,4 	63,863 
	W 	19,47*1,6+10,24*2,95 	61,360 
	W 	10,24*(1,15+2,55) 	37,888 
	W 	6,83*1,6 	10,928 
	W 	soueet 	307,136 
11001 K 1941111232 	TprlPlatek k-~enrradovemu trubkovemu lehkemu s podlahami ~ 1,5 m v 25 m za prvnl a ZKD den pouzitf 	U T----m2m[9~161 	1,261 	11 996,731 
	W 	307,136*31 	9521,216 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21493);(11016,21493);(11016,16703);(21487,16703)posrelh0posrelv0pib
1011 K 1941111832 	I oemontaz lesenl raooveno trubkoveho lehkeho s podlahami zatlzenl do 200 kg/m2 ~ do 1,5 m v do 25 m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,16703);(17396,16703);(17396,21493);(21489,21493)posrelh0posrelv0pib
952901111 	IVy~i~tenl budov bytove a obeanske vystavby pri vy~ce podls!1 do 4 m 
W 	16,45*5,83+6,75*13,84+7,13*5,3 	227,113 
41,00 
12592,58 
93,00 
21121,51 
11031 K 1953312122 	--rVl~zky do5;islych dilata~nlch spar z extrudovanych polystyrenovych desek tl20 mm 	r m2 I 	5,7671 	183,001 	1055,361 
	W 	sch2 
	W 	6,5*0,6+0,5*0,5 
	W 	OS-l 
	W 	0,3*0,84+1,5*0,34 
	W 	OS-2 
	W 	0,3*1,85+1*0,3 		0,855 
	W 	Soucet 		5,767 
4,150 
0,762 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21479);(10441,21479);(10441,14608);(21487,14608)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21491,0);(17606,0);(17606,925);(0,925);(0,14946);(21235,14946);(21235,21470);(21491,21470)posrelh0posrelv0pib
11041 K 1961043111 	IBouranlzakladuzbeto;;-~e~~t);k~menem 	ur m3 I 	9,7841 	1760,001 	17219,841 
	W 	0,4*0,4*(18,2+5+17,55+4,1+3*2+5,3+5) 		9,784 
880,88 

1051 K 1962022391 	10dbouraniMstikamennezdi 	I m3 I 	1,125 
W 	1,5*1,5*0,5 	1,125 
783,00 
11061 K 1962022591 	I Bouranl zdiva nadzakladoveho kamenneho na sucho pres 1 1113 	---]-~3--r-- 5,2651 	590,001 	3106,351 
	W 	17,55*1*0.3 	5,265 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(17606,0);(17606,664);(0,664);(0,21486);(21491,21486)posrelh0posrelv0pib
1071 K 1962032231 	I Bouranl zdiva z cihel palenych nebo vapenoplskovycn na MV nebo MVC pres 1 m3 - spodnl cast demolice 
W 
(6,7+7)*2*1,75*0,3 
(3*2+5,3)*1*0,3 
Strana 12 z 25 
674.00 
11980,35 

PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 
	W 	soucet 	17,775 
\108IK-\965041441 	\ Bouran! podkladu pod dlafby nebo-mazanin silne pOi!kozenych tl pi;; 100mm pi pr~s 4 m2 -- -- ----- ]-~3 ul-1-6~6951--1 330,00] 	-22204:35] 
	W 	126+13+10+26.5+41,5+13,5-1,2*16}*O,15 	16,695 

1091 K 196504144R 	1 Bouran! i!ikmeho nadbetonovani - silne poi!kozeny 	1 m3 1 	5,5201 	1 350,001 	7452,00 
	W 	2,3*16*0,15 		5,520 
[1101 1<1965046-111 	]PrebrOUi!enl betonoveho povrchu - sklady 	1 m2 1 	77.4401 	151,001 	11 693,441 
	W 	PD05 
	W 	39,13+19,09+19,22 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21486);(1679,21486);(1679,3989);(21482,3989)posrelh0posrelv0pib

1111 K 198101131R 	IDemolicebudovzdenychnaMVCpodilkonstrukcido 10% postupnymr ozebiranim 	1 m3 1 	484,8431 	107,001 	51878,20 
	W 	(1,79+2,58}*O,5*10*6,7-3*O,8*4,5 		. - --- 
	W 	10*6,7*1,108*0,5 
	W 	3,5*1,4*18,2 
	W 	2*5*18,2+18,2*0,9*5*0,5 
	W 	soucet 		484,843 

[1t2[KI985-13-1311-- ---rRuenido~iit~;'Tploch~nka;':;-e;'OyCh-oc~lo~Cllkartaci----- -- -------- 	1 m2 1 	21,0281 	144,001 	3028,031 
	W 	PS06 
1,4*(2,53+3,33+4,98+1,13+1,7+1,35 

W 
W 
PS06 
1,4*(2,53+3,33+4,98+1,13+1,7+1,35) 
Pi'esun sute 

236,00 
4962,61 
98523111R 
Vyspravenl spar, zarovnanl a doplnenl aktivovanou maltou 
21,028 
D 997 
385840.12 
114 	K 	997013111 	Vnitrostavenistnl doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m s poufitlrn mechanizace 	t 	184,639 	419,00 	77363,74 	
115 	K 	997013511 	Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s nalozenlrn a se slozenim 	t 	184,639 	335,00 	61854,07 	
116 	K 	99701351R 	prlplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km 	t 	3508,141 	10,30 	36133,85 	
W 	184,639*19 	3508,141 
11171 K 199701383R 	Ipop'atek za ulozeni na sklMce (skladkovne) stavebniho odpadu smesneho k6d odpadu 170904 	r t 	r--184,63!f _ - 1 140,001 	210488,461 
	D 998 	Pi'esunhmot 	176911,05 
11181 K 1998011Oo1--yr;s~~h~;;tpro-budo~d~n~~-~~- 	---------- 	------ 	-T=t- r-675,-23cn 262,001 	176911,051 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21462);(11286,21462);(11286,19689);(21482,19689)posrelh0posrelv0pib
D 	PSV 
711 
Prace a dodavky PSV 

nurn 

5756439,89 
152878.05 
711111001 	IProvedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovne za studena naterem penetracnim 	1 m2 1 	268,3101 	9,381 	2516,75 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(20982,12765);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	W 	PD01 
	W 	3,6*16,09 	57,924 
	W 	PD 0,2,03 
	W 	6,42*13,36+1,1*0,3*4 	87,091 
	W 	VZTkanal 
	W 	1,3*2,02*2 	5,252 
	W 	PD04 
	W 	25,52+0,24*2*(1,51 +4,5+4,78+1,78+2,3+2,45+2,45+1 ,6} 	35,778 
	W 	PD05 
	W 	6,13*13.42 	82.265 
	W 	soucet 	268,310 
11201 M 111163150 	I/ak a5'a/lovy penelratni 	1 	I ~--o,080C- 53 300,00 1 	4264,001 
	W 	268,31*0,0003 'prepoctene koeficientem mnozstvl 		0,080 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21486);(1725,21486);(1725,3989);(21487,3989)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(17606,0);(17606,5319);(0,5319);(0,21276);(21491,21276)posrelh0posrelv0pib
1211 K 1711112001 	1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svisle za studena naterem penetracnim 	1 m2 1 	233,1791 	20,501 	4 780,17 
Strana 13 z 25 

PC Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	
w 							
w 							
w 	{0,3+3,93)*{5,45+13,46)-3*5,45*0,5*2 			63,639 			
W 	{0,3+1,16)*13,62 			19,885 			
W 	{0,3+2,92)*6,52+4*1,38*0,5 			23,754 			
W 	{0,3+1,16)*6,42 			9,373 			
W 	(0,3+1 ,23)*13,76+2,83*2,2*0,5 			24,166 			
w 	(0,3+1,16)*{16,09+5,43) 			31,419 			
W 	(0,3+1,86)*16,25 			35,100 			
w 	vzt kanal 						
w 	1,53*2*2,02 			6,181 			
w 	sachta u VZT 						
w 	2,5*{2,05*2+1,4*2) 			17,250 			
w 	2.3*1.5-1.18*0.88 			2,412 			
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(16368,0);(0,0);(0,21486);(21499,21486);(21499,1994);(16368,1994)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(1057,0);(0,0);(0,21486);(21499,21486);(21499,15426);(18129,15426);(18129,0);(2255,0);(2255,15163);(1057,15163)posrelh0posrelv0pib
71111311R 
76,00 
2470,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(1057,0);(0,0);(0,21486);(21499,21486);(21499,12755);(17990,12755);(17990,0);(2226,0);(2226,12422);(1057,12422)posrelh0posrelv0pib
7111131R1 
260,00 
312,00 
w 	3,6*16,09 	57,924 	
w 	PO 0,2,03 		
w 	6,42*13,36+1,1*0,3*4 	87,091 	
w 	VZTkanal 		
w 	1,3*2,02*2 	5,252 	
w 	PO 04 		
w 	25,52+0,24*2*{1 ,51+4,5+4,78+1 ,78+2,3+2,45+2,45+1 ,6) 	35,778 	
w 	PO 05 		
w 	6.13*13.42 	82,265 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(16368,0);(0,0);(0,21483);(1058,21483);(1058,13914);(14807,13914);(14807,19492);(17148,19492);(17148,12732);(21499,12732);(21499,1182);(16368,1182)posrelh0posrelv0pib
711142559 
Provedenl izolace proti zemnl vlhkosti pasy pfitavenlm svisle NAIP 
109,00 
25416,51 
FS03 
objekt 
{0,3+3,93)*(5,45+13,46)-3*5,45*0,5*2 
{0,3+1,16)*13,62 
{0,3+2,92)*6,52+4*1,38*0,5 
{0,3+1,16)*6,42 

(0,3+1 ,23)*13,76+2,83*2,2*0,5 
(0,3+1,16)*{16,09+5,43) 
63,639 
19,885 
23,754 

9,373 
24,166 
31,419 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Strana 14 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 
W 	(0,3+1,86)*16,25 
w 	vzt kanal 
W 	1,53*2*2,02 
W 	sachta u VZT 
W 	2,5*(2,05*2+1,4*2) 	17,250 
W 	2,3*1,5-1,18*0,88 	2,412 
W 	soucet 	233,179 
35,100 
6,181 
11291 M 16283611R 	Ipasasfaltovanysatestemprotiradonaveochrany 	1 m2 1 	279,8151 	93.001 	26022.801 
	W 	233.179*1,2 'prepottene koeficientem mnozstvl 		279,815 

FS 03 
objekt 
(0,3+3,93)*(5,45+13,46)-3*5,45*0,5*2 
W 	(0,3+1,16)*13,62 
W 	(0,3+2,92)*6,52+4*1,38*0,5 
W 	(0,3+1,16)*6,42 
W 	(0,3+1,23)*13,76+2,83*2,2*0,5 
W 	(0,3+1,16)*(16,09+5,43) 
W 	(0,3+1,86)*16,25 
W 	VZTkanal 
W 	1,53*2*2,02 
W 	sacbta u VZT 
W 	2,5*(2,05*2+1,4*2) 	17,250 
W 	2,3*1,5-1,18*0,88 	2,412 
W 	Soucet 	233,179 
63,639 
19,885 
23,754 

9,373 
24,166 
31,419 
35,100 

98,61 
22993,78 
1301 K 1711161212.GTA [lzolace prof zemnf vlhkosti nopovou f61if svisla, nopek v 8,0 mm, II 0,5 mm 
6,181 
11311 K 1998711202 	Ipresun hmol procentnf proizolace PrOtiVo~,VlhkOstia plynum v objeklech v do 1Tm-- ~ -~ ~ ~ ~-~ ~--- 	1 	% T88-1~0nr=----3-:21-[--- - 	-4754B3] 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21462);(10726,21462);(10726,19689);(21482,19689)posrelh0posrelv0pib
712 

73454.16 
712341559 	IProvedenf povlakove krytiny sUech do 10· pasy NAIP pritavenfm v pine plose 	1 m2 1 	53,3961 	96,801 	5168,73 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(20982,12765);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	W 	ST02 
	W 	61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 	53,396 
11331 M 16285220R 	Ipasysmodifikovanymasfaltemtl.4.omm 	1 m2 	1 	61.4051 	123,001 	--------yssz;82J 
	W 	53.396*1,15 'prepottene koeficienlem mnozstvl 			61,405 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21473);(1725,21473);(1725,5006);(21487,5006)posrelh0posrelv0pib

1341 K 17123415591 	Iprovedenf povlakove krytiny strech do 10· pasy NAIP pritavenfm v pine plo~e - parozabrana 	1 m2 1 	34,2511 	97,001 	3322,35 
	W 	FS04 
	W 	(0,81+0,25)*(6,73+9,03) 		16,706 
	W 	FS 10 
	W 	0,55*31,9 		17,545 
	W 	soucet 		34,251 
11351 M 1628360R1 	Iparozabrana - pas asfaltovany 	1 m2 1 	39,3891 	93,001 	-3663.1s-1 
	W 	34,251 *1.15 'preDoctene koeficienlem mnozstvl 		39,389 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21473);(1679,21473);(1679,5006);(21482,5006)posrelh0posrelv0pib

1361 K 1712361701 	IProvedenf povlakove krytiny strech do 10· f61if polo~enou voln~ s pi'ilepenim spoju 	1 m2 1 	77,5991 	49,501 	3841,15 
	W 	ST02 
	W 	61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 		53,396 
	W 	FS04 
	W 	(0,81+0,25)*(6,73+9,03) 		16,706 
	W 	FS09 
	W 	0,63*(5,4+6,5) 		7,497 
	W 	soucet 		77,599 
11371 M 128322056 	If6lie hydroizolacnl stfesnl mPVC k pfitftenl1,5 mm 	1 m2 	1 	89,2391 	407,001 	36 320~27J 
	W 	77 ,599*1,15 'prepoctene koeficienlem mnozstvl 			89,239 
Strana 15 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
	MJ 		Mnoi:stvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	
1	m2 	1	53,3961 	39,901 	2130,50 	
						
				22,701 	1393,89 	
						
				48,801 	2605,72 	
						
				22,701 	1393,89 	
1381 K 1712391171 
TProvedeni povlakove krytiny strech do 10° podkladni textilni vrstvy 
ST02 
61.4-1,3*8,83+0,48*7,24 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(20931,0);(0,0);(0,21498);(21477,21498);(21477,15194);(20931,15194)posrelh0posrelv0pib
69311068 
geotextilie netkana PP 300glm2 
53,396*1,15 'preoottene koeficientem mnozstvl 
712391172 
Provedeni povlakove krytiny strech do 10° ochranne textilni vrstvy 
ST02 
61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 
69311068 
geotextilie netkana PP 300glm2 
53,396*1.15 'Pfeooctene koeficientem rnnozstvl 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,12765);(21235,12765);(21235,21276);(21491,21276)posrelh0posrelv0pib
7123911721 	I Provedeni povlakove krytiny strech do 10° ochranne separacnl textilni vrstvy 	I m2 	I 	53,3961 	49,00 I 	2 616,40 
ST02 
W 	61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 _ 	53,396 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21486);(1725,21486);(1725,3989);(21487,3989)posrelh0posrelv0pib

11431 M 169311068 	IgeotextilienetkanaPP300glm2 	1 m2 	1 	61,4051 	22,701 	1393.89] 
	W 	53,396*1,15 'prepottene koeficientem mnozstvl 			61 ,405 
1441 K 1998712202 	Ipresun hmot procentni pro krytiny povlakove v objektech v do 12 m 	1 	% 	1 	651,2301 	3,151 	2051,37 

713 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21484,0);(0,0);(0,21486);(911,21486);(911,20121);(2447,20121);(2447,12072);(21484,12072)posrelh0posrelv0pib

Tepelna foukana izolace celul6zova vlakna vooorovna volna tl do 300 mm 
713114113 
PH 02 
7,24*5,24-0,6*3,16)*0,3 
325303,13 
1 120,00 
12 109,44 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,15957);(21235,15957);(21235,21276);(21491,21276)posrelh0posrelv0pib
713121111 	I Montaz izolace tepelne podlah voln~ kladenymi deskami 1 vrstva 	I m2 	I 	200,5901 	21,201 	4252,51 
11100 
W 	51,64+62,85 	114,490 
W 	tl160 
W 	8,66+77,44 	86,100 
W 	Soutet 	200,590 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(20931,0);(0,0);(0,21496);(21477,21496);(21477,16279);(20931,16279)posrelh0posrelv0pib

11471 M 128375914 	IdeskaEPs15Oprot~a/ezatfzenfvtlakU(max.3000kglm2)t1100mm 	--I m2 	1 	116.7801 	223,00 [ 	26041,941 
	W 	11100 
	W 	51,64+62,85 
114,49*1,02 'preool:tene koeficientem mnozstvl 
114,49*1,02 'preool:tene koeficientem mnozstvl 
2837599R 	Ideska EPS 150 pro trva/e zatfzenfv tlaku (max. 3000 kglm2) tl160mm 	I m2 	116,780 I 	490,00 I 	57222,20 
49,50 
1263,24 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(686,0);(0,0);(0,21477);(21492,21477);(21492,15475);(2420,15475);(2420,9876);(686,9876)posrelh0posrelv0pib

713121121 
Montaz izolace tepelne podlah voln~ kladenyrnideskarni 2 vrstvy 
deska EPS 150 pro trva/e zatfzenf v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl120mm 
28375915 
25,52*2,04 'preool:tene koeficientem mnozstvl 
713131135 	I Montaz izolace tepelne st~n kotvenim desek vne objektu 
0,63*(5,46+6,5 
5900266005434 IdeskaXPS t1100mm, ItO = 0,036 (W'm-1'K-1), 1250 x 600 x 100 mm, rozm(Jrvtetne po/odrazky 1265 x 615 mm 
7,535*1,02 'preoottene koeficientem mnozstvl 
713131141 	I Montaz izolace tepelne sten a zakladu lepenim celoplosn~ desek 
FS03 
W 	objekt 
W 	(0,3+3,93)*(5,45+13,46)-3*5,45*0,5*2 
W 	(0,3+1,16)*13,62 
W 	(0,3+2,92)*6,52+4*1,38*0,5 
W 	(0,3+1,16)*6,42 
W 	(0,3+1,23)*13,76+2,83*2,2*0,5 
63,639 
19,885 
23,754 
9,373 
24,166 
Strana 16 z 25 
269,00 
14004,41 
196,00 
1476,86 
658,00 
5057,39 
167,00 
34 625,11 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(10441,0);(0,0);(0,21490);(10441,21490);(10441,20601);(21487,20601);(21487,2638);(10441,2638)posrelh0posrelv0pib
PC Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Mnozstv[ 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	
w 							
w 							
w 							
w 							
w 							
	2837635R.ISV 	1 	m2 	1 	484,001 	97392,42 	
							
	28376356.1SV 				323,00 	3313,66 	
							
	713131151 	Monta! izolace tepelne stem) volne vlo!enymi deskami 1 vrstva 			36,10 	247,68 	
w 		u soklu altan tl 80 mm 					
w 		0.63*(4.5+4 78+0 1 +1 51 \ 		6,861 			

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(16466,0);(0,0);(0,21486);(1033,21486);(1033,8088);(3018,8088);(3018,12133);(3046,12133);(3046,11882);(3213,11882);(3213,8839);(14788,8839);(14788,12383);(17109,12383);(17109,8088);(21498,8088);(21498,750);(16466,750)posrelh0posrelv0pib
713141136 
Monta! izolace tepeme strech plochych lepene za studena nizkoexpanzni (PUR) penou 1 vrstva desek 
108,00 
5766,77 
ST02 
61.4-1.3*8.83+0,48*7,24 

490,00 
26687,36 
2837599R 
deska EPS 150 pro trva/e zatfzenf v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl160mm 
ST02 
61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 
53,396*1,02 'Pteooctene koeficientem rnnozstvl 

w 

ST02 
W 	61,4-1,3*8,83+0,48*7,24 	53,396 
713141336 	I Monta! izolace tepelne sfrech plochych lepene za studena nizkoexpanzni (PUR) penou, spadova vrstva 	1 m2 	1 	53,3961 	144,001 	7689,02 

11611 M [2837614R 	Iklfn izolatnf z p(moveho polystyrenu EPS 150 	1 m3 	1 	5,9911 	3960,001 	23724,361 
	W 	ST02 
	W 	(61,4-1,3*8,83+0,48*7,24)*(0,08+0,14)*0,5 
5,874*1,02 'Pfepottene koeficientem rnnozstvl 
998713202 
Pfesun hmot procentni pro izolace tepetne v objektech v do 12 m 

1,95 
3808,74 

o 721 	Zdravotechnika 	968 678,46 
11631 K 1721722725 	IZdravotechnika-dlepfilOhy 	1 kpl 	1 	1,0001 	968678,461 	968678,461 

731 

69840,00 
735 
69840,00 
69840,00 

741 
Elektroinstalace - silnooroud 

649142.41 
741 
Silnoproud - die pfilohy 
649142,41 
649142,41 
742 
Elekt . 
lab 
d 
406762.00 
		.. 	._ ... -. _ ... _ .. _._-- 	_._-- ._-- 					
166 	K 	742 	EPS material - die pfilohy 	kpl 	1,000 	82295,00 	82295,00 	
167 	K 	7421 	EPS montaz - die pfilohy 	kpl 	1,000 	80738,00 	80738,00 	
168 	K 	7422 	Siaboproud material - die pfilohy 	kpl 	1,000 	130364,00 	130364,00 	
_169 	K 	7423 	Siaboproud rnontaz - die pfilohy 	kpl 	1,000 	113365,00 	113365,00 	
o 751 
Vzduchotechnika 
541 607,00 
Strana 17 z 25 

PC Typ 	K6d 
Popis 
MJ 	MnozsM J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
170TKT751 
TVZduchotechnika - die pfUohy 
I kpl I 	1,000] 	541-607.001	541 607,00 
	~ 	,- , 	v ,. ••...••• __ ",,,,_1 W 				...,.uv,",,,",v,"'"'''' 	
171 	K 	7611R1 	Vnejill vYplne otvorU - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - W 01 	kus 	6,000 	22000,00 	132000,00 	
172 	K 	7611R2 	Vnejill vYplne otvorU - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - W 02 	kus 	1,000 	22000,00 	22000,00 	
173 	K 	7611R3 	Vnejill vYplne otvorU - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - W 03 	kus 	1,000 	22000,00 	22000,00 	
174 	K 	7611R4 	Vnejill vYplne otvoru - prvkY kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - W 04 	kus 	3,000 	4900,00 	14700,00, 	
175 	K 	7611R5 	Vnejill vYplne otvorU - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - W 21 	kus 	2,000 	23000,00 	46000,001 	
176 	K 	7611R6 	Vnejill vYplne otvorU - prvkY kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - W 22 	kus 	1,000 	25000,00 	25 000,001 	
177 	K 	7611R7 	Vnejill vYplne otvorU - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - W 23 	kus 	1,000 	25 000,00 	25000,00 	
178 	K 	7611R8 	Vnejill vYplne otvorU - prvkY kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - W 31 	kus 	1,000 	34 000,00 	34 000,00 	
179 	K 	7612R1 	Vnitfnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 01 	kus 	1,000 	7500,00 	7500,00 	
180 	K 	7612R2 	Vnitfnl dvefe - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 02 	kus 	1,000 	7500,00 	7500,00 	
181 	K 	7612R3 	Vnitfnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 03 	kus 	1,000 	8200,00 	8200,00 	
182 	K 	7612R4 	Vnitfnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobnebo popisu v tabulce - D 04 	kus 	1,000 	8200,00 	8200,00 	
183 	K 	7612R5 	Vnitfnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 05 	kus 	1,000 	8200,00 	8200,00 	
184 	K 	7612R6 	Vnitrnl dvefe - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 06 	kus 	1,000 	8500,00 	8500,00 	
185 	K 	7612R7 	Vnitrnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die pedrobneho popisu v tabulce - D 07 	kus 	2,000 	8500,00 	17000,00 	
186 	K 	7612R8 	Vnitrnl dvere - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 08 	kus 	1,000 	14600,00 	14600,00 	
187 	K 	7612R9 	Vnitrnl dvefe - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - D 09 	kus 	1,000 	4600,00 	4600,00 	
762 
Konstrukce tesatske 

433572.00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21487);(11016,21487);(11016,20912);(21487,20912)posrelh0posrelv0pib
762081150 
Hoblovan] hraneneho feziva ve stavenistnl dUne 
1680,00 
1356o,g6 
76208511R 	I Kotvlcl prvky dfevenych konstrukcl,kompl prov - D+M 	kg 	I 	600,0001 	116,001 	69600,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,15957);(20982,15957);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	w 	statika 
	w 	600 	600,000 
11901 K 17621231R1 	1 Dellcl prl~ka tl150 mm.kompl prov - D+M+kotvlcl a spojovacl prvky 	1 m2 	1 	35,7991 	540,00r-- 	U1-9-331A6j 
	w 	FS08 
	w 	-OSS3t125mm 
	W 	- nosne tramky 100x600 mm 
	W 	- OSS 3 tl 25 mm 
	W 	2,92*6,13*2 			35,799 
11911 K 17621231R2 	1 Dellcl stena,kompl prov - D+M+kotvlcl a spojovacl prvky 	1 m2 	80,8651 	452,00] 	36 550~98] 
	W 	FS07 
	W 	- OSS 3 tI 15 mm 
	W 	- nosne tramky 100x600 mm 
	W 	- OSS 3 tI 15 mm 
	W 	2,37*2*(6,13+12,8)+3*0,5 		91,228 
	W 	-1,36*2,54*3 		-10,363 
	W 	soucet 		80,865 
11921 K 17621231R3 	Istenadfevena,komPlprov-D+M+kotvlclasPojovacIPrvky 	r-ffi2-1 - 45,3621 	721,001 	32706,001 
	W 	FS05,06 
	W 	- tuM dfevovlaknit fasadnl deska tI 35 mm 
	W 	- tramky 160x60 mm 
	W 	- TI tl 160 mm mezi tramky 
Strana 18 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
MnozsM J.eena [CZK] 	Cena eel kern [CZK] 
	w 	- aSB 4 II 18 rnrn s pfelepenymi spoji 
	w 	- latEl 45x45 rnrn 
	w 	- SDK deska 2x12,5 rnrn zaklop 
	w 	FS05 
	w 	2,37*(6,33+4,5+6,16+1,48) 	43,774 
	W 	-0,9*2,1*4 	-7,560 
	W 	FS06 
	W 	2,37*(3,16+0,7) 	9,148 
	W 	soucet 	45,362 
11931. K 1762332-134 - 	1 Montaz nosne konstrukce u pflhradovych nosnlku z hranElneho feziva prufezove plochy do 450 cm2 	1 	m 	1 	201,8001 	324,00[----- 	--65383,201 
	W 	sloupky 
	W 	2,5*44 				110,000 
	W 	2,58*2 				5,160 
	W 	vodorovne tramky 
	W 	2*(16,25+6,92+6,53+13,62) 				86,640 
	W 	soucet 				201,800 
11941 M 160512140 	-Jh-;~~stavebnf relivo prtirelu do 450cm2 do df 6m 	I m3 I 	8,8791 	6800,00 I 	60 377,20 I 
	W 	110*0,2*0,2 		4,400 
	W 	5,16*0,2*0,2 		0,206 
	W 	86,64*0,2*0,2 		3,466 
	W 	soucet 		8,072 
		8,072*1, 1 'Pfepo~tene koeficientem rnnozstvl 		8,879 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21470);(11016,21470);(11016,20545);(21487,20545)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(746,0);(0,0);(0,21276);(21492,21276);(21492,8510);(746,8510)posrelh0posrelv0pib

762341024 	I BednElnl strech rovnych z desek aSB 1118 mm na pero a drazku sroubovanych na krokve 	I m2 I 	198,0001 	357,001 	70686,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,15957);(20982,15957);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	W 	ST01 
	W 	111+87 	198,000 
11961 K 1762342441 	I Monta! kontralatl na strechach sklonu do 60· 	I 	m 	I 	219,9781 	11,701 	-:2573,741 
	W 	ST01 
	W 	111+87 				198,000 
	W 	198*1,111 				219,978 
11971 M 160514114 	Irelivojehfil!nate/atestresnfimpregnovanedl4m 	I m3 I 	0,8711 	6300,001 	--5487,301 
	W 	219,978*0,06*0,06 		0,792 
		0,792*1, 1 'Pfepo~tene koeficientem rnnozstvt 		0,871 

		8,072 	8,072 
	W 	0,792 	0,792 
	W 	Soucet 	8,864 
762395000 	ISpojovacl prostredky pro montaz nosne konstrukce,lafovanl 	I m3 I 	8,8641 	1 090,001 	9661,76 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(373,0);(0,0);(0,21452);(373,21452);(373,19213);(3005,19213);(3005,15794);(746,15794);(746,6777);(21492,6777);(21492,3359);(373,3359)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(17396,0);(17396,5319);(0,5319);(0,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(20982,12765);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
11991 K 1762841130 	I Montaz podhledu z hranolku se sparou 10 mm 	I m2 I 	72,3201 	80,70C 	5836,221 
	W 	PH01 
	W 	72.32 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21482,0);(0,0);(0,5984);(559,5984);(559,21496);(21482,21496);(21482,6333);(1119,6333);(1119,1395);(21482,1395)posrelh0posrelv0pib
2001 M 16051213R 	Ihranol stavebnf relivo prtirelu do 288cm2 do dl6m hoblovany 	I m3 I 	3,0231 	6500,00 I 	19649,50 
	72,320*0,04*0,95 		- _.- 
2,748*1, 1 'Pfeeoetene koeficientem mnozstvl 
762895000 	ISpojovacl prostredky pro montaz podbljenl 	m3 I 	2,7481 	106,001 	291,29 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(746,0);(0,0);(0,21276);(21492,21276);(21492,8510);(746,8510)posrelh0posrelv0pib

763 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(1229,0);(0,0);(0,21487);(21496,21487);(21496,9866);(1404,9866);(1404,575);(1229,575)posrelh0posrelv0pib
presun hmot procentnl pro kce tesatske v objektech v do 12 m 

998762202 
5,58 
21876,39 
763111411 	ISDKpri~katll00mmprofiICW+UW50desky2xA12,5TI50mmEI60Rw50dB 	I m2 I 	5,4001 	1070,001 	5778.00 

281213,65 
W 	3*1,8 	5,400 

12041 K 1763111431 	ISDK prl~ka tll00 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 	I m2 I 	6,7651 	1 250,001 	8456.251 
	W 	3*(1,745+1)-0,7*2,1 		6,765 
Strana 19 z 25 

PC Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	
2051 K 1763111717 	ISDK pfl~ka zakladnl penetracnr nater 	I 	m2 	74,8141 	48,601 	3635,96 	
w 		2* 5 4+6,765+4,05+21,192 						
2061 K 763113341 	SDK pfl~ka instalacnl tl 155 mm zdvojeny profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB 			1490,00 	6034,50 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(21499,0);(0,0);(0,21496);(1111,21496);(1111,18675);(1083,18675);(1083,3757);(3030,3757);(3030,17151);(3114,17151);(3114,14330);(3253,14330);(3253,12917);(14823,12917);(14823,17151);(17132,17151);(17132,3757);(21499,3757)posrelh0posrelv0pib
7631210R1 
1370,00 
3304,44 
7631210R2 
628,00 
5170,32 
763121211 
309,00 
1 145,77 
763121714 
SDK stena predsazena zakladnl penetracnt nat~r 
24,30 
1 451,07 
2.412+8.233+45,362+3,708 
763131414 
SDK pod hied desky 1xA 15 bez TI dvouvrstva spodnl kce profil CD+UD 
708,00 
10924,44 
PH 02 
25.52-1,55-2,6-5,94 

76313143R 	ISDK pod hied deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstva spodnl kce profil CD+UD 	I m2 	I 	9,9501 	734,001 	7303,30 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,15957);(21235,15957);(21235,21276);(21491,21276)posrelh0posrelv0pib
PH 02 
	W 	1,55+2,46+5,94 	9,950 
	W 	soucet 	9,950 
12141 K 1763131714 	ISDK podhled zakladnl penetra~nl nat~r 	I m2 I 	25,5201 	27,801 	709,461 
	W 	PH 02 
	W 	25,52 		25,520 
12151 K 1763131751 	I Montaz parot~sne zabrany do SDK podhledu 	- ----- --- 	I m2 	I 	25,5201 	26,30e 	67(18] 
	W 	PH 02 
	W 	8,47+1,55+2,46+5,94+7,1 				25,520 
	W 	soueet 				25,520 
12161 M 128329210 	If6liepodstfe§nfParotesnaPEro/e 1,5x50m 	I m2 r-28,0721 	--17,OOT 	477,221 
	W 	25,52*1, 1 'Pfepo~tene koeficientem rnnozstvl 	28,072 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21470);(1119,21470);(1119,3700);(21482,3700)posrelh0posrelv0pib
2171 K 176373211R 	lorev~ne stfe~nl pflhradove vaznlky,kompl prov - D+M+nat~r,kotvenl 	I m2 I 	201,3891 	940,001 	189305,66 
	W 	16,25*6,92+6,53*13,62 		201,389 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,21276);(13304,21276);(13304,15957);(21489,15957)posrelh0posrelv0pib
12181 K 1998763402 	Ipfesun hmot procentnl pro sactrok:artonove konstrukce v objektech v do 12 m 	I 	% 	I 2770,0001 	1,521 	4210,401 
764 
Konstrukce klemofrske 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,20333);(20979,20333);(20979,21452);(21491,21452)posrelh0posrelv0pib
269183,11 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(10465,0);(0,0);(0,21486);(21491,21486);(21491,3324);(10465,3324)posrelh0posrelv0pib
ST01 
	W 	111+87 	198,000 
Montaz strukturovane oddelovac! rohoze 	I 	m 	I 	198,0001 	48,001 	9504,00 
12201M 128329223 	If6IiestrukturovanapodPlechovoukryfinU§1,5m 	I m2 	I 	227,7001 	152,001 	34610:401 
	W 		198*1,15 'Pfepo~tene koeficientem mnozstvl 		- 227,700	-- --- - ------ 		
221 	K 	764R01 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabu Ice - K 01 	kus 	1,000 	1450,00 	1450,001 	
222 	K 	764R02 	Konstrukce klemplfske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 02a 	kus 	2,000 	1700,00 	3400,001 	
223 	K 	764R03 	Konstrukce klempifske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 02b 	kus 	1,000 	2000,00 	2000,00 	
224 	K 	764R04 	Konstrukce klempirske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 03 	m 	40,620 	297,00 	12064,141 	
225 	K 	764R05 	Konstrukce klernpffske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 04 	m 	46,660 	297,00 	13858,021 	
Strana 20 z 25 

PC Typ 	K6d 	Popis 	MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	
226 	K 	764R06 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 05a 	kus 	2,000 	5500,00 	11 000,00 	
227 	K 	764R07 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 05b 	kus 	1,000 	5500,00 	5500,00 	
228 	K 	764R08 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 05c 	kus 	1,000 	5500,00 	5500,00 	
229 	K 	764R09 	Konstrukce klernplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 05d 	kus 	1,000 	5500,00 	5500,00 	
230 	K 	764R10 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 06a 	m2 	111,000 	785,00 	87135,00 	
231 	K 	764R11 	Konstrukce klemplrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 06b 	m2 	87,000 	785,00 	68295,00 	
232 	K 	764R12 	Konstrukce klempfrske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - K 07 	m 	141,400 	37,00 	5231,80 	
233 	K 	998764202 	presun hmot procentnl pro konstrukce klemplrske v objektech v do 12 m 	% 	2650,480 	1,56 	4134,75 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;20;(1058,0);(0,0);(0,6413);(27,6413);(27,21494);(1086,21494);(1086,17029);(3038,17029);(3038,21494);(18153,21494);(18153,17029);(21499,17029);(21499,10049);(18153,10049);(18153,1105);(5157,1105);(5157,1672);(2174,1672);(2174,10049);(1058,10049)posrelh0posrelv0pib

765 

765191011 

998765202 

Krvtina skladana 

39,00 

5,33 

10840,60 

7722,00 

548,56 

91,228 
-10,363 
9,148 
0,066 
0,066 
0,073 
	D 766 	Konstrukce truhlarske 	299875,14 
	12371 K 17664112R1 	--rF"as~d~ z prken 68/24 - RHOMBUS vodorovn6,kompl prov vc rolitu a difusnl f6lie 	I . -~2-C 117,0791 ---1236,()01 -----144709;64] 
	w 	FS 07,05 
	w 	- prkna 68/24 mm tvar RHOMBUS 
	W 	- rest z latl 30/50 mm 
	w 	- difusni f6lie proti UV zareni 
	W 	FS 07 
	w 	2,37*2*(6,13+12,8)+3*0,5 
	w 	-1,36*2,54*3 
	w 	FS05 
	w 	2,37*(6,33+4,5+6,16+1,48) 	43,774 
	W 	-0,9*2,1*4 	-7,560 
	W 	soucet 	117,079 
	12381 K 17664112R2 	-1i::asadazprken60/20-RHOMBUSvodorovn6,komplprovvcrolituadifusnlf61ie 	I m2 I 	12,5771 	1260,001 	15847,021 
	w 	FS 06, FS09 
	w 	- prkna 60/20 mm tvar RHOMBUS 
	w 	- rost z latl 30/50 mm 
	w 	- difusnl f61ie proti UV zarenl 
	W 	FS06 
	w 	2,37*(3,16+0,7) 
	w 	FS09 
	w 	0,31*(5,46+6,5-0,9) 		3,429 
	w 	soueet 		12,577 
	12391 K 1766417211 	I Montat oblozenl st6n podkladoveho ro!ltu 	T--rn--I- 1-3,722[· 	53,801 	738,241 
	w 	u soklu altan 
	w 	6,861*2 	13,722 
	w 	soucet 	13,722 
	1240 I M 160512125 	Ihranol stavebni fezivo prilfezu do 120cm2 do dl6m 	I m3 I 	0,073 ,-6600,O() I 	481,8() I 
	w 	pro rost 
	W 	0,06*0,08*13,722 
	w 	soucet 
	w 	0,066*1,1 'Pfepoctene koeficientem rnnozstvl 

Strana 21 z 25 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mnoi:stvi J.cena [CZKl 
Cena celkem [CZKl 
241\ K \766427112 	\ Montaz oblozenl podhledu podkladoveho rostu 
T 
m 
T 
144,640\ 	92,80\ 
13422,59 
W 	PH01 
W 	72,32*2 	144,640 
\242\ M \60512135 	Ihranol stavebnl fezivo pn'Jfezu do 288cm2 do dl6m 	.. u ---ru ~3-1 -- O,382r- 6 700,-00\ 	2559,4?] 
	W 	144,64*0,06*0,04 	0,347 
	.. 		v,"""'" I I I 'V V,,","vll'liOi' n.Vv-II\"o'v'n ••.•• II IIUIU,"","" 		V,VV,," 			
243 	K 	766R1 	Konstrukce truhlal'ske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - T 01 	kus 	3,000 	720,00 	2160,00 	
244 	K 	766R2 	Konstrukce truhlal'ske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - T 02 	m 	31,900 	196,00 	6252,40 	
245 	K 	766R3 	Konstrukce truhlarske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - T 03 	kus 	1,000 	38000,00 	38000,00 	
246 	K 	766R4 	Konstrukce truhlal'ske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - T 04 	kus 	1,000 	41000,00 	41000,00 	
247 	K 	766R5 	Konstrukce truhlarske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - T 05 	kus 	1,000 	26000,00 	26000,00 	
248 	K 	766R6 	Konstrukce truhlal'ske - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - T 06 	kus 	1,000 	5500,00 	5500,00 	
249 	K 	998766202 	presun hmot procentnl pro konstrukce truhlal'ske v objektech v do 12 m 	% 	2966,710 	1,08 	3204,05 	
D 767 
Konstrukce zamecnicke 
391 300.00 
250 	K 	767R01 	Konstrukce zamel:nicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 01 	kus 	1,000 	5800,00 	5800,00 	
251 	K 	767R02 	Konstrukce zarnecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 02 	kus 	1,000 	17 900,00 	17900,00 	
252 	K 	767R03 	Konstrukce zamecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneno popisu v tabulce - Z 03 	kus 	1,000 	17900,00 	17900,00 	
253 	K 	767R04 	Konstrukce zarnecnlcke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 04 	kus 	1,000 	9300,00 	9300,00 	
254 	K 	767R05 	Konstrukce zameenicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 05 	kus 	1,000 	8500,00 	8500,00 	
255 	K 	767R06 	Konstrukce zamel:nicke - prvky kompletizovane,kompl prov die poorobneno popisu v tabulce - Z 06a 	kus 	1,000 	16200,00 	16200,00 	
256 	K 	767R07 	Konstrukce zamel:nicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 06b 	kus 	1,000 	16200,00 	16200,OO! 	
257 	K 	767R08 	Konstrukce zamel:nicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 07 	kus 	1,000 	27800,00 	27800,00 	
258 	K 	767R09 	Konstrukce zarnecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 08 	kus 	1,000 	11 900,00 	11900,00 	
259 	K 	767R10 	Konstrukce zarnecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 09 	kus 	1,000 	25000,00 	25000,00 	
260 	K 	767R11 	Konstrukce zamel:nicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 10 	kus 	1,000 	25000,00 	25000,00 	
261 	K 	767R12 	Konstrukce zamecnlcke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 11 a 	kus 	4,000 	11 000,00 	44 000,00 	
262 	K 	767R13 	Konstrukce zamecnlcke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 11 b 	kus 	4,000 	14600,00 	58400,00 	
263 	K 	767R14 	Konstrukce zamecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 11 c 	kus 	1,000 	17300,00 	17300,00 	
264 	K 	767R15 	Konstrukce zarneenicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 12 	kus 	1,000 	24000,00 	24000,00 	
265 	K 	767R16 	Konstrukce zamecnicke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce - Z 13 	kus 	1,000 	6200,00 	6200,00 	
266 	K 	767R17 	Konstrukce zameenicke - prvky kompletizovane,kompl prov die pcdrobneho popisu v tabulce - Z 14 	kus 	1,000 	2900,00 	2900,00 	
267 	K 	767R18 	Konstrukce zarneenlcke - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabu Ice - W 24 	kus 	3,000 	19000,00 	57000,00 	

771 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21486,0);(0,0);(0,21448);(531,21448);(531,19811);(21486,19811)posrelh0posrelv0pib

145222,90 
77147411R 	I Montaz sokllku z olazdlc keramickyeh rovnych flexibilnllepidlo v do 90 mm vI: rezanl 	I 	m 	I 	101,3401 	89,001 	9019,26 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,15957);(21236,15957);(21236,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
	2*(3,35+2,53+3,33+3,35+4,98+3,35+2,05+2,6+3,35+ 1, 7+3,35+2,93+1,23} 	76,200 
W 	2*(1,78+4,78+1,51+4,5} 	25,140 
W 	soucet 	101,340 
12691 K 177157412R 	I Montaz podlah keramickYch reznych hladkYch lepenych flexibilnlm lepidlem vI: sparovanl 	I m2 	1 	85,820C- 	408,001 	35014,561 
	W 	PD01 
	W 	9,05+11,43+8,62+8,14+7,3+1,25+5,85 			51,640 
Strana 22 z 25 

PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZKj 
	w 	PD2 
	w 	4,01 +4,65 	8,660 
	W 	PD04 
	W 	8,47+1,55+2,46+5,94+7,1 	25,520 
	W 	Soueet 	85,820 
\270\ M \59761116 	\dlatdice keramicke hutne tl8 mm die vjMru 	- -- 	\ m2 	\ 	103,320 \ 	463,00 \ 	47837,161 
	W 	dlazba 
	W 	85,82 				85,820 
	W 	sokl 
	W 	101,34*0,08 				8,107 
	W 	soueet 				93,927 
		93,927*1,1 'Pfepo{:tene koeficientem mnozstvl 				103,320 

771591111 	IPodlahypenetracepodkladu 	I m2 I 	107,5991 	47,201 	5078,67 
51.64+8,66+25,52+21,779 	107,599 

	W 	51,64+8,66 	60,300 
7719901R1 	IVyrovnanl podkladu samonivelacnl sterkou tI 0-5 mm 	I m2 	60,3001 	359,001 	21647,70 

[:273IK \7719901R2 	Ivyrov~an' podkladu samoni~eia~nl St~rkoutI0~5~m- 	1 m2 1 	25,5201 	692,001 	17659,841 
	W 	25,52 		25,520 
12741 K 1998771202 	Ipfesun hmot procentnl pro podlahy z dlazdic v objektech v do 12 m 	\ 	% 	\ 1362,570\ 	6,58\ 	8965,711 
772 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21489,0);(0,0);(0,21492);(506,21492);(506,20084);(2039,20084);(2039,12462);(21489,12462)posrelh0posrelv0pib
Kladenl dlazby z kamene z pravouhlych desek a dlazdic lepenych tI do 50 mm 
694,00 
15114,63 

777 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(788,0);(0,0);(0,21484);(21483,21484);(21483,14196);(3172,14196);(3172,1803);(9144,1803);(9144,721);(788,721)posrelh0posrelv0pib
Pfesun hmot procentnl pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m 

68025.22 

7725212501 
PS07 
1 ,45*{2,53+3,33+4,98+1, 13+1,35+1,7 
5838110R 
deska kamenna tl 50 mm 
2190,00 
49603,50 
21,779*1,04 'Pfeoo{:tene koeficientem mnozstvl 
998772202 
5,11 
3307,09 

62896,34 
777511105 	I Krycl epoxidova sterka tlou~fky pres 2 do 3 mm dekorativnllite podlahy v{: vytazenl na steny 100 mm 	I m2 I 	68,3431 	913,001 	62397,16 

PD03 
	W 	41,86+8,31+12,68 	62,850 
	W 	0,1*2*(5,87+8,512+2,93+2,85+2,825+4,48) 	5,493 
	W 	soucet 	68,343 
[:279\ K \998777202-- rPfesunhrnotprocentnlpropodlahylitevobjekteChVd012m- 	- -------- 	\ 	% 	\ 	623,970\ 	0,80\ 	499,18\ 

781 
Dokoncovacl orace - obklad 

75605,92 
78147411R 	I Montaz obkladu vnitfnlch keramlckych hladkych lepenych f1exibilnlm lepidlem v{: sparovani 	I m2 I 	73,7681 	435,001 	32089,08 

1,4*1,35+2,1*(1,35+1,01*2)-1,38 
	W 	2,1*2*(1,62+2,93)-1,38 
	W 	2,2*2*(1,645+1 )-0,7*2, 1 
	W 	2,2*2*(1,6+1,35+0,345)-0,7*2,1-0,9*2,1 
	W 	2,2*2*{2,3+2,45+0,345)-0,9*2,1 
	W 	0,85*{2,225+0,6*2) 
	W 	0,85*(0,6*2+3,16) 
	W 	Soucet 	73,768 
\281\ M \59761116 	\dlazdicekeramickehutnetI8mmd/~- ----~~-~---~-~~ 	u __ m_ --Cm2 	\ 	81,145\ 	----:re3;DoT------ ~37570,i4J 
	W 	73,768*1,1 'Pfepo{:tene koeficientem mnozstvt 			81,145 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21473);(1150,21473);(1150,5006);(21487,5006)posrelh0posrelv0pib
2821 K 1781495111 	IPenetracepodkladuvnitfnlchobkladu 	m2 I 	73,7681 	47,201 	3481,85 

Strana 23 z 25 

PC Typ 	Ked 	
2831 K 1998781202 	
	782 	
	782991111 	
		
	782991421 	
w 		
w 		
	998782202 	
	-- 	
	783 	
	783213011 	
		
	783218111 	
		
	783817101 	
	783937161 	
w 		
w 		
	784 	
Popis 
MJ 	Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21479);(11016,21479);(11016,19525);(21487,19525)posrelh0posrelv0pib
T Pfesun hmot procentn! pro obklady keramlcke v objektech v do 12 m 
1	% 	1	731,4101 	3,371 	2464,85 
		3476,25 	
	48,501 	1 019,86 	
			
	112,001 	2355,14 	
			
	3,001 	101,25 	
		49441,85 	
	61,201 	9880,13 	
			
	192,001 	13885,44 	
			
I 	77,701 	9568,76 	
	208,00: 	16107,52 	
77,440 		
		73121,70 	
Dokoncovacl Drace - obkladv z kamene 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(11016,0);(0,0);(0,21452);(21487,21452);(21487,6777);(11016,6777)posrelh0posrelv0pib

Penetrace podkladu z kamene 
PS06 
1,4*(2,53+3,33+4,98+1,13+1,7+1.35 

Zakladnl c:i~tl!nl kamennych sten vc:etne jednovrstveho impreqnacnlho nateru 
PS06 
1,4*(2,53+3,33+4,98+1,13+1,7+1,35 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21497);(11286,21497);(11286,20316);(21482,20316)posrelh0posrelv0pib
presun hmot procentnl pro obklady karnenne v objektech v do 12 m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,21470);(11016,21470);(11016,20545);(21487,20545)posrelh0posrelv0pib
784181101 	IZakladn! akrylatova jednonasobna penetrace podkladu v mlstnostech vy§ky do 3,80m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21492,0);(0,0);(0,21496);(343,21496);(343,21096);(1210,21096);(1210,16496);(4677,16496);(4677,8058);(21492,8058)posrelh0posrelv0pib

Napou§tecl jednonasobny synteticky biocidnl nater tesafskych prvku nezabudovanycn do konstrukce 
0,2*4*(110+5,16+86.64 
Lazurovac! dvojnasobny synteticky nater tesafskych konstrukcl 
PH 01 
72,32 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,21487);(14330,21487);(14330,18582);(21489,18582)posrelh0posrelv0pib
Krycl jednonasobny bezpra~ny transparentn! nater hladkych betonovycn povrchu 
Kryc! dvojnasobny epoxidovy vodou feditelny nater betonove podlahy 
PO 05 
39,13+19,09+19,22 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(14233,0);(0,0);(0,20333);(21235,20333);(21235,21452);(21491,21452);(21491,2239);(14233,2239)posrelh0posrelv0pib
	W 	omltky 
	W 	339,945 	339,945 
	W 	1,1 *2,3*8+1,8*0,7 	21,500 
	W 	1,58*10+1,38*4+1,78*2+1,6*197*2 	655,280 
	W 	soueet 	1 016,725 
14,90 
15149,20 
12921 K 1784211131 	IOvojnasobne bile malby ze smes! za mokra minimalne oteruvzdomych v mlstnostech do 3,80 m 	I 	m2 	1 202,7491 ---48~iol 	57972,501 
	W 	PH 02 
	W 	25,52 
	W 	PH 03 
	W 	39,13+19,09+19,22 
	W 	omltky 
	W 	339,945 
	W 	1,1*2,3*8+1,8*0,7 
	W 	1,58*10+1,38*4+1,78*2+1,6*197*2 
	W 	SOKprlc:ky 
	W 	45,362+2,412+8,233+3,708 
	W 	2*(5,4+6,765+4,05+21,192) 
	W 	-2,2*2*(1,645+1+1,6+1,35+0,345+2,3+2,45+0,345) 
	W 	-0,85*(2,225+0,6*2) 
	W 	soucet 
o	VRN 
VRN1 

013254000 
Strana 24 z 25 
25,520 
77,440 
339,945 
21,500 
655,280 
59,715 
74,814 
-48,554 
-2,911 
1202,749 
Vedlejsf rozpoctove naklady 

race 

Dllenska dokumentace a Ookumentace skuteeneho provedenl stavby 
309166,83 
65 000,00 
65000,00 
65000,00 

PC Typ 	Ked 	Popis 	MJ 	Mnozstvi 	J.cena [CZKj 	. Cena celkem [CZKj 	
VRN3 		Zai'fzenf staveniste 				9391032 	
030001000 	Zarrzenl staveni~t~ 			93910,32 	93910,32 	
VRN4 						3756413 	
045002000 				93910,32 	37564,13 	
VRN5 	Financnl naklad 				46955,16 	
052002000 	Finanenl rezerva 			93910,32 	46955,16 	
VRN6 					65737,22 	
065002000 				93910,32 	65737,22 	

Strana 25 z 25 

KRyci LIST SOUPISU PRAci 
Stavba: 
CENTRUM CHOCERADY, REKONSTRUKCE OBJEKTU 80.02 
Objekt: 
0.1.4 VENKOVNi VOOOVOO A KANALIZACE 

KSO: 
M(sto: 
Zadavatel: 
uchazec: 
Vypln udaj 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Ing. K. Dovrtel 
Poznarnka: 

CHOCERADY, p.i:. 244/10,11,12,13 

CC-CZ: 
Datum: 
IG: 
DIG: 
IG: 
DIG: 
IG: 
DIG: 
IG: 
DIG: 

25.10.2018 
Vypln udaj 
Vypln udaj 

Cena bez DPH 			311 677,74 	
	Zaklad dane 	Sazba dane 	vyt.e dane 	
DPH zakladnl 	311677,74 	21,00% 	65452,33 	
snlzena 	0,00 	15,00% 	0,00 	
ICenas DPH 	v 	CZK 	377130,07 	
Strana 1 z 7 

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRAci 
Stavba: 
CENTRUM CHOCERADY. REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02 
Objekt: 
0.1.4 VENKOVNi VOOOVOO A KANALIZACE 

Misto: 
Zadavatel: 
ucnazee: 
K6d dilu - Popis 

CHOCERADY. p.e. 244/10.11.12.13 
Vyph'l uda] 

Datum: 	25. 10.2018 
Projektant: 
Zpracovatel: 	Ing. K. Dovrtel 
Cena celkem [CZK] 

Naklady ze soupisu praci 
HSV - Prace a dodavky HSV 
1 - Zemni prace 
4 - Vodorovne konstrukce 
5 - Komunikace 
8 - Trubni vedeni 
99 - Pi'esun hmot 
PSV - Prace a dodavky PSV 
721 - Zdravotechnika - vniti'ni kanalizace 
722 - Zdravotechnika - vniti'ni vodovod 

Strana Z z 7 

.311 677,74 
309171,18 
142179,11 
5440,38 
53856,00 
87394,98 
20 300,71 
2506,56 
1 580,00 
926,56 

SOUPIS PRAci 
Stavba: 
CENTRUM CHOCERADY, REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02 
Objekt: 
0.1.4 VENKOVNi VOOOVOO A KANALIZACE 
Misto: 

Zadavatel: 
ucnazee: 
CHOCERADY, p.c, 244110,11,12,13 
Datum: 
25.10.2018 
Vyph'\ Odaj 
Projektant: 
Zpracovalel: 
Ing. K. Dovrtel 
PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZKl 	Cena celkem [CZKl 
Naklady soupisu celkem 
113107131 
Odstranenl podkladu pi do 50 m2 z belonu prosteho II 150 mm 

311 677,74 
309171,18 
142179,11 
D 	HSV 
1 
Prace a dodavky HSV 

113107122 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21497,0);(0,0);(0,21491);(178,21491);(178,19811);(18608,19811);(18608,20630);(21497,20630)posrelh0posrelv0pib
61,00 
1952,00 

Odstraneni podkladu pi do 50 m2 z kameniva drceneho 11 200 mm 
(20*0,8) "vYfez vozovky vodovod 
2*{10*0,8) "vYfez vozovky kanalizace 
Soueet 
vv 
255,00 
8160,00 

Odstraneni podkladu nebo krytu s pi'emislenim hmol na skladku na vzdalenosl do 3 m nebo s nalozenim na dopravm prosli'edek v plose 
·ednotlive do 50 m2 z belonu prosleho. 0 II. vrstvv pres 100 do 150 mm 
PP 

62,00 
1984,00 
113107141 
Odstranenl podkladu pi do 50 m2 zivi~nych II 50 mm 
PP 	Odstraneni podkladu pi do 50 m2 iivicnych II 50 mm 
[4J}(-1113154123- 	IFrezov~ni zivicneho krytu tl50 mm pruh s 1 m pi do 500 m2 bez pfek~zek vlrase 	1 m2 -, n-32,000[ 	102,001 	3264,001 
	PP 	Frezovani iivicneho krytu 11 50 mm pruh s 1 m pi do 500 m2 bez prekazek v trase 
I 5 I K 1131201201~---n 	IHloubeni jam zapazenych v hornine If. 3 objemu do 100 m3 	1 m3 I ---34,0001 	646,001 	21964,001 
	PP 	Hloubeni zapaienych jam a zarezu s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu v homine tr. 3 do 100 m3 
	W 	2*{2,5*2,5*2,0) "sachty 	25,000 
	W 	2*{1 ,5*1 ,5*2,0) "napojeni 	9,000 
	W 	Soucet 	34,000 
I 6 I K 1131201209 	IpriPlalek za lepivosl u hloubenijam zapazenych v ho~~--- m __ m___ 	I m3 I 	17,0001 	43,001 	731~601 
	PP 	Hloubeni zapaienych jam a zarezu s urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu Priplalek k cenarn za lepivosl hominy tr. 3 
	W 	0,5*34,000 "hloubeni jam 		17,000 
	W 	soucet 		17,000 
171 K 1132201201 	IHloubenirYhsdo2000mmvhominelf.30bjemudo100m3 	I m3 I 	49,6001 	425,001 	21080.00] 
Hloubeni zapazenych i nezapazenych rYh sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu v homine tr. 3 
do 100 m3 
	W 	(12*0,8*1 ,5)+{12*0,8*1,5) "kanalizace vnejsi 	28,800 
	W 	((20)*0,8*1 ,3) "vodovod 	20,800 
	W 	soueet 	49,600 
PP 
I 8 I K 1132201209 	Ipfiplalekzalepivostkhloubeniryhsdo2000mmvhorninetr:-3 	1 m3 -1--24,8001 	27,501 	682,001 
Hloubeni zapazenych i nezapazenych rYh sirkY pres 600 do 2 000 mm s urovnimim dna do predepsaneho profilu a spadu v homine Ir. 3 

Priplalek k cenern za lepivost hominy tr. 3 
0,5*49,600 "hloubeni ryh 
soucet 
PP 
W 
24,800 
24,800 
W 
Strana 3 z 7 

PC Typ 	K6d 
Popis 
MJ 	Mnozstvi J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZKj 
9 TI< 1151101102 
Izrfzenf prflozneho pazeni a rozeprent sten rYh hi do 4 m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(16368,0);(835,0);(835,10193);(0,10193);(0,21495);(1058,21495);(1058,16612);(3038,16612);(3038,20387);(3095,20387);(3095,19936);(17093,19936);(17093,20387);(17148,20387);(17148,16612);(21499,16612);(21499,10193);(16368,10193)posrelh0posrelv0pib
pp 
W 
W 
W 
W 
151101301 
1 	m2 	1 	112,0001 	186,001 	20832,00 
20,000 
12,000 
54,000 
26,000 
70,00 
2380,00 
Znzeni rozepfeni sten pii paieni pnloznem hi do 4 m 
W 	34,000 "jamy 	34,000 
W 	soueet 	34,000 

1121 K 11511013-11 	IOdstranenf rozeprenf sten pi'i pazenf prfloznem hi do 4 m 	1 	m3 	1 	34,0001 	15,001 	510,001 
	PP 	Odstraneni rozepfeni stim pii pazeni piiloznem hi do 4 m 

	K 161101101 			88,70 	7415,32 
		Svisle premlst m yYkopku bez nalozem do dopravm n doby a 	k s vyprazdnemm dopravm nadoby na hromadu nebo do dopravmho 

prostfedku z hominy If. 1 ai 4. pii hloubce vYkopu pres 1 do 2.5 m 
34,000 "hloubenf jam 
49,600 "hloubenf rYh 
soucet 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21492,0);(0,0);(0,19942);(5367,19942);(5367,20449);(7670,20449);(7670,21489);(21492,21489)posrelh0posrelv0pib
Vodorovne premfstenf do 50 m vykopkulsypaniny z hominy tr. 1 ed 4 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(10726,0);(0,0);(0,21452);(11286,21452);(11286,14675);(18653,14675);(18653,13555);(19213,13555);(19213,21452);(21482,21452);(21482,5598);(10726,5598)posrelh0posrelv0pib
Vodorovne premlstem yYkopku riebo sypaniny po suchu na obvyklem dopravnim prostiedku. bez nalozeni vYkopku, avsak se slozenfm 
bez rozhmuti z hominy tf. 1 az 4 na vzdillenost pres 20 do 50 m 
0,957+3,520 "podsypy 
13,792+18,645 "obsypy 
0,020*(12+12) "potrubf 
2*0,785*2,0 "objekty 
soucet 
IZasyp jam, sachet rYh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnenlrn 

Zasyp sypaninou z jakekoliv hominy s ulozemm yYkopku ve vrstvlich se zhutnenim jam, sachef,ryhriebo kolem objektu v techto 
vvkopavkach 
Poznamka k p%ice:o 
- mimo h/avni koridor slt! 
34,000+49,600 "hloubene vykopavky 
-40,534 "vodorovny presun 
soucet 
Obsypant objektu nad pi'ilehlym puvodnlm terenern sypaninou bez prohozenf sftem, ulozenou do 3 m 

Obsypani objektU nad plilehlym puvodnim terenem sypaninou z vhodnychhomiri 1az 4 nebo materililem ulozenym ve vzdalenosti do 3 
mod vneisiho krale obiektu pro iakoukoliv miru zhutneni bez prohozeni svoaninv sitem 
(12*0,8*0,46)+(12*0,8*0,46)-(0,020*(12+12» "kanalizace vnej~f 
«20)*0,8*0,34) "vodovod 
Soueet 
583313400 
kamenivo tezene drobne frakce 0-4 pro 
40,00 
1 621,36 

95,00 
4091,27 

618,00 
8523,46 

255,00 
6647,09 
PP 
kamenivo pnrodni tezene pro stavebni uealy PTK (drobne, hrube, sterkopisky) kamenivo tezene drobne 0<=2 mm (CSN EN 13(43) 
0<=4 mm (CSN EN 12620. CSN EN 13139) d=O mm. 0<=6.3 mm (CSN EN 13242) frakce 0-4 prana 
W 	1,89*13,792 "obsyp potrubf 	26,067 
W 	Soueet 	26,067 
118\ M 1583101 	\vyhledaVaC{ vodic CYKY 4mm 	1 	m 	1 	25,0001 	13,001 	-325,00] 
	PP 	vyhledavaci vodic CYKY 4mm 
	W 	1,25*(20) "vodovod 
	W 	soucet 
Strana 4 z 7 
25,000 
25,000 

PC Typ 	K6d 
Popis 
MJ 	Mnoi:stvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
19TM"1583102 
10chranna folie 
1	m 	1	20,000 1	7,00 1	140,00 

ochranna folie 
20 "polozena nad potrubl vodovodu 
soucet 
PP 
W 
175101201 
Obsypanl objektu nad pfilehlym puvodnirn terenem sypaninou bez prohozenl sltern, ulozenou do 3 m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,20121);(6606,20121);(6606,21486);(21491,21486)posrelh0posrelv0pib
618,00 
11 522,61 
Obsypani objektU nad pi'ilehlym puvodnlm terenem sypaninou z vhodnychhomin-'faz 4 nebo materialem ulozenym ve vzdalenosti do-:) 
m od vneisiho kraie objektu pro jakoukoliv miru zhutneni bez prohozeni sypaniny sitem 
W 	2*(2,5*2,5*1,5)-2*(0,785*1,5) "§achty 	16,395 
W 	2*(1,5*1,5*0,50) "napojenl 	2,250 
W 	Soucet 	18,645 
PP 
1211 M IS83439300R 	pc;,;;,;w~drcenehrubefrakce32 	1 	t 	1 	31,7521 	250,001 	7938:001 
	PP 	kamenivo drcene hrube frakce 16-32 
	W 	1,703*18,645 "obsyp objekty 
	W 	soucet 
31,752 
31,752 

4 
Vodorovne konstrukce 
451541110R 
t.oze pod potrubl otevreny vykop ze §terku fr. 32 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21491,0);(0,0);(0,20333);(21235,20333);(21235,21452);(21491,21452)posrelh0posrelv0pib
5440.38 
940,00 
899,58 
Loze pod potrubi otevreny yYkop ze sterkodr1e 
W 	2*(1,3*1,3*0,15) "§achty 	0,507 
W 	2*(1,5*1,5*0,10) "napojenf 	0,450 
W 	soucet 	0,957 
1231 K 1451572111 	ILozepodpotrubfotevrenyVYkopikam~adrobnehotezeneho 	- --=rm3-r==Y~520C129O,Ool------- ---454D.801 
	PP 	Loze pod potrubi, stoky a drobne objekty v otevfenem yYkopu z kameniva drobneho tezeneho 0 at 4 mm 
	W 	(12*0,8*0,10)+(12*0,8*0,10) "kanalizace vnej~f 
	W 	«20)*0,8*0,10) "vodovod 
	W 	soucet 
1,920 
1,600 
3,520 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21470);(10726,21470);(10726,20545);(21482,20545)posrelh0posrelv0pib
5 
Komunikace 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,20333);(20982,20333);(20982,21452);(21489,21452)posrelh0posrelv0pib
53856,00 
564851111 
Podklad ze §terkodrte SD tl150 mm 
112,00 
3584,00 
PP 	Podklad ze sterkodr1e $0 tl150 mm 
W 	(20*0,8) "vyrez vozovky vodovod 	16,000 
W 	2*(10*0,8) "vyfez vozovky kanalizace 	16,000 
W 	soueet 	32,000 
----- 
Asfaltovy beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalovane kamenivo OKS) II 80 mm ~ do 3 m 	477,00 	15264,00 
AsfaltoyY beton vrstva podkladni ACP 16 (obaJovane kamenivo stfednezmne - OKS) s rozprosti'enim a zhutn nim v pruhu simy do 3 m, 
o zhutneni U. 80 mm 
PP 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;16;(3065,0);(0,0);(0,21486);(3065,21486);(3065,20488);(14778,20488);(14778,21153);(18013,21153);(18013,15782);(21499,15782);(21499,6036);(18013,6036);(18013,0);(9200,0);(9200,5021);(3065,5021)posrelh0posrelv0pib
Podklad z kameniva zpevneneho cementem KSC I II 150 mm 
232,00 
7424,00 
	PP 	Asfaltovy beton-vrstliaobrusna ACO 11 (ASS) s rozprostrenim a se zhutnenlm z -iTiodilikovaneho asfaltu v pruhu sii'ky do 3 m, po 
zhutneni tl. 50 mm 
390,00 
12480,00 
1291 K 1577166111 	IAsfaltovy beton vrstva loznf ACL 22 (ABVH) tl70 ~~Td~3-;-z nemodifik;;W~eho asfaltu 	Lm2 1 	32,0001 	454,001 	14528,001 
	PP 	AsfaltoyY beton vrstva lozni ACL 22 (ASVH) tl 70 mm s do 3 m z nemoditikovanehc asfaltu 
8 
Trubni vedeni 

87394,98 

871171141 
Montaz potrubl z PE100 SDR 11 otevreny vykop svafovanych na tupo D 40 x 3,7 mm 
58,00 
1740,00 
W 
Montaz vodovodniho potrubi z plastu v otevi'enem v)lkopu z polyetylenu PE 100 svarovanych na tupo SOR 111PN16 040 x 3,7 mm 
20+10" vodovod 
soucet 
30,000 
30,000 
Strana 5 z 7 

PC Typ 	K6d 
Popis 
MJ 	Mnoi:stvr J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
311M 128613111 
Ipotrubf vodovodnf PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm 
1 	m _n T----- 30,450 1	38,00 1	1 157,10 
871310310 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21496,0);(0,0);(0,21479);(113,21479);(113,20190);(911,20190);(911,12996);(21496,12996)posrelh0posrelv0pib
MontAZ kanalizaenlho potrubi hladkeho plnostenneho SN 10 z polypropylenu ON 150 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,19689);(20982,19689);(20982,21462);(21489,21462)posrelh0posrelv0pib
130,00 
3120,00 
PP 

Montitz kanalizacniho potrubi z plastu z polypropytenu PP hladkeho plnostenneho SN 10 ON 150 
	W 	(12+12) "kanalizace vnej~i 	24,000 
	W 	soucet 	24,000 
1331 M 128617011 	Itrubka kanalizatnf PP plnostenna tfivrstva DN 150x3000 ;;'-';-SN10 	1 	m 	I 	24,360 I 	483,00 I 	11 765,881 
	PP 	trubka kanalizacni PP plnostenna tiivrstva ON 150x3000 mm SN 10 
	W 	1,015*24 				24,360 
1341 K 1879221111 	IMontazvodovodnipnpojkyna potrubi ON 63 	I kus I 	1,0001 	1040,001 	1040,001 
	PP 	Montitz napojeni vodovodni pnpojky v otevfenem vYkopu ve sklonu pres 20 % ON 63 
	W 	1 "napojeni na stavajici vodovod 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
1351 K IS92000012R 	Izamefenitrasypotrubi 	m 	I 	54,0001 	62,001 	3348,001 
	PP 	Zamei'eni trasy potrubi 
	W 	12+12 "kanalizace vnej~i 			24,000 
	W 	20+10 "vodovod 			30,000 
	w 	soucet 			54,000 
I 361 K IS9200040R 	I Napojeni svodu vr1itfni-kanali.z.ace 	I kus I 	2,0001 	2200,001 	4400,001 
	PP 	Napojeni svodu vniti'ni kanalizace 
Poznamka k poloice:O 
- napeieni vniti'niho svodu splaskove kanalizace 
	W 	2 "napojeni vnitffii kanalizace 	2,000 
	W 	soucet 	2,000 
P 
I 371 K IS9200150R 	I Napojeni na stavajici kanalizacni stoku 	I kus I 	2,0001 	2600,001 	5200,001 
	PP 	Napojeni svodu vniti'ni kanalizace 
Poznamka k poloice:o 
- napeieni vniti'niho svodu splaskove kanalizace 
	W 	2 "napojeni na stavajici stoku 	2,000 
	W 	soucet 	2,000 
P 
13S1 K IS92221111R 	IZkou~katesnostikanalizacnihopotrubi 	m 	I 	24,0001 	31,001 	744,001 
	PP 	Zkouska tesnosti kanalizacniho potrubi 
	W 	12+12 "kanalizace vnej~i 			24,000 
	W 	soucet 			24,000 
I 391 K 1892233121 	IproPlach a desinfekce vodovodniho potrubi ON ()d-40 do 70 	I 	m 	I 	30,0001 	40,001 	1200,001 
	PP 	Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi ON od 40 do 70 
	W 	10+20 "vodovod 				30,000 
	W 	soueet 				30,000 
I 40 I K IS92241111 	ITlakova zkou~ka vodou potrubi do 80 	I 	m 	I 	30,0001 	17,001 	510,001 
	PP 	Tlakova zkouska vodou potrubi do 80 
	W 	10+20 "vodovod 				30,000 
	W 	soucet 				30,000 
FI K IS94411120R-n -rZfi.z.eni ~achet-kana~.z.bet()oo0Chdl~ dno prefabrikov;';-na potrubi nad 150 do 200 	kus 	2,0001 	9 S50,ooI 	19700,001 
	PP 	Znzeni sachet kanalizacnich z betonovych dilcu dno prefabrikovane na potrubi nad 200 do 300 
	W 	2 "~achta 		2,000 
	W 	soueet 		2,000 
1421 M 159224064 	Idn;;t;;iO~$aehtovekulateDN800x500,80x65x15em 	kus 	2,0001 	5400,001 	10800,001 
	PP 	dno betonove sachtove kulate ON 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm 
[43]. iq 59224312 	I k6nus saehetnf betonovy kapsove plastove stupadlo 80x62,5x58 em 	I kus I 	2,000 I 	1 970,00 I 	3 940,00 I 
Strana 6 z 7 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(18373,0);(0,0);(0,21488);(10741,21488);(10741,18148);(21497,18148);(21497,12221);(18373,12221)posrelh0posrelv0pib
K6d 
Popis 
MJ 
Mnozstvi J.cena [CZKl 	Cena celkem [CZKl 
PP 	skruz betonova ON 1000x250, 100x25x12 em 
skru2 betonova ON 800x250, 80x25x12 em 

950,00 
1900,00 
k6nus sachetni betonovY kapsove plastove stupadlo 100x62,5x58 cm 
	1451 M 159224011 	--y;r~tenecbetonoVjvyro~n-avaef ke krytu saehty 62,5x6x10 em 	u __ ~ kus I 	4,000 I 	-193.00]-- 	--772.00] 
'PP 	prstenec betonovY vyrovnavaci ke krytu Sachty 62,5x6x10 em 
I 46 I M 1592243480 	I tesnenf e/astomerove pro spojenfiachetnfel7 dlliJ EMT ON 800 	. -]-k-;;$ I 	6,oooL 	198,0£1 r 	1188,00 I 
	PP 	tesneni elastomerove pro spojenl Sachetnich dilu EMT ON 1000 

	K 1899104111 	IOsazeni poklopu Iitinovych nebo ocelovych veetne ramo hmotnosti nad 150 kg 	I kus I 	2,0001 	705,001 	1 410,00 
Osazeni poklopu litin0vYch a ocelovYch veelne ramu hmotnosti jednoUive pres 150 kg 
2 "sachta 
soucet 

552434420 
poklop na vstupnf saehtu litinov}! 600 0400, vzor OIN 

6730,00 
13460,00 
w 
vYrobky kanalizacni litinove kamily, mnze, rosty, vpusti, poklopy poklop na vstupni Sachtu CSN 136315.1, 2 600 0400, vzor DIN 
1,97044334975369*1,015 'Pfepo~tene koeficientem mnozstvi 
2,000 
	D 99 	Pi'esun hmot 	20300,71 
1491 K 1997221571 	Ivodorovnadopravavybouran~Chhmotdo1 km 	I 	t 	I 	21,9521 	226,001 	4961,151 
	PP 	Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km 
150 I K 1997221579 	IpfiPlatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy vybouranych hmot 	... _~n t 	I 	87,808[--' 14,001 	1229,311 
	PP 	Priplatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy vybouranych hmot 
	W 	4*21,952 			87,808 
	W 	soucet 			87,808 
I 51 I K 1997221845 	IpoPlatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchU na skladce (SkladkOvOe) 	-----. ----- 	I 	t [-21~952[ 	260,001 	5707,521 
	PP 	Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovYch povrchu na skladce (skladkovne) 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21473);(14115,21473);(14115,5006);(21482,5006)posrelh0posrelv0pib
K 1998276101 	IPfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevfeny vykop 									1 	t 	1 	8,8731 	947,001 	8402,73 
	n!l: __ •• _L. _. 	.l._.L._! .. _-' __ !I...I_ •• L._ .1."	• _.- ' __ '_ L L 	,_ L 	•.• _. __ ,_ -'. 	' __ L 	~ 	...• 	_J 	L • 	•• 	_-,, 	"_

PP 
W 
W 
rIG.,UII hrnot I-'IU trubni vedenl i,iu~u~flc i trub-z-Plastickych hmot neoo :sr;.lolamlrunovy(;n PIU vuuuvuuy neoo r;.tlrlClIIZC:I{,;t: v otevrenem 
vVkopu dopravnl vzdalenost do 15 m 
8,873 "pfesun hmot 
soucet 
8,873 
8,873 
D PSV 
Prace a dodavky PSV 
2506,56 
	D 721 	Zdravotechnika - vniti'ni kanalizace 	1 580,00 
I 531 K 1721242116 	ILapa~ slre§nich splavenin z PP se zapachovou klapkou a lapacim ko§em DN 125 	I kus I 	2,0001 	790,001 	1 u580,()O I 
	PP 	Lapace stiesnich splavenin z polypropylenu (PP) ON 125 [HL 600/21 
	W 	2 "Iapa~ splavenin 
	w 	Sou~et 
2,000 
2,000 
	D 722 	Zdravotechnika - vnitrni vodovod 	926,56 
1541 K 1722231024 	Iventi! pfimy G 5/4 S odvodnenim a dvema z~vity 	I kus I 	1,0001 	926,OOr-- 	926,001 
	PP 	Armatury se dvema zavity ventily prime s odvcdnovaclm ventilem (Ke 125 T) G 5/4 
	W 	1 "napojeni na stavallcl vodovod 
soueet 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(20931,0);(0,0);(0,21476);(21477,21476);(21477,12277);(20931,12277)posrelh0posrelv0pib
998722101 
Pfesun hmot tonaznt tonaznt pro vnitrni vodovod v objektech v do 6 m 

P1esun hmot tonaini tonaini pro vnitfni vodovod v objektech v do 6 m 
556,00 
0,56 
Strana 7 z 7 

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER 
5tavba: CENTRUM CHOCERAOY - REKON5TRUKCE OBJEKTU 50.02 
Objekt: 0.1.4 ZARlzENi PRO VYTAPENi 5TAVBY 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Misto: CHOCERADY, p.c, 244/10,11,12,13 

Zpracoval: 
Datum: 22. 10.2018 

	K6d poloiky 	Popis 

Cena celkem 

	PSV 	Prace a dodavky PSV 

69840,00 

		735 	Ustiedni vvtapeni - otopna telesa 				6984000 	
			elektrick}tm topnym telesem s integrovanym 					
			regulatorem teploty, s teplotnlm splnacem a 					
			omezovecem teploty, plnenl nemrznouci smesi KLME 					
1 	735 	73501)(01 	1820x750 - Qel = 1 2kW / 230V - dodavka a montei. 	kus 	1000 	464000 	4640,00 	
			ICleKTncKY pnmotopny KOnVeKTOr 0 rozmerecn sromm 					
			x 450mm x 100mm s integrovanym termostatem - Qel 					
2 	735 	735EPX01 	= 500W/ 230V - barva b/la - dodavka a montaz 	kus 	2,000 	3900,00 	7800,00 	
			I CleKTncKY pnmoropny KOnVeKTOr 0 rozmerecn 'f'f::Jmm 					
			x 450mm x 100mm s integrovanym termostatem - Qel 					
3 	735 	735EPX02 	= 1000W/ 230V - barva b/la - dodavka a montaz 	kus 	6000 	5100,00 	30600,00 	
			ICleKTncKY pnmoropny KOnVeKTOr 0 rozmerecn reumm 					
			x 450mm x 100mm s integrovanym termostatem - Qel 					
4 	735 	735EPX03 	= 2000W/ 230V - barva bUa - dodavka a montaz 	kus 	4,000 	6700,00 	26800,00 	

Celkem 
Strana 1 z 1 

69840,00 

Soupis praci a dodavek 
Stavba: 
Objekt: 
Cast: 
Silnoprouda elektroinstalace 
DETSKE CENTRUM STRANCICE, Hrdimi 175, 251 63 Stranflce, ICO: 43750672 
Ing. Michal Zurek 
03/2018 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 
				Mno.a;\vl 	Cena 	Cena 	
p.e 	TV 	Popis 	MJ 	celkem 	jednotkova 	celkem 	
				npl:: 			
		5 	6 		8 	9 	
1 	2 						
1 	hlavni rozvadec R-HO oceloplechovy, nastenny, s*v*h 590*915*250 mm . IP40/20, pi'istrojovy yYstroj 	ks 	1 	32000,00 #INilf,~liilif!i	
2 	die vykresove prilohy privod CYKY 4Jx35, rozvod HDO, central stop, total stop, 125A 					
3 	hl.vypinac 125/3 5 podpefovou civkou, patemi yYvody samostatne jistene nezalcnovane 					
4 	zalohovane pole: privod z DA, hl.vypinac 10013 s pcdpetovou civkou, samostatne jistene 					
5 	v~elii eodle v~kresove dokumentace 					
6 	rozvadec vytapeni RT-HO oceloplechovy, nastenny IP40/20, s*v*h 380*410*180 mm, vc.pi'istrojove yYstroje, komplatece, zapoje 	ks 	1 	fllifllil!illiU## fI,iI/!fI!##flJl 	
7 	zaeojeni die schema, jistiee 10kA 					
8 	Dozbrojeni rozvadece topeni R-HK v objektu 5001 	ks 	1 	4000,00 	#11 #,~#~'### 	
9 	instalacni krabice pi'istrojove pod omitku 	ks 	85 	21,00 	!U!h'H/;"i!f!I!J	
10 	OBO GRIP 30 	ks 	45 	26,00 	..................	
					u:rnnniliiiili	
11 	zasuvka 230V/16A 5 ochr.clonkami zapustena 	ks 	38 	197,00 	NflfiftJifiiitffi	
12 	tlacftko total stop kompletni 	ks 	1 	684,00 	684,00 	
13 	Vypinac pro zapustenou montaz razeni c.1 	ks 	12 	243,00 	#fI.~'~II#### 	
14 	vypinac pro zapustenou montaz razeni c.s 	ks 	16 	257,00 	tffJlfKfftff!ftJl	
15 	vypinac pro zapustencu montaz fazeni c.7 	ks 	5 	283,00 	tf •••• K!lf!ttNI!!J 	
16 	zasuvka pro vyrovnanl potencialu, zapustena 	ks 	1 	714,00 	714,00	
17 	zasuvka 230V/16A, IP44 pro zapustenou montaz 	ks 	20 	196,00 	##I~~ljII#:#~I# 	
18 	ukoncenl kabelu v rozvad6Ci a na zafizen! 	ks 	86 	67,00 NJJt!A'#NlIlI#	
19 	svitidlo vnitmi, podle specifikace investora 	ks 	35 	1180,00 ....•............. 	
20 	CYKY 4Jx35 mm2 	m 	72 	306,00 		
21 	CYKY 5Jx35 mm2 	m 	72 	327,00 		
22 	CYKY 5Jx6 mm2 	m 	58 	65,00 		
23 	CYKY 5Jx2,5 mm2 	m 	360 	28,00 """""""""	
24 	CYKY 5Jx1 ,5 mm2 	m 	65 	17,00 fJlI#/IIi#IJffl./	
25 	CYKY 3Jx2,5 mm2 	m 	955 	17,00 fJ###hWI/O#	
26 	CYKY 3Jx1 ,5 mm2 	m 	160 	11.00 11##11111111,/11	
27 	CYKY 30x1,5 mm2 	m 	145 	10,30 ##/#III;;#IJlI	
28 	utesneni patrovych prostupu trasy HDV v souladu s poiadavky PB", vC.materialu 	ks 	2 	2100,00 	,i:;Jf!:':'tfJf!b'1!	
29 	utesneni prostupu do odbemych mist, mezi pozamimi useky, die PB", vc.materialu 	ks 	6 	1600,00 	f:iJiiftlh'h'II##	
30 	1-C5KH-V180 5x35 	m 	65 	618,00 	f.lIINlt#ft#ti#	
31 	1-CSKH-V180 3x1,5 	m 	420 	34,00 	11##111111#1//1	
32 	1-CSKH-V180 20x1,5 	m 	160 	31,00 	•••••••••••••••• '1 	
					HHHIJ fnii/HI; 	
33 	1-CSKH-V180 3x2,5 	m 	56 	36,00 	flNIf!JJ!IIflU#	
34 	1-CSKH-V180 5x1,5 	m 	26 	51,00 	II fUN/tfJi/Jllt; 	
35 	CVY 1x16zi 	m 	140 	35,00 	#11####0#11	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,19583);(20922,19583);(20922,21475);(21482,21475)posrelh0posrelv0pib

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
CYV 1x6 zi 
svorka uzernnovacl na potrubi, resp.vodovod.baterii 
Hromosvod - kompletni dIe samcstatneho navrhu 
uzemnovacl soustava Pasek FeZn v kombinaei s tyCemi FeZn 'T' 1m, propojene FeZn D10mm 
hlavnf ochranne pospojeni , vodice Cyzi 6 ai 25 mm2, ekvipotencialnl svorka, pnpojovaei 
praeovni uzemnent vniti'ni elektroinstalaee 
svitidla venkovniho osvetlenl LED 40W, IP65, s PIR senzorem 
napojeni vz:r a CHL zafizeni 
nastenny vypinac 3x40A, IP44 
nastenny vypinac 3x63A, IP44 
snura CGSG pnpojeni sus. PR 
funkcni zkousky 
zasvork. vyvod 
koordinaee dispozie ele vyvodu s teehnologiemi TZB 
upevriovaei a spojovaei material 
presuny hmot na stavenisti 
zaflzenl staveniste 
denni uklid stavby 
pomocne PSV a v9kopove prace privodu 
krabiee rozvodna pod omitku 
mereni osvetlennosti, vystav.protokolu 
PSV prace bouraei 
demontaie puvodni elektroinstalaee, vc.odvozu a ekologieke likvidaee 
krabiee rozvodna IP44 
m 	75 	
ks 	2 	
sest. 		
sest. 100 	
sest. 1 	
sest. 1 	
ks 	19 	
ks 	4 	
ks 	2 	
ks 	1 	
m 	3 	
NH 	17 	
ks 	39 	
NH 	180 	
sum a 1 	
kptl. 1 	
kptl. 	1 	
ks 	10 	
NH 	50 	
ks 
kptl, 
NH 45 
NH 10 
25 
ks 
15 
45 
m 
m 	120 
m 	120 
bm 55 
NH 120 
NH 230 
kptl, 
kptl. 
kptl. 
12,00 
34,00 
900,00 
68,00 
107,00 
790,00 
1 300,00 
1 460,00 
4700,00 
572,00 
964,00 
38,00 
300,00 
97,00 
90,00 
6000,00 
8000,00 
1200,00 
290,00 
34,00 
6500,00 
240,00 
320,00 
108,00 
21,00 
24,00 
24,00 
187,00 
290,00 
160,00 
7000,00 
9000,00 
790,00 
964,00 
114,00 
850,00 
945,00 
trubka elektroinstalacni sarnozhaslva oheb.P25 
trubka elektroinstalacni samozhasiva oheb.P32 
trubka elektroinstalacni samozhasiva oheb.P32 
kabel.trasa s funkcnosti pi'i pozaru 
ing.cinnost dodavatele, koordinaee s profesemi 
vyehozi revize elektroinstalaee 
vyehozi revize hromosvodu 
dokumentaee skutecneno provedeni DSPS 
zapojeni, oiiveni a nastaveni stavajieiho DA v ramci celeho systemu elektroinstalaei (dieselagregat neni soucasti VZ-bude 
predan investorem) 
~ 		JJilX(J(p}JtJflr{
oornocnv material 	% 	III!#//####.\'
re2je dgpraya	 °4 	".th'Uflll.¥NIf
I;'.r:r#!ffftllii!

KRyci LIST SOUPISU PRAci 
Stavba: 
CENTRUM CHOCERAOY, REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02 
Objekt: 
ZTI-Z1 - 0.1.4 - Zdravotne technlcke instalace 

KSO: 
Misto: 
Zadavatel: 
ucnazec: 
Vyplr'l udaj 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Ing. K. Oovrtel 
Poznamka: 
Cena bez DPH 
OPH zakladnl 
snizena 
Icena s DPH 

CHOCERAOY, p.~. 244/10,11,12,13 

Strana 1 z 14 

CC-CZ: 
Datum: 
Ie: 
ole: 
Ie: 
ole: 
Ie: 
ole: 
Ie: 
ole: 
	Zaklad dane 	Sazba dane 
	657 000,72 	21,00% 
	0,00 	15,00% 
v CZK 

25.10.2018 
Vyph'l udaj 
Vyplr'l udaj 
657000,72 
v-yt.e dan{l 
137970,15 
0,00 
794970,87 

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRAci 
Stavba: 
CENTRUM CHOCERADY, REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02 

Objekt: 
Misto: 

ZTI-Z1 - 0.1.4 - Zdravotne technlcke instalace 
CHOCERADY, p.c, 244/10,11,12,13 

Datum: 	25.10.2018 

Zadavatel: 
uchazec: 
K6d dilu - Popis 

Vypll"l udaj 

Projektant: 
Zpracovatel: 	Ing. K. Dovrtel 
Cena celkem [CZKl 

Naklady ze soupisu praci 
HSV - Prace a dodavky HSV 
1 - Zemni prace 
4 - Vodorovne konstrukce 
9 - Ostatni konstrukce a prace-bouranl 
PSV - Prace a dodavky PSV 
713 - Izolace tepelne 
721 - Zdravotechnika - vniti'ni kanalizace 
722 - Zdravotechnika - vniti'ni vodovod 
724 - Zdravotechnika - strojni vybaveni 
725 - Zdravotechnika - zai'izovaci pfedrnety 
726 - Zdravotechnika - predstenove instalace 
727 - Zdravotechnika - pozarnl ochrana 

Strana 2 z 14 

657000,72 
87807,87 
67471,87 
10836,00 
9500,00 
569192,85 
33540,02 
147089,60 
169276,59 
17276,44 
158036,22 
31 973,98 
12000,00 

SOUPIS PRAci 
Slavba: 
CENTRUM CHOCERADY, REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02 
Objekt: 
Mislo: 
ZTI-Z1 - 0.1.4 - Zdravotne technlcke instalace 
CHOCERADY, p.~. 244/10,11,12,13 
PC Typ 
K6d 
Popis 
		Dalum: 	25.10.2018 		
		Projeklant: 			
		Zpracovalel: 	Ing. K. Dovrtel 		
MJ 	Mnozstvi 	J.cena [ClK) 	Cena celkem [ClK) 	
			657000,72 	
			87807,87 	
				67471,87 	
		667,001 		33616,80 	
Zadavalel: 
ucnazee: 
Vypll'l udaj 
Naklady soupisu celkem 

D 	HSV 
1 
Prace a dodavky HSV 
Hloubeni rYh s do 600 mm v homine If. 3 objemu do 100 m3 
	W 	«8+96+36)*0,6*0,6) "svodna kanalizace 	50,400 
	w 	soucet 	50,400 
132201101 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21491);(196,21491);(196,19811);(21497,19811)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,19213);(21236,19213);(21236,21452);(21489,21452)posrelh0posrelv0pib
[YIK 1132201109 	1 Prlplalek za lepivost k hloubeni rYh ~ do 600 mm v hornine If. 31m3 1 	25,2001 	189,001 	4762,801 
	PP 	Priplatek za lepivost k hloubeni rYh s do 600 mm v homine tr. 3 
	w 	0,5*50,400 "hloubene vykopavky 	25,200 
	w 	soucet 	25,200 
131 K 1161101101 	ISvislepfemislenivYkopkuzhorninylf.1aZ4hlvYkopudo2,5m 	------ I~-I -25,20cil-u 	88,701 	2235.241 
Svisle premisteni yYkopku bez nalozeni do dopravni nadoby avSak s vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho 

prostfedku z hominy If. 1 az 4. pn hloubce wkopu pres 1 do 2.5 m 
0,5*50,400 "hloubene vykopavky 
soueet 
PP 

162201102 
Vodorovne pfemisleni do 50 m vYkopku/sypaniny z horniny If. 1 aZ 4 

40,00 
1881,60 
VOdorovne premistimi yYkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklem dopravnim prostredku. bez nalozeni vYkopku, aVSak se slozenim 
bez rozhmuti z hominy tr. 1 aZ 4 na vzdalenost pres 20 do 50 m 
W 	8,400 "Io~e 	8,400 
w 	35,840 "obsypy 	35,840 
w 	0,020*(8+96+36) "potrubi 	2,800 
w 	soucet 	47,040 
PP 
1 7 1 K 1174101101 	Izasyp jam, ~achet rYh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnenim 	1 m3 1 	3,3601 	95,001 	319,20] 
Zasyp sypaninou z jakekoliv hominy s ulozenim yYkopku ve vrstvaeh se zhutnenim jam, sachet. rYh nebo kolem objektu v techto 
vvkopavkach 
50,400 "hloubene vykopavky 
-47,040 "vodorovny pfesun 
soueet 
PP 
175101101 
Obsypanl potrubi bez prohozenl sypaniny z hornin If. 1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje vYkopu 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,20982);(21236,20982);(21236,21489);(21489,21489)posrelh0posrelv0pib
206,00 
7383,04 

w 
w 

Obsypani pctrubl sypaninou z vhcdnych homin If. 1 aZ 4 nebo matenalem pnpravenym podel yYkopu ve vzdalenosti do 3 m cd jeho kraje. 
pro iakoukoliv hloubku wkopu a miru zhutneni bez prohozeni sveaninv 
W 	«8+96+36)*0,6*0.46)-0,020*(8+96+36) "svodna kanalizace 	35,840 
w 	soucet 	35,840 
PP 
191 M 1583313450 	Ikamenivot~:tenedrobnefrakceO-4 	1 	t 	1 	67,7381 	-255,001 	17273.191 
	PP 	kamenivo tezene drobne frakce 0-4 
Strana 3 z 14 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mno:z:stvl J.cena [CZK) 	Cena celkem [CZK) 

w 
w 
1,89·35,840 
soucet 
67,738 
67,738 
	D 4 	Vodorovne konstrukce 	10836,00 
1101 K 1451572111 	ILozepodpotrubfotevrenyvykopzkamenivadrobnehotezeneho 	I m3 I 	8,4001 	1290,001 	10836,001 
	PP 	Loze pod potrubi. stokya drobne objekty v otevi'enem yYkopu z kameniva drobneho tezeneho 0 aZ 4 mm 
	W 	«8+96+36)·0,6·0,10) "svodna kanalizace 
	W 	Soucet 
8,400 
8,400 

9 
Ostatni konstrukce a nrace-bouranl 

9500,00 
R-9709001 
Stavebni vypomoce, pomocne zedntcke prace, montazni prace a nespecifikovane prace 
380,00 
9500,00 
Stavebni vYpomoce, pomccne zednicke price a nespecifikovane price 

D 	PSV 
713 
Prace a dodavky PSV 
713463121 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21487,0);(0,0);(0,21491);(308,21491);(308,19811);(2174,19811);(2174,10724);(21487,10724)posrelh0posrelv0pib
Montaz izolace tepelne potrubi potrubnimi pouzdry bez upravy uchycenymi sponami 1x 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,19213);(20982,19213);(20982,21452);(21489,21452)posrelh0posrelv0pib
569192,85 
33540,02 
42,00 
247B,00 
Monta! izolace tepelne potrubi potrubnimi pouzdry bez upravy uchycenyrni sponami 1x 
Poznflmka k polozce:o 
- izo/ace desfoveho potrub( a svodneho potrubl pod stropem ON 100. 125 a 150 mm 
W 	39 "de~fova kanalizace 	39,000 
w 	Soueet 	39,000 
w 	59 "de~fova kanalizace 	59,000 
W 	soucet 	59,000 
P 
1131 M 1283770780 	lizotacepotrub~fpouzdroztehcenepryterozm~rD114x13mm 	I 	m 	I 	59,0001 	78,001 	4602,001 
	PP 	tvarovky z 'ehcenych plastu izolace potrubi Mire'on® PRO vnitfni prumer x tl. izolace [mm) 114 x 13 
	W 	59 "destova kanalizace 				59,000 
	w 	soucet 				59,000 
1141 K 1713463131 	I Montaz izolacetep~otrubi potr~ouzdry bez upravy slepenymi 1x II izolace do 25 mm 	I 	m 	I 	262,0001 	56,001 	14672,001 
	PP 	Montaz izolace tepelne potrubi potrubnimi pouzdry bez upravy slepenymi 1x II izolace do 25 mm 
	W 	43+15 "potrubi D20 				58,000 
	W 	47+18+29 "potrubi D25 				94,000 
	W 	10+10 "potrubi D32 				20,000 
	W 	30+1B "potrubi D40 				4B,000 
	W 	3+39 "potrubi ocel 				42,000 
	W 	soucet 				262,000 
[151 M 1283771030 	lizotacepotrubfpouzdrazPE22x9mm 	I 	m 	I 	59,7401 	14,001 	836,361 
	PP 	izolace potrubi Mirelon Pro 22 x 9 mm 
	W 	1,03·(43+15) "vodovod pripojovaci 				59,740 
	W 	soucet 				59,740 
[16 [MJ283mi10 	lizotace potrubf pouzdra z PE 28 x 9 mm 	I 	m 	I 	110,210 I 	16,001---- . ·--1763?6] 
	PP 	izolace potrubi Mirelon Pro 28 x 9 mm 
	W 	1,03·47 "vodovod pi'ipojovaci 				4B,410 
	W 	1,03·18 "vodovod paterni studena 				1B,540 
	W 	1,03·(3+39) "vodovod pozarm studena 				43,260 
	W 	soucet 				110,210 
1171 M 1283770510 	lizotace potrubf pouzdra z PE 32 x 9 mm 	I 	m 	I 	10,300 I 	-18,QOL 	185,401 
	PP 	tvarovky z lehcenych plastu izolace potrubi pouzdra z PE prumer x II. izolace [mm] 32 x 9 
	W 	1,03·10 "vodovod paterni studena 				10,300 
	W 	soucet 				10,300 
118 I M 1283770570 	I izotace potrubf pouzdra z PE 40 x 9 mm 	I 	m 	I 	30,900 I 	22,00 I 	---679:80) 
Strana 4 z 14 

PC Typ 

Ked 

Popis 

MJ 

Mnozstvf J.cena [CZKJ 	Cena celkem [CZKJ 

P 
P 
	PP 	tvarovky z lehcenych p1asru izolace potrubi Mirelon® PRO vnitfni prumer x II. izolace [mm], delka 2 m 40 x 9 
	w 	1,03"30 "vodovod patern! studena 	30,900 
	w 	soueet 	30,900 
	1-"9-] ",q283770490 	I;zo/ace potrubf pouzdra z PE 28 x 25 mm 	I 	m 	I 	29,870 I 	60,00 I 	1 79l,20 I 
	PP 	tvarovky z lehcenych p1asru izolace polrubi Mirelon® PRO vniti'ni prumer x II. izolace [mm], delka 2 m 28 x 25 
	W 	1,03"29 "vodovod patern! tepla 				29,870 
	w 	soucet 				29,870 
	120 1 M 1283770540 	-[lZal';;;~ poiiubiPOUicj;:;~ PE 32 x 25 m~-- 	1 	m 	I 	10,300 I 	68,00 I 	70(),40 I 
	PP 	tvarovky z lehcenych p1asru izolace potrubi Mirelon® PRO vnitfni prumer x II. izolace [mm], delka 2 m 32 x 25 
	W 	1,03"10 "vodovod paterni tepla 				10,300 
	w 	soucet 				10,300 
	121 I M 1283770600 	I;zo/ace potrubf po~d,a z PE 40 ;25",m 	I 	m 	18,540 I 	76,00 I 	1409,041 
	PP 	tvarovky z leheenych p1asru izolace potrubi Mirelon® PRO vnitfni prumer x II. izolace [mm], delka 2 m 40 x 25 
	W 	1.03"18 "vodovod paterni tepla 			18,540 
	w 	soucet 			18,540 
	122 I M 1283770740 	I;zo/ace potrubf pouzdra z PE 92 x 13mm 	--------- ------ 	I 	m 	I 	10,300 I 	95,00 I 	978,50 I 
	PP 	tvarovky z lehcenych p1asru izolace potrubi Mirelon® PRO vnitFni prumer x II. izolace [mm] 92 x 13 
	W 	1,03"10 "vodovod paterni tepla 				10,300 
	W 	soucet 				10,300 
	1231 M 1283770790 	I;zo/ace potrubf pouzdra z PE 114 x 20 mm 	----- 	I 	m 	I 	18,540 I 	183,00 I 	339l,821 
	PP 	tvarovky z lehcenych p1asru izolace potrubi Mirelon® PRO vnitfni prumer x II. izolace [mm] 114 x 20 
	W 	1,03"18 "vodovod patern! tepla 				18,540 
	W 	Soueet 				18,540 
	[241- K 1998713-103 	rpreslIn hmot to~~i~ito~at~iproizOlacetepelne ~Ob]ekteCh~24 ~----- 	I 	t 	I 	0,0461 	1 090.001 	50.141 
	PP 	Pi'esun hmot tonszni tonsZni pro izolace tepelne v objektech v do 24 m 
	D 721 	Zdravotechnika - vniti'nf kanalizace 	147089,60 
	[251 K 1721174024 	Ipotrub! kanaliza~ni z PP odpadni system HT DN 70 	I m I 	10,0001 	465,001 	4650,001 
	PP 	Potrubi z p1astoyYch trub HT System (polypropylenove PPs) odpadni (svisle) ON 70 
	W 	10 "odpadni potrubi 		10,000 
	W 	soueet 		10,000 
	[261 1(-17211-74025 	IpaiN!'! kanaliza&;TZPP-odpadrllSYst~; HTDN1OO----------- 	I 	m 	I 	30.0001 	576,001 	17280,O?j 
	PP 	Potrubi z p1astoyYch trub HT System (polypropylenove PPs) odpadni (svisle) ON 100 
	W 	30 "odpadni potrub! 				30.000 
	W 	soucet 				30.000 
	1271 M 1286156020 	Ic;stfcf tvarovka HTRE, DN 75------ ------ ----- 	--------- ----I kus r--2~000T-- 120,OOj-U - 	240,00 I 
	PP 	cistici tvarovka HTRE, DN 75 
	P 	Pozmimka k poloice:O 
OSMA. k6dvYrobku: 18210 
	W 	2 "odpadn! potrub! 	2,000 
	W 	soucet 	2,000 
	1281 M 1286156030 	Icistfcf tvarovka HTRE, DN 100 	I kus 	I 	7,000 I 	142,00 I 	99ioo] 
	PP 	trubky z polypropylenu a kombinovane trubky a tvarovky kanalizacni HT-System Plus PPs® cistici tvarovky HTRE, DN 110 
Poznamka k poloice:O 
OSMA, k6dvYrobku: 18310 
	W 	7 "odpadni potrub! 	7,000 
	W 	soucet 	7,000 
	1291 K 1721174042 	Ipotrub! kanaliza~n! z PP pi'ipojovaci system HT DN 40 	I 	m 	I 	15,0001 	345,001 	5175,00] 
	PP 	Potrubi kanalizacni z PP pnpojovaci system HT ON 40 
Poznamka k poloice:O 
- doPOieni odf)adu nerez aut. umvvadel 
Strana 5 z 14 

PC Typ 

K6d 

Popis 

MJ 

Mnozstvi J.cena [CZKl Cena celkem [CZKl 

P 
	w 	15 "pi'ipojovacl potrubl 	15,000 
	w 	soueet 	15,000 
	[3OJKJ721174043----]Potru-b~kana~l;pppriPOjO;;-aciSyst~m HTDN50 	m 	I 	m 	I 	21,0001 	383,001 	8043,001 
	PP 	Potrubi kanalizacni z PP piipojovaci system HT ON 50 
	W 	21 "pi'ipojovaci potrubl 					21,000 
	W 	Soueet 					21,000 
	1311 K 1721174045 	Ipotrublkanalizacnlzpppi'ipojovaclsystemHTDN100 	I 	m 	I 	14,0001 	558,001 	7812,001 
	PP 	Potrubi kanalizacni z PP pi'ipojovaci system HT ON 100 
	W 	14 "pi'ipojovacl potrubi 				14,000 
	W 	soucet 				14.000 
	1321 K 1721174055 	Ipotrubi kanali~i ~PPdeMo~system HT ON 100 	I m 	I 	59,0001 	398,001 	23482,001 
	PP 	Potrubi z plastovych trub HT System (polypropy1enove PPs) desfove ON 100 
	W 	59 "destove potrubi 			59,000 
	W 	soueet 			59,000 
	I 33 r K ]721173401 	Ipotrubi kanaliiacnipl8Sto~e -S;;-odn-esysternKGDN1~--- 	I 	m 	I 	8,0001 	324,001 	2592,001 
	PP 	Potrubi z plastovych frub KG System (SN4) svodne Oezate) ON 100 
	W 	8 "svodne potrubi 				8,000 
	W 	soueet 				8,000 
	1341 K 1721173402 	Ipotrubi kanalizacni plastove svodne system KG ON 125 	I m 	I 	96,0001 	382,001 	36672,001 
	PP 	Potrubi z p1astovYch!rub KG System (SN4) svodne Oeiate) ON 125 
	W 	96 "svodne potrubi 			96,000 
	W 	soucet 			96,000 
	1351 K 1721173403 	Ipotrub' kanaliza~i plastoves~O-dne sYst~~ KG[)N-150--u -- -- 	I 	m 	I 	36,0001 	475,001 	17100,001 
	PP 	Potrubi kanalizacni plastove svodne system KG ON 150 
	W 	36 "svodne potrubi 				36,000 
	W 	Soueet 				36,000 
	I 36TM ]458100010 	Ikote~niprVkypro-poirubikanal;zace 	I ks 	I 	49,500 I 	93,00 I 	4603,50 I 
	PP 	kotevni prvky pro potrubi kanalizace 
Poznamka k poiozce:O 
- cena za dodavku kompietnlho lichvtneho. zavesneho a kotevnlho materiaiu 
	W 	(10+30+59)/2 "zavesy, konzoly, uchYtY 	49,500 
	W 	Soucet 	49,500 
	IH3y]--KE1194104 	IvY;~d~;;(a upevneni odpadnich vypustek ON 40 	I kus I 	9,0001 	70,001 	63(),001 
	PP 	Vyvedeni a upevneni odpadnich vYpustek ON 40 
	W 	2+2+1+2+1+1 "zai'izovaci predmely ON40 		9,000 
	W 	soucet 		9,000 
	1-38[-K]721194105 	IVyvedenianuP~~IOdpadnich;.,ypllstek ON 50 	I kus I 	10,0001 	78,001 	78(),001 
	PP 	Zrizeni piipojek na po!rubi vyvedeni a upevneni odpadnich yYpustek ON 50 
	W 	2+1+2+1+2+1+1 "zai'izovaci predmely ON50 		10,000 
	W 	Soucet 		10,000 
	139] K 1721194109 	Ivyvedeni a upevneni odpadnich vypustek ON 100 	I - kus I u _n 4,000] 	11S;00r---- 	H 460,00] 
	PP 	Vyvedeni a upevneni odpadnich vYpustek ON 100 
	W 	3+1 "zai'izovaci predmely ON100 	4,000 
	W 	soucet 	4,000 
	140 I K 17212422-R 	IPodomitkova zapachova uzaverka HL 405 s nastenkou pro ventii112';a z~tnou klapkou- 	-T)us--'----3,000]" 	-1115,001 	3345,001 
	PP 	Podomitkova zapachova uzaverka HL 405 s nastenkou pro ventil 1/2" a zpetnou klapkou 
	W 	1+2 "praeka, su~icka 	3,000 
	W 	soucet 	3,000 
	I 41 I K 1721226530 	n}ZAPaChova uzaverkaHL136NI;lasto~~pro Od~ocl ko~clenzatus pridavnou mech. uzaverkou a cistici vlozkou 	I kus I 	2,0001 	690,001 	1 380,0()1 
	PP 	Zapachova uzaverka HL 136N p1astova pro odvod kondenzatu s pi'idavnou mech. uzaverkou a cistici v1oikou 
Strana 6 z 14 

PC Typ 

K6d 

Popis 

MJ 

Mnoi:stvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

	W 	2 "odvod kondenzatu 	2,000 
	W 	Soul5et 	2,000 
	@[KT721226540 	IVtOk se zapachovou uzaverkou HL 21 s prldavnym uzaverem pro suchy stay 	1 kus· [--y;ooor--- 495,001 	990,001 
	PP 	Vtok se zapachovou uz2verkou HL 21 s pi'idavnym uZ2verem pro suchy stay 
	W 	2 "odvod kondenzatu, ukapy pojistnych ventilu 	2,000 
	W 	soueet 	2,000 
	[43-1 K 1721211421R 	IVPusf podlahova se svislym odtokemDN 50/75/110 mri~ka nerez 115x115, sucM klapka proti zapachu 	1 kus I 	2,0001 	510,001 	1 02~ 
	PP 	Podlahove vpusti se svislym odtokem DN 50175/110 (HL 310N) mnzka nerez 115x115 
	W 	2 "podlahova vpust 		2,000 
	W 	soucet 		2,000 
	[«I-K ]721273153 	IHlavice ventilal5nl polypropylen PP DN 110 	I kus I 	2,0001 	90,001 	180~ool 
	PP 	Hlavice ventilacni polypropylen PP DN 110 
	W 	2 "odvetranl kanalizace 		2,000 
	W 	soucet 		2,000 
	11251 K 1935931112 	IOd~odnenl plastovymi ~Iaby pro zati~enl A15 s ro!ltem mustkovym vnitml h hl100x74 mm 	I 	m 	I 	5,8501 	348,001 	2 ()35,801 
	PP 	Odvodneni ploch plastoyYmi zlaby pro tFrdu zatizeni A 15. s krycim roitem mustkoyYm vniti'ni sii'kylhloubky 100174 mm 
	W 	4,85+1,0 "liniovy ~Iab 				5,850 
	W 	Soucet 				5,850 
	I 461 K 172129()-~- -}ZIZ~~k~~snosti potrubf kanalizace vodou do DN 125 	1 	m 	1 	149,0001 	22,001 	3 278~OOJ 
	PP 	Zkouska tesnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 
	W 	15+21+14 "pripojovacf potrubf 				50,000 
	W 	10+30 "odpadnf potrubf 				40,000 
	W 	59 "destove potrubl 				59,000 
	W 	soueet 				149,000 
	1471 K 1721290112 	IZkou!lka tesnosti potrubl kanalizace vodou do DN200-----·· -------- .. - 	I 	m 	1 	140,0001 	29,001 -----... 	4060:00] 
	PP 	Zkouika tesnosti potrubi kanalizace vodou do DN 200 
	W 	8+96+36 "svodne potrubl 				140,000 
	W 	soucet 				140,000 
	1481 K 1998721103 	Ipresunhmottona~nlprovnitmfkanalizacevobjektechVd024~-------- 	nun 	I 	t 	I 	0,425r 	676,00[- ------ ·287:30] 
	PP 	Presun hmot tonazni pro vnitmi kanalizace v objeldech v do 24 m 
	D 722 	Zdravotechnika - vniti'ni vodovod 	169276,59 
	I 491 K 1722130233 	I Potrubf vodovodnf ocelove zavitov~~kOvane svarovane be~ne ON 25 	I 	m 	I 	42,0001 	477,001 	20034,001 
	PP 	Potrubi vodovodni ocelove z8vitove pozinkovane svarovane bezne DN 25 
	W 	3+39 "pozarm vodovod 				42,000 
	W 	soucet 				42,000 
	1501 K 1722174022 	IpotrubfvodovodnfplastovepP-RcTsvarpOlyfuze020mm 	I 	m 	I 	58,OO()r---289,OOI 	16762,001 
	PP 	Potrubi vodovodni plastove PPR svar polyluze PN 20 D 20 x 3.4 mm 
	W 	43+15 "vodovod pripojovacf ve stenach 				58,000 
	W 	soucet 				58,000 
	I 51 I K 1722174023 	Ipotrubf vodovodnf plastove PP-RCT svar polyfuze D 25 mm 	I 	m 	I 	94,0001 	350,001 	32900:()01 
	PP 	Potrubi vodovodni plastove PPR svar polyluze PN 20 D 25 x 4,2 mm 
	W 	47 "vodovod pripojovacf ve stenach 				47,000 
	W 	18+29 "vodovod paternf pod stropem 				47,000 
	W 	soucet 				94,000 
	I 521 K 1722182012 	IPOdPumy ~Iab pro potrubl 0 25	 -----.---------~---~ -I· 47,0001 	35,001 	1645,001 
	PP 	Podpumy Zlab pro potrubi priimeru D 25 
	W 	18+29 "vodovod pateml pod stropem 	47,000 
	W 	Soul5et 	47,000 
	I 531 K 1722174024 	Ipotrubl vodovodnf plastove PP-RCT svar polyfuze 0 32 mm 	I 	m 	I 	20,0001 	418,OOr------ - 	836Mol 
Strana 7 z 14 

PC Typ 

K6d 

Popis 

MJ 

Mnozstvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

P 
1,000 
1,000 
	PP 	Potrubi vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 0 32 x5,4 mm 
	W 	10+10 "vodovod patei'llf pod stropem 	20,000 
	W 	soucet 	20,000 
	IU54[KJ7221820-1-3 -- 	Ipodpumy zlab pro potrubf 0 32 	I 	m 	I 	20,0001 	37,001 	740.001 
	PP 	Podpumy nab pro potrubi prilmeru 0 32 
	W 	10+10 "vodovod paternf pod stropem 				20,000 
	W 	Soucet 				20,000 
	I 55-1 KU 1722174025 	I Potrubf vodovodnf plastove PP-RCT svar polyfuze D 40 mm 	1 	m 	I 	48,000 I 	509,00 I 	24 432,00 I 
	PP 	Potrubi vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 040 x 6,7 mm 
	W 	30+18 "vodovod paternt pod stropem 				48,000 
	W 	soucet 				48,000 
	I 56 [K ]722182014 -- 	I Podpurny zlab pro potrubf 0 40 	1 	m 	1 	48,000 I 	43,00 I 	2 064,00 I 
	PP 	Podpumy Ziab pro potrubi prilmeru 0 40 
	W 	30+18 "vodovod paternf pod stropem 				48,000 
	W 	soueet 				48,000 
	1571 M 145820001R 	jkotevnf prvky pro potrubf vodovodu 	I ks 	I 	78,500 I 	53,00 I 	4160,50 I 
	PP 	kotevni prvky pro potrubi vodovodu 
Poznamka k polozce:D 
- cena za dodavku kom/J/etniho uchvtneho. zlivesneho a kotevniho materililu 
	W 	{18+29+1 0+1 0+30+18+3+39)/2 "vodovod patei'llf pod stropem 	78,500 
	W 	soucet 	78,500 
	I 5-iT K 1722220152 	I Nastenka zavitova plastova PP-RCT ON 20 x G 1/2 	1 kus I 	7,0001 	143,001 	1001,001 
	PP 	Nastenka zilvitova plastova PPR PN 20 ON 20 x G 1/2 
	W 	1+2+1+3" nastenka yYtok 		7,000 
	W 	Soueet 		7,000 
	IS9E 1722220161 	I Nastenny komplet plastovy PP-RCT ON 20 x G 1'2 	I soubor I 	9,0001 	535,001 	4815,001 
	PP 	Nastenny komplet plastovY PPR PN 20 ON 20 x G 1/2 
	W 	1+1+1+2+2+1+1 " nastenka baterie 		9,000 
	W 	soueet 		9,000 
	160 I K 1722229101 	I Montaz vodovodnfch armatur s jednfm zavitem G 1/2 ostatnf typ 	I soubor I 	17,0001 	67,001 	1139,001 
	PP 	Montal!: vodovodnich annatur s jednim zavltem G 1/2 oslatni typ 
	W 	14+3 "yYtoky 		17,000 
	W 	soucet 		17,000 
	I 6111\.1 [551119980 	I venti! rohovy kulovy s filtrem IVAR 112" x 112" 	I kus I 	14,000 I 	197,00 I	 -- -2 758.00] 
	PP 	ventil rohovY kul0vY s f~trem IVAR 1/2" x 1/2" (k praece) 
	W 	2*{1+1+2+2+1) "baterie 		14,000 
	W 	Soucet 		14,000 
	1621 M 1551119820 	I venti' pratkovy RIO 107943/4" 	1 kus I 	3,000 I 	615,00 I 	---1845,001 
	PP 	ventil prackovY 3/4" 
	P 	Poznamka k polozce:o 
(R1107941 
	W 	2+1 "pracka, su~i(5ka 	3,000 
	W 	soucet 	3,000 
	1631 K 1722224115 	I Kohout plnicf nebo vypou~tecf G 1'2 PN 10 sjednfm zavitem 	I kus I 	12,0001 	228,001 	2736,001 
	PP 	Kohout plnici nebo vypousteci G 1/2 PN 10 s jednim zilvitem 
	W 	12 "vypou~tenf 		12,000 
	W 	soueet 		12,000 
	1641 K 1722231072 	IVentil zpetny G 1'2 PN 10 do 110·C se dvema zavity 	I kus I 	1,0001 	237,001 	237,001 
	PP 	Ventil zpetny G 1/2 PN 10 do 110'C se dvema zavity 
	W 	1 "strojovna 
	W 	soucet 
Strana 8 z 14 

PC Typ 

K6d 

Popis 

MJ 

Mnozstvi J.cena [CZK] 

Cena celkem [CZK] 

	651 K 1722231073 	Iventn zp~tny G 3/4 PN 10 do 110°C se dv~ma zavity 

I kus I 

1,000T 	309,001 

309,00 

	PP 	Armatury se dvema zavity vent~y zptitne mosazne PN 10 do 11 O·C G 3/4 
	W 	1 "strojovna 	1 ,000 
	w 	soueet 	1,000 
	I 661 K 1722231074 	IV-;;:;tn~tny G 1 PN 10 do 110°C se dv~ma zavity 	I kus I 	2,0001 	370,001 	74(),001 
	PP 	Armatury se dvema z8vity ventily zptitne (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1 
	W 	2 "strojovna 		2,000 
	W 	soueet 		2,000 
	I 671 K 1722231141 	IVentn zavitovy pojistny rohovy G 1/2 	I kus 	1,0001 	435,Or---· 	435,001 
	PP 	Armatury se dvema zavity ventily pojistne rohove G 1/2 
	W 	1 "strojovna 		1 ,000 
	W 	soucet 		1,000 
	I 681 K 1722231143. ---]Ve~v~~hO~-l-------- . 	n 	kus I 	1,0001 	918,001 	--91s:ooj 
	PP 	Armatury se dvema zavity ventily pojistne rehove G 1 
	W 	1 "strojovna 			1 ,000 
	W 	soueet 			1,000 
	I 691 K 1722232061 	I Kohout kulovypflmy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitrnl zavit s vypou~t~nlm 	1~-nT 	4,0001 	337,001 	1 34S,OOI 
	PP 	Armatury se dvema z8vity kulove kohouty PN 42 do 185 ·C pi'ime vnitfni zavit s vypoustenim G 1/2 
	W 	4 "uzav~r odboeka 		4,000 
	W 	soucet 		4,000 
	170II<]722232062 	- rKOhout kulovy primyG 3/4 PN 42 do 185°C vnitrni zavit s vypou~t~nlm 	I kus I 	2,0001 	437,001 	874,001 
	PP 	Kohout kulovY pFimy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitFni z8vit s vypoustenim 
	W 	2 "uzav~r odboeka 		2,000 
	W 	soucet 		2,000 
	I 71 I K 1722232063 	I Kohout kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C vnitfnl zavit s vypou~t~nlm 	I kus I 	9,0001 	---587,OOr- 	5283,001 
	PP 	Kohout kulovY pFimy G 1 PN 42 do 185·C vnitFni zavit s vypoustenim 
	W 	9 "uzav~r odbocka 		9,000 
	W 	Soucet 		9,000 
	1721 K 1722234264 	IFiltrmosaznyG3/4PN16do120°Cs2xvnitrnlmzavitem	------ 	-~ kus I 	1,0001 	315,001 	315,001 
	PP 	Armatury se dvema zavity filtry mosazny PN 16 do 120 ·C G 3/4 
	W 	1 "strojovna 			1 ,000 
	W 	soucet 			1,000 
	I 731 K 1722262301 	Ivodom~r zavitovy vicevtokovy mokrob~tny do 40°C G 1 x 105 mm On 2,5 m3/h ver1ikalnl 	I kus I 	1,0001 	1 990,001 	-1990,00] 
	PP 	Vodomery pro vodu do 40°C zavitove vertikalni vicevtokove mokrobezne G 1 x 105 mm Qn 2,5 
	W 	1 "vodomer podrutny 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
	I 741 K 1722239101 	I Montat armaturvodovodnich se dv~ma zavity G 1/2 	I kus I 	2,0001 	77,001 	154~ 
	PP 	Mont8z armatur vodovodnich se dvema z8vity G 1/2 
	W 	2 "uzaver odbocka 		2,000 
	W 	Soueet 		2,000 
	I 751 M 1551279090 	I ventil vyvaZovacl stoupackovy tetmostaticky 1J2n 	I kus 	2,000 I 	1300,00 I 	2600Tol 
	PP 	ventil vyvaiovaci stoupackovY dvouregulacni CIM 727 1" 
	W 	2 "uzav~r odbocka 		2,000 
	W 	Soucet 		2,000 
	I 76 I K 1722250133 	I Hydrantovy system s tvarov~ stalou hadici D 25 x 30 m celoplechovy 	I soubor I 	1,000 I 	8 700,00 I 	8 700,001 
	PP 	Pozami pi'islusenstvi a armatury hydrantovY system s tvarove stalou hadici celoplechovY 0 25 x 30 m 
	W 	1 "hydrant 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
	1 771 K 1722290226 	IZkou~ka t~snosti vodovodniho potrubi zavitoveho do DN 50 	m 	1 	262,0001 	44,001 	11 528,001 
	PP 	Zkouska tesnosti vodovodniho potrubi z8vitoveho do ON 50 
Strana 9 z 14 

PC Typ 
K6d 
Popis 
MJ 
Mnozstvf J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 
	W 	43+47+15 "vodovod pripojovaci ve stenach 	105,000 
	W 	18+29+10+10+30+18 "vodovod patei'ni pod stropem 	115,000 
	W 	3+39 "vodovod pozamt 	42,000 
	W 	soucet 	262,000 
I78P< 1722290234---- Iproplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do ON 80	---- 	l-m-r--262,OO()I-- 	u-31,O()1 	8122,001 
	PP 	Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do ON 80 
[7-g-rK]998722103 	1 presun hmot tonazni tonazni pro vniti'ni vodovod v objektech v do 24 mit 	1 	0,5481 	606:001 	332,091 
	PP 	Pi'esun hmot tonazni tonazni pro vniti'ni vodovod v objektech v do 24 m 

724 
Zdravotechnika - stroini wbaveni 

17276,44 
722239103 
Montaz armatur vodovodnich se dvema zavity G 1 
103,00 
206,00 
PP 
Armatury se dvema zavity monta! vodovodnich armatur se dvema zavity ostatnich typu G 1 
1+1 "strojovna 
Soucet 

484880400 
sm~sova(; trojcestny termostaticky pfimofinny DN 25 

1470,00 
1470,00 
pi'islusenstvi zai'izeni pro usti'edni vyt{ipeni ostatni smesovaee trojcestne smesovace MIX-AP s pi'imym prutokem pi'ednostne urceny pro 
okruhv s nucerwrn obehem max. provozni Uak 0.6 MPa. max. provozni teolota 110'C MixAP ON 40 
W 	1 "strojovna 	1,000 
W 	soucet 	1,000 
PP 
----_. --- 
	sm~sovac trojcestny termostaticky pfimofinny DN 15 	1 200,00 	1 20(),OO 
pnslusenstvl zanzeni pro usti'edm vyt{ipeni ostatni smesovaee trojcestne smesovace MIX-AP s pi'imym prutokem p ednostne ureeny pro 
okruhv s nucerwm obehem max. provozni Uak 0.6 MPa. max. provozni teplota 110 'C Mix AP ON 40 
W 	1 "strojovna 	1,000 
W 	soueet 	1,000 
PP 
1-8311<[732331714 	1 Nadoba tlakova expanzni s membranou zavitove pnpojeni PN 1,00 objemu 251 	1 soubor I 	1,0001 	3920,001 	3920,001 
	PP 	Nadoby expanzni tlakove s rnembranou bez pojistneho ventilu se zavit0vYm pi'ipojenim PN 1,00 objemu 25 I 
	W 	1 "strojovna 
soucet 

732421414 
Cerpadlo teplovodni mokrobezne zavitove obehove ON 25 yYtlak do 6,0 m prutok 4,0 m3/h pro vytapeni 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,20834);(21236,20834);(21236,21479);(21489,21479)posrelh0posrelv0pib
8860,00 
8860,00 
erpadla teplovodni zavitova mokrobezna ooohova pro teplovodni vytapeni (elektronicky i'izena) PN 10, do 110'C ON pripojky/dopravni 
wska H (m) - eerpaci wkon Q (m31h) ON 251 do 6.0 m 14.0 m31h 
W 	1 "strojovna 	1 ,000 
W 	soueet 	1,000 
PP 
1 85 I K 1734411104 	I Teplomer technickY s pevnym stonkem a jimkou zadn! pnpojeni prumer 63 mm delky 150 mm 	I kus I 	1,000 I 	653,00 I 	653,00 I 
	PP 	Teplomery technicke s pevnym stonkem a jimkou zadni pi'ipojeni (axialni) prumer 63 mm delka stonku 150 mm 
	W 	1 "strojovna 		1 ,000 
	W 	soucet 		1,000 
1861 K 1734421101 	ITlakomer s pevnym stonkem a zpetnou klapkou tlak 0-16 bar prumer 50 mm spodni pnpojeni 	I kus I 	1,0001 	954:001- -- 	954,001 
	PP 	TIakomery s pevnym stonkem a zpetnou klapkou spodni pi'ipojeni (radialni) lIaku 0-16 bar prumeru 50 mm 
	W 	1 "strojovna 		1,000 
	W 	Soueet 		1,000 
I 871 K 1998724103 	Ipresun hmot tonazn! pro strojnl vybaveni v objektech v do 24 mit 	1 	0,0121 	1120,00[-- - 	13,441 
	PP 	Presun hmot tonazni pro strojni vybaveni v objektech v do 24 m 

725 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,20280);(20982,20280);(20982,21462);(21489,21462)posrelh0posrelv0pib
158036,22 
Zai'izeni zachodu monta! klozetovYch mis zavesnych na nosne steny 
W 	3+1 "klozet 	4,000 
W 	soucet 	4,000 
725119123 
Montaz klozetovych mis zavesnych na nosne steny 
1870,00 
7480,00 
1891 M 1642360410 	Iklozet keramicky ztlvesny hluboke splachovtlni bily 	I kus I 	3,000 I 	2480,00 I 	7440,go] 
	PP 	klozety keramicke zavesne hluboke splachovanl barva bila 
Strana 10 z 14 

PC Typ 
Ked 
Popis 
MJ 
MnozsM J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZKj 
	W 	3 "klozet zav~sny 	3,000 
	W 	soucet 	3,000 
190TM 1642360510 	Ik/ozetkeramiCkyztJv~SnYh/UbokesP/achovtJn/handicaPbIlY 	I kus 	I 	1,0001 	4700,001 	4700,001 
	PP 	klozety keramicke z8lvesne hluboke splachovani barva bila handicap 
1 "klozet zav~snv invalidn! 
55167382R 	IsedtJtko k/ozetove durop/astove s pok/opem, oceiove t1chyty 	I kus 	I 	3,000 I 	990,00 I 	2970,00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21479);(10726,21479);(10726,20512);(21482,20512)posrelh0posrelv0pib
	PP 	sedatko klozetove duroplastove s poklopem. oceIove uchyty 
	W 	3 "klozet zav~sny 	3,000 
	W 	soueet 	3,000 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,12765);(20982,12765);(20982,21276);(21489,21276)posrelh0posrelv0pib
1921 M 155167383R -~dMkO k!c;zetove durop/astove bez poklopu, oce/ove (/chyty 	- n I-k~; -r-- 1,000 I 	530,00 C- 	530,OOJ 
	PP 	sedatko klozetove duroplastove bez poklopu, cceteve uchyty 
Poznamka k poloice:o 
- k misam zavesnvm handicap 
	W 	1 "klozet zav~sny invalidn! 	1,000 
	W 	soucet 	1,000 
P 
@[i<1725291722 	I Doph"lky zar!zen! koupelen a zaehodu nerezove madlo krakoreove sklopne dl834 mm 	soubor I 	2,0001 	5 200,001 	10400~01 
	PP 	Dopliiky zarizeni koupelen a zachodu smaltovane madla krakorcova sklopna, delky 834 mm 
2*1 "invalidn! we 
soucet 
725532103 
Elektrieky ohr!vai: zasobnlkovy akumulai:nl zav~sny svisly 20 I / 2,0 kW 

5600,00 
5600,00 

Elektricke ohfivace zasobnikove beztlakoveprepaaove allumulacni i; pojistriymventilern zavesne svisle objerri- nadrie (pnkon) 15 I (3,3 
kW) 
W 	1 "boiler 	1,000 
W 	soucet 	1,000 
PP 
I 951 K 1725532126 	I Elektrieky ohrlvai: zasobn!kovy akumulai:nl zav~sny svisly 200 If 2,2 kW 	I soubor I 	1,000 I 	8 950,00 [ 	8 950,00 I 
Elektricke ohfivace zasobnikove beztlakove pi'epadove akumulacni s pojistnyo, ventilem zavesne svisle objem nadrie (piikon) 200 I (2,2 
kW) 
1 "boiler 
soucet 
PP 
725211603 
Umyvadlo keramicke pfipevn~ne na stenu srouby bile bez krytu na sifon 600 mm 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21496,0);(15428,0);(15428,1934);(0,1934);(0,5802);(5139,5802);(5139,7736);(9178,7736);(9178,21479);(21496,21479)posrelh0posrelv0pib
bez sloupu nebo krytu na siton 

4 050,00 
8100,00 
W 

Umyvadla keramicka bez yYtokovYch armatur se zapachovou uzav~pevnen 
600 mm 
W 	2 "umyvadlo 	2,000 
W 	soucet 	2,000 
PP 
I 97 I K 1725211701 	I Umyvatko keramieke stenove 400 mm 	I soubor I 	1,000 I 	3 490,00 I 	3 490,O~ 
	PP 	Umyvadla umYvatka keramicka se zapachovou uzaverkou stenova 400 mm 
	W 	1 "umyvadlo 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
I 981 K 1725211681 	IUmyvadlo keramieke zdravotn! pi'ipevn~ne na ste-;;u irouby-bll~64o-;;.;ll'l 	I SOUbO-;:-[--l,Oo![ - 3250.001 	3250,001 
	PP 	Umyvadla keramicka bez yYtokoyYch armatur zdravotni se zapachovou uzaverkou piipevnena na stenu srouby bila 640 mm 
Poznamka k polozce:o 
- podomitkova zapachova uzaverlca 
	W 	1 "umyvadlo invalidnl 	1,000 
	W 	soucet 	1,000 
P 
11271 K 1725212217 	Iumyvadlo keramieke bile nabytkove ~!rky 1000 mm vi:etne skrillky s dv~ma zasuvkami 	I soubor I 	1,0001 	9000,OOr 	9000,001 
	PP 	Umyvadla keramicka bUa bez yYtokoyYch armatur mlbytkova veetne skniiky s dvema zasuvkarnl, sitka umyvadla 1000 mm 
	W 	1 "umyvadlo pradelna 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
I 991 K 1125291711 	I Doplllky zarizenl koupelen a zaehodu nerezove madlo krakorcove dl550 mm 	I soubor I 	2,0001 	3400,OOr 	6800,001 
	PP 	Dophiky zanzeni koupelen a zachodu smaltovane madla krakcrcova, delky 550 mm 
	W 	2*(1) "umyvadlo invalidn! 
	W 	Soucet 
2,000 
2,000 
Strana 11 z 14 

PC Typ 

K6d 

Popis 

MJ 

Mnozstvi J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

	1001 K 1725822611 	I Baterie umyvadlove stojankove pakove bez vypusti 	I kus I 	4,0001 	1780,001 	7120,00 
	PP 	Baterie umyvadlove stojankove pakove bez vYJIusti 
	W 	2+1+1 "umyvadlo 		4,000 
	w 	scueet 		4,000 
	11011 K 1725822613 	I Baterie umyvadlove stojankove pakove bez vypusti, lekafska prodlou~ena paka 	I kus I 	1,0001 	2940,001 	2940,001 
	PP 	Baterie umyvadlove stojankove pakove bez vYJIusti, prodlouzena paka 
	w 	1 "umyvadlo invalidnl 		1,000 
	W 	soucet 		1,000 
	11021 K 172585132-5- 	Iventn odpadnl umyvadlovy bez pfepadu G 5/4 	I kus I 	5,0001 	257,001 	1285,001 
	PP 	Ventily odpadni pro zaiizovaci pfedmety umyvadlove bez pi'epadu G 5/4 (HL 15.1) 
	W 	2+1+1+1 "umyvadlo 		5,000 
	W 	soueet 		5,000 
	11031 K 1725861102 -u~zapachova uzaverka pro umyvadla ON 40, chrom 	I kus I 	4,0001 	310,001 	1240,001 
	PP 	Zapachove uzaverkY zaiizovacich predmetU pro umyvadla ON 40 (HL 132140) 
	W 	2+1+1 "umyvadlo 		4,000 
	W 	Soucet 		4,000 
	11041 K 1725861312 	Izapacho~i~~averka pro umyvadlo ON 40 podomltkova 	I kus I 	1,0001 	560,001 	560,001 
	PP 	Zapachove uzaverkY zaiizovacich pfedmetu pro umyvadla podomitkove ON 40/50 (HL 134) 
	W 	1 "umyvadlo invalidnl 		1,000 
	W 	Soucet 		1 ,000 
	11051 K 1725311121 	-IDfe~j~d~oduchY nerezovy s odkapavacl plochou 500x450 mm 	I soubor I 	2,0001 	2790,001 	5580,001 
	PP 	Drezy bez yYtokovYch armatur jednoduche se zapachovou uzaverkou nerezeve s odkapavaci plochou 560x480 mm a miskou 
	W 	2 "dfez 		2,000 
	W 	soucet 		2,000 
	11061 K 1725311111- 	I Drez jednoduchy keramicky se zapachovou uzaverkou 590x450 mm 	I soubor 	1,000 I 	2 700,00 I 	2 700,00 I 
	PP 	Drezy bez yYtokovYch armatur jednoduche se zapachovou uzaverkou kerarnicke 590x450 mm 
	W 	1 "dtez 		1 ,000 
	W 	soueet 		1,000 
	11071 K 1725821328 	I Baterie drezo~~ s!ojankove pakove s vytahovacl spr§kou 	I soubor I 	3,000 I 	4 600,00 I 	13 801),00 I 
	PP 	Baterie drezove stojankove pakove s otacivYm ustim a delkou raminka s vylahovaci sprSkou 
	W 	2+1 "drez 		3,000 
	W 	soucet 		3,000 
	11081 K 1725851305 -- -]ventii~dPadnl dfezovy bez pfepadu G 6/4 	I kus I 	3,0001 	281,001 	843,001 
	PP 	Ventil odpadni drez0vY bez prepadu G 6/4 
	W 	2+1 "dfez 		3,000 
	W 	soueet 		3,000 
	1-1-091 K 1725862103 	Izapachova uzaverka pro dfezy ON 40/50 	I kus I 	3,0001 	337,001 	1 011,001 
	PP 	Zapachova uzaverka pro di'ezy ON 40/50 
	W 	2+1 "dfez 		3,000 
	W 	soucet 		3,000 
	[110rKJ721212113 	IOdtokovy sprchovy zlab delky 900 mm s kryclm ro§tem a zapachovou uzaverkou 	I kus I 	1,000 I 	7 400~OO 1-- 	7 400,00 I 
	PP 	Odtokove sprchove Ziaby se zapachovou uzaverkou a krycim rostern delky 900 mm 
	W 	1 "sprcha 		1 ,000 
	W 	soueet 		1,000 
	11111 K 1725241112-~nicka sprchova akryla!ova ctvercova 900x900 mm 	I soubor 	2,0001 	5700,001	---1-1 400,001
	PP 	Sprchove vanicky, boxy, kouty a zasteny sprchove vanicky akryfatove etvercove 900x900 mm 
	W 	2 "sprcha 		2,000 
	W 	Soucet 		2,000 
	11121 K 1725245103 	IZastena sprchovajednokfldla do vy§ky 2000 mm a §Irky 900 mm 	I soubor I 	1,0001 --7300,001- 	7300.001 
	PP 	Sprchove vanicky, boxy, kouty a zasteny zasteny sprchove do vYsky 2000 mm dvere jednokndle, sifky 900 mm 
Strana 12 z 14 

PC Typ 
K6d 
Mnozstvf J.cena [ClK] Cena celkem [ClK] 
Popis 
MJ 
	W 	1 "sprcha 	1 ,000 
	W 	soueet 	1,000 
11131 K 1725841311 	I Baterie sprchova nast~nna pakove vcetne sprchoveho set~, drtaku sprchy 	I soubor I 	2,0001 	6860,001 	13720,001 
	PP 	Baterie sprehove nastenne pakove 
	W 	2 "sprcha 		2,000 
	W 	soueet 		2,000 
11141 K 1725865311 	Izapachova uzav~rka sprchovYch van ON 40/50 s kulovYm kloubem na odto~--- 	I kus I 	1,0001 	760,001 	760,001 
	PP 	Zapachove uzaverky zafizovacich pi'edmetu pro vany sprchovych koutu s kuloyYm kloubem na odtoku ON 40/50 [HL 5141 
	W 	1 "sprcha 		1 ,000 
	W 	Soucet 		1,000 
[tt5[KI72598()123 	lovrrka 30/30 	I kus I 	10,0001 	139,001 	1 390,001 
	PP 	Ovii'ka 30/30 
	W 	7+2+1 "reviznr dvrrka 		10,000 
	W 	soueet 		10,000 
11161 K [W87251()3 	I pre~~n l1~ot tonainr pro zanzovacr predmitY~ Objektech v do24-;;'- 	t 	I 	0,3911 	709,00 I 	277,221 
	PP 	Presun hmot tonaini pro zanzovaci predmety v objektech v do 24 m 
	726 	
	726111031 	
PP 		
W 		
W 		
K 1726111041 	
PP 		
W 		
W 		
	552818000 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21482,0);(0,0);(0,21462);(14115,21462);(14115,16097);(21482,16097)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(10166,0);(0,0);(0,21452);(21482,21452);(21482,6777);(10166,6777)posrelh0posrelv0pib
Zdravotechnika - ofedstenove instalace 
31 973,98 

17360,00 
lnstalaent predstena - klozet s ovladanrm zepredu v 1080 mm zavesny do masivnr zdene kce 
8680,00 
Predstenove instala':ni systemy pro zazdeni [GEBERIT] do masivnich zdenych konstrukc! pro zavesne klozety ovladam zepi'edu, 
stavebni vVska 1080 mm 
2 "klozet 
soucet 

9200,00 
lnstataenl predstena - klozet s ovladanlm zepredu v 10800 mm zavesny do masivnr zdene kce pro imobilnr 
9200,00 
Predstenove instalacm systemy pro zazdem [GEBERIT] do masivnich zdenych konstrukci pro zavesne klozety ovladani shora, stavebni 
vVska 820/880 mm 
1 "klozet imobilnr 
soueet 
t/atitko pneumatieke pro oddalene ovladani we zepfedu , dve vody, bile 24,6 x 16,4 em 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21496,0);(7870,0);(7870,17577);(0,17577);(0,19511);(3477,19511);(3477,20190);(21347,20190);(21347,21479);(21496,21479)posrelh0posrelv0pib
2170.00 
2170,00 
PP 
material instalacm - prvky montaZnrOvlSdacl Uacitka, pnslusenstvl Uacltko pro ovladani zepi'edu pneurnaficke rucni Uacitko, dYe 
mnoistvi vodv. bile 
P 	Poznamka k poloice:D 
- odda/ene ovladan; sp/achovan; oouze Pro we pro imobiln; 
W 	1 "klozet imobilnr 	1,000 
W 	soucet 	1,000 
[i2O[KY6191 001 	IZvukoizolacnr souprava pro klozet a bidet 	I soubor I 	3,0001 	320,00[--- 	- 96(),001 
	PP 	Ostatni prislusenstvi instalacnich systemu zvukoizolacnl souprava pro we a bidet 
	W 	2+1 "klozet 		3,000 
	W 	soueet 		3,000 
11211 K 1726191002 	ISouprava pro predstenovou montaz 	I soubor I 	3,0001 	754,001 	2262,001 
	PP 	Ostatni prislusenstvi instalacnich systemu souprava pro predstenovou montai 
	W 	2+1 "klozet 		3,000 
	W 	Soucet 		3,000 
11221 K 1998726113 	-- TPre~''-hmOttonainrpro instalaenr pretabrikityv objektech v do 24m 	I 	t 	C6'-031r=709,()OT 	21,981 
	PP 	Presun hmot tonaini pro instalacni prefabrikaty v objekteeh v do 24 m 

727 
8760,00 
727121112 
Zdravotechnika - oozarnl ochrana 
12 000,00 

1460,00 
Protipozarnr manZeta 0 110 mm z jedne strany delier konstrukee pozarnl odolnost EI 90 
W 
W 
Protipozami ccnranne maniety z jedne strany deliei konstrukee pozarnl odolnost EI 90 (PROMASTOP RII30 501.35) D 110 
6 "manzety kanalizaee 
soucet 
6,000 
6,000 
Strana 13 z 14 

	PC Typ 	K6d 
12411(-1727121131 
PP 
W 
W 

Popis 
-1 Protipozarnl rnanzeta D 50 mm z [edne strany dellci konstrukce pozarnl odolnost EI 120 
ProtipoZilmi ochranne manzety z jedne strany delici konstrukce pozami odolnost EI120 (PROMASTOP RI501.30) D 50 
3 "ucpavky vodovod 
soucet 
Strana 14 z 14 

	MJ 	Mnozstvi J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 
Ikus 	I	3,0001 	1 080,001 	3240,00 
3,000 
3,000 

P.C. 	Polozka Popis poloiky 			Mer. 	Mnozstvl c:eny v Ke 						
						liedn. 	DPS 	!Jedn. 	I Material 	!Jedn. 	I Montal 	
		Siaboproude rozvodv 											
		Elektricka Doiarnf sienalizace EPS 					8229500 				8073800 	
1 	R 	VstuDne wstuDnf modulv 						- 				- 	
2 	R 	BX-IM4 vstuonl modul 			ks 	2 	295000 	590000 		35000 	70000 	
3 	R 	BX-REL4 reh!ovV modul 			ks 	2 	381000 	762000 		40000 	80000 	
4 	R 	BX-IOM vstupne!wstu_pni modul 	ks 	2 	690000 	1380000 		90000 	180000 	
5 	R 	krabice pro modulv IP66 / rozrnerv: 130 x 94 x 57 mm 	ks 	2 	51200 	102400 		11000 	22000 	
6 	R 	pomocny napaject zdro] pro vstupne vystupm mocuiv.zoro] L4V/jA II'jU ve Skrmlll'jU, akkU max. LbAn, 	ks 	2 	1200,00 	2400,00 		260,00 	520,00 	
		is termistorem 										
7 	R 	Akurnulator 112V/17Ahl do tabla obsluhv 	ks 	2 	123000 	246000 		9500 	19000 	
8 	R 	Hlasice 								- 				- 	
9 		Adresovatelnyoptickokourovikombinovanv hlasic oro kruhovou linku do stavalfciho svstemu Scharck 	ks 	14 	89200 	1248800 		19800 	277200 	
10 	R 	Zasuvka pro senzorv 			ks 	14 	36400 	509600 		13000 	182000 	
11 	R 	Adresovateln"; tlacitkovV hlasic pozaru vnitrni s lzolatorern cerveny, 135x135x32mm 	ks 	2 	61500 	123000 		9800 	19600 	
12 	R 	Samoleokv s cislv adres 1 az 250 na bilem pozadf (kruhove vedeni AI. 	ks 	1 	35600 	35600 		29000 	29000 	
13 	R 	Samoleokv s cislv adres 1 az 250 na zlutem oozadt Ikruhove vedeni Bl. 	ks 	1 	38100 	38100 		29000 	29000 	
14 	R 	Sirena 								- 				- 	
15 	R 	Adresovatelna vome prograrnovatetna sirena s izolatorem, pro vmtrm pouzltt, cervena, napajem z 	ks 	3 	2970,00 	8910,00 		350,00 	1050,00 	
			In'!'hn v •• rI •• n; ,hb.it".H (QO:l 10~rlRt 16 r1~7mich tOnt' 								
16 	R 	:,aelovacl kabely 5 tunkcnl sChopnostl systemu ptl pozaru die ZP Z7/Z008, STN 9Z OZ05,DIN 410Z-1Z a 					- 				- 	
		''''.'' ""hlnlr"l f. '1OII/,n1 1. 5b. 182 ca sldn 										
17 	R 	kabel sdelovacl 1 x 2 x 0 8 s funkcni odolnosti pri pozaru Inapr.:PRAFlaGuard· F 1 x 2 x 0 8 PH120- Rl 	m 	180 	2700 	486000 		2300 	414000 	
18 	R 	,:'lIove kabely 5 funkenl sChopnostl systemu ptl pozaru die ZP .t.I/ ""UUIJ, STN 9Z OZ05,DIN 410Z-1Z a 					- 				- 	
		,,,,. ,,_, '.n •. If. '';:Il/'n1 1 5b.182 ca sldn 										
19 	R 	Hned" kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1DO 	m 	65 	2600 	169000 		2100 	136500 	
20 	R 	Elektroinstalacni material 						- 				- 	
21 	R 	trubka obebna -prumer 16 320N PVC (CSN) 	m 	65 	900 	58500 		1100 	71500 	
22 	R 	trubka obebna - orumer 23 320N PVC le5Nl 	m 	35 	1400 	49000 		1100 	38500 	
23 	R 	trubka obebna - prumer 29 320N PVC Ie SNI 	m 	20 	1900 	38000 		1100 	22000 	
24 	R 	krabice univerzalnf KU 68-1901 pod omitku veetne vieka 	ks 	10 	1000 	10000 		2800 	28000 	
25 	R 	protioozarni tmel EI90min min. tl.stenv 150 az do 300 cm2 	ks 	5 	42700 	213500 		17000 	85000 	
26 	R 	drazka pro tr.16 			m 	65 		- 		10800 	702000 	
27 	R 	drazka pro tr.23 			m 	35 		- 		11700 	409500 	
28 		Kabelova prichvtka oro funkcni trasu pri pozaru oro 1-2 kabelv 	ks 	365 	2600 	949000 		1200 	438000 	
29 	R 	prostup stavebni konstukci do 150mm 	ks 	5 		- 		74000 	370000 	
30 	R 	oroerarnovani ustrednv 			hod 	15 		- 		52000 	780000 	
31 	R 	oziveni svsternu 			hod 	10 		- 		52000 	520000 	
32 	R 	vazbv na ostatni orofese Ikoordinace erovazanostl 	hod 	15 		- 		45000 	675000 	
	R 	vazbv na sllnoproud - integrace Dleaselagregatu 	hod 	10 		- 		45000 	450000 	
		zeorucxe vvoornoci \VV5eKam nlKy pro xonzo y, pocperv, zavesy, zajrstern marupuiacm piosmv, zazcern 										
33 	R 	nebo zabetonovanlrvh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastfelovan! upevriovacich prvku, 	hod 	35 		- 		400,00 	14000,00 	
		v 	• • n" •.•.• ",.1 	v • 	:on"rll 										
34 	R 	revize zarizeni EPS 			hod 	5 		- 		60000 	300000 	
35 	R 	zaskolenl obsluhv 			hod 	2 		- 		60000 	120000 	
36 	R 	drobnv elektroinstalaeni material (5kgl 	kol 	1 	90000 	90000 		49000 	49000 	
		Celkem bez DPH 	------- 						163033, 	00 		

P.f Polo Popis pololky 				Mer. MnozsNCeny v Kc 					
							ledn, OPS 	lJedn. 	I Material lredn. 	I Montal 		
		SlaboDroude rozvodv 											
		PODlachovV zabezDefovacl a tlsilovV System PZTS 					"",,,,,,,,,,,,		11##"""""		
1 	R 	LCD klavesnice r tamper.zelene podsvetleny displej 2x16 znaku, akustlcka signalizace 	ks 	6 	3700,00 	22200,00 	1040,00 	6240,00 		
2 	R 	Koncentrator v kovovem krvtu oro 16 z6n a 4 PGM vvStUDV 	ks 	2 	620000 	1240000 	170000 	340000 		
3 	R 	Splnany zdroj v kovovern krytu 13,8 Vss / lOA s releovymi vYstupy a odpojovacern 	ks 	1 	5590,00 	5590,00 	1200,00 	1200,00 		
4 	R 	AKU 12V/45Ah 				ks 	1 	1100,00 	1100,00 	80,00 	80,00 		
5 	R 	PIR detektor, pulkulova otocna eocka, dosah vejli' 11m / dlouM dosah 17m. 	ks 	14 	2060,00 	28840,00 	180,00 	2520,00 		
6 	R 	Magneticky kontakt povrchovv 2cm, plast, NC 	ks 	16 	48,00 	768,00 	23,00 	368,00 		
7 	R 	Magneticky kontakt povrchovv 2cm, kovovv, tezky, NC 	ks 	1 	173,00 	173,00 	60,00 	60,00 		
8 	R 	plastova OIzka propojovad krabice pro povrchovou monta! s ochrannym rneandrem, pajed svorky, 	ks 	14 	312,00 	4368,00 	93,00 	1302,00 		
		loocet svorek 7+1 ocbrannv kontakt NC. barva bila. r~~~l!.~ : 96 x 41 x 18 mm. 								
9 	R 	!'Idld iednotka vcetne instalacniho boxu 	ks 	3 	490000 	1470000 	1200,00 	3600,00 		
10 	R 	Elektroinstalacnl krabice IP68, pro i'idid jednotku 	ks 	3 	743,00 	2229,00 	210,00 	630,00 		
11 	R 	eteeka karet 					ks 	3 	968,00 	2904,00 	160,00 	480,00 		
12 	R 	elektrornechanickv samozamykad zamek 	ks 	3 	571600 	1714800 	58000 	1740,00 		
13 	R 	kabel SYKFY 5x2xO 5 			m 	690 	700 	483000 	1400 	966000 		
14 	R 	kabel CYKY-O 2x15 			m 	245 	900 	220500 	1400 	343000 		
15 	R 	trubka PVC 16 2016 			m 	530 	900 	477000 	1100 	583000 		
16 	R 	trubka PVC 23 2023 			m 	260 	1400 	364000 	11 00 	286000 		
17 	R 	trubka PVC 29 2029 			m 	50 	1900 	95000 	11 00 	55000 		
18 	R 	krabice KU68-1901 vc.vicka 			ks 	25 	1000 	25000 	2800 	70000 		
19 	R 	krabice K0100 				ks 	5 	8900 	44500 	3700 	18500 		
20 	R 	DrotiDoZarni tmel EI90min min. tl.stenv 150 az do 300 cm2 	bal 	2 	42700 	85400 	17000 	34000 		
21 	R 	drazka oro tr.16 cihla 			m 	240 		- 	10800 	2592000 		
22 	R 	drazka pro tr.23 cihla 			m 	110 			11700 	1287000 		
23 	R 	drazka pro tr.29 cihla 			m 	50 			12400 	620000 		
24 	R 	erostuo kci 150mm 80x80 cihla 		ks 	5 			74000 	370000 		
		zecrucxe vvpomoci \VVSeKani nlKy pro xcnzotv, poapery, zavesy, zajrstern rnarupuiacrn prosmv, 									
25 	R 	zazdeni nebo zabetonovanl rYh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastfelovanl upevilovadch 	hod 	15 		- 	400,00 	6000,00 		
		nrul •.•• , 	- 	•• n",.,..,,,,.fh, 	- . 	~n".l\ 									
26 	R 	nrozramovanl usti'ednv 			hod 	10 			52000 	520000 		
27 	R 	oziveni svsternu 				hod 	5 			52000 	260000 		
28 	R 	revize zai'izeni 				hod 	5 			60000 	300000 		
29 	R 	zaskolenl obsluhv 			hod 	2 		- 	60000 	120000 		
30 	R 	drobnv elektromstalacnl material {5kltl 	kol 	1 			150000 	150000 		
31 	R 	Strukturovana kabelal SK 							6510100 		3777200 		
32 	R 	zasuvka Dod omitku 2xRJ45 UTP CA T6 vcetne ramecku 	ks 	7 	26300 	184100 	10800 	75600 	, 	
33 	R 	zasuvka Dod omitku 1xRJ45 UTP CAT6 vcetne rameeku 	ks 	3 	19700 	59100 	10800 	32400 		
34 	R 	19" datow rozvadec BOfFO 									- 		
35 	R 	Rozvadec stoian. 45Uf800 x 800 sedv. dvei'e sklo 	ks 	1 	15200 00 	1520000 	230000 	230000 		
36 	R 	Rozvodnv panel 6poz 220V vcetne vanv snura 3m 	ks 	1 	98000 	98000 	610O 	6100 		
37 	R 	19" horlzontalnl ventilacnl iednotka 2U se 4 ventnatorv, bimetalow termostat 	ks 	1 	381000 	381000 	105000 	105000 		
38 	R 	Osvetlovacl iednotka 1U halozenova 288 1m 	ks 	1 	151300 	151300 	41000 	41000 		
39 	R 	Ukladac! olato 550mm 1U-4b. BK cerne nosnost 45klt 	ks 	1 	67200 	672 00 	10700 	10700 		
40 	R 	Patch Danel UTP osaz. 24 pozlc BK 1U CAT6 	ks 	2 	171400 	342800 	31000 	62000 		
41 	R 	Vwazovad Danel1U olastova oka BK cerny 	ks 	2 	20600 	41200 	7300 	14600 		
42 	R 	Patch kabel UTP 3m CAT6 sedv. s litou ochranou 2xRJ45 AESP 	ks 	35 	7900 	276500 	2000 	70000 		
43 	R 	Zdroi UPS BO/FO 							. 		. 		
44 	R 	Aktivnf Drvkv BOfFO 							. 		. 		
45 	R 	Switch web rnanaeed PoE 24x 100M PoE + 2x 1G Combo 	ks 	1 	464000 	464000 	49000 	49000 		

146 	R 	Access Point 					- 		- 	
		WI!"I Access Pornt HUl.lla/o/gtn/ac az Hb7MOps, DualOand, POE, GLAN, WPS, RADIUS server, 							
47 	R 	Roaming, centralnl sprava, Podpora az 100 uzivatehi soucasne a rychly roaming mezi pi'istupovymi 	ks 	3 	7000,00 	21000,00 	350,00 	1050,00 	
		hntiv 								
48 	R 	Elektroinstalacnf material a kabelv 				- 		- 	
49 	R 	kabel U/UTP drat CAT6 PVC civka 500m sedv 	m 	176 	900 	158400 	1300 	228800 	
50 	R 	trubka PVC LPFLEX 2323 		m 	120 	1400 	168000 	1100 	132000 	
51 	R 	trubka PVC LPFLEX 2329 		m 	30 	1900 	57000 	1100 	33000 	
52 	R 	trubka PVC LPFLEX 2336 		m 	20 	2200 	44000 	1100 	22000 	
53 	R 	krabice oi'istroiova KP68/2 		ks 	10 	500 	5000 	2600 	26000 	
54 	R 	krabice KU68-1901 vc.vicka Dod omitku 	ks 	30 	1000 	30000 	2800 	84000 	
55 	R 	nrottpofarnf tmel EI90min min. tl.stenv 150 az do 300 cm2 	bal 	5 	42700 	213500 	17000 	85000 	
56 	R 	lista hranata 60x4o HA (3ml vcetne snol.materlalu 	ks 	5 	9800 	49000 	8000 	40000 	
57 	R 	orostue kef 150mm 80x8o cihla 		ks 	5 		- 	74000 	370000 	
58 	R 	ICT mei'eni certlfikalcnf orotokol 		ks 	1 		- 	830000 	830000 	
59 	R 	dnizka oro tr.23 cihla 		m 	30 		- 	11700 	351000 	
60 	R 	dnizka oro tr.29 cihla 		m 	10 		- 	12400 	124000 	
61 	R 	zednlcke vYpomoci (vysekani niky pro konzoly, podpery, zazden! nebo zabetonovanf r'{h nebo kapes 					400,00 	6000,00 	
		ve zdech nebo stropech, nastfelovani upevilovacfch prvku, upevilovani pomocf hmofdinek apod) 				- 			
			hod 	15 					
62 	R 	drobnv elektroinstalacnl material (5k2l 	kol 	1 	100000 	100000 	50000 	50000 	
63 	R 	IP kamerovV system 					3455000 		747000 	
		I vt:rll\UVllr rf" UUIlt:L "drrrt:r d, I U/N, nu ~UlSup, .jMt', r=z.e-azrnrn, WUIt, lit .jum,-lI'bb , I..MU::' ~/.j- , 							
64 	R 	2048 x 1536, Barva: 0,07 lux; CB: 0 lux (IR zapnuto), RJ-45 (10/100 Base-T), 12 VDC / PoE (IEEE 	ks 	4 	3471,00 	13884,00 	970,00 	3880,00 	
		IlIn") ~"f\ _~n _ I':.n or "l' •• +n& "'nn,nl ••••. " ••.••••.• ,"" , •• .-1' 							
65 	R 	licence oro oi'iooieni 1 kamerv 		ks 	4 	260000 	1040000 	30000 	120000 	
66 	R 	Pi'idavnv HOD s kaoacitou 4TB 		ks 	1 	249000 	249000 	7000 	7000 	
67 	R 	konektor RJ45 cat.6 (oro venkovni kamerul 	ks 	8 	972 00 	777600 	14000 	112000 	
68 	R 	Kabelva elektroinstalacnf material (soucastf dodavkv strukturovane kabelaze) 				- 		- 	
69 	R 	oflvenl a nastaveni svstemu IP CCTV 	hod 	2 		- 	60000 	120000 	
70 	R 	Tfsnove volanf na we pro telesne postiiene osobv 				501500 		123500 	
71 	R 	zakladnl modul sie:nalizacniho svsternu 	ks 	1 	150000 	1500,00 	27000 	270,00 	
72 	R 	Napaiec 15A/40W/24 V DC 		ks 	1 	94000 	940,00 	18000 	180,00 	
73 	R 	kabel k napaieci 		ks 	1 	16500 	165,00 	7000 	7000 	
74 	R 	orlantacnl svetlo 		ks 	1 	21600 	216,00 	13500 	13500 	
75 	R 	lootvrzovacf tlacitko 		ks 	1 	38000 	38000 	11400 	11400 	
76 	R 	,pi'ivolavaef tlacitko 		ks 	1 	45300 	45300 	11400 	11400 	
77 	R 	volacf tahove tlacitko 		ks 	1 	131700 	131700 	26000 	260,00 	
78 	R 	konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p 	ks 	4 	11,00 	4400 	2300 	9200 	
79 	R 	Kabely a elektroinstalacnf material 				368400 		2279500 	
80 	R 	Kabel UTP Cat5e 		m 	320 	640 	2048,00 	1000 	320000 	
81 	R 	drazka pro tr.16 		m 	120 			10800 	1296000 	
82 	R 	trubka ohebna PVC 16 2016 		m 	120 	900 	108000 	1100 	1320,00 	
83 	R 	krabice KU68-1901 vc.vicka Dod omitku 	ks 	5 	1000 	SO 00 	2800 	14000 	
84 	R 	mont.iZni krabice na omitku pro tlacltka 	ks 	4 	9600 	38400 	6300 	25200 	
85 	R 	rnontafnl krabice na omitku pro zakladni a rozsii'uiicf modul 	ks 	1 	12200 	122,00 	6300 	63,00 	
86 	R 	drazka pro tr.16 cihla 		m 	45 			10800 	486000 	
87 	R 	Spolecna televiznf antena STA 					2435400 		2936800 	
		Kaskadovatelny multipi'epinac, 8 ucastnickych vYstupu Pruchozi utlum: - TER: 6 dB - SAT 2 00. 4,5 dB 							
88 	R 	odbocovacf utlum: - TER: 20 00.18 dB - SAT: 18 00.15 dB, Pruchozi pi'epinac 8x vYstup pro TV/SAT 		1 	14600,00 	14600,00 	6500,00 	6500,00 	
		zasuvku oro 5ti kabelovou kaskadu. 	ks 						
89 	R 	F konektor rvchlcspojka (5ks) 	-- 	ks 	2 	2500 	SO 00 	1400 	2800 	

90 	R 	F konektor na koax kabel 			ks 	4 	18300 	73200 	3500 	14000 	
91 	R 	zasuvka lV SAT Rood omitku koncova s utlumem 1 dB. 	ks 	2 	22600 	45200 	11500 	23000 	
92 	R 	kabel koaxialni 75 Ohm .orumer 6.8mm stinen! 100 dBi KH21D 	m 	120 	2500 	300000 	1700 	204000 	
93 	R 	trubka obebna - MONOFLEX 23 320N PVC (C SN) 	m 	90 	1400 	126000 	1100 	99000 	
94 	R 	krabice KU68-1901 vc.vicka pod omitku 	ks 	10 	1000 	10000 	2800 	28000 	
95 	R 	krabice oristroiova KP68/2 			ks 	5 	500 	2500 	2600 	13000 	
96 	R 	Poiarni ucoavka eof.odolnost 90 min tmel min. tl.stenv 150 do 300 cm2 	ks 	5 	42700 	213500 	17000 	85000 	
97 	R 	drazka oro tr.23 				m 	60 			11700 	702000 	
98 	R 	lerostuo stavebni konstukci do 150mm 		ks 	4 			74000 	296000 	
99 	R 	nastaveni anten mereni slznalu oziveni svstemu 	hod 	2 			60000 	120000 	
		[zecrucxe vvpomoo \vyseKam mKy pro xonzotv, poapery, zavesy, zajrsteru mamputacru ploslny, 							
## 	R 	zazdeni nebo zabetonovanf ..yh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastfelovanl upevriovacich 	hod 	15 		- 	400,00 	6000,00 	
		InruJ,.,·, 	v 	• 'nn""n,.; 	v • 	:onn/ll 							
## 	R 	drobnv elektroinstalacni material (10ke) 	ks 	1 	200000 	2000 00 	1000 00 	100000 	
		Celkem bez DPH 						####11###		##11#####	

POLOZKOvY ROZPOCET 
QI 
u 
oN 
o 
Q. 
	1 	PRAOELNA A ZEHLfRNA 

::s 
== 
"C 
ii 
N 
'ftI 
Z 

~ 
o 
C 
"C 
QI 
- 

~ 
'N 
o 
C 
~ 

nJ 
C 
QI 
U 
'nJ 
> 
~~ 
o > 
c 'nJ 
"C"C 
QI 0 
_"C 

nJ 
C 
QI 
u > 
~~ 
o'nJ 
~"C 
- 0 
~"C 

nJ 
C 
QI 
u 
'nJ 
> 
o QI 
~ 'N 
•.• 'nJ 
o •.• 
c C 
"C 0 
.! E 

nJ 
C 
QI 
U QI 
'ftl ,N 
> 'ftI 
o •.• 
~ c 
- 0 
~ E 

1.1 [Kompaktnl vzduchotechnlcka rekuperacnl jednotka tepelne a zvukove oplastena (PUR 
pena 50mm), vniti'nf podstropnf provedenf. 
Siozenf jednotky: prufna rnanfeta na vsech hrdlech, filtry F7/M5, deskovv protiproudv 
rekuperacnl vYmenfk s obtokem, pi'fvodnf a odvodnf ventilator s EC motorem; chladiee 
(pi'fmy vYparnfk) s moznostt vyuzitf pro ohi'ev vzduchu. 
Parametry chladice/ohffvace: Qoh = 2 kW, tp (leto/zima) = 16/24 "C 
Parametry rekuperatoru: min. ueinnost rekuperace die EN 308 (sucha) 78 % 
Pi'fvodnf ventilator: Vp = 750 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,385 kW; 2,5 A; 230 V 
Odvodnf ventilator: Vo = 750 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,385 kW; 2,5 A; 230 V 
Hlukove parametry: do potrubf sanf/pi'fvod/odvod/vYfuk - Lw = 61/82/63/80 dB(A); 
hluk od oplastenf do okoll Lw = 59 dB(A) 
1. 1 [Prokabelovanl komponenta MaR ktere nejsou propojeny z vYroby, ve. propojovacfch 
	• 	Y. 	'" - 	I _ .x.. '" 	., 

kpl I 1,0 I 46 000 Kc I 46 000 Kc I 11 000 Kc I 11 000 Kc 
kpl I 1,0 I 5 000 Kc I 5 000 Kc I 7 000 Kc I 7 000 Kc 

1. 2 IVenkovnf kondenzafnl jednotka - SPLIT system; 0 jrnenovltem chladfcfm vYkonu min 2,5 I kpl I 1,0 I 19 000 Kc I 19000 Kc I 4 500 Kc I 4 500 Kc 
kW, invertorovY system, ve. chladiva R410a; autorestartu; pracovnf rozsah venkovnf 
teploty -10° do +46°C. ve. autonomnf regulace; rnofnosti externfho pi'epfnanf reiimu 
chlazenf/topenf 
parametry: 2,5 kW; 230 V; jistenf C10A; veetne ocelove konzole pod venkovnf 
kondenzacnf jendotku; ve. 4 silentbloku 

1. 3 I NEOBSAZENO 
1. 4 ITlumic hluku do kruhoveho potrubf 0250/100o.ohebny, s vvsokvrn utlurnern 
1.5 [Protidestova zaluzie "NASAVACf" vAl provedenf 355x355 mm, ve. ochranneho pletiva z 
dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacfch lamel v hornf easti uzpusoben pro zachvt 

ks 
ks 

7.0 
1,0 

o Kc 
1834 Kc 112838 Kc 
1 940 Kc I 1 940 Kc 

300 Kc 
93 Kc 

o Kc 
2100 Kc 
93 Kc 

1. 6 I Protldestova zaluzie "vYFUKOVA" v AI provedenf 355x355 mm, ve. ochranneho pletiva z I ks I 1,0 I 1 940 Kc I 1 940 Kc 

93 Kc 

93 Kc 

10 300 Kc I 20 600 Kc 
	o 	.1 "' 	I ••••• n .. 1n. 
	1.7 IUzavfracf klapka tesna 0250 mm; pi'fprava pro ovladanl servopohonem - ve. 	I kpl 
	..,..,n\l"" L.. 	x __ •.•.•. _r __ •• ~: __ •• 1_ •.•. _"'= __ ( ",)A\/I",)-:ln\/ ••. .11 .••.•• \1'7T' 
1. 8 I Pi'fvodnf dvoutada vyustka do kruhoveho potrubf v komfortnfm provedenf 400x100mm, I ks 
	., 	I_ - - D1 	.•.. .L~_!L. __ ..! __ XI. 
Stranka 1 z 4 

2,0 
2,0 

515 Kc 

1030 Kc 

2160 Kc 
84 Kc 

4320 Kc 
168 Kc 

r---- 																1146 Kc 			
1. 9 pi'fvodni dvoufada vyustka do kruhoveho potrubi v komfortnim provedeni 200x100mm, 	ks 	3,0 	382 Kc 		84 Kc 	252 Kc 	
	. 		n. 		.. . 	. 	." 											
1. 10 	Odvodni [ednofada vvustka do kruhoveho potrubi v komfortnim provedeni 	ks 	3,0 	470 Kc 	1410 Kc 	84 Kc 	252 Kc 	
	IA,," .. 1"". 	. 		n. 				. . 		.Yo . 								
1. 11 	Odvodni [ednofada vvustka do kruhoveho potrubi v komfortnim provedeni 	ks 	2,0 	298 Kc 	596 Kc 	84 Kc 	168 Kc 	
	I ..• "" .1"". 	. 		"'" 				. . 		. 								
1.12 	Pi'fvodni talii'ovy venti I kovow 080 mm vC. montamfho oi'islusenstvi 	ks 	1.0 	290 Ke 	290 Kc 	133 Ke 	133 Ke 	
1.13 	Odvodni talii'ovY venti I kovovv 080 mm VC. rnontafnfho pi'fslusenstvf 	ks 	10 	290 Kc 	290 Kc 	133 Kc 	133 Kc 	
1. 14 	NEOBSAZENO 													o Ke 		o Ke 	
1.15 	NEOBSAZENO 													o KC' 		o Kc 	
1. 16 	Ah 												bm 	10.0 	400 Ke 	4000 Ke 	150 Ke 	1500 Kc 	
1.17 	Kruhove potrubi SPIRO 0250 mm z pozlnkovaneho plechu, vC. tvarovek, montafnfho, 	bm 	30,0 	837 Kc 	25110 Kc 	320 Ke 	9600 Kc 	
	.. 	.'<1 		. 		. 	. . 				• T"7 							
1.18 	Hranate potrubi sk I z pozinkovaneho plechu, vc. montafnfho, zavesoveho, spojovaciho 	m2 	3,0 	1630 Ke 	4890 Kc 	392 Kc 	1176 Ke 	
	. 	. . 		" 						. 		. 							
1.19 	Izolace tepelna z mtneralnf vatv 0 tl. 4cm sAL polepem; min. 40 kgJm3; A = 0,034 W/mK 	m2 	8,0 	325 Kc 	2600 Kc 	140 Ke 	1120 Kc 	
	•. ,,0,. 		.. . 															
1.20 	Plast0vY zlab pro instalaci chladivoveho potrubf, vC. tvarovek, montafnlho a uchvtneho 	bm 	8,0 	200 Kc 	1600 Ke 	162 Ke 	1296 Ke 	
1 	Celbm zarizeni - PRAoELNA A ZEHLfRNA 						######## 		44 904 Kc 	
2 	HYGIENICKE ZAiUZENr A SKLAOY 											
2. 1 	Diagonalnf dvouotackow (dvoji vinuti) ventilator do kruhoveho potrubi 	ks 	1,0 	3700 Ke 	3700 Ke 	680 Ke 	680 Ke 	
	I ..• "" •..• " •.• "".... ""r- 		.•.• ..,n n •.••.• A 										
2.2 	Diagonalnf dvouotackcvv (dvoji vinuti) ventilator do kruhoveho potrubi 	ks 	1,0 	5100 Ke 	5100 Ke 	680 Kc 	680 Ke 	
	IAnn • .",~. '""7n n .• "nr 		. .,."n . n.,., 1\ 										
2.3 	Axialni nastimny ventilator 								ks 	1,0 	1382 Kc 	1382 Ke 	400Kc 	400 Kc 	
	I ..• "" ...• 'L. 0"'" .""'" ••...•..• ". 												
2.4 	Tlurnlc hluku do kruhoveho potrubi 0160/900 			ks 	3.0 	1746 Kc 	5238 Kc 	300 Kc 	900 Kc 	
2.5 	Protidestova zaluzie "vYFUKOvA" v AI provedeni 200x200 mm, vc. ochranneho pletiva z 	ks 	1,0 	1400 Ke 	1400 Ke 	70 Ke 	70 Kc 	
		. 			. "" .. "" 													
2.6 	Pozarni zpenovad mi'izka klasifikovana jako uzaver typu EW45; 300x200 mm, s pozarni 	kpl 	1,0 	2800 Kc 	2800 Ke 	600Ke 	600 Kc 	
	odolnosti min. 45 minut; vc. 2 kusu krycich mi'izek a prostupu provedeneho ze 4- 							
2. 7 	Odvodni jednofada vvustka v komfortnim provedenf 200x100mm, vc. rnontafnfho 	ks 	2,0 	298 Kc 	596 Kc 	84 Ke 	168 Ke 	
		.Y 																	
2.8 	Odvodnf talii'ovY ventil kovovv 0160 mm vC. montafnfho oi'islusenstvi 	ks 	4.0 	397 Ke 	1588 Kc 	133 xe 	532 Kc 	
2.9 	Odvodni talii'ovY ventil kovovv 0125 mm vc. rnontafnfho pi'islusenstvi 	ks 	5.0 	340Ke 	1700 Ke 	133 Kc 	665 Ke 	
7.10 	loetna klapka do kruhoveho potrubl 0160 mm 			kc; 	2.0 	190 Ke 	380 Kc 	60 Ke 	120 Ke 	
2.11 	Krvci mi'izka 0160 mm z dratku 0 tl. 1mm s okv 10x10mm 	kc; 	2~O 	200Ke 	400Kc 	30 Ke 	60 Kc 	
2. 12 	Pruzna rnanfeta oro nanoienl ventiiatoru: 0160 mm 		ks 	40 	~70KC' 	14S0 Ke 	80 Ke 	320 Ke 	
2.13 	Kruhove potrubf SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vC. tvarovek, rnontaznfho, 	bm 	20,0 	652 Kc 	13 040 Kc 	290 Ke 	5800 Kc 	
	. . 					. 	.. 			.. 	'. T"7 							
2.14 	Kruhove potrubf SPIRO 0125 mm z pozlnkovaneho plechu, vc. tvarovek, rnontafnfho, 	bm 	5,0 	614Kc 	3070 Ke 	290 Kc 	1450 Ke 	
	. . 					. 	.. 			.. 	•• T"7 							
2.15 	Hranate potrubi sk I z pozinkovaneho plechu, vi; montafnfho, zavesoveho, spojovaciho 	m2 	1,0 	1630 Kc 	1630 Kc 	392 Ke 	392 Kc 	
	. 	. . 		.. 								. .1. 							
Stranka 2 z 4 

2.16 	Izolace tepelna z rnlneralnl vaty 0 tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; A = 0,034 W/mK 	m2 	1,0 	325 Kc 	325 Kc 	140 Kc 	140 Kc 	
	v. no,.. 	.Xf • 												
2. 17 	Izolace tepelna z rnineralnf vaty 0 tl. 4cm s Al polepem ve venkovnim provedeni (tj. do 	m2 	1,0 	412 Kc 	412 Kc 	140 Kc 	140 Kc 	
		.v. 	.• e ,I •• .,. ,. n n., .• \AlI •• v .ll" nor 	.~: . 							
2 	Celkem zafizeni - HYGIENICKE ZAIUZENr A SKLADY 					44241 Kc 		13117 Kc 	
3 	DIESELAGREGAT 												
3.1 	KulisovY tlumlc hluku 1250x250x1000 (slozeny z 6 kulis 100x250x1000, konce kulis 	ks 	2,0 	8700 Kc 	17400 Kc 	1600 Kc 	3200 Kc 	
	budou opati'eny nabehovvmi hranami), plasi tlurnice hluku je zapocten do yVmery 							
3.2 	Tlumie hluku bunkoyV, velikost 800x500/1000 mm (slozeny z 4 bunek s derovanym 	ks 	2,0 	3624 Kc 	7248 Kc 	1200 Kc 	2400 Kc 	
	piech em 500x200x1000mm), veetne nabehovvch a yVbehoyVch plechu. Parametry 							
	utlurnu hluku pro bufiku delky 1000mm pro strednf frekvence v oktavovem pasrnu 							
	32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 6/9/12/19/26/28/24/18/10 dB. Plasi 							
3.3 	Protidesiova zaluzie INASAVACf" vAl provedeni 1250x450 mm, ve. ochranneho pletiva 	ks 	1,0 	1730 Kc 	1730 Kc 	200 Kc 	200 Kc 	
	z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacich lamel v horni easti uzpusoben pro 							
3.4 	Protidesiova zaluzie IvYFUKOVA" v AI provedeni 1250x450 mm, ve. ochranneho pletiva 	ks 	1,0 	1730 Kc 	1730 Kc 	200Kc 	200 Kc 	
	.L • 	4 	4" .. 4n. 										
3. 5 	Uzavfraci klapka tesna, vlcellsta, protibezna 1250x250 mm; prfprava pro ovladani 	kpl 	1,0 	17500 Kc 	17500 Kc 	2800 Kc 	2800 Kc 	
			v 	•• .,n, 	.x. 	, 	v. 							
3.6 	Uzaviraci klapka tesna, vlcellsta, protibezna 800x250 mm; pifprava pro ovladanl 	kpl 	1,0 	12300 Kc 	12300 Kc 	2300 Kc 	2300 Kc 	
			v 	..,..,n, 	.x . 	, 	v. 							
~. 7 	Krvci mi'fzka 800x400 mm z dratku 0 tl. 1mm s okv 10x10mm 	ks 	1.0 	110Kc 	110 Kc 	92 Kc 	92 Kc 	
3.8 	Pruzna rnanzeta pro napojeni ventilatoru: (560x630) mm - die konkretnfho napojenf na 	ks 	1,0 	1930 Kc 	1930 Kc 	340 Kc 	340 Kc 	
			..•. 												
3.9 	Hranate potrubi sk I z pozlnkovaneho plechu, ve. rnontafnfho, zavesoveho, spojovadho 	m2 	55,0 	1630 Kc 	89650 Kc 	392 Kc 	21560 Kc 	
	v 	, , 	, s: , 	•• .t. 	• .t., 										
3. 10 	Izolace tepelna z mlneralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem; min. 40 kg/m3; A = 0,034 W/mK 	m2 	60,0 	325 Kc 	19500 Kc 	140 Kc 	8400 Kc 	
	v. no,.. 	.X' • 												
3 	Celkem zafizeni - DIESELAGREGAT 							######## 		41492 Kc 	
4 	LEDNICE 													
4. 1 	Diagonalnl dvouotackovv (dvoji vinuti) ventilator do kruhoveho potrubi 	ks 	1,0 	4291 Kc 	4291 Kc 	680 Kc 	680 Kc 	
	I.,,,,, .,>/L.1"Jnn.nn" ••. .,.,,,\1.,, •••• ,, 										
4.2 	Tlumic hluku do kruhoveho ootrubt 0160/900 				ks 	1.0 	1 746 Kt 	1746 Kc 	300 Kc 	300 Kc 	
4.3 	Protldestova zaluzie INASAVACf" v AI provedeni 250x250 mm, ve. ochranneho pletiva z 	ks 	1,0 	1615 Kc 	1615 Kc 	70 Kc 	70 Kc 	
	dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacich lamel v horni easti uzpusoben pro zachvt 							
4.4 	Uzavirad klapka tesna, vlcelista, protibezna 250x250 mm; priprava pro ovladanl 	kpl 	1,0 	10300 Kc 	10300 Kc 	2160 Kc 	2160 Kc i 	
			• X 	. ..,..,n, 	.>: . 	, 	v. 							
4.5 	Zpetna klapka do kruhoveho notrubl 0160 mm 			kc: 	1 n 	1qn Kc 	190 Kc 	60 Kc 	60 Kc 	
4.6 	Krvd mrizka 250x250 mm z dratku 0 tl. 1mm s okv 10x10mm 	ks 	1.0 	430 Kc 	430 Kc 	40Kc 	40 Kc I 	
4. 7 	Krvd mrizka 0160 mm z dratku 0 tl. lmm s okv 10x10mm 	ks 	20 	200 Kc 	400 Kc 	30 Kc 	60 Kc I 	
4.R 	Pruzna manfeta pro nanolenl ventilatoru: 0160 mm 			ks 	2.0 	370 Kc 	740 Kc 	80 Kc 	160 Kc 	
4.9 	Kruhove potrubi SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, ve. tvarovek, montafnfho, 	bm 	13,0 	652 xe 	8476 Kc 	290 Kc 	3770 Kc 	
	_.::. •. x. ....•.•.•• "' •.• _ .•.. __ =_ •• _ •.. :&. ••.•.•.•.••.•• x •..•.• ( •• : •..• __ ..•. +_.:..1;,111 •• : •• T"7 •.•••••. '.Lr •••••.•.•.•.•.•• ,( ••••.•.•. 1,11 ___ + .•• __ 							
Stranka 3 z 4 

4. 10 	Hranate potrubl sk I z pozlnkovaneho plechu, vc. rnontafnfho, zavesoveho, spojovadho 	m2 	1,0 	1630 Kc 	1630 Kc 	392 Kc 	392 Kc 	
	.,. " 										
4.11 	Izolace tepelna z mineralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem; min. 40 kg/m3; ~ = 0,034 W/mK 	m2 	6,0 	325 Kc 	1950 Kc 	140 Kc 	840 Kc 	
	v. no,.. 	.xr . 									
4. 12 	Izolace tepelna z mlneralnl vaty 0 tl. 4cm s Al polepem ve venkovnfm provedenf (tj. do 	m2 	1,0 	412 Kc 	412 Kc 	140 Kc 	140 Kc 	
		ill:: ,I •• ~. 'I. _ /\ " •.•• 	y. no,.. 	.,., . 							
4.13 	Certiflkovanv system protipofarnfho utesnenf vrr prostupa rnineralnl vatou + 	bm 	1,0 	1200 Kc 	1200 Kc 	300 Kc 	300 Kc 	
	protlpofarnlm tmelem, pozarnf odolnost shodna s pozarnf odolnostf konstrukce, viz 							
4 	Celkem zarizeni - LEDNICE 						33380 Kc 		8972 Kc 	

	iCelkem -dodavka a montaz 						######## 		######## 	
	DODrava 							19850 Kc 			
	Zarellulovani Dredani a vvzkousenf 								16273 Kc 	
	Celkova cena zakazkv bez DPH 						######## 			
Stranka 4 z 4 

CERTIFIKAT POJISTENi 
(Potvrzenf 0 uzavFenf pojlstne smlouvy) 
Generali Pojist'ovna, a.s., se sidlem Beh,!hradska 132, 120 84 Praha 2 timto potvrzuje uzavi'eni pojlstne smlouvy 
mezi spolecnostl WANDEL CZECH s.r.o., Ie 28977955 a Generali pojlstovnou.a.s, ze dne 11.03.2013: 
Pojistna smlouva C.:	 1153288517, Dodatek (.1 
fojlsl_nik a poJlUiny: WANDEL CZECH, s.r.o. 
IL: 28 9779 55 
Havlr(kova 408, 584 01 Ledec nad Sazavou 
zapsana v OR KS Hradec Kralove, oddfl C, vlofka 31813 
Pojistitel:	Generali PojiJfovna, a. s, 
Selehradska 132, 120 84 Praha 2 
IL: 61 85 98 69 
zapsana v OR MeS Praha, oddfl S, vlozka 2866 
Pfedmet pojiJteoiiPojisteni odpovednosti za skodu z provozni (innosti 
IJmjt pojistneho plnenf: 
20 000 000,- Kc 
~pojistneho plneni:
2 X 20 000 000,- Kc 
Polatek pojiStinf: 
Konec pojBtinf: 
'4·10.2017 
na dobu neurcitou 
Generall Poji~fovna, a.s. trmto potvrzuje, fe nema villi pojistnfkovi z~dne pohled~vky po Ihllti 
splatnosti vypljvajrcr z vY~e oznalene poiistne smlouvy. 
Pi'esny rozsah pojiStenl je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikcit ani nemeni ani nenahrazuje. 
Kontakt: 
Tyrsova 108, 538 51 Chrast u Chrudimi 
Tel. 

lng. Miroslav Bohac, 
Jednatel FS Bohac s.r.or-. \L_, 
Poj.makler 056754PM .{~, , .• ,\ 
FS BOH " C 5 .• r.O .• 
Kancelar: Tyrsova 108, 538 51 Chrast 
Ie: 27505235, email; 
	.- 	- 
: 	._ .:;4. _ _ 	., 
V Chrasti 13.10. 2017 
Mail: Bohac@FsBohac.cz

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21479);(21276,21479)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21484);(21494,21484)posrelh0posrelv0pib
CESTNE PROHLAsENi 0 PODDODAVATELicH 
Ucastnlk WANDEL CZECH s.r.o., 
se sidlem: Havlickova 408,58401 Ledec nad Sazavou, 
reo. 28977955, 
zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskyrn soudem v Hradci Kralove, oddil C, vlozka 
31813, 
jakozto dodavatel vefejne zakazky na stavebni prace: "Rekonstrukce Detskeho centra 
Chocerady - Technickohospodafsky objekt" (dale jen "dodavatel"), 
v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona c. 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, nize predklada seznam poddodavatelu, pokud jsou dodavateli znami 
vcetne uvedeni, kterou cast bude kaZdy z poddodavatelu pinit 

Obchodni firma nebo nazev 	leo (pokud bylo pfideleno) a 	Cast vefejne zakazky, 	
nebo jmeno a pfijmeni 		kterou bude poddodavatel 	
	sidlo poddodavatele 		
poddodavatele 		plnit 	
AdriJan BP s.r.o. 	27524957 	OOZ v prevenci rizik BOZP 	
		aPO 	
V souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zakona c. 134/2016 Sb., 0 zadavanl verejnych zakazek, ve 
zneni pozdejslch pfedpisu, jsou ve vyse predlozenem seznamu vypsany i jine osoby, jejichz 
prostfednictvfrn prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil plsemny zavazek jine osoby k 
poskytnuti plneni urceneho k plneni verejne zakazky nebo k poskytnuti veci nebo prav, s nimiz 
bude dodavatel opravnen disponovat v ramci plneni vefejne zakazky, a to alespoii v rozsahu, v 
jakem jina osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele. 
Osoby, jejichz prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve verejne zakazce, je 
dodavatel povinen vyuZivat pfi plnenl dIe SmIouvy uzavrene s vybranym dodavatelem, a to po 
celou dobu jejiho trvanl a lze je vymenit pouze s pfedchozfm pisemnym souhlasem zadavatele, 
ktery mme by! dan vylucne za pfedpokladu, ze tyto osoby budou nahrazeny osobami 
spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vefejne zakazce nejmene ve stejnem rozsahu jako 
nahrazovane osoby. Zadavatel bezduvodne neodmitne udeleni souhlasu. Dodavatel je povinen 
poskytnout soucinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici 
plneni na jeho strane.