SMLOUVA O DÍLO

Označení smluvních stran

České vysoké učení technické v Praze
Sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ:		68407700
DIČ: 		CZ68407700
zastoupená:	prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu 
na straně jedné jako objednatel nebo ČVUT

a	
ENESA a.s.
se sídlem: 	U Voborníků 852/10, PSČ 190 00 Praha 9
zastoupená:	Ing. Milan Dorko, předseda představenstva
	Ing. Valentýn Avramov, místopředseda představenstva
	Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
	Vladimír Kučera, člen představenstva,
	za společnost jednají vždy min dva členové představenstva
IČ: 27382052	
DIČ: CZ27382052
Bankovní spojení: 
na straně druhé jako projektant

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 

Článek 1.	Předmět díla a technické řešení
1.1	Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a další související činnosti specifikované níže – na dílo „STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍ PROSTOR UNIVERZITNÍ ZŠ-LVÍČATA, STUDENTSKÝ DŮM-KOLEJNÍ UL., PRAHA 6“, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) a další činnosti projektanta popsané v této Smlouvě.
1.2	Předmětem díla je:
a)	Zaměření/podklady stávajícího objektu Studentského domu, ul. Bílá čp. 6, na pozemku p. č. 681/23, 681/27, 681/28, 681/29 
 v k.ú. Dejvice – prostor ZŠ Lvíčata v 1.NP (tento prostor dále též jako „ZŠ“), řešený (a nezbytně nutný navazující) prostor – 2.np (jedná se především o doměření skutečnosti – velikost, systém evakuace z objektu (v návaznosti na oddělení části prostor), prostory vnitřních komunikací, přípojné body na vnitřní rozvody – kanalizace, vodovod (sv, tuv, cirkulace), elektro, vytápění, odvětrání (s využitím poskytnuté dokumentace)	, systém EPS v objektu (návaznosti na správce jednotlivých systémů – EPS, požární techniky, elektro, VZT apod.)
b)	Studie – řešení prostoru rozšíření ZŠ, dopracování do konečného řešení (v návaznosti na skutečnost a stávající využívání – funkční - objektu a návaznosti na vymezení základu pro projekt jak jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy) 
c)	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. - (dokumentace bude sloužit pro projednání s dotčenými orgány a jako vstupní podklad pro jednání s investorem a jednotlivými správci objektu a správci jednotlivých systémů – EPS, pož. technika, elektro, VZT apod.)
d)	Inženýrská činnost - zajištění stanovisek dotčených orgánů (předpoklad – KHS, HZS, odbor životního prostředí – především odpady, odbor dopravy – parkování v klidu) vč. poplatků případně zajištění vydání stavebního povolení nebo jiného povolení (souhlasu) namísto stavebního povolení, pokud není vydání stavebního povolení potřebné (vyžadováno). 
e)	Projektová dokumentace pro provádění stavby – využitá pro výběr dodavatele a realizaci v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (dokumentace bude řešena v návaznosti na stávající provoz v koordinaci s investorem a jednotlivými správci – objektu a správci jednotlivých systémů – EPS, pož. technika, elektro, VZT apod. a projektovou dokumentaci popsanou v písm. c) výše)
f)	Součinnost projektanta (nebo jeho zástupce) při výběru dodavatele – odpovědi na dotazy ze strany účastníků výběrového řízení, objednatele, případné posouzení nabídek (nebo jejích částí) pouze z hlediska a ve vztahu k projektové dokumentaci zpracované projektantem v termínech a lhůtách upravených zákonem č. 134/2016 Sb.
g)	Autorský dozor – zajištění autorského dozoru v době výstavby (po celou dobu výstavby - 50 hodin celkově – další hodiny budou účtovány dle hodinové sazby). Předpokládaná doba výstavby je 2,5 měsíce.
Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a v rozsahu a obsahu dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb dle § 193 zákona č.183/2006 Sb.).

Článek 2.	Provádění díla
2.1	Veškerá projektová dokumentace zhotovená projektantem musí odpovídat platným právním předpisům i technickým normám v posledním znění. 
2.2	Vyhodnocení existujících podkladů a provedení průzkumů budovy provede projektant v rozsahu, které dle jeho odborných znalostí a zkušeností budou dostatečné ke zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy.
2.3	Dokumentace pro provedení stavebních prací musí odpovídat platným právním předpisům upravujícím rozsah dokumentace pro vydání stavební povolení, tedy příloze č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
2.4	Při výkonu autorského dozoru bude projektant průběžně ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí jím zpracované projektové dokumentace, zejména projektové dokumentace pro provádění stavby se skutečným prováděním stavby (díla) a v případě, že zjistí odchylky, navrhne projektant ČVUT způsob jejich řešení, tak, aby byla v souladu se shora uvedenými dokumenty. O návrhu bude informovat objednatele. Dále činnost autorského dozoru v sobě zahrnuje účast na kontrolních dnech a podávání stanovisek k návrhům změnových listů podávaných podle smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
2.5	Smluvní strany se dohodly na tom, že činnost podle bodu 1.2.f této smlouvy zahrnuje konzultace a formulace návrhů odpovědí na dotazy v rámci výběru zhotovitele stavby, vyhodnocení v rozsahu týkajícím se projektové dokumentace souladu nabídek s projektovou dokumentací, účast na prohlídce místa plnění, zpracování návrhů na výzvu k vysvětlení nabídky pouze ve vztahu a v rozsahu projektové dokumentace.
2.6	Veškerá dokumentace zhotovená dle této smlouvy bude provedena ve standardu obvyklém v ČR tedy s logem ČVUT v Praze a projektanta, v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů a jméno zpracovatele. 
2.7	Projektant je povinen odevzdat jedno vytištěné vyhotovení kompletní projektové dokumentace v měřítku ne menším než 1:100 plus identickou elektronickou verzi v tiskovém formátu PDF a otevřeném formátu DWG ke schválení ČVUT. ČVUT se ke kompletní projektové dokumentaci vyjádří do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od jeho obdržení, přičemž ve vyjádření uvede připomínky, případně další požadavky na dopracování a/nebo změnu projektové dokumentace. Projektant je povinen zapracovat všechny připomínky ČVUT a předložit ČVUT konečnou verzi (čistopis) projektové dokumentace v množství a formátu určeném touto smlouvou, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení vyjádření. Pokud se ČVUT do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů nevyjádří je předložená dokumentace považována za schválenou.
2.8	Projektant předá ČVUT pro každý ze stupňů projektové dokumentace, pokud se strany vdaném případě nedohodnou jinak:

(a)	DSP v počtu 2 (dvou) tištěných vyhotoveních a 2 (dvou) elektronických vyhotoveních na nosiči na datovém nosiči nebo elektronickou poštou  (jedno ve formátu PDF, druhé v editovatelné podobě výkresy v DWG, dokumenty v DOC a tabulky XLS) z nichž jedno tištěné vyhotovení takto předávané dokumentace bude projektantem autorizováno, tj. bude podepsáno autorizovanou osobou a opatřeno autorizačními razítky;
(b)	dokumentaci pro provedení stavebních prací sestávající se z textové části a výkresů v počtu 6 (šesti) tištěných vyhotoveních a 2 (dvou) elektronických vyhotoveních na nosiči CD-ROM (jedno ve formátu PDF, druhé v editovatelné podobě výkresy v DWG, dokumenty v DOC a tabulky XLS) z nichž jedno tištěné vyhotovení takto předávané dokumentace bude projektantem autorizováno, tj. bude podepsáno autorizovanou osobou a opatřeno autorizačními razítky;	 
(c)	stavební povolení případně souhlas stavebního úřadu s provedením prací v rozsahu dle projektu a všechna související vyjádření.
2.9	Předložení projektové dokumentace ke schválení ČVUT dle předešlých ustanovení nemá vliv na povinnost projektanta dodržet termín pro dokončení díla.
2.10	Činnost dle bodu 1.2. f  a 1.2. g provede projektant na výzvu ČVUT, která bude písemně zaslána projektantovi min 2 pracovní dny před požadovaným termínem. 

Článek 3.	Práva a povinnosti projektanta
3.1	Projektant je povinen dílo provést při vynaložení veškeré odborné péče, na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou, jinak za podmínek obvyklých. V případě, že projektant se souhlasem ČVUT zadá provádění díla dle této smlouvy jiným osobám, odpovídá za provedení díla stejně jako by jej prováděl sám.
3.2	Projektant je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně ČVUT, případně osobu jím určenou, jestliže zjistí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je projektant povinen navrhnout na své náklady opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla. Při nesplnění této povinnosti nese projektant odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany ČVUT.
3.3	ČVUT nebo jím určená osoba, kterou ČVUT písemně projektantovi oznámí, jsou oprávněni vydávat projektantovi pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení díla. Projektant je povinen pokyny ČVUT nebo jím určené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené bez zbytečného prodlení. Pokud by pokyn udělený projektantovi měl vliv na kvalitu plnění, termín plnění nebo cenu díla, bude o této skutečnosti projektant informovat ČVUT a do doby sdělení upraveného nebo nového pokynu se posouvá příslušný termín plnění.
3.4	Tato smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění projektanta jednat jménem ČVUT nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Projektant si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních úkonů, které by učinil za ČVUT, by byl zavázán pouze sám.  Pro plnění této smlouvy je nezbytné, aby ČVUT udělil projektantovi plnou moc. Plná moc bude předána do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Vzor plné moci tvoří přílohu č. 2. Ujednání prvých dvou vět tohoto bodu smlouvy se tedy nevztahuje na činnost, kterou má podle této smlouvy projektant vykonávat, zejména na inženýrskou činnost. 
3.5	Projektant je povinen poskytovat ČVUT odborné rady ve všech věcech s touto smlouvou a s prováděním díla na jejím základě souvisejících s nejlepší odbornou péčí. Plnění této povinnosti je součástí provádění díla a projektantovi za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění. Pro účely této smlouvy se odbornými radami rozumí konzultace v průběhu vypracovávání dokumentací DSP a DPS do jejich předání se zapracovanými změnami.
3.6	Projektant bude v průběhu provádění díla dle této smlouvy veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost návrhu a je povinen po projednání s  ČVUT nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou sloužit jako podklady pro jeho konečné rozhodnutí.
3.7	Projektant je povinen pravidelně informovat ČVUT o stavu díla prováděného podle této smlouvy v průběhu jeho realizace.
3.8	Projektant je povinen na základě předešlé písemné výzvy ČVUT podat písemnou zprávu o stavu díla do dvou pracovních dnů od jejího obdržení nebo ve lhůtě delší stanovené ve výzvě.
3.9	Projektant je povinen v průběhu realizace díla pravidelně konzultovat s ČVUT jednotlivá technická řešení předmětu díla, předkládat návrhy možných variant na provedení předmětu díla a následně zohlednit a zapracovat požadavky a/nebo připomínky ČVUT k provedení díla.
3.10	Projektant prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a odpovědnosti za škody plynoucí ze škody na majetku ČVUT při výkonu činností v rámci této smlouvy. Projektant prohlašuje, že pojištění výše specifikované bude udržovat v platnosti nejen po dobu trvání smluvního vztahu, ale i minimálně 3 roky po kolaudaci stavby či jejím předání do užívání v minimální výši 1.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 10%, nejdéle však 4 roky od dokončení předmětu díla. 

Článek 4.	Koordinace prací prováděných třetími subjekty
4.1	Projektant se před podpisem této smlouvy seznámil s veškerými podklady, a prohlašuje, že je mu jejich obsah znám, nemá k nim žádných připomínek a jsou dostačující pro provedení vlastního díla za podmínek stanovených touto smlouvou.
4.2	Projektant může při své činnosti využít služeb dalších subjektů. V takovém případě však odpovídá za takové činnosti stejně, jako by je provedl sám.

Článek 5.	Autorské právo
5.1	Projektant podpisem této smlouvy uděluje ČVUT souhlas k užití jakékoliv dokumentace zhotovené dle této smlouvy, přičemž předkládání či rozšiřování, změny architektonických plánů, náčrtů, výkresů, grafických vyobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům či v souvislosti s nutnými úpravami vyžádanými v průběhu provádění stavby nebo i po jejím dokončení v rámci její úpravy, opravy a v rámci komercionalizace celého projektu, nebude považováno za porušení autorských práv projektanta. 
5.2	Projektant není oprávněn použít dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy pro jinou zakázku či jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu ČVUT, a to ani v případě jejího pozměnění.
5.3	ČVUT je oprávněno při respektování oprávněných zájmů projektanta použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace celého projektu výstavby dle preambule této smlouvy či v souvislosti s uvedenými činnostmi bez jakéhokoliv dodatečného nároku projektanta na jakoukoliv kompenzaci, neboť se má za to, že tato je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy. Projektantovi náleží právo své dílo veřejně prezentovat po předchozím souhlasu ČVUT, které jej bez vážného důvodu neodepře.
5.4	Projektant tímto dává ČVUT předchozí souhlas s převodem práva použít dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy či jiné výsledky činnosti projektanta v rámci této smlouvy na jakoukoliv jinou osobu bez jakéhokoliv dodatečného nároku projektanta na jakoukoliv dodatečnou kompenzaci. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy.
Článek 6.	Cena za dílo
6.1	Projektant má právo na zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Sjednaná cena je cenou úplnou a konečnou za celý předmět díla u cen sjednaných paušální částkou, nikoliv u cen sjednaných hodinovou odměnou projektanta. 
6.2	Cena díla za jednotlivé činnosti činí podle této smlouvy:
(a)	cena díla za činnost dle odst. 1.2 písm. a), b), c) činí 195 000,- Kč bez DPH;
(b)	cena díla za činnost dle odst. 1.2 písm. d) činí 145 000,- Kč bez DPH;
(c)	cena díla za činnost dle odst. 1.2 písm. e) činí 248 000,- Kč bez DPH
(d)	cena díla za činnost dle odst. 1.2 písm. f) je obsažena v odměně za činnost dle odst. 1.2. písm. e)
(e)	cena díla za činnost dle odst. 1.2 písm. g) bude účtována ve výši 1 340,- Kč/hod bez DPH podle skutečného rozsahu poskytnuté činnosti a sjednané jednotkové ceny

6.3	K ceně díla za každou činnost bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.
6.4	Sjednaná cena v sobě zahrnuje náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s plněním dle této smlouvy včetně všech základních výkonů, jakož i odměnu za autorská práva, pojištění, daně či jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací plnění dle této smlouvy.

Článek 7.	Platební podmínky
7.1	Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla v postupných platbách dle členění uvedené v čl. 6 odst. 2 takto:
(a)	platbu za činnost dle odst. 1.2 písm. a), b), c) – při předání jednotlivých částí díla a odsouhlasení ze strany zadavatele (tedy bez vad a nedodělků) 
(b)	platbu za činnost dle odst. 1.2 písm. d) po nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného oprávnění stavebního úřadu k provedení prací;
(c)	platbu za činnost dle odst. 1.2 písm. e) po uzavření smlouvy mezi ČVUT a vybraným zhotovitelem stavebních prací nebo po rozhodnutí ČVUT o zrušení zadávacího řízení  nejpozději však po uplynutí 3 měsíců po předání projektu ČVUT;;
(d)	platbu za činnost dle odst. 1.2 písm. g) po dokončení díla (předpoklad výstavby je 2,5 měsíce) na základě odsouhlasených výkazů práce (předkládaných zpravidla po jednom měsíci), 
7.2	Řádně vystavený daňový doklad bude uhrazen do 30 kalendářních dnů od jejího doručení ČVUT. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu XXXXXXXXX Datum odepsání částky z účtu ČVUT bude považováno za datum jejího uhrazení projektantovi. 
7.3	Veškeré faktury vystavené projektantem na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, bude v nich uveden název akce, číslo smlouvy projektanta a údaj o tom zda se jedná o investiční nebo neinvestiční prostředky, a dále náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je ČVUT oprávněno vrátit bez zbytečného odkladu fakturu projektantovi s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury. 

Článek 8.	Termíny dokončení díla
8.1	Projektant je povinen dílo dle této smlouvy předat ČVUT v těchto termínech: 

8.2	ČVUT je oprávněno ze závažných důvodů termíny plnění posouvat či prodlužovat, není však oprávněno bez toho, aby zároveň došlo k odpovídající změně rozsahu díla, termíny pro plnění bez dohody s projektantem zkracovat. Pokud dojde ze strany ČVUT k přerušení nebo prodloužení prací, bude následně o stejnou délku prodloužen termín plnění, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.3	Pokud projektant v průběhu provádění díla zjistí, že ze závažných důvodů není možné některý z termínů dokončení díla dodržet, je povinen tuto skutečnost sdělit ČVUT bez zbytečného prodlení od doby, kdy se ji dozvěděl.
8.4	ČVUT vždy rozhoduje o tom, zda k prodloužení termínů dojde či nikoliv a o jakou dobu budou termíny prodlouženy. ČVUT termíny díla neprodlouží, pokud projektant nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas.
8.5	Termín dokončení díla může být prodloužen pouze z následujících důvodů, pokud leží zcela mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost projektanta, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení odborné péče, v době uzavření smlouvy či kdykoliv v průběhu jejího plnění, a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se splněním termínu provádění díla:
(a)	událost vyšší moci, kterou se rozumí překážka nastalá nezávisle na vůli ČVUT a projektanta, která brání splnění povinnosti projektanta, a kterou projektant nemohl ani s vynaložením odborné péče nebo její následky odvrátit nebo překonat, smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je povinna druhou smluvní stranu písemně do 20 dnů od počátku zásahu písemně informovat, stejně tak je povinna informovat o konci překážky. V případě, že druhá smluvní strana nebyla informována, není možné se na zásah vyšší moci odvolávat;
(b)	změn na základě pokynu ČVUT, jejichž důsledkem je podstatná změna rozsahu díla dle této smlouvy.
8.6	Pokud nebude dohodnuto jinak, projektantovi nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv ztrát nebo škod, které utrpí v souvislosti s případným prodloužením termínů, ledaže k prodloužení došlo podle bodu 8.5. písm. b) této smlouvy.

Článek 9.	Kontrola provádění díla
9.1	Projektant je povinen umožnit ČVUT nebo osobám jím pověřeným kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolu jeho provádění. 
9.2	Projektant není oprávněn bez pokynu ČVUT přikročit ke zhotovování další fáze díla. ČVUT nesmí bez relevantního důvodu oddalovat nebo nevydat pokyn ke zhotovování další fáze díla. 
9.3	Provedení kontroly nemá žádný vliv na odpovědnost projektanta za jakékoli vady, ledaže bylo ČVUT výslovně upozorněno na vadu (vzniklou na základě nevhodného podkladu či pokynu) a nevydalo pokyn ke změně. 
9.4	Pokud vznikne v souvislosti s prováděním díla třetí osobě škoda, za kterou odpovídá projektant, je projektant povinen takovou škodu poškozenému okamžitě nahradit. 
9.5	Pokud vznikne prokazatelná škoda ČVUT, za kterou odpovídá projektant, pak je ČVUT oprávněno náklady na její náhradu odečíst z částek dlužných projektantovi. 
9.6	. 

Článek 10.	Záruka za jakost, odpovědnost za chyby
10.1	Projektant poskytuje ČVUT záruku za to, že zhotovená dokumentace bude dodána řádně bez vad a v kvalitě požadované touto smlouvou o dílo posuzováno ke dni předání a převzetí projektové dokumentace, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu záruční lhůty v rozsahu 3 let, s výhradou změny příslušných právních předpisů. Záruční lhůty počínají běžet dnem převzetí příslušné dokumentace ČVUT.
10.2	Projektant je povinen odstranit všechny vady na díle, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, a to bezplatně. Projektant se tímto zavazuje, že uhradí ČVUT v plné výši veškeré škody prokazatelně vzniklé v přímé příčinné souvislosti s porušením jeho povinnosti předat předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i všech jiných smluvních povinností projektanta stanovených v této smlouvě o dílo. V případě, že projektant neodstraní vady ve lhůtě určené ČVUT nebo osobou jím určenou, je ČVUT oprávněna zajistit odstranění vad na náklady projektanta. Nebude-li možné vadu odstranit, poskytne projektant ČVUT přiměřenou slevu z ceny za provedení díla.
10.3	Projektant odpovídá za prokázané vady díla, které se projeví v průběhu realizace stavebních prací podle díla, pokud zhotovitel díla postupoval přesně podle celé projektové dokumentace a pokynů projektanta a vada díla byla způsobena chybou  projektové dokumentace a/nebo pokynu projektanta. Projektant bude v rámci autorského dozoru přizván k jakémukoliv jednání se zhotovitelem stavebních prací, aby měl možnost obhájit si svůj projekt.

Článek 11.	Dokončení díla a jeho vady
11.1	Projektant je povinen veškeré vady díla, které se vyskytnou po předání díla na své náklady v přiměřené lhůtě stanovené ČVUT nebo osobou jím určenou odstranit, jinak bez zbytečného odkladu. 
11.2	Bude-li dílo vykazovat při předání vady, které nelze odstranit, je ČVUT oprávněno, pokud nevyužije svého práva od této smlouvy odstoupit, uplatnit nárok na slevu z ceny díla a cenu za provedení díla přiměřeně snížit.
11.3	Po dokončení díla a ukončení činnosti autorského dozoru je projektant povinen vrátit ČVUT veškerou dokumentaci, kterou obdržel od ČVUT.

Článek 12.	Ukončení smlouvy, smluvní pokuta
12.1	V případě, že projektant neplní povinnosti stanovené touto smlouvou o či zákonem (ve vztahu k předmětu této smlouvy) řádně a včas, ačkoliv byl na tuto skutečnost předem písemně upozorněn a nesplnil své povinnosti ani v další přiměřené lhůtě stanovené v tomto oznámení, je ČVUT oprávněno odstoupit od této smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným projektantovi. V tomto oznámení ČVUT uvede, zda odstupuje od celého závazku nebo částečně, ohledně dotčené výkonové fáze. Neuvede-li ČVUT tuto specifikaci, má se za to, že odstupuje od závazku celého.
12.2	Projektant je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, kdy mu ČVUT neposkytlo potřebnou součinnost ani po předchozím písemném upozornění projektanta. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
12.3	ČVUT je oprávněno vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi projektantovi. 
12.4	ČVUT je oprávněno od této smlouvy odstoupit i v případě, že je na majetek projektanta prohlášen konkurs nebo je návrh na takový konkurs zamítnut pro nedostatek majetku anebo pro nesložení zálohy na náklady takového konkursu nebo pokud projektant pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen.
12.5	Po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu:
a) je projektant povinen vrátit ČVUT veškeré dokumenty a dokumentaci, která mu byla předána ČVUT,
12.6	Dojde-li k ukončení této smlouvy před dokončením díla, je projektant povinen byť třeba rozpracované dílo či jeho část ČVUT předat k použití. ČVUT projektantovi zaplatí cenu za dílo již řádně předané, pokud jde o dílo rozpracované, cena bude přiměřeně upravena s přihlédnutím k možnostem jeho dalšího využití do 30 dnů od uplatnění nároku na zaplacení ze strany projektanta. V případě odstoupení od této smlouvy nemá projektant nárok na vrácení díla již ČVUT předaného. Rozpracované dílo bude ČVUT předáno nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V případě, že si ČVUT rozpracované dílo ve lhůtě nepřevezme, bude mu zasláno poštou. 
12.7	V případě prodlení se splněním kterékoliv fáze díla, bez ohledu na to, zda ČVUT využilo svého práva odstoupit od této smlouvy či nikoliv, je projektant povinen zaplatit ČVUT smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti příslušné fáze díla. Projektant je povinen splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou i po jejím zaplacení, pokud mezitím nedošlo k odstoupení od této smlouvy podle jiných ustanovení smlouvy. Vedle smluvní pokuty je projektant povinen nahradit ČVUT vzniklou škodu v plné výši
12.8	Za každé jednotlivé nesplnění výkonu činnosti autorského dozoru, k němuž došlo po předchozí písemné výzvě k nápravě takové povinnosti, je projektant povinen zaplatit ČVUT smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění touto smluvní pokutou zajištěné povinnosti.
12.9	V případě porušení povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 9 nebo čl. 3 odst. 10 této smlouvy může ČVUT požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
12.10	Budou-li v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti projektanta, které projektant neodstraní do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ČVUT nebo nezjedná nápravu v jiném termínu stanoveném ČVUT, je projektant povinen zaplatit ČVUT smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.
12.11	  Splatnost smluvních sankcí se sjednává na 7 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. ČVUT má také právo částku vyplývající ze smluvních pokut odečíst z celkové ceny díla.
12.12	ČVUT je oprávněno započíst výše uvedené nároky proti sjednané ceně díla či jakékoli jiné pohledávce projektanta.
12.13	 V případě prodlení s úhradou platby oprávněné fakturace projektanta je CVUT povinen uhradit  úrok z prodlení ve výši upravené právními předpisy.

Článek 13.	Součinnost smluvních stran
13.1	Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku projektanta převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, u ČVUT v místě stavby nebo na adrese projektanta v písemné formě nebo mohou být předány elektronicky formou e-mailu na e-mailové adresy smluvních stran.
13.2	ČVUT se zavazuje poskytnout projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a projektantem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění, pokud budou v jeho dispozici, a to bez zbytečného odkladu po žádosti o součinnost.
13.3	Jakákoliv činnost projektanta, která není obsažena v této smlouvě, musí být písemně odsouhlasena a objednána ČVUT před tím, než ji projektant začne provádět.
13.4	Osoby oprávněné jednat za projektanta: 
Ve věcech smluvních
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

13.5	Osoby oprávněné jednat za ČVUT ve věcech technických nebo osoba, kterou ČVUT sdělí projektantovi:
Ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Článek 14.	Řešení sporů
14.1	Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českými zákony.

Článek 15.	Salvatorní ustanovení
15.1	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

Článek 16.	Závěrečná ustanovení
16.1	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
16.2	Projektant souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí ČVUT.
16.3	Pokud je kdekoliv v této smlouvě o dílo použit termín smlouva o dílo, jsou tím míněny i veškeré její přílohy. 	
16.4	Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které budou takto označeny a podepsány zástupci smluvních stran.
16.5	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku některé ze stran jako právního subjektu, přecházejí veškerá práva a závazky ze smlouvy na jejího právního nástupce.
16.6	Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
16.7	Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
16.8	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Nabídka projektanta č. 20EN009 ze dne 6.3.2020
Příloha č. 2 Vzor plné moci
Příloha č. 3 Architektonická studie a požadavky ČVUT

V Praze dne 

________________________			____________________________
Ing. Alena Kohoutková, CSc.,			
prorektorka pro výstavbu				ENESA a.s.