Spisový znak:            56.2
Skartační znak/lhůta:  V/5

DODATEK Č. D č. 5 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: 	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub	
A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská	Org: 5845	

		uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.	
       Smluvní strany

  1. Objednatel:	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 00299308	DIČ:  CZ00299308	
	Zástupci objednatele	
	- ve věcech smluvních:	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl	
	tel.:                                                        e- mail: 	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:	
		
	tel.                                                         e-mail: 	
		
	tel.: 		e- mail: h	
		
	tel:                                                         e-mail:   	
		
	Bankovní spojení: 	
	číslo výdajového účtu: 	

2. Zhotovitel:	Ing. Petr Doležel
se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc	
též „příkazník“	
IČ: 	DIČ:		
ŽL vydaný: Okresní úřad Olomouc, Okresní živnostenský úřad dne 13.04.1992	
Č.j.:                                             vent. Č.: 	
Zástupci 		
- ve věcech smluvních:	
Ing. Petr Doležel	
tel.:  		e-mail: 	
- ve věcech technických:	
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace …..)	
Ing. Petr Doležel	
tel.: 		 e-mail: 	
Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace …..)	
Ing. Petr Doležel	
tel.: 		 e-mail: 	
	
Bankovní spojení: 	
č. účtu

     II. 
                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.5 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.5  je rozšíření předmětu plnění o zajištění DPS přeložky CETIN,  rozšíření autorského dozoru o SO 401 Veřejné osvětlení a také  vyhlášení nouzové stavu na území České republiky a z toho plynoucí omezení fungování úřadů, správních orgánů a organizací, které vydávají příslušná vyjádření či povolení k projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem č 5. se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy 
V.  Termín plnění 
VI. Cena a platební podmínky 

III.	

Předmět smlouvy

Bod 2. se rozšiřuje o zpracování DPS (dokumentace pro provedení stavby) SO 402 Přeložka CETIN

            V. 
Termín plnění
V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

a)  Aktualizovaná dokladová část a podání žádosti o ÚR                    do 30.6.2020

                                                                                         VI.
Cena  a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky takto: 

e)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.   výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	Původní SOD+D č.1	Dodatek č. 5	Nová cena	
Cena za část c) bez DPH:	341 000,-	27 500,-	368 500,-	
DPH za část c):	71 610,-	5 775,-	77 385,-	
Cena za část c) s DPH:	412 610,-	33 275,-	445 885,-	

Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Pův. cena+D č. 1,4	Dodatek č.5	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	854 325,-	27 500,-	881 825,-	
DPH:	179 408,-	5 775,-	185 183,-	
Cena celkem s DPH:	1 033 733,-	33 275,-	1 067 008,-	

f)   Autorský dozor:
	Původní cena	Dodatek č.	Nová cena	
Cena za část d) bez DPH:	36 000,-	5 000,-	41 000,-	
DPH za část d):	7 560,-	1 050,-	8 610,-	
Cena za část d) s DPH:	43 560,-	6 050,-	49 610,-	

Celková cena díla za části a) až f):     

	Původní cena	Dodatek č. 5	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	890 325,-	32 500,-	922 825,-	
DPH:	186 968,-	6 825,-	193 793,-	
Cena celkem s DPH:	1 077 293,-	39 325,-	1 116 618,-	

		         
        Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD a dodatcích č. 1 - 4  nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. D č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

V Olomouci dne:  18.5.2020	V Olomouci dne: 12.5.2020	

 Objednatel	Zhotovitel	

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl	
Ing. Petr Doležel