SO001513
	Smlouva o dílo č 	. 
uzavřená na dodávku stavebně montážních prací 
I. Smluvní strany 
Objednatel: 
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. 
Na Brně 362/15 
500 06 Hradec Králové 
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem. Ph. D. - předsedou představenstva 
DIČ: CZ25282174 
IČO: 25282174 
bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové 	č.ú.: 5307-511/0100 
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765 
Zhotovítel: 
ENERGOSTAV, spol. s r. o. 
Letecká 2863 
53004;,Pardubice 
zastoupená: Ing. Jiřím Vychytilem - ředitelem společnosti 
DIČ: CZ45538298 
IČO: 45538298 
balf<ovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 835446561/0100 KB Pardubice 
zápis v OR KS HK, oddíl C, vložka 1783 
, II. Předmět smlouvy 
Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat a objednatel se zavazuje odebrat a uhradit 
soubor prací, dodávek a služeb pro realizaci stavby (dále jako dílo): 
"Rekonstrukce teplovodu PS B02, Jungmannova ulice, Hrubínova ulice, 
Hradec Králové - II. etapa" 
Předmětem díla je demontáž a montáž venkovních rozvodů ÚT a TeV v ulici Hrubínova v Hradci 
Králové - celé odbočky pro MŠ Hrubínova 1529 včetně dopojení 'na stávající vnitřní (domovní) 
rozvody v rozvodně tepla v objektu MŠ Hrubínova. 
Potrubí vČ. všech komponent dodá objednatel. Zhotovitel zajistí složení potrubí z kamionu na stavbě. 
Předmětem díla nejsou stavební práce ani geodetické zaměření díla. Zhotovitel předá pro geodetické 
zaměření veškeré potřebné doklady. 
Místem provedení díla je Hradec Králové ul. Hrubínova - odbočka pro MŠ Hrubínova 1529. 

S.	

III. Termíny plnění 

Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

111.1. 	termín zahájení 	
111.2. 	vykládka materiálu 	
111.3 	termín zprovoznění ÚT 	
111.4 	termín zprovoznění TeV 	
111.5. 	dokončení díla 	

14.5.2020 

14.5.2020 

22.5.2020 

28.5.2020 

29.5.2020 

IV. Cena díla 

Cena díla je stanovena dle nabídky zhotovitele, je pevná a konečná v době plnění a činí celkem:  

CELKEM 

560 000,- Kč bez DPH 

V ceně nejsou stavební práce ani stavební přípomoce a geodetické zaměření skut. provedení. V ceně 
je demontáž stávajících rozvodů včetně kompletní Iikvidace(zejména tepelných izolací). 
Při fakturaci stavebních a montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 
Číselné zařazení v klasifikaci CZ-CPA: 42.21.22 
Nabídka zhotovitele byla dne 27.3. 2019 výběrovou komisí objednatele vybrána jako nejlepší. 
Cenová nabídka tvoří formou přílohy nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí, že pokud se během realizace díla stane nespolehlivým plátcem a dále by 
objednatel mohl naplnit podmínky § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/1994 Sb. 
v pozdějších znění, bude úhrada díla provedena zhotoviteli bez příslušné daně vyčíslené na daňovém 
dokladu. Tuto daň objednatel zaplatí a odvede příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele. 

Pokud tato skutečnost nebude objednateli známa a bude provedena úhrada daňového dokladu 
včetně DPH, bude objednatel po zhotoviteli požadovat vrácení uhrazené daně, kterou musel uhradit 
za zhotovitele. 

Zhotovitel souhlasí s úhradou nákladů právně souvisejících objednateli v případě vzniklé na základě 
této skutečnosti. 

V. Financování a placení 
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu platby: 
Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou faktury bude předávací a 
přejímací protokol. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
Splatnost faktury je 21 dní po obdržení objednatelem. 
VI. Povinnosti objednatele a zhotovitele 
1.	Objednatel předá stavební připravenost zhotoviteli dle dohody a samostatného zápisu. 
2.	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené i mimo pracovní pruh. 
3.	Zhotovitel povede během celé realizace montážní deník, ve kterém budou uváděny všechny 
skutečnosti mající vliv na termín, cenu, kvalitu a rozsah prováděných prací a bezpečnost 
práce. 
4.	Objednatel poskytne upravenou vodu pro tlakovou zkoušku bezúplatně. 
T.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny předem zápisem do deníku 
stavby(případně dopisem nebo faxem). 
6.	ri~:.předání a převzetí díla sepíší obě strany předávací a přejímací protokol. Součástí 
předávacího a přejímacího protokolu bude případný soupis vad a nedodělků s termíny jejich 
odstranění. V protokole budou zmíněny relevantní zápisy z montážního deníku. 
7.	Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení: 
- -::; seznam zařízení, které bude součástí stavby a jejich atesty(potrubí, armatury, elektrody) 
	protokoly o provedení ÚTZ smontovaného potrubí(bude provedeno provozním tlakem) 	'-_ 
kopie montážního deníku 
osvědčení o způsobilosti svářečů 
protokol o proměření alarmu se zákresem 
protokol o provedení topné zkoušky 
povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným ukončením předmětu díla v místě 
plnění po provedeném úspěšném komplexním odzkoušení, je-Ii dílo bez vad a nedodělků, 
v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a ČSN vztahujícím se k dílu. 
V".Majetkové sankce 
1.	V případě nesplnění termínů plnění viz čI. III. dle této smlouvy, z důvodů, které budou na 
straně zhotovitele, má právo objednatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 z ceny díla za 
každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
případných vzniklých škod, pokud je škoda vyšší než uhrazená smluvní pokuta. 
2.	Za prodlení s odstraněním nedodělků v dohodnutých termínech uhradí zhotovitel objednateli 
1000,- Kč za každý den a vadu až do úplného odstranění. Totéž platí i pro odstranění 
reklamovaných vad v záruce. 
3.	Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli 0,1 z dlužné částky za každý 
den prodlení, na základě vystavené faktury zhotovitelem. 

	VIII. 	Zmocnění 
a ) objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy: 

ve věcech obchodních: 
ve věcech technických: 

Ing. Petr Juránek 
p. Michal Zvěřina 

b) zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy: 

ve věcech technických: 
ve věcech výrobních: 
IX. Zvláštní ujednání 

Ing. Jiřího Zlatníka 
p. Josefa luskače, nebo jím pověřený pracovník 

1.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-Ii kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
2.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-Ii smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
-. jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
.r'obohacení. 
3.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) . 
4.   Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů. 
5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas 
se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut 
dobrovolně. 
6.	Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí 
rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i 
přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, 
bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky se-sídlem v' Praze podle je Řádu a pravidel, 
třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí 
předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 
14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-Ii se jmenovaní rozhodci ve 
stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo 
předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem 
konání rozhodčího řízení je Hradec Králové. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení, 
včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. 

Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat 
výrok o nákladech řízení. 
7.	Tato smlouva přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany 
jsou povinny na tuto smlouvu právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními 
povinnostmi seznámit. Tato smlouva je pro právní nástupce závazná 
8.	Převzetím díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na objednatele, do této doby 
náleží vlastnické právo a nebezpečí škody zhotoviteli. 
9.	Záruční doba činí na montážní práce 60 měsíců, na materiál dle dodavatelů, nejméně však 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
10.	Předmět díla nebude zprostředkován na další firmu. 
11.	Za odpadové hospodářství spojené s činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi odpovídá 
v plné míře vedení přísl. zhotovitele, ve smyslu zák.č. 125/97 Sb. 
12.	Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl, ani vědět 
nemusel, které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je objednatel povinen 
projednat návrh zhotovitele na odpovídající změnu smluvního závazku. 
13.	Případné vícepráce podmiňující dokončení stavby tak, aby byla funkční, provede zhotovitel 
proti úhradě při nezměněném termínu dokončení stavby. 
14. Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, 
                 jen jsou-li učiněna smluvními dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran. 
15.	Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality, a rozsahu díla a ceny jsou 
povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit . 
   16. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních . 
	stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení. 	,_ 

Příloha: 

Cenová nabídka č. S, ze dne 25.3.2019 

 

V Hradci Králové dne: ,11.5.2020 
za"objednatele: 
 
Ing. Jiří Seidler, Ph.D 
předseda představenstva 
_. 

za zhotovitele: 
Ing. Jiří Vychytil 
ředitel společnosti