Revize zadávacího list
Úkolu výzkumné podpory
v rámci projektu „Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště“,
vystavený na základě Rámcové smlouvy o poskytování výzkumné podpory
Evidenční číslo SÚRAO:	4.1.6.9 / č.j. ESS: SURAO 2018-2222
Evidenční číslo ÚJV:	PB-2018-ZL-U2222-041-Transport8
Oblast výzkumné podpory:	VI. Transport radionuklidů z úložiště
Řešitelský expertní tým:	Expertní tým VI., Transport radionuklidů z úložiště
Název výzkumného úkolu / dílčího projektu / činnosti
Transport radionuklidů z hlubinného úložiště/Testování koncepčních a výpočetních modelů
Revize:	1
Datum: 	28. 1. 2020
	Instituce	Funkce	Jméno	Datum	Podpis	
Zpracoval	ÚJV	Organizační koordinátor projektu	xxxxx	28. 1. 2020		
	ÚJV	Hlavní garant projektu	xxxxx	29. 1. 2020		
	PROGEO	Hlavní řešitel a koordinátor projektu	xxxxx			
Projednal	ÚJV	Vědecko-technický koordinátor projektu	xxxxx	29. 1. 2020		
Garant oblasti 	ÚJV	Vedoucí expertního týmu	xxxxx	29. 1. 2020		

Schválení projektu
Datum:	Datum: 29. 1. 2020	
xxxxx.
zástupce Poskytovatele PROGEO pro věci technické	Xxxxx
zástupce Objednatele pro věci technické /předsedkyně V/P výboru projektu	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
xxxxx
zástupce Poskytovatele PROGEO pro věci smluvní	xxxxx
zástupce Objednatele pro věci smluvní
/předseda Řídícího výboru projektu	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
xxxxx
zástupce Poskytovatele TUL pro věci technické	xxxxx
zástupce Poskytovatele ČGS pro věci smluvní	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
xxxxx
zástupce Poskytovatele TUL pro věci smluvní	xxxxx
zástupce Poskytovatele ČGS pro věci technické	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
xxxxx
zástupce Poskytovatele FSv pro věci technické	xxxxx
zástupce ČVUT v Praze, FJFI pro věci technické	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
xxxxx
zástupce Poskytovatele FSv pro věci smluvní	xxxxx
zástupce ČVUT v Praze, FJFI pro věci smluvní	
Podpis:	Podpis:	
1	

1	Zadání Objednatele
1.1	Požadavky na věcné a technické zadání
Jedním z požadovaných kritérií při posuzování vhodnosti horninového masivu pro situování HÚ je absence regionálních vodivých zón v izolační části úložiště.  Není však možné vyloučit přítomnost menších vodivých zón, které mohou tvořit část preferenčních cest z prostor HÚ do biosféry. 
Vzniká potřeba testovat transport radionuklidů přes puklinové systémy procházející prostorem ÚOS do návazných puklinových systémů s napojením do biosféry. Vhodným nástrojem pro popis transportních procesů jsou matematické modely. Transport radionuklidů z hlubinného úložiště je primárně závislý na advektivním proudění podzemní vody v síti puklin. Nedílnou součástí transportních simulací proto jsou modely proudění podzemní vody.  
Hlavním cílem projektu je modelovat pomocí vhodných softwarových nástrojů proudění a dobu zdržení radionuklidů v puklinových systémech izolační části horninového masivu s ÚOS či v jejich blízkosti – až do oblasti napojení na regionální vodivé struktury, vázané obvykle na zlomové linie druhé a první kategorie dle klasifikace SKB. 
Náplní projektu je: 

1.	Charakterizace puklinových systémů, které se uplatňují při transportním procesu radionuklidů z prostor HÚ včetně charakterizace poruchových zón 3. a 4. kategorie dle klasifikace SKB, které pro puklinové systémy z oblasti ÚOS reprezentují navazující oblast proudění. Náplní tohoto bodu je rovněž rešerše dostupných zpráv (zejména organizací Posiva a SKB) za účelem ověření vhodných přístupů a metodiky při modelování uvedené problematiky.  

2.	Příprava detailních numerických modelů proudění podzemní vody a transportu v horninovém prostředí, které budou založeny na metodě DFN, případně na kombinaci DFN a CPM přístupu. Hydrogeologické modely budou primárně vycházet z dostupných strukturně-geologických dat získaných v prostorách laboratoře Bukov. Okrajové podmínky detailního DFN modelu mohou být převzaty z dosavadních hydrogeologických modelů na lokalitě - při využití vypočtených hodnot z projektované hloubky hlubinného úložiště. Do výpočtu transportu bude zahrnut konzervativní radionuklid I-129. Výstupem zpracovaných modelů budou tlaková pole proudění, rychlosti proudění a doba zdržení (při uplatnění techniky particle tracking), časový průběh rozložení koncentrací. Pracoviště PROGEO bude využívat kombinaci DFN-EPM přístupu při uplatnění softwaru NAPSAC ConnectFlow – (MODFLOW). Pracoviště TUL bude využívat software Flow123d. Puklinové systémy budou v modelech uvažovány jako konektivní a bez výplně. Proudění bude zadáno ustálené – pro podmínky v delší periodě po uzavření HÚ. 

3.	Specifikace významu parametrů puklinového systému pro transport radionuklidů v izolační části horninového masivu. Na základě výsledků zhodnocení významu puklin a jejich vlastností pro transport radionuklidů v izolační části masivu. Analýza vlivu EDZ a depozičního tunelu na transportní procesy.

4.	Převedení výsledků hydraulických a transportních modelů do modelu GoldSim či jiného obdobného modelu umožňujícího propojovat procesy v poli blízkých a vzdálených interakcích a provedení citlivostní analýzy se zaměřením na zjištění nejdůležitějších parametrů horninového prostředí  

5.	Návrh návazného výzkumného programu pro hodnocení transportu radionuklidů z hlubinného úložiště včetně věcného a časového harmonogramu prací.

Výstupy projektu budou:

1.	Ověřené matematické modely pro hodnocení transportu radionuklidů z hlubinného úložiště
2.	Průběžná zpráva v českém a anglickém jazyce včetně českého a anglického souhrnu popisující rešeršní a přípravné práce 
3.	Závěrečná zpráva v českém a anglickém jazyce shrnující všechny zjištěné výsledky a výstupy z prací, včetně souhrnu v českém a anglickém jazyce
1.2	Požadavky na termíny plnění
Věcný a časový harmonogram prací 	10/2018	
Průběžná výzkumná zpráva shrnující přípravné práce v souladu s navrženým harmonogramem prací	4/2019	
Závěrečná zpráva v českém a anglickém jazyce	11/2019	
1.3	Požadavky na limitní cenu dílčího projektu
Předpokládaná cena za toto dílčí plnění projektu, kterou by Poskytovatel neměl překročit, je 4,75 mil. Kč.
1.4	Specifické požadavky na organizaci prací
Modely budou tvořeny za účelem vytvoření a otestování metodiky a koncepce, využitelné v budoucnosti i pro další lokality. 
Vstupní parametry do modelu budou převzaty z předešlých etap projektu a výsledků dalších prací. Definovány budou zejména geometrie a HG vlastnosti puklin na základě experimentálních dat ze zahraničních projektů, dat z PVP Bukov nebo jiných zdrojů. 
2	Potvrzení / modifikace zadání Poskytovatelem
2.1	Věcné a technické zadání 
Poskytovatel potvrzuje věcné a technické zadání Objednatele včetně navrhovaných forem výstupů a termínů.
Smluvní strany se z důvodu alokace prostředků na anglický překlad závěrečné zprávy dohodly na revizi Zadávacího listu. Změny oproti Revizi 0 Zadávacího listu jsou zvýrazněny červenou barvou.
2.2	Termíny plnění
2.2.1	Harmonogram jednotlivých etap (milníků) a náplň prací: 
Etapa	Náplň prací	Termín	
1	Podrobný věcný a časový plán řešení projektu	I/2019	
1	Měření v PVP Bukov, zpracování modelu puklinové sítě  	I/2019	
1	Rešerše, zahraniční přístupy a zkušenosti k modelování HÚ, metodika a koncepce řešení, soupis vstupních dat HG řešení  	II/2019	
1	Základní DFN model puklinové sítě	III/2019	
Výstup 1	Průběžná zpráva (ČJ), rešerše, metodika prací	IV/2019	
2	Specifikace puklinového prostředí v oblasti HÚ	IV/2019	
2	Metodika a nástroj pro převod specifikace puklinového prostředí do vstupního souboru v GoldSim	IV/2019	
2	Základní hydraulický model výřezu horninového masivu v okolí HÚ – verze DFN a EPM; softwary ConnectFlow, MODFLOW-based, Flow123d, GoldSim (PROGEO, TUL, FJFI)	V/2019	
2	Simulace inženýrských prvků (depoziční tunel, EDZ)	V/2019	
2	Základní transportní model pro modelovou doménu proudění; analýza výstupů (tlakové pole, směry proudění, rozložení koncentrací, doba zdržení)	VI/2019	
2	Koncepce, využití dat, tvorba sítě puklin - GoldSim  	VI/2019	
2	Citlivostní analýza pro účely hodnocení významu parametrů proudění a transportu 	VIII/2019	
2	Kalibrace, bezpečnostní výpočty - Goldsim	VIII/2019	
Výstup 2	Závěrečná zpráva, modely (ČJ)	II/2020	
	Závěrečná zpráva, modely (ENG)	III/2020	

2.3	Limitní cena dílčího projektu
Celkový rozpočet podle výkonů v jednotlivých kategoriích
kategorie 	CELKEM	
1	166	
2	2 964	
3	1 188	
4	41	
5	66	
Hodiny celkem	4 425	
Výkony (tis. Kč)	4 421,9	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	440	
Cena celkem (tis. Kč)	4 861,9	
Vedlejší náklady ÚJV a FJFI zahrnují nákup aktuální licence softwaru Goldsim. 
Na anglický překlad závěrečné zprávy jsou určeny vedlejší náklady ve výši 120 tis. Kč (20 tis. Kč na každou řešitelskou organizaci ZL).

3	Přílohy
3.2	Podrobné rozpočty řešitelů
Vedlejší náklady 20 tis. Kč na každou řešitelskou organizaci ZL jsou určeny na anglický překlad závěrečné zprávy v roce 2020.
3.2.1		Rozpis výkonů a rozpočet PROGEO
kategorie prací	2019	2020	Celkem	
dle smlouvy	I.	I.	III.	IV.	I.		
Management projektu	
1	30	20	20	22	0	0	
2	30	20	20	20	0	92	
Celkem hodin	27,0	18,0	18,0	19,8	0	92	
Celkem (tis. Kč)	30	20	20	22	0	82,8	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	286	240	295	175	0	996	
3	140	75	90	56	0	361	
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
Celkem hodin	426	315	385	231	0	1357	
Celkem (tis. Kč)	362,4	272,25	333,0	199,5	0	1 167,15	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	20	20	
Celkem (tis. Kč)	1 249,95	20	1 269,95	

3.2.2	Rozpis výkonů a rozpočet FJFI
kategorie prací	2019	2020	Celkem	
dle smlouvy	I.	I.	III.	IV.	I.		
Management projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	5	5	5	0	0	15	
Celkem hodin	5	5	5	0	0	15	
Celkem (tis. Kč)	7	7	7	0	0	21	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	153	150	150	0 	0	453	
3	18	4	4	0	0	26	
4	0	0	0	0	0	 0	
5	10	4	4	0	0	18	
Celkem hodin	181	158	158	0	0	497	
Celkem (tis. Kč)	243	218	218	0	0	 679	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	100	0	0	0	20	120	
Celkem (tis. Kč)	800	20	820	
Vedlejší náklady jsou plánovány na nákup licence aktuální verze GoldSim.
3.2.3	Rozpis výkonů a rozpočet ÚJV
kategorie prací	2019	2020	Celkem	
dle smlouvy	I.	II.	III.	IV.	I.		
Management projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	8	4	4	4	0	20	
Celkem hodin	8	4	4	4	0	20	
Celkem (tis. Kč)	9,92	4,96	4,96	4,96	0	24,8	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	110	160	140	80	0	490	
3	30	80	70	20	0	200	
4	0	0	0	0	0	 0	
5	0	0	0	0	0	0	
Celkem hodin	140	240	210	100	0	690	
Celkem (tis. Kč)	164,9	274,4	240,1	118,2	0	797,6	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	220	0	0	0	20	240	
Celkem (tis. Kč)	1042,4	20	1062,4	
Vedlejší náklady jsou plánovány na nákup licence aktuální verze GoldSim.
3.2.4	Rozpis výkonů a rozpočet TUL
kategorie prací	2019	2020	Celkem	
dle smlouvy	I.	II.	III.	IV.	I.		
Management projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	12	12	12	3	0	39	
Celkem hodin	12	12	12	3	0	39	
Celkem (tis. Kč)	12,24	12,24	12,24	3,06	0	39,78	
Realizace projektu	
1	28	28	28	16	0	100	
2	158	158	158	74	0	548	
3	60	60	60	20	0	200	
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
Celkem hodin	258	258	258	113	0	848	
Celkem (tis. Kč)	249,16	249,16	249,16	112,48	0	859,96	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	20	20	
Celkem (tis. Kč)	899,74	20	919,74	
3.2.5	Rozpis výkonů a rozpočet ČGS
kategorie prací
dle smlouvy	2019	2020	Celkem	
	I.	II.	III.	IV.	I.	 	
Management projektu	
1	30	10	16	 0	0	56	
Celkem hodin	30	10	16	0	0	56	
Celkem (tis. Kč)	23,40	7,80	12,48	0	0	43,68	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	163	40	20	0	0	223	
3	154	41	16	0	0	211	
4	20	11	10	0	0	41	
5	15	13	20	0	0	48	
Celkem hodin	352	105	66	0	0	523	
Celkem (tis. Kč)	246,16	69,99	40,28	0,00	0	356,43	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	20	20	
Celkem (tis. Kč)	400,105	20	420,105	
3.2.6	Rozpis výkonů a rozpočet FSv ČVUT
kategorie prací
dle smlouvy	2019	2020	Celkem	
	I.	II.	III.	IV.	I.	 	
Management projektu	
1	10	0	0	0	0	10	
2	10	0	0	0	0	10	
Celkem hodin	20	0	0	0	0	20	
Celkem (tis. Kč)	31,5	0	0	0	0	31,50	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	
2	78	0	0	0	0	78	
3	141	19	12	18	0	190	
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
Celkem hodin	219	19	12	18	0	268	
Celkem (tis. Kč)	264,3	20,9	13,2	19,8	0	318,20	
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	20	20	
Celkem (tis. Kč)	349,7	20	369,7	

Ostatní články ZL se nemění.