ZMĚNOVÝ LIST č.1
Rozpočet	A01	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
SO01-1	Hamr - stavební část	(více a méně práce)			
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV			
Projektant	Ing arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.	
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen soustava	RTS-201701	
Objednatel	ZČM v Plzni, p o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
Z
R
N	HSV celkem	-15 500	-	0	
	PSV celkem	109 003	-	0	
	M práce celkem	0	-	0	
	M dodávky celkem	0	-	0	
ZRN celkem	93 503	-	0	
		-	0	
HZS	0	-	0	
ZRN+HZS	93 503	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost. náklady+HZS	93 503	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	
Datum	
Podpis	
	Jméno	O Drnec
Datum	
Podpis
	Jméno
Datum
Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0	% 	93 503 Kč	
DPH	21,0	%	19 636 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	113 139 Kč	
Poznámka

Stavba	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet A01	
Objekt	SO01-1 Hamr - stavební část (více a méně práce)		
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-15 500	0	0	0	0	
00	Vícepráce - doplněné položky	0	109 003	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	-15 500	109 003	0	0	0	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Položkový rozpočet
Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRlV	| Rozpočet: A01	
Objekt;	SQ01-1 Hamr - stavební část	(více a méně práce)	
p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ množství cena / MJ j celkem (Kč)	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
1	950-04	H12 - nové základy vodních kol na straně lednice vč. kamenného obkladu atd. - viz specifikace	ks	-3,00	5 000,00	-15 000,00	
2	950-05	Bourání stávajících základů vč. odvozu na skládku a likvidace suti	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	
3	950-03	H11 - kontrola a oprava stávajících základů strojního vybavení	ks	-3,00	1 500,00	-4 500,00	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-15 500,00	
Díl:	00	Vícepráce - doplněné položky	
4	H12-01	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu Bloky 70x40x40 cm - stavební pískovec	kus	4,00	5 200,00	20 800,00	
5	H12-02	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu doprava z Lipníce	km	220,00	43,00	9 460,00	
6	H12-03	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu montáž bloků	kus	4,00	3 500,00	14 000,00	
7	H12-04	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu montážní ruka	hod	8,00	900,00	7 200,00	
8	H12-05	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu demontáž a montáž pražců	kus	20,00	100,00	2 000,00	
9	H12-06	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu opracování bloků pro usazení ložiska (požadavek pam péče na celkové ruční opracování)	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	
10	H12-07	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu doplněni kamenného obkladu včetně materiálu	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	
11	H11-01	H11 - základy kol a strojů v kovárně Výkop základů včetně odvozu na skládku	m3	14,88	1 200,00	17 856,00	
12	H11-02	H11 - základy kol a strojů v kovárně Vyplnění kamenivem frakce 0-200 mm	m3	14,88	950,00	14 136,00	
13	H11-03	H11 - základy kol a strojů v kovárně Proloženi a zhutnění kameniva	m3	14,88	400,00	5 952,00	
14	H11-04	H11 - základy kol a strojů v kovárně
Dubové prahy v. 100 mm na kovové trny vč. montáže	m2	3,39	2 830,00	9 599,36	
	Celkem za	00 Vícepráce - doplněné položky	109 003,36