Dodatek č. l 
ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů" (ID smlouvy o dílo v registru smluv 11595876) 
ze dne 27.4.2020 (číslo smlouvy objednatele 4/2020/D) 
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
1. 	Objednatel: 	Městská nemocnice, příspěvková organizace 
K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9 
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: Mgr.Zuzana Steinbauerová, ředitel 
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 
PPF banka Praha 6 
45245843 
2. Dodavatel: 	CHIRANA Technik s.r.o. 
se sídlem: 	Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 112, PSČ 756 61 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40824 Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Karel Joch 
- ve věcech technických: Karel Joch 
- ve věcech díla: Karel Joch 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 
DIČ: 
Raiffeissen Bank 6862131060/5500 26865513 CZ26865513 
Dále také obecně „smluvní strany". 
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů" v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle§ 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené v níže uvedené tabulace, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase. Vícepráce se týkají osazení ventilových skříní. 
Tabulka: Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku. 
Souhrnná výše víceprací je 757.453,- Kč bez DPH, cena vč. DPH činí 871070,95. Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 3 932 400,00 Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 4 522 260,-- Kč se navyšuje a činí celkem včetně víceprací dle dodatku částku 4.689.853,- Kč bez DPH a 5.393.330,95 Kč, vč. DPH .. Jde o navýšení o 19,26 %, což je v souladu se zákonem. 
Stra~a 1/2 

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny 
Původní smlouva o dílo má ID smlouvy v registru smluv 11595876. 
V Praze dne 
Objednatel 
9', b. i,;)~ 
11-CÁld' 'č 
Městská nemocnice nas e ne pe e 
190 00 Praha 9, K Moravině 343/6 IČ: 45245843 
5 
•	CHIRANA To~hlill{s,r.o .• 
Bayerova 112, 756 61 Rožnov p.R. 
Czech Republic Č: CZ26865513 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(6973,0);(0,0);(0,21488);(21494,21488);(21494,9511);(14513,9511);(14513,7073);(13401,7073);(13401,4890);(12979,4890);(12979,2438);(6973,2438)posrelh0posrelv0pib
strana 2/2 

• 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,21495);(15919,21495);(15919,19936);(21498,19936)posrelh0posrelv0pib
Položkový rozpočet stavby 
Objednatel: 
!CO: 
DIC: 
Zhotovitel: 
Chirana Techni'i< s.r.o. Bayerova 112 
75661 	Rožnov pod Radhoštěm 
ICO: 26865513 DIC: 
Vypracoval: 
Celkem 
Rozpis ceny 
HSV 
0,00 
PSV 
MON 
0,00 
757 453,00 
Vedlejší náklady 
0,00 
Ostatní náklady 
0,00 
Celkem 
757 453,00 
Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 
15 o/o 
757 453,00 CZK 
Snížená DPH 
15 o/o 
113 617,95 CZK 
Základ pro základní DPH 
21 o/o 
0,00 CZK 
Základní DPH 
21 o/o 
0,00 CZK 
Zaokrouhlení 
0,00 CZK 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(2751,0);(2751,4860);(0,4860);(0,21479);(21498,21479)posrelh0posrelv0pib
v 
Praze 
dne 

Za objednatele 

Rekapitulace dílů 

Položkový rozpočet
... 
S: 1200118 
Praha-Nemocnice následné péče 
O: 101 
Osazení ventilových skřlnl 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;20;(21498,0);(0,0);(0,21490);(9469,21490);(9469,17702);(12231,17702);(12231,21490);(13646,21490);(13646,17373);(15499,17373);(15499,17702);(16510,17702);(16510,17373);(17960,17373);(17960,17702);(18971,17702);(18971,17373);(21432,17373);(21432,17702);(21498,17702)posrelh0posrelv0pib
2IT0018 
D+M Tvarovky Cu pr. 18 
m 
ks 
620,00 
121,00000 
82,00 
213 900,00 
9 922,00 
15,001 245 985,oo 
15,001 	11 410,30 
311322 
Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 
KG 
6,70000 
21 000,00 
140 700,00 
15,001 161 805,oo 
UL-Ag45Sn 
4 0089.T 		D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) 	ks 	121,00000 	120,00 	14 520,00 	15,00 	16 698,00 	
5 PPD02 		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) 	m 	345,00000 	14,00 	4 830,00 	15,00 	5 554,50 	
6 990001 		D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek 	m 	345,00000 	9,80 	3 381,00 	15,00 	3 888,15 	
7 ACU 1SM 	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn s integrovanou signalizací - 	KS 	5,00000 	29400,00 	147 000,00 	15,00 	169 050,00 	
			na omítku 							
8 PZR02 		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) 	m 	345,00000 	35,00 	12 075,00 	15,00 	13 886,25 	
9 PTZ02 		Tlaková zkouška úseková 	kpl 	5,00000 	3 000,00 	15 000,00 	15,00 	17 250,00 	
10 	PVM01 		Vedení montážních prací 	kpl 	1,00000 	12 000,00 	12 000,00 	15,00 	13 800,00 	
11 	PVR01 		Výchozí revize rozvodů MP 	kpl 	5,00000 	5 000,00 	25 000,00 	15,00 	28 750,00 	
12 	PVR02 		Výchozí revize elektro 	kpl 	5,00000 	5 000,00 	25 000,00 	15,00 	28 750,00 	
13 	PZS01 		Zakreslení skutečného stavu 	kpl 	5,00000 	8 000,00 	40 000,00 	15,00 	46 000,00 	
14 	PZS02 		Nátěř potrubí 	m 	345,00000 	125,00 	43 125,00 	15,00 	49 593,75 	
15 	PZS04 		Ukončení původního potrubí včetně demontáže 	kpl 	1,00000 	26 000,00 	26 000,00 	15,00 	29 900,00 	
16 	DOP 	TOO 	Dopravné 	kpl 	5,00000 	5 000,00 	25 000,00 	15,00 	28 750,00