Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1120000351

Fakulta stavební ČVUT v Praze

se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)

a

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

se sídlem: 			Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená: 			Ing. Miroslav Lán, jednatelem
IČO: 				25076655
DIČ:				CZ25076655
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

S ohledem na to, že:    
  
a)	smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2020 smlouvu o dílo č. 1120000351 (dále jen „Smlouva“) na autorský dozor při rekonstrukci poslucháren B280 a B286, které provádí VW Wachal a.s.; 

b)	s dodavatelem stavebních prací VW Wachal a.s. byl uzavřen dodatek s termínem dokončení rekonstrukce poslucháren 5.2.2021;

c)	termín realizace autorského dozoru dle Smlouvy je potřeba prodloužit shodně s termínem dokončení rekonstrukce poslucháren;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Termín dokončení díla v čl. IV. Smlouvy se mění na 5. 2. 2021. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne ………………..	
	
V Praze dne ………………..	

			
za FSv ČVUT v Praze
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník		za dodavatele
Ing. Miroslav Lán
jednatel