Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 7/2020/RR/Mu 
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi
                                
Objednatelem:			Město Bílovec 
					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města
					Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických: 	
telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:				
IČO:			        	00297755
DIČ:					CZ00297755
e-mail: 				
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem:                     Truhlářství Urban, s.r.o.
Sídlo:					Lidická 502, 553 02 Česká Skalice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Urban, jednatel		
Zastoupen ve věcech technických:   	Pavel Urban, jednatel 
Bankovní spojení:			ČSOB a.s., pobočka Trutnov	
Číslo účtu:				
DIČ:					CZ27501701	
IČO:			          	27501701	
Telefon:                             
E-mail:					
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka C 62034.
 (dále jen zhotovitel)
-	společně označováni jako „smluvní strany“

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 7/2020/RR/Mu ze dne 
20. 4. 2020 na provedení akce s názvem „Obnova oken na zámku v Bílovci - 4. etapa“, důvodem je realizace víceprací, týkajících se dozdívek špalet oken a parapetů nad původní rozsah, takto: 
 Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11 takto:
11. V průběhu realizace byly zjištěny tyto vícepráce:
- po vybourání původních kastlových oken bylo zjištěno, že nestandardně provedené dozdívky některých ostění oken a nadpraží, pomocí malty doplněné břidlicí, kousky cihel, dřevem aj. v tloušťce nad 5 cm je nutné odstranit a nahradit klasicky dozděním z cihel na MVC, v tl. 8 – 12 cm. Po vybourání parapetních teracových desek je nutné odstranit volné části zdiva parapetu, vyčistit a nově dotvarovat, v tl. 5 – 8 cm.  
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:
1.	Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši: 
	Cena celkem v Kč
bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč
s DPH	
Cena dle SOD	2.234.760,-	469.300,-	2.704.060,-	
Cena dle Dodatku č. 1	+ 93.069,19	+ 19.544,53	+ 112.613,72	
Konečná cena	2.327.829,19	488.844,53	2.816.673,72	

(slovy: dvamilionytřistadvacetsedmtisícosmsetdvacetdevět a 19/100 korun českých bez DPH)
Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2)	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3)	Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 7/2020/RR/Mu.
4)	Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5)	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 50. schůzí rady města Bílovec dne 30. 11. 2020 usnesením č. RM/1391/50/2020.

V Bílovci dne:	30. 11. 2020				V Bílovci dne: 30. 11. 2020 
Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………..	…                             ……………………………..
Mgr. Renata Mikolašová				Pavel Urban
starostka města   					jednatel