Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5120000063
Číslo smlouvy zhotovitele: 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen „objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.,
se sídlem na adrese: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Ing. Ondřej Wachal, prokurista
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též
jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. V průběhu provádění prací tak byly stranami projednány změnové listy č. ZL1-ZL18, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Ve finančním vyčíslení se jedná o vícepráce v hodnotě 6 493 573,01 Kč a méněpráce 4 186 639,71 Kč, v souhrnu se tedy cena díla navyšuje o 2 306 933,30 Kč (vše bez DPH).
Přestože zvýšení smluvní ceny tvoří pouze 3,56 % z původní sjednané ceny díla, celkový objem změn po započtení všech víceprací i méněprací dosahuje téměř 16,5 %. V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť veškeré změny vyplývají z průběhu provádění prací (zjištění po odkrytí zakrytých míst, úprava kotvení zavěšené lávky, úprava provedení školních lavic), jsou nezbytné (bez provedení změny není možné pokračovat v provádění původně sjednaných stavebních prací) a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Zároveň s ohledem na věcné změny v provádění díla (změna typu sedaček, změna zavěšení technologické lávky a změna osvětlení), se strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla.
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.   Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1.	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT FSv – Rekonstrukce poslucháren B280 a B286“, spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby zpracované xxxxxxxxxxxxx, IČ xxxxxxxxxxxxx v 04/2016 s aktualizací v 05/2019 (dále jen DPS). Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL18.

2.	Ustanovení odst. 3.2 se upravuje takto:
3.2 Zhotovitel provede stavební práce podle harmonogramu upravenému v rámci dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen hotové dílo, bez zjevných vad a nedodělků, předat objednateli nejpozději do 5.2.2021.
3.	Ustanovení odst. 6.1 nadále zní:
Smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL18. V návaznosti na tyto změny došlo ke zvýšení ceny díla o 2 306 933,30 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 67 186 360,49 Kč 
(šedesát sedm milionů jedno sto osmdesát šest tisíc tři sta šedesát korun čtyřicet devět haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 14 109 135,70 Kč 
(čtrnáct milionů jedno sto devět tisíc jedno sto třicet pět korun sedmdesát haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 81 295 496,19 Kč 
(osmdesát jeden milion dvě stě devadesát pět tisíc čtyři sta devadesát šest korun devatenáct haléřů)
4.	S ohledem na úpravy rozsahu díla změnovými listy ZL1-ZL18 se strany dohodly na nahrazení přílohy 2 – Harmonogramu (finanční a časový) novou přílohou, která je přílohou tohoto dodatku.
5.	Zhotovitel předložil žádost o změnu realizačního týmu a předložil potřebné dokumenty. Objednatel se změnou vyslovil souhlas. Strany se dohodly na nahrazení přílohy 4 – Realizační tým novou přílohou, která je přílohou tohoto dodatku.
6.	Dále se do ust. 29.7 doplňuje nový bod e) tohoto znění:
e) Příloha 5 – Změnové listy ZL1-ZL18
7.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
8.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
9.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Ondřej Wachal
Prorektorka pro výstavbu				Prokurista