DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6.2020
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupena:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

008 44 896
CZ00844896
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „objednatel")
2. Obchodní firma
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
DRŽIK s.r.o.
Lidická 256/46a, Ostrava Vítkovice, 703 00

28657474
CZ28657474

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413
Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.6.2020, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 5.
III.
Nová smluvní cena
1.	Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	14 454 000,00 Kč
2.	Méněpráce bez DPH (viz příloha)	-337 892,87 Kč
3.	Vícepráce bez DPH (viz příloha)	+1 257 015,61 Kč
4. Nová smluvní cena bez DPH
15 373 122,74 Kč

IV.
Nový termín plnění
1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při výkopových pracích a při provádění hrubé stavby, které znemožnily průběžnou realizaci předmětných prací a dále z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v odstranění betonové desky při výkopových pracích základů, dále z důvodu realizace odstavné zpevněné plochy, instalace zabezpečovacího systému, elektroinstalačních prací a úpravy terénu okolo stavby se založením trávníku se mění termín dokončení díla do 30.11.2020.
V.
Závěrečná ujednání
1.	Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3.	Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací
V Havířově dne 14.12.2020
2

REKAPITULACE STAVBY
Kód:	33-1
Stavba:	Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Havířov	Datum:	30. 11.2020	
Zadavatel:	IC:	00844896	
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:	28657454	
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:
Cena bez DPH				919 122,74	
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%		919 122,74	193 015,78	
snížená	15,00%		0,00	0,00	
Cena s DPH		V	CZK	1 112 138,52	
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Strana 1 z 12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:	33-1
Stavba:	Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
Místo:
Havířov
Datum:
Zadavatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	Projektant:
Zhotovitel:	DRŽIKs.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	Zpracovatel:
30. 11. 2020
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
919 122,74	1 112 138,52
5	VP
6	MP
1 257 015,61	1 520 988,89
-337 892,87	-408 850,37
Strana 2 z 12

krycí list rozpočtu
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1 Objekt:
5-VP
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Havířov	Datum:	30. 11.2020	
Zadavatel:	IČ:	00844896	
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:	28657454	
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH				1 257 015,61 0,00
1 257 015,61	
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně	
dpi-základní	1 257 015,61		21,00%	263 973,28	
snížená	0,00		15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 520 988,89	
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Strana 3 z 12

REKAPITULACE
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
Objekt:
5-VP
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Havířov
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132 DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
30, 11. 2020
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací
111-2 - Založení trávníku
1 257 015,61
241 508,90
D1 - Elektromateriál- EZS, WiFi, stmívání svítidel, čtečky,doplnění displeje, Siemens-chlaz*	108 327,69	
D2 - Elektromontáže-EZS	20 808,77	
D3 - Elektromontáže- WiFi, stmívání svítidel, čtečky,doplnění displeje, Siemens-chlazení	19 242,00	
HSV - Práce a dodávky HSV	618 651,86	
1 - Zemní práce	164 346,40	
5 - Komunikace pozemní	193 887,92	
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	50 810,04	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 725,71	
997 - Přesun sutě	166 881,79	
PSV - Práce a dodávky PSV	245 155,62	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 830,11	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 646,34	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	82 242,50	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 524,80	
764 - Konstrukce klempířské	8 100,00	
766 - Konstrukce truhlářské	28 622,50	
767 - Konstrukce zámečnické	40 328,64	
776 - Podlahy povlakové	37 759,50	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	20 101,23	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 320,77	
VRN6 - Územní vlivy	3 320,77	
2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 257 015,61
Strana 4 z 12

ROZPOČET
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
Objekt:
5-VP
Místo:
Havířov
Datum:	30.11.2020
Zadavatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	Projektant:
Zhotovitel:	DRŽIKs.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.csnajCZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
1 257 015,61
	D	111-2	Založení trávníku - Založení trávníku				241 508,90	
1	K	111-2.R01	Rozprostření a urovnání ornice v rovině	m2	1 780.00C	6,9C	12 282,00	
2	K	111 -2.R02	Založení trávníku výsevem univerzálního v rovině	m2	1 780.00C	23,00	40 940,00	
L2	K	111-2.R03	Obdělání půdy hrabáním	m2	1 780,00C	4,03	1	7173,40	
4	K	111-2.R04	Hnojení půdy umělým hnojivém naširoko v rovině	t	0,072	138 000,00	9 936,00	
5	K	Materiál	Osivo travní směsi universal	Kg	65,000	241,50	15 697,50	
6	K	Materiál. 1	Hnojivo NPK	kg	65,000	138,00	8 970,00	
I 7	UL	Materiál.2	Trávníkový substrát včetně naložení a dopravy	m3	91,000	1 610,00	146 510.00	
	0	D1	Elektromateriál- EZS, WiFi, stmívání svítidel, čtečky,doplnění displeje, Siemens-chlazení	108 327,69	
8	j K	19012ELE12	Kabel CXKH-R-J 3* 1.5	m	254,000	17,77	4 513,58	
9	K	19012ELE14	Kabel CXKH-R-J 3*2.5	m	185,000	24,96	4 617,60	
1°	K	19012ELE171	Kabel VL 24-2*0,5+4*0,22	m	191,000	18,00	3 438,00	
11	K	19012ELE23	Žlab MARS EKO 250/100 vč. Příslušenství	m	12,000	296,32	3 555,84	
12	K	19012ELE25.R2	I Ústředna EVO HD	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
13	K	19012ELE25.R3	BOX VT-80	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
14	K	19012ELE25.R4	Aku 12V/18 Ah	ks	1,000	1 505,00	1 505,00	
15	K	19012ELE25.R5	GSM brána PCS250-SWAN	ks	1,000	6 120,00	6 120,00	
16	K	19012ELE25.R6	hlasový modul VDMP3	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
17	K	19012ELE25.R7	Klávesnice K641 +	ks	1,000	3 987,00	3 987,00	
18	K	19012ELE25.R8	BOX K+ pro klávesnice	ks	1,000	612,00	612,00	
19	K	19012ELE25.R9	Mechanický zámek (0703-053) pro K+	ks	1,000	134,00	134,00	
20	K	19012ELE25.R10	Detektor stropní DG467 PARADOME	ks	1,000	1 148,00	1 148,00	
21	K	19012ELE25.R11	Detektor pohybu vnitřní DG 65	ks	8,000	99,00	792,00	
22	K	19012RRH27.R22	tlačíko	ks	1,000	220,00	220,00	
23	K	19012RRH27.R51	Ubiquity Unify UAC-PRO	ks	1,000	3 946,00	3 946,00	
L24	K	19012RRH27.R60	HUB PRO	ks	2,000	9 188,00	18 376,00	
25	K	19012RRH27.R61	UDS 110	ks	1,000	5 260,00	5 260,00	
26	K	19012RRH27.R62	Zdroj	ks	1,000	2120,00	2120,00	
27	K	19012RRH27.R63	Instalační materiál	ks	1,000	690,00	690,00	
28	K	19012RRH27.R64	AKU 7Ah	ks	1,000	547,00	547,00	
! 29	K	19012RRH27.R70	panel MDS-Delta	ks	1,000	3 485,00	3 485,00	
30	K	19012RRH27.R71	Instalační krabice	ks	1,000	40,00	40,00	
31	K	19012RRH27.R72	kabel praflaguard 4x2x0,8	m	35,000	44,00	1 540,00	
32	K	19012RRH27.R73	lišta 20x20	m	2,000	20,00	40,00	
	K	19012RRH27.R74	instalační materiál	soub	1,000	330,00	330,00	
34	K	E-2000-1	Jistič jednopólový a trojpólový IJV, UM	ks	1,000	120,00	120,00	
35	K	210 201020.R1	Montáž svítidla	ks	3,000	350,00	1 050,00	
36	K	19012ELE25.R1	svítidlo philips	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
37	K	19012NN4	1-CYKY 3*240+120	m	15,000	1 515,42	22 731,30	
38	K	19012NN5	1 -CYKY 4*70	m	4,200	581,20	2 441,04	
39	K	19012RRH23	Jistič B10/1	ks	1,000	92,46	92,46	
40	K	19012RRH27	Jistič s proudovým chráničem C10-03/A	ks	1,000	1 125,87	1 125,87	
	D	D2	Elektromontáže-EZS				20 808,77	
41	K	19012ELE34	Kabel DATACOM UTP drát cat.6	m	159,000	5,53 i	879,27	
42	K	210 100007	Ukončení vodičů do 70 mm2	ks	10,000	74,00	740.00	
43	K	210 100012	Ukončení vodičů do 240 mm2	ks	10,000	200,00	2 000,00	
44	K	210810112	CYKY-CYKYm 1 kV 3x240+120	m	11,000	240,00,	2 640,00	
45	K	210 810134	CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	2,200	70,00	154,00	
46	K I	220 280401	Kabel datový do 7 mm	m	50,000	15,00	750,00	
Strana 5 z 12

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
47	K	220 300603	Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5	ks	10,000	125,00	1 250,00	
48	K	POI67.R1	Zaškoleni obsluhy	set	1,000	3 600,00	3 600,00	
49	K	19012RRH27.R23	tlačíko- montáž	ks	1,000	173,00	173,00	
50	K	19012RRH27.R44	přepojení svítidel	ks	1,000	598,00	598,00	
51	K	19012RRH27.R52	Ubiquity Unify UAC-PRO- montáž	ks	1,000	460,00	460,00	
52	K	19012RRH27.R65	HUB PRO- montáž	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	
53	K	19012RRH27.R66	UDS 110-montáž	ks	1,000	115,00	115,00	
54	K	19012RRH27.R67	Zdroj- montáž	ks	1,000	575,00	575,00	
55	K	19012RRH27.R68	Instalační materiál- montáž	ks	1,000	345,00	345,00	
56	K	19012RRH27.R69	AKU 7Ah- montáž	ks	1,000	57,50	57,50	
57	K	19012RRH27.R75	panel MDS-Delta- montáž	ks	1,000	300,00	300,00	
58	K	19012RRH27.R76	instalační krabice- montáž	ks	1,000	40,00	40,00	
59	K	19012RRH27.R77	kabel praflaguard 4x2x0,8- montáž	m	35,000	20,00	700,00	
60	K	19012RRH27.R78	lišta 20x20- montáž	m	2,000	26,00	52,00	
61	K	19012RRH27.R79	instalační materiál- montáž	soub	1,000	330,00	330,00	
62	K	19012RRH27.R80	programování, oživení	soub	1,000	2 750,00	2 750,00	
	D	D3	Elektromontáže- WiFi, stmívání svítidel, čtečky.do	plnění displeje, Siemens-chlazení	19 242,00	
63	K	210 020311	Kabelový žlab Mars,pozink.250/1 OOmm vč. víka a podpérek	m	12,000	200,00	2 400,00	
64	K	210100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	64,000	18,00	1 152,00	
65	K	210 810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	m	254,000	15,00	3 810,00	
66	K	210 810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený	m	185,000	15,00	2 775,00	
67	K	210810110.R1	Kabel VL 24-2*0,5+4*0,22 pevně uložený	m	191,000	15,00	2 865,00	
68	K	974 082 112	Vysek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm	m	130,000	48,00	6 240,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV			618 651,86	
	D	1	Zemní práce - Zemní práce				164 346,40	
j 69	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,000	40,46:	1 658,86	
70
L_l	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	29,960	91,16
|	2 731,15	
	w		206*0,5		103,000			
w		celková výměra- parkoviště		103,000			
w		-16,84		-16,840			
w		odpočet betonu- zpevněné plochy		-16,840			
w		-56,2		-56,200			
w		odpočet betonu- základy		-56,200			
w		Součet		29,960			
71	K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	29,960	30,35	909,29	
w		206*0,5		103,000			
w		celková výměra- parkoviště		103,000			
w		-16,84		-16,840			
w		odpočet betonu- zpevněné plochy		-16,840			
w		-56,2		-56,200			
w	odpočet betonu- základy		-56,200			
w	Součet		29,960			
72	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně	m3	56,200	2 758,00	154 999,60	
w	56,2		56,200			
73	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 přes 100 m3	m3	29,960	59,37	1 778,731	
w	206*0,5		103,000			
w	celková výměra- parkoviště		103,000			
w		16,84		-16,840			
w	odpočet betonu- zpevněné plochy		-16,840			
w		56,2		-56,200			
w	odpočet betonu- základy		-56,200			
w	Součet		29,960			
74	K 171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	29,960	15,99|	479,06	
w	206*0,5		103,000			
w	celková výměra- parkoviště		103,000			
w		16,84		-16,840			
w	odpočet betonu- zpevněné plochy		-16,840			
w	-56,2		-56,200			
w	odpočet betonu- základy		-56,200			
w	Součet		29,960			
J*L	K 181951101	úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2 |	321,891	5,56	1 789,71	
w	2,548*5	
w	14,325*21,302	
w	4	
w	Součet	
12,740
305,151
4,000
321,891
D 5
Komunikace pozemní - Komunikace pozemní
193 887,92
Strana 6 z 12

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
76	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 1 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	3 m2	5,67(	)	4 445,8	25 207,74	
77	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	206,00(	309,2)	3	63 711,68	
I 78	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní	m2	236,900	247,04	58 523,78	
	w		206*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		236,900		
79	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně	m3	16,840	2 758.0C	46 444,72	
	w		16,84		16,840		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Úpravy povrchu, podlahy a osazování vvdIi	50 810,04	
80
L_	K	622511021.12	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm obarvení	m2	38,626	250,9C		
9 691,26	
| 81	K	629999011.R1	Příplatek k úpravám povrchů- barva fasády příplatková	I soub	1,00C	15 OOO.OC	15 000,00	
j 82	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	52,627	496,3C	26 118,78	
	w		(21,302+21,302+14,325+14,325+5+5)*0,5		40,627		
	w		24*0,5		12,000		
	w		Součet		52,627		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 725,71	
83
L_	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	96,000	225,40	21 638,40	
84	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	6,000	136,50	819,00	
85	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	54,000	138,60	7 484.40	
86	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	36,000	119,70	4 309,20	
87	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	12,600	157,12	1 979,71	
88	K	977151118.R1	Zhotovení otvorů do D 100 mm do stropních panelů	m	0,500	3 396,00	1 698,00	
89	K	977151124.R1	Zhotovení otvorů do D 160 mm do stropních panelů	m	0,500	5 580,00	2 790,00	
90	K	977151127.R1	Zhotovení otvorů do D 250 mm do stropních panelů	m	0,250	8 028,00	2 007,00	
	D	997	Přesun suté - Přesun suté				166 881,79	
91	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	146,080	72,10	10 532,37	
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	146,080	160,30	23 416,62	
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 460,800	7,00	10 225,60	
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	146,080	840,00	122 707,20	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV			245 155,62	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 830,11	
95	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	356,30	356,30	
96	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN
50	m	7,000	378,99	2 652,93	
97	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	2,000	282,10	564,20	
98	M	28614451	redukce kanalizační PP třlvrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	1,000	331,10	331,10	
99	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus	1,000	12,60	1260	
100	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	i,ooot	84,70	84,70	
101	K	721211401.R1	Zámečnické konstrukce	kus	5,000	150,00	750,00	
102	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,128	611,59	78,28	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod - Zdravotechnika	- vnitřní vodovod		14 646,34	
103	K	722190901. R1	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách (včetně vypuštění a napuštění)	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
104	K	722190901. R2	Napojení na stávající potrubí	soub	1,000	1 750,00	1 750,00	
105	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,000	351,13	4 915,82	
106	M	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS V	kus	1,000	315,70	315,70	
107	K	722190901. R3	Zámečnické konstrukce	soub	1,000	650,00	650,00	
108	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	139,30	139,30	
109	M	55114212	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 3/4"	kus	2,000	224,00	448.00	
110	M	43633207	filtr na studenou vodu 3/4" se zpětným manuálním oroplachem	kus	1,000	2 751,00	2 751.00	
ni	K	722190901. R4	Napojení na VZT jednotku	soub	1,000	320,00	320,00	
112	M	27127005	oouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm	m	14,000	37,311	522.34	
113	M	59244398	fěsnlcl páska průtažné butyl-kaučukové lepidlo na speciální textilii 10bm/role	m	10,000	53,27	532.70	
114	K j	722190901. R5	Vlontáž izolace	m	14,000	61,00	854,00	
Strana 7 z 12

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
i 115	K 722280106.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 160	m	14,000	16,21	226,94	
116	K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,220	547,92	120,54	
	D 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		82 242,50	
117	K 723231162.R10
_ _	Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) vč. manometru, čidla klinické signalizace a nouzového vstupu	kus	1,000	33 322,50	33 322,50	
118	K 723231162.R11	Signalizace tlaků plynů (1-6 snímaných tlaků)- klinická signalizace (STP-K)	kus	2,000	20 500,00	41 000,00	
119	K 723231162.R12	Kabel SYKFY 2x2x0,5- propojení klinické signalizace	m	80,000	99,00	7 920,00	
	D 741	Elektroinstalace - silnoproud - Elektroinstalace - silnoproud		8 524,80	
120	K ,741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	6,000	158,20	949,20l	
121	M ' 34575131. R1	žlab kabelový s víkem PVC (110x70)- parapetní kanál	m	6,000	310,00	1 860,00	
122	K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	210,000	19,04	3 998,40	
w
50+60+100
210,000
123 M 34111090
kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)
m
50,000
15,82
791,00
124	M	34121046	kabel sdělovací s Cu jádrem 3x2x0,5mm (SYKFY)	m	60,000	3,07	184,20	
125	M	34143798	šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2 (CYSY H05)	m	100,000	7,42	742,00	
D 764Konstrukce klempifské - Konstrukce klempířské		8 100,00
126 K 7640000.R01	Úprava stávajících klempířských prvků- žaluzie	soub	1,000	8 100,00 8100,00	
D 766	Konstrukce truhlářské - Konstrukce truhlářské	28 622 50
	u.				 . . 	rrm	..	— ’ -
127 K 766121210.R 1	D+M vozíčky pod PC	soub	1,000	2 651,00	2 651,00	
128 K 766211200.R1	D+M područky k židlím	ks	7,000	550,00	3 850,00	
129 K 766414233.R1	D+M zadní obkladové desky za kuchyňskou linkou	ks	3,000	5 040,50	15121,50	
130 K 766414233.R2	D+M ochranný kryt rohů	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
D 767Konstrukce zámečnické - Konstrukce zámečnické		 40 328,64
131	K	767136135. R4	Střecha pro spojovací krček- D+M vrstvy bílé lepenky navíc	soub	1,000	13 117,30	13 117,30	
132	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,800	38,22	107,02	
	w		(2*0,7)*2		2,800			
133	M	69752001. R1	rohož vstupní čistící textilní	m2	2,800	829,00	2 321.20	
134	K	767661500. R1	Záměna venkovních rolet AI6 a AI7 za žaluzie + dálkové ovladače- požadavek investora	soub	1,000	24 783,12	24 783,12	
	D	776	Podlahy povlakové - Podlahy povlakové				37 759,50	
135	M	28411011.R1	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriálnl- doplatek za materiál dle výběru investora	m2	61,100	150,00	9 165,00	
	W		3,8+6,7+44,2+2,2+2,1+2,1		61,100			
136	M	28411045.R1	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm. R 0,05-1 MCI, rozměrová stálost 0.05%. otlak do 0,035mm- doplatek za materiál dle výběru investora	m2	190,630	150,00	28 594.50	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy - Dokončovací práce - čalounické úpravy	20 101,23	
137	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	2,460	124,60	306,52	
	w		2*1,23		2,460			
138	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	2,460	375,90	924,71	
	w		2*1,23		2,460			
139	K	786631160.R1	žaluzie Pb1-zvětšení plochy žaluzii	soub	1,000	18 870,00	18 870,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady	3 320,77	
	D	VRN6	Územní vlivy - Územní vlivy				3 320,77	
140	K !	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	1,000	3 320,77	3 320,77 j	
Strana 8 z 12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1 Objekt:
6-MP
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Havířov	Datum:	30. 11. 2020	
Zadavatel:	IC:	00844896	
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:	28657454	
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH				-337 892,87 0,00
-337 892,87	
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně	
dph základní	-337 892,87		21,00%	-70 957,50	
snížená	0,00		15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-408 850,37	
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Strana 9 z 12

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
Objekt:
6-MP
Místo:	Havířov
Zadavatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132
Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:	30. 11. 2020	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady ze soupisu prací
D1 - Elektromateriál		-337 892,87
-56 527,14	
D3 - Elektromontáže		-6 282,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		-50 153,72	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-8 827,10	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-41 326,62	
PSV - Práce a dodávky PSV		-224 930,01	
713 - Izolace tepelné		-17 562,19	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		-337,63	
763 - Konstrukce suché výstavby		-28 304,79	
766 - Konstrukce truhlářské		-11 200,00	
767 - Konstrukce zámečnické		-40 161,71	
776 - Podlahy povlakové		-17 440,22	
777 - Podlahy lité		-47 576,54	
781 - Dokončovací práce - obklady		-62 346,93	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-337 892,87
Strana 10 z 12

ROZPOČET
Stavba:
Nemocnice Havířov- magnetická rezonance 1
Objekt:
6-MP
Místo:
Havířov
Datum:	30.11.2020
Zadavatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132	Projektant:
Zhotovitel:	DRŽIKs.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice	Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-337 892,87
	D	D1	Elektromateriál - Elektromateriál				-56 527,14	
1	K	19012ELE10	Skříň nouzového zastavení XAL-K178 SCH	ks	-8,000	788,31	-6 306,48	
2	K	19012ELE2	Elektroinstalační krabice nehořlavá KSK100	ks	-42,000	668,35	-28 070,70	
3	K	19012ELE27	I LED svítidlo vestavné do rastru 600x600, mikropyramidová optika, MPR 5200/840, 35W, 4020
Lm	ks	-6,000	3 357,00	i	
-20 142,00	
4	i K	19012ELE29	N3 Nouz.sv.LED přisazené 3W 1h IP41	ks	-1,000	1 269,00	-1 269,00	
5	K	19012ELE8	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A	ks	-6,000	123,16	-738,96	
	D	D3	Elektromontáže - Elektromontáže				-6 282,00	
6	K	210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. Zapojení	ks	-42,000	51,00	-2 142,00	
7	K	210111021	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	ks	-6,000	115,00	-690,00	
8	K	210140431	Ovladač porn. obvodů v AI skříni jednotlačítkový	ks	-8,000	125,00	-1 000,00	
9	K	210 201030	Svítidla zářivková typ 231 49 01 -(32 702.00) 4x20 W	ks	-6,000	350,00	-2 100,00	
10	K	210200043	Svítidla žárovková typ 213 20 01 -25+25 W, nouzové	ks	-1,000	350,00	-350,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV			-50 153,72	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce		-8 827,10	
11	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	-11,610	343,75	-3 990,94	
12	M	59228418.1	palisáda betonová tyčová hranatá 120x165x400mm	kus	-112,000	43,18	-4 836,16	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vy	-41 326,62	
13	K	622511021.111	Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka tl. 2,0 mm obarvená	m2	-38,626	248,95	-9 615,94	
14	K	632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	-32,700	229,80	-7 514,46	
	w		-32,7		-32,700			
15	K	637211122.1	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do štěrkopískového lože	m2	-40,627	595,57	-24 196,22	
	w		(21,302+21,302+14,325+14,325+5+5)*-0,5		-40,627			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV			-224 930,01	
	D	713	Izolace tepelné - Izolace tepelné				-17 562,19	
16	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-32,700	20,97	-685,72	
17	M	28375993.R1	Deska EPS s hladkým povrchem, polodrážkou do podlah Á=0,035 tl 200mm	m2	-32,700	516,10	-16 876.47	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-337,63	
18	K	723231162.R1	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pro kyslík - odmaštěný	kus	-1,000	337,63	-337,63	
	D	763	Konstrukce suché výstavby - Konstrukce suché výstavby	-28 304,79	
19	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-32,700	412,69	-13 494,96	
20	M	59036517	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	-32,700	452,90	-14 809,83	
	D	766	Konstrukce truhlářské - Konstrukce truhlářské				-11 200,00	
21	K	766811143.R1	D+M lednice	kus	-2,000	5 600,00	-11 200,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické - Konstrukce zámečnické				-40 161,71	
22	K	767162811.R2	D+M zábradlí Z9- rampa	soub	-1,000	30161,71	-30161,71	
Strana 11 z 12

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
23	K	767641211.R3	Dveře AL4 + AL5- nerealizace tepelných parametrů	soub	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
	D	776	Podlahy povlakové - Podlahy povlakové				-17 440,22	
24	K	776221221	Lepeni elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem, včetně propojení a uzemněni	m2	-32,700	533,34	-17 440,22	
	D	777	Podlahy lité - Podlahy lité				-47 576,54	
25	K	777511125.1	Podlaha- betonový potěr	m2	-32,700	1 454,94	-47 576,54	
	D	781	Dokončovací práce - obklady - Dokončovací práce - obklady		-62 346,93	
26	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-64,400	604,62	-38 937,53	
27	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-64,400	363,50	-23 409,40	
Strana 12 z 12