Město Svitavy	

xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 88648176

Odbor rozvoje města
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Plátce DPH

Naše značka: 10086-21/ORM-xxx/408-2016
Vyřizuje / tel. : xxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
Svitavy dne: 05.02.2021
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Změna termínu plnění

Dne 07.04.2020 byla uzavřena objednávka č. 358/2020/xxx na výkon technického dozoru investora (TDI) v průběhu provádění dodávky a montáže gastrozařízení a dodávky včetně montáže interiérového vybavení v nové přístavbě Seniorcentra,  s termínem plnění do konce 02/2021. Tímto se termín plnění prodlužuje do 06/2021.  Akce: „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy – gastrozařízení a interiéry.“

S pozdravem

…………………….......
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx	
vedoucí odboru	

Zhotovitel podpisem uděluje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, obchodní firma, IČ a sídlo za účelem zveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou.

Potvrzujeme a akceptujeme změnu termínu plnění.
Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx   05.02.2021