Dodatek čel ke smlouvě o dílo č.114/16 
v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů (dále též NOZ) 
I. Smluvní strany. 
I. 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zadavatel: 
se sídlem: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

AM Technic line, spol. s r.o. 
Jílovská 913, Těptín - p.Kamenice, PSČ 25168 
Tel. 602342356, e-mail: szetei@amtechnic.cz 
25126873 
CZ25126873 
MONET A Money Bank, a.s. 
č. ú.: 1912308504/0600 
PALAT A - domov pro zrakově postižené 
Na Hřebenkách 737/5, 15000 Praha 5 - Smíchov 
panem Ing. Jiřím Procházkou - ředitelem domova Palata 
Tel. 604 208 389, e-mail: servis@palata.cz
70872783 
Česká spořitelna Praha 
č. ú.: 50016 - 143451319/0800 

Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednavatele: 
Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Procházka - ředitel domova Palata 
Petr Szetei , tel: 602342356 

Zástupci pro věci díla: 
	Za objednavatele: 	Bc.Roman Bicek - vedoucí provozního úseku, tel. 731 575 091 
e-mail: roman.bicek@palata.cz
	Za zhotovitele: 	Petr Szetei , tel: 602342356 
e-mail: szetei@amtechnic.cz 
PREAMBULE 
1.	Smluvní strany uzavřely dne 21.11 2016 smlouvu o dílo č. 114/16 (dále jen "Smlouva"). 
2.	Smluvní strany si přejí upravit čl. II., odst. 1, čl. IV., čl. VI. odst. 1. této smlouvy. 
I. 
1. Článek II., odst. 1 se rozšiřuje takto: 
Předmětem veřejné zakázky (díla) je "Výměna osvětlení ve varně, prádelně a malé 
kultuře - P ALAT A Domov pro zrakově postižené" 
2. Článek IV. se rozšiřuje takto: 
Práce na díle zahájí zhotovitel v termínu: duben 2017 
Objednatel předá staveniště bez právních vad, prosté práva nároků třetích osob. 
Termín dokončení stavebních prací a předání celého díla se stanovuje: duben 2017 
Délka realizace stavební zakázky je 20 dnů. 

3. Článek VI. odst. 1 se rozšiřuje takto: 

Zhotovitel provede dílo za předem dohodnutou cenu, stanovenou na základě výkazu výměr, v 
souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o cenách Č. 526/1990 Sb. 
Celková cena díla byla stanovena na základě nabídkové kalkulace. 

	Celková cena stavebních prací: bez DPH: 	124.484,- Kč 
	DPH 15%: 	18.672,60 Kč 

	Celkem včetně DPH: 	143.156,60 Kč 
Slovy: = stočtyřicettřitisícestopadesátšestkorunšedesáthaléřů = 
Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

II.Ostatní ujednání 

1.	Tento Dodatek se uzavírá s platností a účinností od data jeho podpisu Smluvními stranami. 
2.	Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech vlastnoručně podepsaných Smluvními stranami. Každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis Dodatku. 
3.	Ustanovení smlouvy Č. 114/16 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. 
4.	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost Dodatku potvrzuj í Smluvní strany svým 
podpisem. 

5.	
6.	
7.	

Objednatel: 

V Praze dne 	: 	. 

Zhotovitel: