Author: NPÚ
Last saved by: Válková Martina

Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě:
„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady - Povel“,
obec Olomouc, k. ú. Nové Sady u Olomouce, Povel

Sazba nákladů na provedení ZAV je stanovena ve smyslu zákona 526/1990 Sb. o cenách dohodou, ve znění pozdějších předpisů, dle Příkazu ředitele NPÚ ÚOP v Olomouci č. I/2016/NPÚ ÚOP OL, č. j. NPU-391/20350/2016, a to jako sazba metrická nebo hodinová za práce spojené s přípravou, realizací terénních prací a zpracováním ZAV. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Nedílnou součástí archeologického výzkumu je technické a laboratorní zpracování nálezů a výsledků výzkumu, k  úhradě těchto nákladů bude při fakturaci připočteno 20 % z  částky za terénní část výzkumu. 

I. Obecné údaje o záchranném archeologickém výzkumu (dále ZAV)
1. Stavebník: Statutární město Olomouc
2. Zhotovitel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc
3. Časový harmonogram: 17 týdnů plošný ZAV, dohled v průběhu stavby
4. Informace k předpokládaným archeologickým nálezům: Místo stavby se nachází na území s archeologickými nálezy. Archeologickými výzkumy jak v místě stavby, tak i v blízkém okolí byly při stavbě sídliště doloženy sídlištní aktivity ze starší doby hradištní, tj. z průběhu 8. stol. Jedná se o jedno z mála známých předvelkomoravských center v ČR.
Dosavadní poznatky dokládají, že lokalita je archeologicky značně exponovaná a jejímu výzkumu a dokumentaci bude třeba věnovat odpovídající odbornou pozornost.
5. Forma výzkumu: Archeologický výzkum bude probíhat formou plošného terénního výkopu a formou terénního dohledu. 
a) forma plošného odkryvu: V ideálním případě je staveniště předáno organizaci oprávněné provádět archeologické výzkumy, vyžaduje plné uplatnění archeologických technologií při odkryvu, výkopové práce se provádí ručně v ploše stavby. V případě zvláště cenných nálezů mimo rozsah stavby se zpravidla sepisuje dodatek k dohodě o ZAV, který stanovuje další podmínky. Plošný odkryv trvá řádově dny až týdny, podle konkrétní situace jej lze realizovat i v předstihu před zahájením stavby.
b) forma dohledu: realizována v průběhu a souběhu stavebních prací, a to zejména v trasách rekonstruovaných inženýrských sítí; v případě zjištění neporušených archeologických situací požadavek na stavebníka – umožnění kresebné a fotografické dokumentace a vzorkování profilů výkopu, zaměření situace, což je realizováno v souběhu se stavbou a řádově trvá hodiny (dle konkrétní situace na stavbě). V případě důležitých archeologických nálezů může přejít i do plošného odkryvu.
Soutiskem projektu stavby s předpokládaným areálem raně středověké sídelní aglomerace byla vymezena zájmová oblast (ZO), ve které je nutno provést plošný odkryv z důvodu zvýšené pravděpodobnosti přítomnosti archeologických nálezů. 
V návaznosti na archeologické výzkumy z 80. let byla zájmová oblast rozdělena na dvě části podle četnosti přítomnosti archeologických objektů, z plochy byly odečteny předpokládané zaniklé vodoteče a terén druhotně porušený stávajícími inženýrskými sítěmi (viz příloha):
Zikova 1 (ZO Z1) – západní část ulice Zikovy
Zikova 2 (ZO Z2) – východní část ulice Zikovy

Použité podklady: 
„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“, Souhrnná technická zpráva, Ing. Tomáš Pokorný, prosinec 2017, aktualizace 04/2018.
„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ Přehledná situace stavby, B 1, 1:1000, Ing. Miroslav Hlávka, prosinec 2017, aktualizace 04/2018.
Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ Koordinační situace stavby, C 3.1, C 3.2, C 3.3, 1:500, Ing. Miroslav Hlávka, prosinec 2017, aktualizace 04/2018.
II. Popis staveb a archeologické požadavky
Stavba „Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ proběhne v ulicích Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova, a to od stávající tramvajové zastávky Trnkova na ul. Rooseveltova, přes ulici Zikova až k nově budované zastávce na ul. Schweitzerova. Součástí je i úprava křižovatek se stávajícími ul. Trnkova, Werichova a Rožňavská.

Objektové skupiny:
SO-001, 002 Přípravné práce
SO-100 Pozemní komunikace
SO-300 Vodohospodářské objekty
SO-400 Elektro a sdělovací objekty
SO-500 Trubní vedení
SO-650 Objekty drah
SO-800 Úpravy prostoru

Rozdělení stavby dle Souhrnné technické zprávy – stavební postupy (SP):
SP1 – Přípravné práce
SP2 – Křižovatka ulic Rooseveltova, Zikova, Střední Novosadská, U Dětského domova, úsek ulice Zikova po křižovatku s Werichovou včetně
SP3 – Úsek ulice Zikova od křižovatky s Werichovou po ulici Schweitzerova (mimo)
SP4 – Křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova, Jeremiášova
SP5 – Dokončovací práce, zprovoznění tramvajové trati

SP1 – Přípravné práce: 
Zahrnuje: SO-657 výstavba částí kabelovodu, SO-654 stožáry trakčního vedení, SO-302 kanalizační sběrač, přeložky (SO-500 horkovod, SO-301 kanalizace, SO-303, 304, 305 vodovod, nová vodoměrná šachta), SO-400 nové rozvody VO, SO-651 práce na tram trati v úseku Schweitzerova,
1) SO-657 + SO-654 kabelovod + stožáry trakčního vedení
Kabelovod – celková délka cca 1197 m, z toho 151 m v ZO Z1, 238 m v ZO Z2
Stožáry trakčního vedení – celkem 66 sloupů (jedna jáma 1,6 x 1,6 m = 2,56 m^2), z toho 13 v ZO Z1, 15 v ZO Z2
ZO – plošný ZAV + archeologické sondy – 3,04 týdny (15,2 dnů)
Práce mimo ZO – dohled.
2) SO – 301, 302 kanalizační sběrač – stoky D1, D2, AIII
Stoka D1 – délka 124 m v ZO Z2; stoka D2 – délka 18 m v ZO Z1 – plošný ZAV;
stoka D3 – mimo ZO – dohled.
Sběrač AIII – délka 170 m v ZO Z1, 225 m v ZO Z2 - plošný ZAV; mimo ZO – dohled.
Celkem plošný ZAV – 4,25 týdny (21,25 dnů).
3) SO-651 práce na tram trati v úseku Schweitzerova – mimo ZO
-	předstihový detektorový průzkum a sběry – 1 týden
-	plošný ZAV – 2,5 týdny
4) Ostatní výkopové práce – dohled v průběhu stavby
5) Přeložky (SO-500 horkovod, SO-303, 304, 305 vodovod, nová vodoměrná šachta), SO-400 nové rozvody VO – vedeno v převážně porušeném terénu – dohled.
SO-304 Přeložka a rekonstrukce vodovodu Zikova – nová armaturní šachta 2,5 x 2,5 m = 6,25 m^2 – sonda, 3,5 dne (56 hod.).

SP2 – Křižovatka ulic Rooseveltova, Zikova, Střední Novosadská, U Dětského domova, úsek ulice Zikova po křižovatku s Werichovou včetně
Zahrnuje: SO-100 pozemní komunikace, SO-650 objekty drah.
1) Úsek ulice Rooseveltova po křižovatku s ul. Zikova – Střední Novosadská – U Dětského domova včetně rekonstrukce křižovatky – výkopové práce budou podle projektu prováděny převážně ve stávajících trasách, předpoklad narušení historického terénu již v minulosti – dohled.
2) Úsek ulice Zikova po křižovatku s Werichovou včetně – skrývka ornice, zemní práce, objekty drah – SO-651 tramvajová trať – spodní a vrchní stavba
– v ZO Z2 délka 153,6 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 153,6 x 4 m = 614,4 m^2 – zaokrouhleno 614 m^2 – plošný AV; 2 týdny (10 dnů)

SP3 – Úsek ulice Zikova od křižovatky s Werichovou po ulici Schweitzerova (mimo)
Zahrnuje: SO-100 pozemní komunikace, SO-650 objekty drah – skrývka ornice, zemní práce; Objekty drah - SO-651 tramvajová trať – spodní a vrchní stavba 
a) v ZO Z1 délka 161,09 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 161,09 x 4 m = 644,36 m^2, zaokrouhleno 644 m^2- plošný AV
b) v ZO Z2 délka 81,02 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 81,02 x 4 m = 324,08 m^2, zaokrouhleno 324 m^2- plošný AV
Plošný AV Z1 + Z2 = 3,12 týdny (15,6 dnů).

SP4 – křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova, Jeremiášova
Výkopové práce budou podle projektu prováděny převážně ve stávajících trasách, předpoklad narušení historického terénu již v minulosti – dohled v průběhu stavebních prací.

SP5 – Dokončovací práce, zprovoznění tramvajové trati
Zahrnuje: SO-800 provedení terénních a sadových úprav – sadba stromů – dohled v závislosti na předchozích stavebních zásazích.

III.
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu, terénní část

Pro výpočet nákladů na provedení ZAV – plošný AV bylo počítáno s ideálním stavem, vycházejícím z poznatků ZAV na lokalitách Zikova I. a Zikova II. v 80. letech 20. století. Plocha projektované stavby tramvajové trati byla v zájmové oblasti ZO rozdělena na dvě části, podle plánu rekonstrukce předpokládaného rozsahu raně středověkého osídlení. Je vycházeno z předpokladu, že ZAV bude zahrnovat jednak průzkum kulturní vrstvy a následně sídlištních objektů, zahloubených do geologického podloží. Pro každou část (ZO Z1 a ZO Z2) byl vypočten průměrný počet objektů na 1 m^2 (ZO Z1 = 0,033 obj./m; ZO Z2 = 0,026 obj./m) a z toho odvozován počet objektů v dané ploše. Výsledný počet objektů byl násoben částkou, odpovídající finančním nákladům na práci jedné pracovní skupiny o dvou osobách. Doba práce na vypreparování a dokumentaci jednoho zahloubeného objektu byla stanovena na 3,5 dny, tj. 28 pracovních hodin (3,5 x 8 = 28 hod.) x 2 osoby = 56 hod. Při hodinové sazbě za manuálního pracovníka 140,-/hod. = 56 x 140 = 7.840,- Kč za 1 archeologicky prozkoumaný objekt.
Stanovení nákladů na ZAV kulturní vrstvy vychází z předpokladu práce 2 osob za 2 pracovní dny (2 x 16 hod. = 32 hod.) na 1 čtverci o rozměrech 5 x 5 m, tedy 25 m^2. Tedy částka nákladů na práci na 1 čtverci činí 32 x 140 = 4.480,- Kč. Přítomnost kulturní vrstvy je předpokládaná cca v polovině plochy ZO.

Výpočty
SP1 – Přípravné práce: 
1) SO-657 + SO-654 kabelovod + stožáry trakčního vedení
Kabelovod: 
ZO Z1: 	 	- 8,34 objektů x 7.840,-						=  65.385,6 Kč
		- vrstva: 5 čtverců x 4.480,-					=  22.400,- Kč
ZO Z2		- 10,37 objektů x 7.840,-					=  81.300,8 Kč
		- vrstva: 8 čtverců x 4.480,-					=  35.840,- Kč
Stožáry
ZO Z1: 13 jam x 2,56 m^2 = 33,28 m^2
- objekty x 0,033 = 1,098 objektů x 7.840,-			=     8.608,32 Kč
		- vrstva: 0,67 čtverce x 4.480,-					=     3.001,6 Kč
ZO Z2: 15 jam x 2,56 m^2	= 38,4 m^2
- objekty x 0,026 = 0,998, zaokrouhleno 1 objekt x 7.840,- 	=     7.840,- Kč
		- vrstva: 0,77 čtverců x 4.480,-					=     3.449,6 Kč
Celkem										= 227.825,92 Kč

2) SO – 301, 302 kanalizační sběrač – stoky D1, D2, AIII
Stoka D1 – ZO Z2: 3,224 objektů x 7.840,-					=  25.276,16 Kč
stoka D2 – ZO Z1: 0,6 objektu x 7.840,-						=    4.704,- Kč
Sběrač AIII - ZO Z1: 14,025 objektů x 7.840,-					= 109.956,- Kč
		- vrstva: 8,5 čtverců x 4.480,-					=   38.080,- Kč
 - ZO Z2: 14,625 objektů x 7.840,-					= 114.660,- Kč
		- vrstva: 11,25 čtverců x 4.480,-					=   50.400,- Kč
Celkem:									= 343.076,16 Kč

3) SO-651 práce na tram trati v úseku Schweitzerova – mimo ZO
-	předstihový detektorový průzkum a sběry – 1 týden (8 x 5 = 40 hodin)
-	plošný ZAV – 2,5 týdne (8 x 12,5 dne = 100 hodin)
archeolog: 			140 hod. x 400,- 				= 56.000,- Kč
dokumentátor:			140 hod. x 250,- 				= 35.000,- Kč
manuální pracovník, 6 osob: 	100 hod. x 6 osob x 140,- 			= 84.000,- Kč
Celkem										= 175.000,- Kč

5) SO-304 Přeložka a rekonstrukce vodovodu Zikova – nová armaturní šachta 2,5 x 2,5 m = 6,25 m^2;
ZO Z1, sonda; 6,25 x 0,033 = 0,21 objektů x 7.840,- 			= 1.646,4 Kč

Celkem SP1 = 747.548,48 Kč

SP2 – plošný AV v úseku ulice Zikova po křižovatku s Werichovou 
ZO Z2: 614 m^2	- objekty: x 0,026 = 15,964, zaokrouhleno 16 objektů x 7.840,- 	= 125.440,- Kč
		- vrstva: 12,28 čtverců x 4.480,- 				=   55.014,4 Kč
Celkem										= 180.454,4 Kč

SP3 – plošný AV v úseku ulice Zikova od křižovatky s Werichovou po ulici Schweitzerova
ZO Z1: 644 m^2	- objekty: x 0,033 = 21,252 objektů x 7.840,-			= 166.615,68 Kč
		- vrstva: 12,88 čtverců x 4.480,- 				=   57.702,4 Kč
ZO Z2: 324 m^2	- objekty: x 0,026 = 8,424 objektů x 7.840,-			=   66.044,16 Kč
		- vrstva: 6,48 čtverců x 4.480,-					=   29.030,4 Kč
Celkem										= 319.392,64 Kč

SP1–SP5: dohledy, práce archeologa, dokumentátora

Hodinové sazby
práce archeologa: 400 Kč/hod.
práce dokumentátora: 250 Kč/hod.
práce manuálního pracovníka: 140 Kč/hod.

archeolog: 	520 hodin x 400,- 	= 208.000,- Kč
dokumentátor:
1 osoba 480 hod. x 250,- 	= 120.000,- Kč
1 osoba 255 hod. x 250,- 	=   63.750,- Kč
Celkem					= 391.750,- Kč

Shrnutí – ZAV terénní část
Plošný ZAV: SP1	1) 227.825,92
			2) 343.076,16
			3) 175.000,00
			4)             0,00
			5)     1.646,40
Celkem SP1 		= 747.548,48 
	SP2		= 180.454,40
	SP3		= 319.392,64
Celkem:		= 1.247.395,52	

ZAV formou dohledu: 	= 391.750,-

Celkem plošný ZAV + ZAV formou dohledu = 1.247.395,52 + 391.750,- = 1.639.145,52 Kč, 
IV.
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu, technické a laboratorní zpracování nálezů a výsledků výzkumu
20 % z 1.639.145,52 = 327.829,10

Celkem III. + IV. = 1.639.145,52 + 327.829,10 = 1.966.974,62 Kč, 

V. 
Předpokládaný časový harmonogram – souhrn
Poznámka: počítán je pracovní týden, tj. 5 pracovních dnů × 8 hodin = 40 hodin
Plošný ZAV:
SP1	1) 3,04 týdny × 5 dnů 	= 15,2 dnů
	2) 4,25 týdny × 5 dnů 	= 21,25 dnů
	3) 3,5 týdny × 5 dnů 	= 17,5 dnů
	5) 0,7 týdne × 5 dnů 	= 3,5 dnů
Celkem: 11,49 týdnů		= 57,45 dnů

SP2	2 týdny × 5 dnů 	= 10 dnů
SP3	3,12 týdny × 5 dnů 	= 15,6 dnů
Celkem: 16,61 týdnů		= 83,05 dnů

Pro případ časové rezervy (odkryv složitých stratigrafií, hrobů) počítáno 17 týdnů × 5 = 85 pracovních dnů

(Průměrný počet pracovních dnů za měsíc v roce 2019 = 21
85 pracovních dnů : 21 pracovních dnů = 4,05 měsíce – bez dnů pracovního volna)

ZAV formou dohledu: v souběhu se stavbou, délku nelze odhadnout ani vypočítat.

Předběžná finanční kalkulace ZAV tedy činí: 1.966.974,62,- Kč bez DPH.
Časový harmonogram terénních prací: 17 týdnů/85 pracovních dnů plošný ZAV, dohled v průběhu stavby.

Vypracovali: xxxxxx			říjen 2018

/

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci | Horní náměstí 25, 779 00  Olomouc
T +420 585 204 111 | M +420 775 888 957 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333