Spisový znak:            56.2
Skartační znak/lhůta:  V/5

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: SMLP-2018-902-000019	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002544/2018/Boh	
A Název akce: Třída Kosmonautů - koordinovaný tah, SSZ	Org: 25888 	

		uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.	
       Smluvní strany

  1. Objednatel:	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 00299308	DIČ:  CZ00299308	
	Zástupci objednatele	
	- ve věcech smluvních:	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl	
	tel.:                                   e- mail: 	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:	
		
	tel.                                    e-mail: 	
		
	tel.: 		e- mail: 	
		
	tel:                                    e-mail: 	
		
	Bankovní spojení: 	
	číslo výdajového účtu: 	

2.  Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
též „příkazník“	se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín	
IČ: 607 15 286	DIČ:  CZ60715286	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně	
pod sp. zn.  B 6274	  	
Zástupci zhotovitele		
- ve věcech smluvních:	
Ing. Karel Hostaša, key account manager	
tel.: 		e-mail: 	
- ve věcech technických:	
Hlavní inženýr projektu: 	
tel.: 		 e-mail: 	
Hlavní projektant: 	
tel.: 		 e-mail: 	
	
Bankovní spojení: 	
č. účtu: 	

     II. 
                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je pozastavení prací objednatelem z důvodu úsporných opatření v souvislosti s pandemií COVID19 a rozšíření předmětu plnění na základě požadavku odboru dopravy a územního rozvoje.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:

III. Předmět smlouvy 
V. Termín plnění 
VI. Cena a platební podmínky

III.
Předmět smlouvy

Bod 2. se rozšiřuje o:
Navržení nového živičného povrchu křižovatky tř. Kosmanautů x Vejdovského, v rozsahu vymezeného indukčními smyčkami v jednotlivých ramenech křižovatky.

Průzkum šachet na trase křižovatky v úseku PS1 – PS4 bude zahrnovat otevření šachet prověření počtů chrániček a jejich průměrů. Rovněž také prověření chrániček k indukčním smyčkám. Výsledkem místního šetření, které bude provedeno ve spolupráci s pracovníky TS Olomouc, bude zjištění stavu využitelnosti stávajících chrániček. 

V.
Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. odst. 1 takto:

Předání kompletního předmětu plnění                                                                    	do 31. 3. 2021

VI.
Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. odst. 1 takto: 

c)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.   výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	Původní SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena	
Cena za část c) bez DPH:	299 340 Kč	0	25 000 Kč	            324 340 Kč	
DPH za část c):	62 861,40 Kč	0	5 250 Kč	         68 111,40 Kč	
Cena za část c) s DPH:	362 201,40 Kč	0	30 250 Kč	       392 451,40 Kč	

Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	797 090 Kč	25 000 Kč	822 090 Kč	
DPH:	167 388,90 Kč	5 250 Kč	172 638,90 Kč	
Cena celkem s DPH:	964 478,90 Kč	30 250 Kč	994 728,90 Kč	

		         
        Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento 
        dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

V Olomouci dne:  8.3.2021	Ve Zlíně dne: 11.3.2021	

 Objednatel	Zhotovitel	

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl	
Ing. Karel Hostaša, na základě plné moci
key account manager